Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2021

Smluvní strany, tj.:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
se sídlem: K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupen: .... ..................., ředitelkou
IČO: 488 95 440
telefon: +420 ...........
e-mail: .................
číslo účtu: ..................
bankovní spojení: ČNB
(na straně jedné, dále jen jako „Objednatel“)

a

MBL spol. s.r.o.
IČO: 263 12 956	
DIČ: CZ263 12 956	
se sídlem: Táborská 93, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 43278
č. účtu: 3260972002/5500
zastoupena ve věcech smluvních a technických: ................................
tel: + 420..........
e-mail: ..................
(na straně druhé, dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)
smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2021 (dále také jako „SOD“)

1.	Účelem tohoto dodatku č. 1 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „VÚ Velké Meziříčí - odvlhčení budov, rekonstrukce kanalizace“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to článku II. Předmět díla, článku IV. Cena za dílo, kdy dojde ke změně sjednané ceny. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2.	Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
3.	Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat a jedná se o dodatečné stavební práce dodavetele, které v původní PD na předmětnou veřejnou zakázku neobsahovala, z toho důvodu je neobsahovala ani SOD. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku a spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková absolutní hodnota všech změn dle tohoto dodatku činí 29 % z původní ceny díla dle SOD, tj. 824 674,18 Kč bez DPH.
4.	Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu smlouvy (díla), a to ve znění přílohy č. 1-4 (protokol o změně díla - změnový list 1-4), (dále také jako „ZL č. 1-4“). Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
5.	Rozsah předmětu díla je měněn z následujících důvodů:
5.1. optimalizace vedení kanalizace pro nově vzniklé skutečnosti, a to především nemožností realizace výkopových prací strojně. Dále bylo zjištěno, že podkladní vrstvy místní areálové komunikace jsou pod štěrkovou vrstvou zpevněny vrstvou KZC, která měla za následek i vyšší nároky na ukládku sutí na skládce. Z tohoto důvodu došlo k dohodě o změně a rozsahu nutné opravy kanalizace, které vedli k úsporám uvedeným v ZL č. 1, aby byly pokryty práce nutné k realizaci části díla - SO 06 dle skutečnosti na stavbě.
5.2. při realizaci díla se vyskytly skutečnosti, které původní PD nezahrnovala. Projekt předpokládal zemní práce za použití strojního vybavení, toto ovšem nebylo v důsledku jiných skutečností od doby realizace PD možné, proto muselo být provádění zemních prací realizováno ručně. V návaznosti na jiné tloušťky omítek, bylo provedeno navýšení vrstvy sanačních omítek z důvodu jejich vyrovnání o 10 mm. Pro zachování původního rázu místnosti bylo přistoupeno k navrácení původního provedení soklu v místnosti 0.02 po provedení injektáže. Největší dopad na změnu ceny má řešení odvětrávání sanovaného zdiva, kdy původní PD počítala s realizací kazetového plechového interiérového obkladu. Z důvodů vysokého nárůstu cenových vstupů, které zadavatel a dodavatel nemohl předpokládat (COVID, válka na Ukrajině) vznikla potřeba nalezené cenově dostupnějšího řešení viz příloha č. 2 Cenový nárůst dle průzkumu trhu od AD a cenový komentář od dodavatele systému viz. příloha č. 3. Bližší důvody obsahuje ZL č. 2.
5.3. Na základě realizace díla, byly změněny rozsahy prováděných prací dle skutečnosti na stavbě na základě dohody mezi TDS a zhotovitelem. Tyto změny jsou reflektovány v ZL č. 3 a vedou k ponížení výdajů ze strany VÚ Velké Meziříčí, potažmo MŠMT. Bližší informace obsahuje ZL č. 3.
5.4. Z důvodu toho, že projekt předpokládal zemní práce za použití strojního vybavení, toto nebylo v důsledku jiných skutečností od doby realizace PD možné, proto byly prováděny zemní práce ručně. V návaznosti na jiné tloušťky omítek, bylo provedeno navýšení vrstvy sanačních omítek z důvodu vyrovnání o 10 mm. Dále pro zachování původního rázu místnosti bylo přistoupeno k navrácení původního provedení soklu v místnostech 1.00 po provedení injektáže. Největší dopad na změnu ceny, má řešení odvětrávání sanovaného zdiva, kdy původní PD počítala s realizací kazetového plechového interiérového obkladu. Z důvodu nárůstu cenových vstupů (COVID, válka na Ukrajině) bylo hledáno výhodnější, resp. cenově dostupnější řešení viz příloha č. 2 Cenový nárůst dle průzkumu trhu od AD a cenový komentář od dodavatele systému viz příloha č. 3. Bližší informace jsou uvedeny v ZL č. 4, který dále obsahuje i práce doobjednané investorem, a to především osazení nových zárubní pro dveřní křídla v 1.PP budovy SO 02. 
6.	Změnami uvedenými v odst. 5 tohoto dodatku č. 1 zároveň dochází k vícepracím a méněpracím, specifikovaným v ZL č. 1 až 4, a to v rozsahu požadavků ust. § 222 odst. 5 a odst. 9 ZZVZ, což má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o částku 605 798,38 Kč bez DPH. Tato částka sestává z částek dle ZL č. 1 až 4.
7.	Náklady na změnu rekapitulace ZL č. 1
Cena dle rozpočtu ZL č. 1-4 bez DPH                                                                	
Vícepráce	715.236,28 Kč	
Méněpráce	           - 109 437,90 Kč	
Cena dle rozpočtu ZL č. 1- 4  celkem bez DPH	              605 798,38 Kč             	

8.	Rekapitulace provedených změn:

a)	Stávající znění Článku II. SOD Předmět díla se tímto dodatkem č. 1 nově doplňuje o odst. 2.6., který zní takto:
„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnových listech č. 1 až 4 a zužuje se o práce a dodávky nepoužité, uvedené v odpočtech v ZL č. 1, 2, 3 a 4.

b)	Stávající znění článku IV odst. 4.1. SOD:
„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

1.	část - SO 02 - VÚ Velké Meziříčí - odvlhčení suterénu budovy administrativy, v SMVS 133V122000028, K Rakůvkám 1
Cena bez DPH 1 762 058,82 Kč (slovy: jedenmilionsedm setšedesátdvatisícpadesátosm korun českých a padesát čtyři halérů);
DPH 15 % ve výši 264 308,82 Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisíctřistaosm korun českých a osmdesátdva haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 2 026 367,64 Kč (slovy: dvamilionydvacetšesttisíctřistašedesátsedm korun českých a šedesátčtyři haléřů)
(dále též jako „Cena za provedení díla“);

2.	část - SO 03 - VÚ Velké Meziříčí - odvlhčení suterénu budovy školy, v SMVS 133V122000027, Nad Sýpkami 17
Cena bez DPH 511 962,54 Kč (slovy: pětsetjedenácttisícdevětsetšedesátdva korun českých padesátčtyři haléřů);
DPH 15 % ve výši 76 794,38 Kč (slovy: sedmdesátšesttisícsedmsetdevadesátčtyři korun českých třicetosm haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 588 756,92 Kč (slovy: pětsetosmdesátosmtisícsedmsetpadesátšest korun českých devadesátdva haléřů), (dále též jako „Cena za provedení díla“);

3.	část - SO 06 - VÚ Velké Meziříčí - rekonstrukce areálové kanalizace, v SMVS 133V122000026, K Rakůvkám 1
Cena bez DPH 591 625,90 Kč (slovy: pětsetdevadesátjednatisícšestsetdvacetpět korun českých devadesát haléřů);
DPH 15 % ve výši 88 743,89 Kč (slovy osmdesátosmtisícsedmsetčtyřicettři korun českých osmdesátdevět haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 680 369,79 Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíctřistašedesátdevět korun českých sedmdesátdevět haléřů) - (dále též jako „Cena za provedení díla“);

Celková cena za všechny tři části:
Cena bez DPH 2 865 647,26 Kč (slovy: dvamilionyosmsetšedesátpěttisícšestsetčtyřicetsedm korun českých dvacetšest haléřů);
DPH 15 % ve výši 429 847,09 Kč (slovy: čtyřistadvacetdevěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých devět haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 3 295 494,35 Kč (slovy: tři milionydvěstědevadesátpěttisícčtyřistadevadesátčtyři korun českých třicetpět haléřů).“

Nově článek IV odst. 4.1. SOD ve znění tohoto dodatku:
„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

1.	část - SO 02 - VÚ Velké Meziříčí - odvlhčení suterénu budovy administrativy, v SMVS 133V122000028, K Rakůvkám 1
Cena bez DPH 2 102 904,66 Kč (slovy: dva miliony sto dva tisíc devět set čtyři korun českých a šedesát šest haléřů);
DPH 15 % ve výši 315 435,69 Kč (slovy: tři sta patnáct tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a sedmdesát haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 2 418 340,35 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmnáct tisíc tři sta čtyřicet korun českých třicet šest haléřů)
(dále též jako „Cena za provedení díla“);

2.	část - SO 03 - VÚ Velké Meziříčí - odvlhčení suterénu budovy školy, v SMVS 133V122000027, Nad Sýpkami 17
Cena bez DPH 651 895,13 Kč (slovy: šest set padesát jedna tisíc osm set devadesát pět korun českých třináct haléřů);
DPH 15 % ve výši 97 784,27 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých dvacet sedm haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 749 679,40 Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc šest set sedmdesát korun českých čtřicet haléřů), (dále též jako „Cena za provedení díla“);

3.	část - SO 06 - VÚ Velké Meziříčí - rekonstrukce areálové kanalizace, v SMVS 133V122000026, K Rakůvkám 1
Cena bez DPH 716 645,85 Kč (slovy: sedm set šestnáct tisíc šest set čtyřicet pět korun českých osmdesát pět haléřů);
DPH 15 % ve výši 107 496,88 Kč (slovy: sto sedm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých osmdesát osm haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 824 142,73 Kč (slovy: osm set dvacet čtyři tisíc sto čtyřicet dva korun českých sedmdesát tři haléřů) - (dále též jako „Cena za provedení díla“);

Celková cena za dílo za všechny tři části:
Cena bez DPH 3 471 445,64 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých šedesát čtyři haléřů);
DPH 15 % ve výši 520 716,84 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc sedm set šestnáct korun českých osmdesát pět haléřů);
Cena včetně DPH ve výši 3 992 162,48 Kč (slovy: tři miliony devět set devadesát dva tisíc sto šedesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů).“

9.	Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla, který je součástí SOD.
10.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
11.	Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto dodatku č. 1 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 1.
12.	Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 1 v případě potřeby doplněno.
13.	Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

14.	Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4
 Velké Meziříčí dne ..........	 Velké Meziříčí dne ..........	

……………………………………..  Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 .... ................., ..........Objednatel	………………………………………….. za MBL spol. s.r.o. .... ............., .........Zhotovitel