DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17.8.2022
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu: tel.: e-mail:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
ředitelem
provozně-technický náměstek
manažer investic
008 44 896
CZ00844896
evídenčni číslo N:
evidenční ůlfilo MSK:	
ID dle RS ÉVČR:	
Datum evidence; ^2 j] 1

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. Obchodní firma
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
DRŽIK s.r.o.

286 57 454 CZ 286 57 454 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět dodatku
1.	„Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení44 Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016693
2.	Předmětem tohoto dodatku jsou více práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.8.2022, hlava V. bod 3. písmeno b, c. Podrobné rozpisy více práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín dohotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. Bod 5.
III.
Nová smluvní cena
1.	Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 851 699,00 Kč
2.	Více práce bez DPH (viz příloha)	1 076 940,00 Kč
16 928 639,00 Kč
3. Nová smluvní cena bez DPH

IV.
Nový termín plnění
1.	Z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky se prodlužuje termín dokončení díla o 45 pracovních dní.
V.
Závěrečná ujednání
1.	Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3.	Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis více prací
V Havířově dne:	 V Ostravě dne
za zhotovitele
2