SO001885	
TVi ram:« KRALove.......			

Smlouva o Dílo
č. M 115 / 2022
dodatek č. 2
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") Smluvní strany:
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ:	25282174
DIČ	CZ25282174
Číslo bankovního účtu:	5307-511/0100
Zastoupená:	Ing. Jiří Seidler, Ph.D. - předseda představenstva
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Petr Juránek, e-mail: juranek@thhk.cz
K technickým jednáním oprávněn:	Jiří Zezulka, e-mail: zezulka@thhk.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králově, odd. B, vložka 1765
dále jen „Objednatel"
a

RegulTech servis, s.r.o.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo bankovního účtu:
Zastoupena:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
K technickým jednáním oprávněn:

Býšť čp. 23, 533 22 Býšť
64790479
CZ64790479
598140277/0100
Ing. Erich Neugebauer — jednatel
Ing. Erich Neugebauer, e-mail: regultech@regultech.cz
Vladimir Polanecký, vedoucí zakázky,
e-mail: vladimir.polanecky@regultech.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 9512
Dale jen „Zhotovitel"
čl. 1
Předmět smlouvy
1.	Předmětem smlouvy je dodávka a instalace díla s názvem:
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému - pilotní projekt" (dale jen „FV systém" nebo „Dílo")

2. Předmět dodatku Č. 2
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání díla. Na základě vzájemné dohody Objednatele a Zhotovitele se smluvní strany dohodly, že dílo bude dokončeno kompletní nejpozději k termínu 31.3.2023.
Posunutí termínu je zapříčiněno zdlouhavým řízením smluvního jednání s ČEZ Distribuce pro formát virtuální baterie.
Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
V Hradci Králové dne 24.2.2023
	Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
za Objednatele	
Erich Neugebauer 

Za zhotovitele