Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1122000623

I.	Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)

a

INSTALACE Praha, spol. s r. o.
se sídlem/místem podnikání:	Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
jednající/zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Štočkem, jednatelem
IČO: 				45804371
DIČ: 				CZ45804371
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 11753
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule
S ohledem na to, že:
A)	Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.10.2022 smlouvu o dílo č. 1122000623 (dále jen „Smlouva“);
B)	v průběhu realizace Smlouvy probíhalo na Fakultě stavební zkouškové období a Objednatel z důvodu nerušeného průběhu zkoušek omezoval přístup Zhotovitele na staveniště (hluk se přenášel v konstrukci celé budovy A, čímž došlo k pozastavení prací);
C)	pozastavení prací prodloužilo termín plnění Smlouvy;
dohodly se smluvní strany na následujícím:

1)	Článek II odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje takto
„ Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 17.4.2023.“
2)	Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3)	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4)	Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ………………..	
	V Praze dne ………………..

			
za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník		za zhotovitele
Ing. Jaroslav Štoček
jednatel