Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5122000001
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-012 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

PROXIMA, a.s.
se sídlem na adrese: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616
IČ: 60916478
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Karel Chorvát, člen správní rady
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících konstrukcí třeba provést dílčí úpravy navrženého technického řešení. Ke změně dochází především ve stavebních pacích (likvidace místnosti pod areálovou komunikací, ošetření atiky, vyrovnání fasády) a úpravě SHZ.
Objednatel se zhotovitelem projednali pro jednotlivé změny změnový list č. ZL07 a tímto dodatkem upravují cenu díla. Provedení změn dohodnutých tímto změnovým listem prodlužuje termín dokončení díla o 47 dní.
V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. Nezbytnost provedení prací je popsána v jednotlivých změnových listech a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže včetně výrazného zvýšení nákladů (nutnost přerušení stavebních prací a výběr nového dodavatele by byl zcela jistě výrazně finančně náročnější) a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn).
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT – Rekonstrukce bývalé kotelny na archiv ČVUT“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO 26760312 (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL07.

2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, které se nahrazuje novým zněním takto:
Dílo bude provedeno nejpozději do 31.5.2023 (cca 16,5 měsíce) od předání staveniště.

3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány ve změnovém listě č. ZL07. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 1 658 686,54 Kč bez DPH a částky v bodě 6.1. smlouvy se mění takto:

cena bez DPH: 66 254 170,22 Kč (šedesátšestmilionůdvěstěpadesátčtyřitisícejednostosedmdesátkorun dvacetdvahaléře)
sazba DPH: 21%
DPH: 13 913 375,75 Kč 
(třináctmilionůdevětsettřinácttisíctřistasedmdesátpětkorun sedmdesátpěthaléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 80 167 545,97 Kč 
(osmdesátmilionůjednostošedesátsedmtisícpětsetčtyřicetpětkorun
devadesátsedmhaléřů)

4.	Dále se v ustanovení odst. 28.7. upravují body c) a d) tohoto znění:
c) Příloha 3 – Finanční a časový harmonogram upravený na základě dodatku č.3
d) Příloha 4 – Změnové listy ZL01-ZL07

5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Karel Chorvát
prorektorka pro výstavbu				člen správní rady
České vysoké učení technické v Praze		PROXIMA, a.s.