DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
„Nosná konstrukce“
uzavřené dne 9. 12. 2022 mezi následujícími smluvními stranami

České vysoké učení technické v Praze, 
Ústav technické a experimentální fyziky
se sídlem Husova 240/5, 110 00 Praha 1
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
zastoupená: doc. Ing. Ivanem Šteklem, CSc., ředitelem
IČ: 6840 7700, DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: XXXXX
(dále jen „ÚTEF“)

a

MZK Chomutov s.r.o.
se sídlem/místem podnikáni: Droužkovická 424, 431 41 Údlice, Česká republika
zastoupená Romanem Purkarem, jednatelem společnosti
IČO: 25490273, DIČ: C225490273
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad
Labem, XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX., č. ú.: XXXXX
(dále jen „dodavatel“)

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 9 12. 2022 kupní smlouvu (dále jen „Smlouva”), jejímž předmětem je dodat ÚTEF dodávku „Nosná konstrukce“ dle specifikace (dále též „Dodávka“), a dále převést na ÚTEF vlastnické právo k Dodávce, jakož i další závazky dále stanovené v této smlouvě blíže specifikované v preambuli Smlouvy. 
Předmět plnění měl být dle Smlouvy kupujícímu ze strany dodavatele dodán do 30. 4. 2023. S ohledem na skutečnost, že v smlouvě je v kapitole V., odst. 4 uvedeno: „Termín dodání se může prodloužit o dobu měřeni aktivity vzorků. V tomto případě se uzavře dodatek k této uzavřené smlouvě.“
Doba měření v podzemní laboratoři LSM se prodloužila o 4 týdny. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je úprava termínu dodání předmětu plnění.

I. Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 odst.  1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen splnit všechny smluvní podmínky nutné k předání a převzetí Dodávky do 31. 5. 2023.“

2.	Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
II. Závěrečná ustanovení
1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle S 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
4.	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5.	Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání a že obsah dodatku není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem.

          V Praze dne 3. 4. 2023	           V Údlicích dne 3. 4. 2023

	__________________________	__________________________
	za ÚTEF	za dodavatele
                  doc. Ing. Ivan Štekl, CSc			      Roman Purkar
	ředitel	jednatel