V Pelhřimově, dne 27.4.2023 
objednatel 

Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace (§ 2586 a násl. občanského zákoníku) 
I. 
Smluvní strany 
1. Objednatel: Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem: Radětínská 2305, Pelhřimov 393 01 
IČ: 751 36 295 
zastoupený: Mgr. Bc. Petrou Bruknerovou, DiS. 
2. Zhotovitel: GREEN ART s.r.o. 
se sídlem: Sadská 674/8, I 98 00 Praha 9 IČ:49357387,DIČ:CZ49357387 zastoupený: Ing. Davidem Nechanickým, jednatelem 
Smluvní strany se shodly, že dojde ke změně ve článku IV. této smlouvy a to takto: 
· · IV .. 
	. 	Čas plněni 
1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo dle bodu II. I. do 16.05.2023. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 
V Pelhřimově, dne 27.4.2023 

zhotovitel