Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1123000208

I.	Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx,
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)

a

vv.interiéry, s.r.o.
se sídlem:			Jordana Jovkova 3252/3, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: 			Vladimírem Vottem, jednatelem
IČ: 				27362078
DIČ: 				CZ27362078
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108442
 (dále jen „zhotovitel“)

Preambule
S ohledem na to, že:
A)	objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.10.2022 smlouvu o dílo č. 1123000208 (dále jen „Smlouva“);
B)	v průběhu realizace Smlouvy byla při zaměření skutečného stavu výklenků zjištěna křivost stěn, která nebyla zachycena ve výkresové dokumentaci. Zhotovitel díla tak musel předělat řezné plány překližky pro vestavěné skříně kvůli jiné výtěžnosti z tabulí překližky a nově objednat jejich výrobu. 
C)	tato nezbytná úprava nebude mít vliv na celkovou cenu díla, avšak prodloužila termín plnění Smlouvy;
dohodly se smluvní strany na následujícím:

1)	Článek III odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje takto
„Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 20.6.2023.“
2)	Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3)	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4)	Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ………………..	
	V Praze dne ………………..

			
za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník		za zhotovitele
Vladimír Vott
jednatel