REKAPITULACE STAVBY
Kód:	03
Stavba:	dodatek č.3 - REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA
KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IC:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
Silba Elstav s.r.o.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		
64358844
Cena bez DPH				225 110,05	
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%		225 110,05	47 273,11	
snížená	15,00%		0,00	0,00	
Cena s DPH		V	CZK	272 383,16	
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpisy
Razítko
Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	03
Stavba:	dodatek č.3 - REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:	Silba Elstav s.r.o.	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:			
Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		225 110,05	272 383,16	
ZL54	neprováděné prvky I		-213 326,00	-258 124,46	
ZL55	neprováděné prvky II		-64 606,33	-78 173,66	
ZL56	zesíleni kleštin Chotěšovský dům		23 053,06	27 894,20	
ZL57	změna umístění a kce.dělící příčky Sa17		-10 000,00	-12 100,00	
ZL58	truhlářské prvky Chotěšovský dům		22 220,00	26 886,20	
ZL59	nové oplocení		193 855,99	234 565,75	
ZL60	povrchová úprava dřevěné podlahy Chotěšovský		236 251,82	285 864,70	
ZL61	povrchové úpravy dřevěná podlaha Gerlachovský dům		57 883,41	70 038,93	
ZL62	likvidace, uzavření stávajícího schodiště Gerlachovský dům		12 178,10	14 735,50	
ZL63	záměna svítidla S3a		-32 400,00	-39 204,00	
Strana 2 z 2

krycí list soupisu prací
Stavba:
dodatek č.3 - REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA Objekt:
ZL54 - neprováděné prvky I
KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
Silba Elstav s.r.o.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		
64358844
Cena bez DPH					-213 326,00	
	Základ daně			Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-213 326,00			21,00%	-44 798,46	
snížená	0,00			15,00%	0,00	
Cena s DPH		V	CZK		-258 124,46	
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Strana 1 z 2

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
dodatek č.3 - REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA
Objekt:
ZL54 - neprováděné prvky I
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:		Silba Elstav s.r.o.			Datum:
Projektant:
Zpracovatel:		
PČ Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	.213 326,00
d PSV	Práce a dodávky PSV	-213 326,00
D 766	Konstrukce truhlářské	-213 326,00
3	K	766-Sa7	Montáž prvku Sa7	m	-156,000	162,00	-25 272,00	
4	M	Sa7	Nový závěsný systém pro expozici_viz. odkaz Sa7	m	-156,000	335,00	-52 260,00	
7	K	766-Sb11	Montáž prvku Sb11	m	-24,000	162,00	-3 888,00	
8	M	Sb11	Typový nástěnný závěsný systém pro expoziční prostory-systém pro zavěšení obrazů 8 ks- dl. 3,0 m + min32 ks závěsů - nutno upřesnit_viz. odkaz Sb11	m	-24,000	335,00	-8 040,00	
1	K	766-TRa52	Montáž prvku TRa52	kus	-1,000	7 000,00	-7 000,00	
2	M	TRa52	Nové provedení výstavní vitríny - prosklená dělící příčka šířka 1745 mm p.k. 3100mm v.k. 3430 mm - kompletní dodávka viz. odkaz TRa/52	kus	-1,000	60 866,00	-60 866,00	
9	K	766-TRb31	Montáž prvku TRb31	kus	-6,000	1 000,00	-6 000,00	
10	M	TRb31	Nové vyrovnávací schůdky ke stávajícímu vaznému trámu š. 210/300mm x dl. 900 mm_kompletní dodávka viz. odkaz TRb31 Materiál: masiv - smrk
Materiál: smrková prkna 30/120 mm + OSB desky tl. 25 mm
Nosná konstrukce 2x ochranný nástřik fungicidního a insekticidního přípravku.
Rozměry: schody 300/210 mm, šířka schodiště 900 mm
Povrchová úprava:
Ošetření proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.
1x základní + 2x vrchní nátěr hedvábný polomatný
tvrdý voskový olej - polomatný
odstín bude upřesněn před prováděním investorem
nutno upřesnit na předloženém vzorku na materiálu
bude barevně sjednocen se stávajícími dřevěnými
prvky	kus	-6,000	5 000,00	-30 000,00	
12	K	Sb10	Stávající osazený zvonek na dveřní zárubni, zůstane zachován_odborná řemeslná repase s konzervací povrchu_viz. odkaz Sb10	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
11	K	Sb3	Stávající pavlačové litinové zrcadlo - bude odborně repasováno dle popisu viz. odkaz Sb3	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
Strana 2 z 2

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI -
NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby/projektové dokumentace č.	ZL 55	
	
Dotčená část stavby:	Chotěšovský dům, Gerlachovský dům	
Název/označení změny:	neprováděné prvky II	
Podklad pro změnu:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	26.04.2023	
Zdůvodnění a popis změny:
V rámci dodávky výtahu byl vstupní portál výtahu opatřen nerezovým plechem do uzavřeného rohu vstupního otvoru do výtahu. Dodatečné doplnění obložení ostění otvorů nerezovým obkladem nebude realizováno. Nástup do výtahu byl proveden pomocí šikmého ostění otvoru se segmentovým záklenkem.
Po rozebrání podružných keramických obkladů schodiště bylo obnoveno původní kamenné zachované schodiště, které bylo rozhodnuto zachovat v intaktním stavu. Montáž profilu pro schodové hrany nebude realizována. Změnu požaduje investor.
Vliv změny na termín dončení díla:		NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO			
Náklady na změnu celkem:	-64 606,33 ,-Kč bezDPH	
přípočty celkem:	0,00 ,-Kč bezDPH	
odpočty celkem:	-64 606,33 ,-Kč bezDPH	
Přílohy:	víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis	
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka		
	Michal Schmid		
projektant /AD/ -	Ing.Arch Jiří Opl		
objednatel:	Mgr.Jiří Orna		
					
TDS
Ing
. Jaromír Jaren

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI
NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 56
Dotčená část stavby:	Chotěšovský dům	
Název /označení změny:	zesílení kleštin	
Podklad pro změnu:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	26.04.2023	
Zdůvodnění a popis změny:				
V podkrovní části krovu Chotěšovského domu byl proveden výpočet požadované požární odolnosti viditelných dřevěných prvků statikem, který požadoval kleštiny posílit vloženými dřevěnými hranoly a jejich požární odolnost tak zvýšit. Viditelné doplněné dř. prvky budou impregnovány 15% roztokem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Následně byl upraven rozsah opláštění sádrokartonovými konstrukcemi. Doloženo výpočtem statika a výkresem. Změnu nebylo možné předvídat, ie vyvolána požadavkem na zvýšení požární odolnosti.	
	
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		23 053,06	,- Kč bezDPH	
přípočty celkem:		23 053,06	,- Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH	
Přílohy:	víceprací				
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)				
Za útvar/oddělení /firma	Jméno	Datum	Podpis	
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka			
	Michal Schmid			
projektant /AD/ -	Ing.Arch Jiří Opl			
objednatel:	Mgr.Jiří Orna			

TDS	Ing. Jaromír Jaren			

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 58
Dotčená část stavby:
Název / označen] změny: Podklad pro změnu:
Chotěšovský dům
Zápis ve stavebním deníku ze dne: Návrh pro změnu podal:
truhlářské prvky
zhotovitel, objednatel
Dne:
26.04.2023
Zdůvodnění a popis změny:
Koncem roku 2022 byla dokončena samostatná projektová dokumentace stálé expozice a v součinnosti s architekty stálé expozice bylo rozhodnuto o způsobu využití nik vstupního průjezdu Chotěšovského domu. S ohledem na navržené využití těchto prostor budou dna stávajících půlkruhových nik v průjezdu 1.NP. Chotěšovského domu doplněny dřevěnými parapety. Změnu požaduje investor a souvisí s koordinací projektů stavební rekonstrukce objektů NMP a stálé expozice muzea.
Vliv změny na termín dončení díla:
Vliv změny na cenu díla: Náklady na změnu celkem:
přípočty celkem:
odpočty celkem:
NE
ANO
22 220,00	Kč bezDPH
22 220,00	Kč bezDPH
0,00 ,- Kč bezDPH
Přílohy:	víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)
Za útvar / oddělení / firma
Jméno
Datum
Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.
projektant /AD/ -
objednatel:
Ing.Jan Jirka Michal Schmid Ing.Arch Jiří Opl Mgr.Jiří Orna
TDS
Ing. Jaromír Jaren

L			J	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI
NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 59
Dotčená část stavby: Název / označení změny:
Gerlachovský dům
nové oplocení
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne: Návrh pro změnu podal: Zdůvodnění a popis změny:
zhotovitel, objednatel
Dne:
26.04.2023
Tzv. "velký dvůr Gerlachovského domu" na stavební parcele č. 14 volně přechází do dvora sousedního objektu č. p. 103/6 v Dřevěné ulici na stavební parcele č. 13. V souvislosti se zásadní změnou využití dvora sousedního objektu č p. 103/6 po roce 2018 (provoz kavárny a tanečního klubu, pořádání koncertů a dalších akcí s vysokou návštěvností, požaduje investor oddělení obou parcel kovaným mřížovým oplocením s brankou. Bez tohoto řešení není možné dvůr muzea za současných podmínek adekvátním způsobem využívat pro pořádání doprovodných edukačních programů pro stálou expozici, jejíž projekt byl vypracován v závěru roku 2022. Změna je požadována investorem.
Vliv změny na termín dončení díla: Vliv změny na cenu díla:
Náklady na změnu ceíkem: přípočty celkem: odpočty celkem:
Přílohy:	víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)
ANO
NE
193 855,99
193 855,99
,-Kč bezDPH Kč bezDPH
0,00 ,-Kč bezDPH
Za útvar / oddělení / firma
Jméno
Datum
Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.
projektant /AD/ -
objednatel:
Ing.Jan Jirka Michal Schmid Ing.Arch Jiří Opl Mgr.Jiří Orna
TDS
Ing. Jaromír Jaren

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 60
Chotěšovský dům
povrchové úpravy dřevěné podlahy
zhotovitel, objednatel
Dne:
26.04.2023
Dotčená část stavby:
Název / označení změny:	
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal:	
Zdůvodnění a popis změny:
Projektová dokumentace byla zpracována za plného provozu Národopisného muzea Plzeňska. Prostory dotčených
místností byly využívány jako depozitáře, kanceláře a provozní místnosti Národopisného muzea Plzeňska. Proto
nebylo možné provést v této části lokální sondy do podlah. Nášlapnou vrstvu tvořilo souvrství koberce, PVC a lokálně
novodobé dřevěné vlysy. Po vyklizení všech interiérových prvků, podružných podlahových krytin v objektu a při
realizaci stavby po odstranění a rozebrání nášlapných vrstev bylo možné plošně posoudit technický stav stávajících
skrytých podlahových prken, a to rovněž v návaznosti na lokální provádění technických instalací. Vzhledem k výše
uvedenému se ukázalo být řešení navržené v PD jako nedostačující. Podlahové plochy bylo třeba doplnit kolem zdivá
lištami a dřevěné podlahy ve větší míře vyspravit, v prostorách stálých expozic a kancelářských prostorách také s
ohledem na bezbariérovost a přístupnost prostor osobám se sníženou schopností pohybu. Změnu nebylo možné
předvídat a je požadována investorem pro zajištění optimálního provozu depozitárních a kancelářských prostor a
zejména prostor stálých expozic, které budou přístupné návštěvníkům muzea.
Vliv změny na termín dončení díla Vliv změny na cenu díla:
Náklady na změnu celkem: přípočty celkem: odpočty celkem:
Přílohy:	víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)
ANO
--
NE
236 251,82 ,- Kč bez DPH 236 251,82 Kč bez DPH
0,00 ,-Kč bez DPH
Za útvar/oddělení/firma
Jméno
Datum
Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.
projektant /AD/ -
objednatel:
TDS
Ing.Jan Jirka
i	
Michal Schmid Ing.Arch Jiří Opl Mgr.Jiří Orna
Ing. Jaromír Jaren

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI
NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 61
Dotčená část stavby:	Gerlachovský dům	
Název / označení změny:	povrchové úpravy dřevěné podlahy	
Podklad pro změnu:		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	26.04.2023	
Zdůvodnění a popis změny:				
Pro celkové sjednocení povrchu sanovaných dřevěných podlah bylo navrženo plošné přebroušení, lokální vyspravení a provedení nového obnovujícího nátěru lakem s mezibroušením vč. tmelení, vysátím povrchu a konečnou povrchovou úDravou lakem na základě provedených vzorků povrchových úprav. Změnu požaduje investor.	
Vliv změny na termín dončení díla:		NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO			
Náklady na změnu celkem:		57 883,41	,-Kč bezDPH	
přípočty ceíkem:		57 883,41	,-Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,00	,-Kč bezDPH	
Přílohy:	víceprací				
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)				
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis	
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka			
	Michal Schmid			
projektant /AD/ -	Ing.Arch Jiří Opl			
objednatel:	Mgr.Jiří Orna			

TDS	Ing. Jaromír Jaren			

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.63/2021
CZ.06.3.33/0.0/0.0/017 099/0007900
Stavební akce:
"REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI
NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA"
Změna stavby /projektové dokumentace č.
ZL 62
Dotčená část stavby: Název / označení změny: Podklad pro změnu:
Gerlachovský dům
likvidace, uzavření stávajícího schodiště
zhotovitel, objednatel
Dne:
26.04.2023
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal:
Zdůvodnění a popis změny:
Koncem roku 2022 byla dokončena samostatná projektová dokumentace stálé expozice muzea. S ohledem na celkovou koncepci expozice v podkrovní části Gerlachovského domu ve 4. NP a vytvoření zvýšeného dřevěného podia nad vaznými trámy (ve středu jednolité vitríny lemující většinu podkrovního prostoru) nebylo možné stávající schodiště se zábradlím zachovat. Z výše uvedeného důvodu bude provedena demontáž stávajícího zábradlí původního dřevěného schodiště a provedena realizace dřevěného poklopu pro uzavření původního schodišťového prostoru. Změnu požaduje investor a souvisí s koordinací projektů stavební rekonstrukce objektů NMP a stálé expozice.
Vliv změny na termín dončení díla: Vliv změny na cenu díla:
Náklady na změnu celkem: přípočty celkem: odpočty celkem:
Přílohy:	víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)
NE
ANO
12 178,10 ,-Kč bez DPH    12 178,10 Kč bez DPH   0,00 Kč bez DPH
Za útvar / oddělení / firma
Jméno
Datum
Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.
projektant /AD/ -
objednatel:
Ing.Jan Jirka Michal Schmid Ing.Arch Jiří Opl
Mgr.Jiří Orna
TDS
Ing. Jaromír Jaren