ZMĚNOVÝ LIST č. 2
(podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu: 	XXXX
Číslo změny závazku ze smlouvy:  	2 
Datum: 5.6.2023

Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo: 						747 67 Hrabyně 204
IČ: 						00601233
DIČ:						CZ00601233
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 	Ing. Andrea Ruprichová
Osoba oprávněná ve věcech technických TDS:	XXXX
dále jen „Objednatel“

BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:						Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál	
IČ: 						02657392
DIČ:						CZ02657392
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 	XXXX
Osoba oprávněná ve věcech technických:	XXXX
dále jen „Zhotovitel“

Obsah:
1.	Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2.	Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
3.	Souhrnné vyhodnocení výše změny závazku
4.	Podklady k návrhu změny
5.	Závěrečné prohlášení zhotovitele stavby

1.	Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon") se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná II. Etapa“ nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují některou z podmínek vymezených v § 222 odst. 4 až 7 zákona (viz dále v textu).

2.	Předmět změny
2.1.a Změny spojené se sanaci podkladů pod opravované parkoviště etapa 17
Předpoklad v rozpočtu a skutečnost na stavbě
Rozpočet stavby byl sestaven na základě poznatků skladby podkladu pod komunikacemi z „oprav komunikací etapy č.1“ z podzimu 2022. Po odstranění betonové plochy parkoviště u etapy 17 bylo zjištěno že podklad pod betonovou plochou je tvořen pouze jílem a lokálně návozem stavební suti. Dále bylo zjištěno, že dvorní vpusť, jenž měla zajišťovat odvod srážkové vody do dešťové kanalizace, nebyly připojena na kanalizaci a vody tak zasakovala do podloží plochy. Podloží tak bylo zvodnělé a neúnosné. Z důvodu životnosti nové plochy, je nutné nevhodný podklad sanovat. Jíl odebrat do hloubky 300mm a podklad pod komunikace sanovat geotextílií a novým podsypem z kamene f 0-125mm v tl. 300mm. Na tento podklady již budou prováděny vrstvy dle rozpočtu stavby. 

2.1.b Změny spojené s odvodněním plochy parkoviště etapa 17

Předpoklad v rozpočtu a skutečnost na stavbě
Rozpočet stavby předpokládal pro odvodnění plochy využít stávající dvorní vpusti. Při realizaci prací uvedených v bodě 2.1.a však bylo zjištěno že stávající vpusti nejsou připojeny na dešťovou kanalizaci. Je tak nutné na ploše parkoviště zhotovit nové odvodňovací prvky a připojit je na areálovou dešťovou kanalizace. Celkem budou v ploše zhotoveny dvě dvorní vpusti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a)	jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože o provedení této změny bylo rozhodnuto až během stavebních prací podle aktuálního stavu konstrukce, čímž se plnění způsobem určeným předmětnými položkami soupisu prací stalo nemožným. Změna byla projednána s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c)	hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2.a Demolice stěny na parkovišti, ruční bourání betonu, doplnění přídlažby, přidání příkopového žlabu atd, změna asfaltu za dlažbu atd.
2.2.a Demolice stěny a kójí na uhlí
V rámci rozpočtu stavby bylo počínáno s ponecháním stěny a kojí po uskladnění uhlí bývalé kotelny. S ohledem na nutnost sanace podkladu (viz bod 2.1.a) došlo k zásahu do základových poměrů kójí a stěny a bylo tak rozhodnuto o jejich demolici.

2.2.b Doplnění přídlažby
Chybou v rozpočtu stavby bylo uvedeno nedostatečné množství betonové přídlažby. Namísto potřebných 101mb přídlažby, bylo uvedeno 101ks přídlažby o délce 0,5m. Pro realizaci stavby tak chybí doplnit 101 ks přídlažby po 0,5m délky. Uvedené se týká pouze materiál, práce je oceněna kompletní.

2.2.c Doplnění příkopového žlabu a ruční bourání betonu etapa 11, A 17
Při realizaci prací na etapě 11 byla provedena úprava spádování komunikace s cílem odvést srážkovou vodu do příkopového žlabu, jenž by zlepšil odtokové poměry dešťových vod v areálu a zabránil tak častému zaplavování spojovacího pavilonu při přívalových deštích. Dále bylo potřeba provést část bouracích prací kolem budou ručně, namísto oceněných bouracích prací strojem.

2.2.d Změna asfaltového krytu za bezfazetovou dlažbu u etapy 14
Na KD bylo rozhodnuto o změně asfaltu u etapy 14 za bezfazetovou dlažbu. A to z důvodu blízkosti vzrostlých stromu a tím do budoucna nutnosti oprav povrchu poškozeného kořeny stromů.

Zdůvodnění změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona
a)	hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b)	hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.	Souhrnné vyhodnocení výše změny závazku

Původní hodnota závazku			3 550 000Kč bez DPH	dodatek č.1	dodatek č.2	součet	limit

Součet hodnot změn závazku odst. 6)		1 002 807,68		21,39%		28,24%		49,63%	50%
Součet hodnot změn závazku podle odst. 4)	293 450,87		6,39%		8,29%		14,65%	15%
4. Podklady k návrhu změny
4.1	Položkový rozpočet změn 2.1-2.2 „VCP Chuchelná komunikace II. Etapa a VCP 17 Chuchelná komunikace II. Etapa“
4.2	Relevantní Zápisy z Kontrolních dnů a Stavebního deníku
4.3	Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Stanovisko investora:	souhlasím	nesouhlasím
Stanovisko TDI:	souhlasím	nesouhlasím

5. Závěrečné prohlášení zhotovitele stavby
Tyto změny nebudou mít negativní vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti, naopak v případě změny dojde ke zlepšení parametrů opravovaných komunikací. 
Třebaže změna zahrnuje jednu technologickou operaci navíc (doplnění podkladní vrstvy) oproti řešení původně navrženému, nebudou mít v změny jako celek žádný dopad na délku doby plnění.

Za Zhotovitele:	Za Objednatele:	
Datum: 6.6.2023	Datum: 6.6.2023