Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby
ČVUT – SÚZ – Rekonstrukce Bubenečské koleje

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Příkazníka:  20-08-01-003

Smluvní strany:
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700		DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 	prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 
prorektorka pro výstavbu 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Příkazce“)

a

FRAM Consult a.s.
se sídlem: 		Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
zastoupený: 		Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČ: 64948790 	DIČ: CZ64948790
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682
(dále jen „Příkazník“)
Příkazce a Příkazník společně v textu též „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne následující dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného k příkazní smlouvě dne 3. 5. 2022 (dále v textu jen „Dodatek č. 2“ a „Příkazní smlouva“) 

Preambule
1.	Mezi Příkazcem jako objednatelem a společností VW Wachal, a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČO 25567225 jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo dne 29. 3. 2021 (dále v textu jen „Smlouva o dílo“). Lhůta pro dokončení díla stanovená Smlouvou o dílo byla prodloužena celkem 4 dodatky ke Smlouvě o dílo, konktrétně dne: 10. 12. 2021, 25. 5. 2022, 24. 8. 2022. Smluvní strany jsou si vědomy, že se připravuje se závěrečný dodatek s předpokládaným datem ukončení činnosti příkazníka do 30.6.2023.
2.	Příkazník prováděl a provádí na díle dle Smlouvy o dílo činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP.
3.	Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro dokončení díla stanovená Smlouvou o dílo byla několikrát dodatky prodloužena, a i nadále je nutné provádět zajištění TDS a činnosti koordinátora BOZP v rozsahu větším, než byl původně Smluvními stranami v Příkazní smlouvě předpokládán, uzavírají Příkazce a Příkazník Dodatek č. 2, neboť částka nabídkové ceny Příkazníka Příkazci v Příkazní smlouvě je již takřka vyčerpána.
4.	Mezi Smluvními stranami není pochyb o skutečnosti, že navýšení odměny Příkazníka je způsobeno posunem lhůty pro dokončení stavebních prací na díle dle Smlouvy o dílo, jelikož předmět plnění Příkazní smlouvy je na předmětu plnění Smlouvy o dílo přímo a neoddělitelně závislý.
5.	Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Odměn Příkazníka se navyšuje o částku 340 000,- Kč bez DPH. Úprava odměny Příkazníka je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 2 Příkazní Smlouvy.

I.
Změna Příkazní smlouvy
1.	V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s ohledem na ust. čl. 13, odst. 7 Příkazní smlouvy, na úpravě a doplnění Příkazní smlouvy následovně:
a) ruší se stávající znění článku 7. odst. 1. Příkazní smlouvy a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

7.1.	Celková odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem  1 997 500,- Kč bez DPH 
(slovy: Jedenmiliondevětsetdevadesátsedmtisícpětset korun českých). 

b) ruší se stávající znění článku 7. odst. 2 Příkazní smlouvy a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

7.2. 	Odměna Příkazníka po jednotlivých činnostech je stanovena takto (uváděno bez DPH):
a)	odměna za realizační fázi ve výši 1 934 500,- Kč bez DPH;
b)	odměna za závěrečnou fázi ve výši   63 000,- Kč bez DPH.

2.	Smluvní strany se dohodly, že čl. 8.1. Příkazní smlouvy (tj. ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2) nahrazuje následujícím textem: 
Platby Příkazníkovi budou probíhat na základě faktur vystavených Příkazníkem dle Platebního kalendáře „platební kalendář TDI a BOZP Bubenečská kolej – dodatek č.2“; 
Platební kalendář TDI a BOZP Bubenečská kolej – dodatek č.2 tvoří přílohu Dodatku č. 2.
II.
Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Dodatku č. 2 v Registru smluv.
2.	Zaslání Dodatku č. 2 správci Registru smluv k uveřejnění zajišťuje Příkazce. Nebude-li Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3.	Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 3. 5. 2022 nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4.	Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě; každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu.
5.	Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje elektronické podpisy (certifikáty).
6.	Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha: 
Platební kalendář TDI a BOZP Bubenečská kolej – dodatek č.2

Za Příkazce:						Za Příkazníka: 

_____________________________		______________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 			     Ing. Roman Klimt
prorektorka pro výstavbu					předseda představenstva