Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5122000001
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-012 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

PROXIMA, a.s.
se sídlem na adrese: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616
IČ: 60916478
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Karel Chorvát, člen správní rady
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících konstrukcí třeba provést dílčí úpravy navrženého technického řešení. Ke změně dochází především ve stavebních pracích, komunikaci, parkové úpravě, ZTI, elektro.
Objednatel se zhotovitelem projednali pro jednotlivé změny změnový list č. ZL08 a ZL09 a tímto dodatkem upravují cenu díla. Provedení změn dohodnutých těmito změnovými listy nemá vliv na termín dokončení díla.
V souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. Nezbytnost provedení prací je popsána v jednotlivých změnových listech a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže včetně výrazného zvýšení nákladů (nutnost přerušení stavebních prací a výběr nového dodavatele by byl zcela jistě výrazně finančně náročnější) a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn).
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 
Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT – Rekonstrukce bývalé kotelny na archiv ČVUT“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, IČO 26760312 (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL09.

2.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány ve změnovém listě č. ZL08-ZL09. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 1 731 820,20 Kč bez DPH a částky v bodě 6.1. smlouvy se mění takto:

cena bez DPH: 67 985 990,42 Kč (šedesát sedm milionů devět set osmdesát pět tisíc devět set devadesát korun a čtyřicet dva haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 14 277 057,99 Kč 
(čtrnáct milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc padesát sedm korun a devadesát devět haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 82 263 048,41 Kč 
(osmdesát dva miliony dvě stě šedesát tři tisíc čtyřicet osm korun a čtyřicet jeden haléř)

3.	Dále se v ustanovení odst. 28.7. upravuje d) tohoto znění:
c) Příloha 3 – Finanční a časový harmonogram upravený na základě dodatku č.3
d) Příloha 4 – Změnové listy ZL01-ZL09
4.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Karel Chorvát
prorektorka pro výstavbu				člen správní rady
České vysoké učení technické v Praze		PROXIMA, a.s.