ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 7 - xxxxxxxxxx
STAVBA:	STRAKOVA AKADEMIE - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ	
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	17/258-0, S00071/ÍNV/2017/105 ze dne 24.8.2017	
OBJEDNATEL/IC:	Česká republika - Úřad vlády České republiky/ 00006599	
ZHOTOVITEL MC:	Sdruženi „Strakova akademie - HTCZ + GEOSAN" / 46678468	
Dohodnuté změny:	
Popis změny:
Ocenění upraveného zadáni xxxxxxx na základě obdržené projektové instrukce č. 4 ze dne 13.2. 2018 a její revize ze dne 13.3. 2018 a zápisu KD 32 (xxxxxxxxx)

Součástí ceny nejsou ozdobné vnější lišty, ZL bude zpracován následně.

Dopad do ceny:
Zvýšení ceny o částku 956 365Kč bez DPH. Viz příloha č.1
Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.

Ostatní:

Přílohy:

1)   Rozpočet ceny změny díla