Galerie hlavního města Prahy
110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13
__________________________________________________________________________

Dodatek č. Z – 3100 - 184 – 2017 – 01                                               

ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,        mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Galerie hlavního města Prahy
		zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou
		ředitelkou galerie
		Staroměstské náměstí 605/ 13
		110 01 Praha 1
		IČO 064416
		DIČ 006-00064416
		číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
		bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:    VETAMBER s.r.o.
                        Prosluněná 558/7
                        152 00 Praha 5
                        IČO 26447541
                        DIČ CZ26447541
                        číslo bankovního účtu : xxxxxxxxxxxxx

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou:

      Sádrokartonářské a malířské práce pro výstavu „O.Ishay“, která se bude konat v Domě fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
                                      
Termín výstavy: 5.6. – 10.9.2017

     Předmět dodatku:

Na základě dodatečných požadavků vystavující umělkyně odsouhlasil objednatel změny v rozsahu prací, upřesnění prací a materiálů a to:

-	výstavba dalších 8 m2 SDK panelů
-	výmalba těchto 8 m2 nových SDK panelů + dodatečná výmalba 17 m2 ustoupených spodních částí SDK
-	dodatečná výmalba 4 promítacích ploch

III. Cena: 

Celková cena zakázky se navýšila o 7.150,- Kč bez DPH, tj. 8.651,50 Kč vč.DPH

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

……………………………………..			……………………………………
          objednatel						zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy			Vetamber s.r.o.
PhDr. Magdaléna Juříková				Tomáš Veber
ředitelka						jednatel

V Praze dne:……………………….			V Praze dne: ……………………..

Příloha č.1 : cenová kalkulace zhotovitele
Příloha č.2 : podepsaný předávací protokol