ČVUT-CIIRC: Vzduchotechnický (VZT) systém laboratoří

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5121000185
Evidenční číslo zhotovitele: 202112

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Šabek
sídlem: Hořejší 48, 252 26 Třebotov
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Černošice IČO: 01202308
(dále též jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)

Preambule
1.	Dne 21. 12. 2021 uzavřely smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo; Závazek
z předmětné smlouvy o dílo vzešel ze zadávacího řízení na stavební práce s názvem
„ČVUT-CIIRC: Vzduchotechnický (VZT) systém laboratoří“ a týkal se zhotovení vzduchotechnického systému laboratoří vysokoškolského ústavu ČVUT-CIIRC. Smlouva o dílo byla zveřejněna dne 13. ledna 2022 v Registru smluv (dále v textu jen
„SoD“).
2.	K SoD byl dne 19. dubna 2022 uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1, který byl uveřejněn v Registru smluv dne 28. dubna 2022 (dále v textu jen „Dodatek č. 1“).
3.	Smluvní strany konstatují, že plnění dle SoD a Dodatku č. 1 bylo odevzdáno zhotovitelem a akceptováno objednatelem.
4.	Objednatel konstatuje, že se jedná o veřejnou zakázku, jejíž závazek z ní vzešlý stále trvá (konkrétně trvá závazek vzešlý ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku týkající se záruky zhotovitele za jakost díla – záruční lhůta byla stanovena na 60 měsíců ode dne předání díla – srov. čl. 19 SoD) a dále, že hodnota změny navýšená tímto dodatkem č. 2 (dále v textu jen „Dodatek č. 2“) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku dle SoD, přičemž hodnota cenového nárůstu stanoveného Dodatky č. 1 a 2 je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze SoD.
5.	Objednatel tedy konstatuje, že změny SoD provedené na základě Dodatku č. 2 byly legitimní změnou závazku v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť změna dodavatele by není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících

zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Dodatek č. 2 uzavřený tímto mezi objednatelem a zhotovitelem bez předchozího provedení zadávacího řízení tedy nebrání žádná zákonná překážka.
6.	Na základě v Preambuli uvedených skutečností se proto smluvní strany dohodly na
úpravě uzavřené SoD Dodatkem č. 2

Článek 1. Předmět Dodatku č. 2

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění nového čl. 2.14. do SoD ve znění Dodatku č. 1
v následujícím znění:
2.14. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnového listu ZL-10.
2.	Smluvní strany se dohodly na doplnění nového čl. 3.5. do SoD ve znění Dodatku č. 1
v následujícím znění:
3.5. Dílo dle čl. 2.14. vymezené změnovým listem ZL-10 bude provedeno do 30 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 smlouvy.
3.	Smluvní strany se dále dohodly na doplnění stávajícího čl. 19.1. SoD. Do čl. 19.1. SoD se tečka v poslední větě čl. 19.1. nahrazuje čárkou a věta za nově nahrazenou čárkou zní:
19.1…kromě předmětu plnění Díla vymezeného změnovým listem ZL10, na které se poskytuje zvláštní záruka v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání předmětu plnění Díla vymezeného změnovým listem ZL-10.
4.	Smluvní strany se dále dohodly na změnu stávajícího čl. 6.1. SoD ve znění Dodatku č. 1.
Nové znění čl. 6.1 SoD zní:
6.1	…Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí: Cena bez DPH: 115. 920,- Kč (sto patnáct tisíc devět set dvacek korun) Sazba DPH: 21 %
DPH v Kč: 24. 343,20 Kč (dvacet čtyři tisíc třista čtyřicet tři korun dvacet haléřů)
Celková cena Díla vč. DPH: 140. 263,20 Kč (sto čtyřicet tisíc dvěstě šedesát tři korun
dvacet haléřů).
5.	Smluvní strany se dohodly na změnu čl. 7.13 SoD, který nově zní:
Zhotovitel se zavazuje vystavit separátní faktury rozdělené dle pokynů objednatele v souvislosti s finančním zdrojem, ze kterého jsou jednotlivé položky díla hrazeny. Dle pokynů objednatele označí zhotovitel na separátně vystavených fakturách číslo projektu: Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085, resp. FRIM.
6.	Smluvní strany se dohodly na doplnění nového čl. 9.5. SoD ve znění Dodatku č. 1.
v následujícím znění:
9.5. Povinnosti časového harmonogramu realizace Díla dle tohoto článku smlouvy se nevztahují na změnový list ZL-10 dle čl. 2.14. této smlouvy.
1.	Smluvní strany se dohodly, že za druhý odstavec Preambule Dodatku č. 1 bude doplněn třetí  odstavec  v  následujícím  znění:  Objednatel  prohlašuje,  že  v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. obsahuje závazek vzešlý z tohoto dodatku a

specifikovaný změnovými listy ZL01 až ZL09 záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při současném splnění podmínek ust. § 222 odst. 7 písm. a) až d) zákona č. 134/2016 Sb.

Článek 2. Článek 2 Ustanovení společná a závěrečná
2.	Další ustanovení SoD se nemění a zůstávající nadále v platnosti ve znění SoD a Dodatku
č. 1.
3.	Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a opatřen certifikáty (elektronickými podpisy) zástupců smluvních stran.
4.	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze, dne	V Praze, dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

                               _______________________________________________________________________________________________

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,	Ing. Jaroslav Šabek
prorektorka pro výstavbu	jednatel
České vysoké učení technické v Praze