ZMĚNOVÝ LIST č. 1
(podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu: 	XXXX
Číslo změny závazku ze smlouvy:  	1 
Datum: 28.6.2023

Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo: 						747 67 Hrabyně 204
IČ: 						00601233
DIČ:						CZ00601233
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 	Ing. Andrea Ruprichová
Osoba oprávněná ve věcech technických TDS:	XXXX
dále jen „Objednatel“

BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:						Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál	
IČ: 						02657392
DIČ:						CZ02657392
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 	XXXX
Osoba oprávněná ve věcech technických:	XXXX
dále jen „Zhotovitel“

Obsah:
1.	Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2.	Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
3.	Souhrnné vyhodnocení výše změny závazku
4.	Podklady k návrhu změny
5.	Závěrečné prohlášení zhotovitele stavby

1.	Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon") se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná III. Etapa“ nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují některou z podmínek vymezených v § 222 odst. 4 až 7 zákona (viz dále v textu).

2.	Předmět změny
2.1.a Změny spojené se sanaci podkladů pod opravované komunikace
Předpoklad v rozpočtu a skutečnost na stavbě
Rozpočet stavby byl sestaven na základě poznatků skladby podkladu pod komunikacemi z „oprav komunikací etapy č.II z května 2023, a na základě prováděných oprav areálových komunikací. Po odstranění vrchní vrstvy litého asfaltu bylo zjištěno, že v projektu předpokládaná sanace, není v některých úsecích komunikace dostatečná. Podmočení komunikace v parkové části areálů bylo natolik silné, že je nutné přistoupit k zvětšení objemu sanace podkladu pod komunikací. Je nutné zeminu odebrat do hloubky 500mm a podklad pod komunikace sanovat v celé ploše geotextílií a lokálně novým podsypem z kamene f 0-125mm v tl. 500mm. Na tento podklady již budou prováděny vrstvy dle rozpočtu stavby.

2.1.b Doplnění geotextilie do skladby podkladu komunikace
S ohledem na rozbahnění podkladu bylo nutné do skladby doplnit v celé ploše geotextilii, aby při hutnění podsypu z kamene f 0-125mm, nedocházelo k zatlačování kamene do rozbahněného podkladu. 

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a)	jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože o provedení této změny bylo rozhodnuto až během stavebních prací podle aktuálního stavu konstrukce, čímž se plnění způsobem určeným předmětnými položkami soupisu prací stalo nemožným. Změna byla projednána s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c)	hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.	Souhrnné vyhodnocení výše změny závazku
			Kč bez DPH													
Původní hodnota závazku			1 994 075,13													
součet hodnot změn závazku podle 	odst. 6		358.281,42	tj.	17,96%		původní hodnoty závazku, limit 50%				

4.	Podklady k návrhu změny
4.1	Položkový rozpočet změn 2.1-2.2
4.2	Relevantní Zápisy z Kontrolních dnů a Stavebního deníku
4.3	Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):

Stanovisko investora:	souhlasím	nesouhlasím
Stanovisko TDI:	souhlasím	nesouhlasím

5.	Závěrečné prohlášení zhotovitele stavby
Tyto změny nebudou mít negativní vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti, naopak v případě změny dojde ke zlepšení parametrů opravovaných komunikací. 
Třebaže změna zahrnuje jednu technologickou operaci navíc (doplnění podkladní vrstvy) oproti řešení původně navrženému, nebudou mít v změny jako celek žádný dopad na délku doby plnění.

Za Zhotovitele:	Za Objednatele:	
Datum:	Datum: