Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVBY
„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1	Všeobecná ustAanovení

Definice	

1.1	V Obchodních podmínkách (dále též jen "Obchodní podmínky", "Podmínky" nebo „OP“) budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují i sdružení, korporace a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1	Smlouva o dílo

1.1.1.1	"Smlouva" je dvoustranný právní úkon. Její obsah tvoří soubor listin a výkresů. Jsou to Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Technické specifikace, Výkresy, Související dokumenty a další dokumenty (pokud nějaké jsou) uvedené ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.2	"Smlouva o dílo" znamená listinu označenou jako “Smlouva o dílo”, která je mezi smluvními stranami uzavřena v souladu s článkem 1.6 (Smlouva o dílo).

1.1.1.3	"Technická specifikace" jsou Technické podmínky. Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), Všeobecné technické podmínky (VTP) a Zvláštní technické podmínky (ZTP) vypracované pro konkrétní stavbu, případné další dokumenty uvedené jako součást Smlouvy o dílo a všechny dodatky a změny Technických specifikací provedené v souladu se Smlouvou o dílo tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo, případné další dokumenty uvedené jako součást Technické specifikace a všechny dodatky a změny provedené v souladu se Smlouvou. Tento dokument spolu s Výkresy technicky specifikuje Dílo a Stavbu.

1.1.1.4	"Výkresy" jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých-koli  jejich dodatků a modiﬁkací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) v souladu se Smlouvou. Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění Díla. Tato projektová dokumentace je v těchto Podmínkách označována rovněž jako „Projekt (P)“. Technická specifikace může stanovit rovněž další části projektové dokumentace. Ty se v takovém případě rovněž považují za součást Výkresů.

1.1.1.5	"Související dokumenty" znamenají dokumenty obstarané Investorem, Objednatelem nebo sestavené Zhotovitelem a jím předané Objednateli před uzavřením Smlouvy o dílo, které jsou pro provedení Díla závazné a které jsou jako Související dokumenty označeny ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty mohou zahrnovat Soupis prací, data, seznamy a rozpisy sazeb a/nebo cen. Mezi tyto dokumenty mohou dále mimo jiné patřit i stavební nebo jiná povolení správních úřadů, posuzovací protokol stavby a zadávací dokumentace stavby. 

1.1.1.6	"Nabídka“ znamená „Výkaz výměr“ a další dokument označený jako „nabídka“ (pokud existuje), který je uveden ve Smlouvě o dílo, a všechny ostatní dokumenty, které Zhotovitel předal spolu s Nabídkou (pokud existují), jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo. 

1.1.1.7	"Soupis prací" znamená „Výkaz výměr“. "Výkaz výměr" je seznam prací nutných ke zhotovení Díla, sestavený podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), s uvedením jejich množství a ocenění vyplněným Zhotovitelem. Podle potřeby může být Výkaz výměr PS a SO doplněn o položky prací a materiálu ve třídníku dosud neobsažených. Množství jednotek v položkách PS a SO výkazu výměr jsou očekávaná množství vycházející z technického řešení v Projektu stavby. Podkladem pro stanovení množství v položkách výkazu výměr je Projekt stavby zpracovaný jako projekt pro realizaci a pro stavební povolení nebo projektové souhrnné řešení pro stavební povolení. Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách Výkazu výměr, lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí Objednatele.
1.1.1.8	"Seznam hodinových sazeb" znamená takto nadepsaný dokument (pokud existuje), který je zahrnut v Souvisejících dokumentech. 
1.1.1.9	"Zadávací dokumentace" znamená souhrn dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek vypracovaných Investorem, kterými byla v nezbytných podrobnostech vymezena Stavba v rámci otevřeného zadávacího řízení na zhotovení Stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“.
1.1.1.10	„Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění prací na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technická specifikace.
1.1.1.11	„Technickou specifikací položky“ se rozumí ve vztahu ke každé jednotlivé položce Soupisu prací popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu se Zadávací dokumentací. Technické specifikace položek jsou součástí Soupisu prací.
1.1.1.12	„Soupis prací“ znamená podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Díla. Výkaz výměr a Technická specifikace položek jsou součástí Soupisu prací. 

1.1.2	Strany a osoby

1.1.2.1	"Strana" znamená Objednatele nebo Zhotovitele, podle kontextu.

1.1.2.2	"Objednatel" znamená osobu označenou jako Objednatel ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.2.3	"Zhotovitel" znamená osobu (osoby) označenou jako Zhotovitel ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby nebo osob.

1.1.2.4	"Ředitel výstavby" je „TDS“ a znamená osobu určenou Objednatelem k tomu, aby zastupovala Objednatele a vystupovala jako Ředitel výstavby pro účely Smlouvy, a jmenovanou ve  Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli podle článku 3.4 (Výměna Ředitele výstavby)

1.1.2.5	"Zástupce zhotovitele" znamená osobu jmenovanou Zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou Zhotovitelem podle článku 4.3 (Zástupce zhotovitele), která jedná za Zhotovitele.

1.1.2.6	"Personál objednatele" znamená Ředitel výstavby, asistenty zmiňované v článku 3.2 (Pověření Ředitelem výstavby) a veškerý ostatní personál, dělníky a ostatní zaměstnance Objednatele, stejně jako veškerý další personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Ředitelem výstavby jako Personál objednatele.

1.1.2.7	"Personál zhotovitele" znamená zástupce Zhotovitele a veškerý personál, jehož Zhotovitel využívá na Staveništi, což může být personál, dělníci a další zaměstnanci Zhotovitele a kteréhokoliv Podzhotovitele, a veškerý ostatní personál, který pomáhá Zhotoviteli při provádění Díla.

1.1.2.8	"Podzhotovitel“ znamená kteroukoliv osobu uvedenou ve Smlouvě jako podzhotovitel nebo poddodavatel a kteroukoliv osobu jmenovanou jako podzhotovitel nebo poddodavatel a právní nástupci každé takové osoby. Jedná se o osobu odlišnou od Zhotovitele, která je pověřena zhotovením či dodáním části Díla a právní nástupce všech těchto osob.

1.1.2.9	„Investor“, „SŽ“ nebo „SŽDC“ znamená Správa železnic, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234.

1.1.2.10	„Personál investora“ jsou Správce stavby, jeho asistenti a zaměstnanci Investora.  

1.1.2.11	„Hlavní smlouva o dílo“ smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Investorem na provedení celé Stavby.

1.1.2.12	„Správce stavby“ je osoba jmenovaná Investorem.

1.1.3	Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1	"Základní datum" znamená datum uzavření Smlouvy o dílo.

1.1.3.2	"Datum zahájení prací" znamená datum uvedené ve Smlouvě o dílo, a pokud není uvedeno ve Smlouvě o dílo, tak datum oznámené podle článku 8.1 (Zahájení prací na díle).

1.1.3.3	"Doba pro dokončení" znamená dobu pro dokončení Díla, Sekce nebo části Díla (podle okolností) podle článku 8.2 (Doba pro dokončení), tak jak je uvedena ve  Smlouvě o dílo (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení)), počítaná od Data zahájení prací. Doby pro dokončení jednotlivých částí Díla nebo Sekcí jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo a nejsou-li uvedeny ve Smlouvě o dílo, pak jsou uvedeny Hlavním harmonogramu, a pokud nejsou uvedeny ani v Hlavním harmonogramu, pak jsou uvedeny v harmonogramu podle článku 8.3 (Harmonogram prací).

1.1.3.4	"Přejímací zkoušky" znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě, nebo na nichž se dohodnou obě strany, nebo nařízené jako Variace, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přejímací zkoušky), před převzetím Díla nebo Sekce Objednatelem. 

1.1.3.5	"Protokol o převzetí" znamená potvrzení vydané podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem).

1.1.3.6	"Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě, jejichž náležitosti, rozsah a způsob provedení jsou specifikovány v Technických podmínkách, a které se provádějí poté, co je Sekce nebo Dílo (podle okolností) převzato Objednatelem.

1.1.3.7	"Záruční doba" znamená dobu, po kterou je Zhotovitelem poskytnuta záruka za jakost Díla podle článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací a odstranění vad), tak jak je uvedeno ve Smlouvě (se všemi prodlouženími podle kapitoly 11).

1.1.3.8	Neobsazeno.

1.1.3.9	"Hlavní harmonogram" znamená harmonogram prací zpracovaný Objednatelem a předaný Zhotoviteli, ve znění všech jeho pozdějších aktualizací provedených Ředitelem výstavby. 

1.1.3.10	"den" znamená kalendářní den a "rok" znamená 365 dnů. Tím nejsou dotčena ustanovení o běhu sjednaných a stanovených lhůt plynoucí z právních předpisů.

1.1.3.11	„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla, části Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách tak, jak je stanovena ve Smlouvě (se všemi prodlouženími podle článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno ve Smlouvě.

1.1.3.12	„Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce dokončeného Díla nebo Sekce (podle okolností). Zkušební provoz se zavádí před vydáním kolaudačního souhlasu Drážního úřadu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.4	Ceny a platby

1.1.4.1	"Přijatá cena díla" nebo také „Smluvní cena“ znamená cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která je nejvýše přípustnou cenou za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2	"Cena díla" znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3	"Náklady" znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaloženy Zhotovitelem na provedení Díla, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4	"Potvrzení konečné platby" znamená potvrzení o platbě vydané podle článku 14.13 (Vydání potvrzení konečné platby).

1.1.4.5	"Závěrečné prohlášení" znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o vydání potvrzení konečné platby).

1.1.4.6	"Cizí měna" znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) Ceny díla, ne však místní měnu.

1.1.4.7	"Potvrzení dílčí platby" znamená potvrzení platby, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platební podmínky), jiné než Potvrzení konečné platby.

1.1.4.8	"Místní měna" znamená měnu České republika, tj. korunu českou.

1.1.4.9	"Potvrzení platby" znamená potvrzení platby vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platební podmínky).

1.1.4.10	Neobsazeno.

1.1.4.11	"Zádržné“ znamená zadržené platby, které Objednatel zadržuje podle článku 14.3 (Žádost o vydání potvrzení dílčí platby) a vyplácí podle článku 14.9 (Platba zádržného).

1.1.4.12	"Prohlášení" znamená prohlášení (vyúčtování) předávané Zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platební podmínky).

1.1.4.13	„Bankovní záruka za odstranění vad Díla" znamená Bankovní záruku podle článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla].

1.1.4.14	„Bankovní záruka“ je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou.

1.1.4.15     	"Faktura" je výzva k platbě s náležitostmi daňového a účetního dokladu podle Právních předpisů. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy: Soupis zjišťovacích protokolů, Zjišťovací protokoly.

1.1.4.16	„Bankovní záruka za provedení Díla“ znamená Bankovní záruku za provedení Díla podle článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla].

1.1.4.17	„Bankovní záruka za zálohu“ znamená Bankovní záruku podle článku 14.2 [Zálohová platba].“

1.1.5	Dílo a vybavení

1.1.5.1	"Vybavení zhotovitele" znamená všechny přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci nezbytné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje Pomocné práce, zařízení Objednatele (je-li jaké), Zařízení, Materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást Stavby.

1.1.5.2	"Věci určené pro dílo“ jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Zařízení a Pomocné práce, nebo cokoliv z toho, tak jak je to třeba.

1.1.5.3	"Materiály" znamenají věci všeho druhu (jiné než Zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Díla, včetně materiálů dodaných bez zabudování (jsou-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány Zhotovitelem.

1.1.5.4	"Zhotovovací práce" znamenají zhotovovací práce, které mají být provedeny Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.5.5	"Zařízení" znamená přístroje, stroje a dopravní prostředky, které mají tvořit nebo tvoří část zhotovovacích prací.

1.1.5.6	Neobsazeno.

1.1.5.7	"Sekce" je část Díla specifikovaná ve Smlouvě (je-li taková).

1.1.5.8	"Pomocné práce" znamenají dočasné dílo a veškeré pomocné práce jakéhokoliv druhu (jiné než Vybavení zhotovitele) nutné na Staveništi pro provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad.

1.1.5.9	"Dílo" znamená předmět díla dle Smlouvy včetně zhotovovacích prací a pomocných prací, nebo kterékoliv z nich, podle toho, co se hodí. Dílo tvoří jednu ze součástí Stavby.

1.1.5.10	"Stavba" znamená celou stavbu s názvem "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)", kterou realizuje Objednatel jako zhotovitel pro Investora a jejíž je Dílo jednou ze součástí.

1.1.6	Další definice

1.1.6.1	"Dokumentace zhotovitele" znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li jaké) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.6.2	"Země" znamená Českou republiku.

1.1.6.3	"Vybavení objednatele" znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která jsou dána k dispozici Objednatelem či Investorem pro použití Zhotovitelem pro provedení Díla, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách. Nezahrnuje však Zařízení, které nebylo Objednatelem převzato. 

1.1.6.4	"Vyšší moc" je definována v kapitole 19 (Vyšší moc).

1.1.6.5	"Právní předpisy" znamenají veškerou národní (nebo státní) legislativu, nařízení, vyhlášky a další zákony a vyhlášky a zákonná opatření legálně ustanovené veřejné správy. Podle těchto Podmínek se za Právní předpisy považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů. Podle těchto podmínek se za Právní předpisy považují rovněž dokumenty a předpisy vydané Investorem, pokud jsou Zhotoviteli přístupné podle písmene (a) článku2.2 [Povolení, licence a schválení] těchto Podmínek. Právní předpisy vydané Investorem jsou závazné ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy o dílo. Pokud v průběhu doby dojde ke změně Právního předpisu vydaného Investorem, rozhodne Ředitel výstavby podle pokynu Správce stavby a charakteru změny o tom, zda bude postupováno podle ustanovení Pod-článku 3.3 [Pokyny ředitele výstavby].

1.1.6.6	"Zajištění splnění smlouvy" znamenají zajištění (nebo záruky) podle článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy). 

1.1.6.7	"Staveniště" znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána zařízení a materiály, a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě jako součást Staveniště.

1.1.6.8	"Nepředvídatelný" znamená takový, jenž nemůže být rozumně předpokládán zkušeným Zhotovitelem k datu uzavření Smlouvy o dílo.

1.1.6.9	"Variace" znamená jakoukoliv změnu Díla, která je nařízena nebo schválena jako změna podle kapitoly 13 (Variace a úpravy).

1.1.6.10	„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Investora jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti stran související s předčasným užíváním Díla, nebo Sekce jsou upraveny především v článku 10.5 [Předčasné užívání].

1.1.6.11	„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v dalších ustanoveních těchto Podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu, uvedeno jinak.

Výklad pojmů	1.2	Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, tak ve Smlouvě:

	(a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody;

(b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné;

(c) ustanovení obsahující slovo "souhlasit", "souhlas", „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo "dohoda" vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly zaznamenány písemně, a

       	(d) „napsaný“, "písemný" nebo "písemně" znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu, 
	
	(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;

	a

      	(f) v ustanoveních obsahujících "přiměřený zisk" se přiměřený zisk určí dle všech relevantních okolností, přičemž nesmí přesáhnout 2,5 % Nákladů.

Nadpisy a slova na kraji stránky a další titulky nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

Komunikace	1.3	Kdekoliv tyto Podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení, požadavků a žádosti, budou tato sdělení:
a)	písemná a předávána osobně (proti potvrzení o převzetí), poslána poštou nebo kurýrem, nebo přenášena za použití jakýchkoliv odsouhlasených systémů elektronického přenosu uvedených ve Smlouvě (elektronickým přenosovým systémem se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky); a
b)	doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve Smlouvě. S výjimkou:
i.	jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude poté doručeno podle toho, a
ii.	pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzení vydává, zašle kopii též druhé straně. Když je jedné straně vydáno oznámení druhou stranou nebo ředitelem výstavby, bude kopie zaslána podle okolností buď řediteli výstavby, nebo druhé straně.
Komunikace s Investorem a projektantem: Veškerá komunikace s Investorem, projektantem a/nebo subjektem provádějící autorský dozor vymezeným ve Smlouvě o dílo bude ze strany Zhotovitele vedena výhradně prostřednictvím Objednatele či Ředitele výstavby, pokud Objednatel či Ředitel výstavby nestanoví jinak.
Důležité okolnosti týkající se provádění Díla se zapisují do Stavebního deníku. Stavební deník vede Zhotovitel. Podmínky pro vedení Stavebního deníku stanoví Smlouva a Právní předpisy. 
Smlouva může stanovit, kdy se za doručení určitého oznámení druhé smluvní straně považuje zápis do Stavebního deníku.
Smlouva může stanovit, kdy musí být písemnost zaslána jako doporučená zásilka nebo jako poštovní zásilka s dodejkou.

Právo a
jazyk	1.4	Smlouva o dílo se bude řídit právem České republiky.

	Má-li nějaká část Smlouvy ve verzi sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost a bude rozhodovat verze v českém jazyce.

	Komunikačním jazykem bude český jazyk.
Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

Priorita
dokumentů	1.5	Dokumenty tvořící smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a)	Dodatky Smlouvy o dílo
b)	Smlouva o dílo
c)	Tyto Podmínky
d)	Technické podmínky v pořadí:
(i) Zvláštní technické podmínky
(ii) Všeobecné technické podmínky
(iii) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
e)	Výkresy
f)	Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící části Smlouvy
g)	Nabídka (je-li jaká)

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, Ředitel výstavby vydá závazné objasnění nebo závazný pokyn.

Smlouva o dílo	1.6	Smlouva o dílo vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Převod
práv	1.7	Žádná ze stran nepřevede (nepostoupí) celou Smlouvu nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu.
	Avšak každá strana je oprávněna s předchozím písemným souhlasem druhé strany:
a)	převést celek nebo některou část, podle volného uvážení této druhé strany, a
b)	jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle Smlouvy.
Kromě toho je Objednatel oprávněn, a to i bez souhlasu Zhotovitele, převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy či kterékoliv z nich na Investora, budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí, či jiných částí Díla, zejména pokud se týče odpovědnosti Zhotovitele za vady ve lhůtě pro oznámení vad či případu ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem a Investorem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či jeho části.

Péče o
dokumenty
a dodání
dokumentů	1.8	Technické podmínky a Výkresy budou pod správou a v péči Objednatele. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, bude jedna kopie Výkresu poskytnuta Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat další kopie.

	Všechny Dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči Zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, poskytne Zhotovitel Řediteli výstavby čtyři kopie každého z Dokumentů zhotovitele.

		Zhotovitel bude na Staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentů uvedených v Technických podmínkách, Dokumentů zhotovitele (existují-li), Výkresů a Variací a dalších sdělení, vydaných podle Smlouvy. Personál objednatele bude mít v obvyklé době přístup ke všem těmto dokumentům. K dispozici musí být též Stavební deník vedený Zhotovitelem.

Výkresy a další dokumentace stavby plynoucí z Právních předpisů a všechny ostatní doklady týkající se prováděného Díla nebo jeho Variací, budou k dispozici též příslušným správním úřadům vykonávajícím státní stavební dohled. 

	Jestliže se některá ze stran dozví o chybě nebo závadě technické povahy v dokumentu, který byl vyhotoven pro použití při provádění Díla, oznámí strana tuto chybu nebo závadu neprodleně druhé straně. 

Opožděná dokumentace
stavby nebo
pokyny	1.9	Zhotovitel oznámením upozorní Ředitele výstavby vždy, když je pravděpodobné, že se realizace Díla opozdí, jestliže nebude Zhotoviteli v určité době vydán některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o nutném dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu zpoždění nebo přerušení práce, k nimž pravděpodobně dojde, bude-li vydán později.

	Pokud Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo výdaje v důsledku toho, že Ředitel výstavby nevydal ohlášený výkres nebo pokyn ve lhůtě, která je přiměřená a je specifikována v oznámení spolu s podpůrnými detaily, dá Zhotovitel Řediteli výstavby další oznámení a podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) bude oprávněn k:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.
Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností Ředitele výstavby způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, včetně chyby v některém z Dokumentů zhotovitele nebo zpoždění v jeho předání, nebude mít Zhotovitel nárok na toto prodloužení doby a uhrazení Nákladů.

Užívání
dokumentace
zhotovitele
objednatelem	
1.10	Jak platí pro obě strany, ponechá si Zhotovitel autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví k Dokumentaci zhotovitele vyhotovené Zhotovitelem (nebo z jeho pověření).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy o dílo) poskytl Objednateli, Investorovi a uživateli předmětu Díla zdarma časově neomezenou, přenosnou, neexkluzívní a bezúplatnou licenci pro kopírování, užívání a sdělování Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato licence bude:
a)	platit po celou dobu životnosti odpovídajících částí Díla,
b)	opravňovat kteroukoliv osobu platně vlastnící či užívající odpovídající část Díla ke kopírování, užívání a sdělování Dokumentů zhotovitele pro účely kompletace, provozu, údržby, úprav, oprav a demolic Díla, 
c)	v případě Dokumentace zhotovitele, která je ve formě počítačových programů a jiného software, dovolovat jejich užívání na kterémkoliv počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně výměny veškerých počítačů dodaných Zhotovitelem, a
d)	umožňovat udělení podlicence, a to i bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Dokumentace zhotovitele a další projektová dokumentace zpracovaná Zhotovitelem (nebo v jeho zastoupení) nebude bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem, Investorem a uživatelem předmětu Díla užívána, kopírována nebo sdělována třetím stranám (nebo v jeho zastoupení) pro jiné účely než uvedené v tomto článku. 

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, pokud je dodání zdrojového kódu podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel, Investor a uživatel předmětu Díla je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Investora, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i)	dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii)	Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii)	ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoliv vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv)	Objednatel, Investor a uživatel předmětu Díla začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.

Užívání dokumentů
objednatele
zhotovitelem	1.11	Jak platí pro obě strany, ponechá si Objednatel či Investor (podle okolností) autorská práva a další práva z duševního vlastnictví k Technickým podmínkám, Výkresům a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem či Investorem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy. Bez Objednatelova souhlasu nebudou Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely, vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele užít ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by byla výsledkem činnosti Zhotovitele spojené s prováděním Díla (např. dokumentace, kterou má Zhotovitel podle Smlouvy o dílo a jejích příloh v rámci provádění Díla vytvořit).
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uvést na veřejnost nebo jinak umožnit třetím osobám přístup ke Smlouvě o dílo a jejím přílohám.
 
Důvěrné
záležitosti	1.12	Skutečnosti uvedené ve Smlouvě považují smluvní strany za důvěrné záležitosti a zavazují se zajišťovat jejich náležité utajení. 
Zhotovitel je však oprávněn a povinen poskytnout nebo sdělit všechny důvěrné záležitosti a jiné informace Řediteli výstavby, které tento může požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje utajit před třetími osobami, s výjimkou oprávněných kontrolních státních orgánů a útvarů, veškerá cenová ujednání dle Smlouvy a neuvádět jejich výši a složení. 
Zhotovitel není oprávněn samostatně a bez předchozího souhlasu či pokynu Objednatele či Ředitele výstavby v souvislosti s Dílem jednat s Investorem, projektantem a/nebo subjektem provádějící autorský dozor, zejména není oprávněn jednat o cenových záležitostech. Porušení tohoto ujednání je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

Soulad se
zákonem	1.13	Zhotovitel bude při plnění Smlouvy jednat v souladu s Právními předpisy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:
a)	Objednatel musí zařídit (nebo zajistit zařízení) územní, stavební nebo podobná povolení pro zhotovovací práce a jakákoliv další povolení popsaná v Technických podmínkách jako povolení, která měl (nebo má) zařídit Objednatel či Investor, a Objednatel odškodní Zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak Objednatel opomněl učinit a
b)	Zhotovitel zařídí veškerá oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a zařídí veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované Právními předpisy nebo Technickými podmínkami ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých závad, a Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak Zhotovitel neučinil.

Společné a sdílené
závazky	1.14	Jestliže Zhotovitel ustaví (podle Právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné seskupení (registrované i neregistrované) dvou nebo více osob:
a)	tyto osoby budou společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění závazků, vzniklých v souvislosti se Smlouvou,
b)	tyto osoby oznámí Objednateli svého představitele, který bude oprávněn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob, a
c)	Zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

2	Objednatel 

Právo na
přístup
na staveniště	2.1	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, včetně příslušné části železniční dopravní cesty, předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání Zhotoviteli nějaký základ, konstrukci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na Staveniště, musí to Objednatel udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Objednatel však může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajištění splnění smlouvy. 

	Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu a užívání Staveniště v těch obdobích, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel postupovat podle Hlavního harmonogramu V případě, že pro Zahájení prací na díle není nutný přístup k celému Staveništi, je Objednatel oprávněn zpřístupňovat Staveniště Zhotoviteli po částech.

Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. Postup při předání Staveniště a náležitosti zápisu o předání Staveniště je upraven v Technické specifikaci.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo Náklady v důsledku toho, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli toto právo přístupu nebo užívání Staveniště během této doby, Zhotovitel to oznámí Řediteli výstavby a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
b)	uhrazení všech těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností Objednatele způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, včetně chyby v některém z dokladů Dokumentace zhotovitele nebo zpoždění v jeho předložení, nebude mít Zhotovitel nárok na toto prodloužení doby a uhrazení Nákladů.

Povolení, licence
a schválení	2.2	Objednatel na žádost Zhotovitele může poskytnout (tam, kde to může udělat bez zvýšených Nákladů) odpovídající pomoc při:
a)	poskytnutím interních předpisů Investora, které tvoří Právní předpisy podle těchto Podmínek. Interní předpisy úrovně přístupu (A) zpřístupní Objednatel Zhotoviteli bezplatně. Interní předpisy úrovně přístupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za úhradu nákladů Objednatele a úplatu podle aktuálně platného ceníku Investora. Interní předpisy úrovně přístupu (C) není Objednatel povinen Zhotoviteli zpřístupňovat. Nebudou-li interní Předpisy Investora úrovně přístupu (C) Zhotoviteli zpřístupněny, nepovažují se za Právní předpisy podle těchto Podmínek 
b)	žádostech Zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná Právními předpisy:
i.	které Zhotovitel má získat podle článku 1.13
ii.	pro dodávku Věcí určených pro Dílo včetně proclení.

Personál
objednatele	2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že Personál objednatele a další zhotovitelé Objednatele na Staveništi:
a)	spolupracují při úsilí Zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
b)	podnikají kroky podobné těm, které se požadují po Zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a) až (e) článku 4.8 (Bezpečnostní postupy) a podle článku 4.18 (Ochrana životního prostředí) a podle přílohy Smlouvy o dílo nazvané „Povinnosti zhotovitele v oblasti zabezpečení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany“.

Finanční opatření
objednatele	2.4 Neobsazeno.
	
Nároky
objednatele	2.5 Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn požadovat úhradu podle jakéhokoli článku Smlouvy, oznámí to Objednatel nebo Ředitel výstavby Zhotoviteli. Oznámení se nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), podle článku 4.20 (Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem), nebo za další služby požadované Zhotovitelem (např. podle článku 4.30 Výluky).

	Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co si Objednatel uvědomil skutečnost nebo okolnost, které jsou důvodné pro vznesení nároku, není-li jinde stanoveno jinak.

Podrobnosti budou specifikovat článek či jiný základ pro vznesení nároku a budou obsahovat odůvodnění částky a/nebo délky prodloužení o němž se Objednatel domnívá, že má na ně nárok podle Smlouvy. Ředitel výstavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) výši částky (pokud připadá v úvahu), která by měla být zaplacena Objednateli Zhotovitelem a/nebo (ii) prodloužení (pokud připadá v úvahu). 

	Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Ceny díla a Potvrzení plateb. Objednatel je oprávněn k započtení či jinému snížení částky uvedené v Potvrzení platby Zhotoviteli, nebo jinému nároku vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3	ŘEDITEL VÝSTAVBY
Povinnosti a 
pravomoc ředitele 
výstavby	3.1	Ředitel výstavby je jmenován ve Smlouvě a bude zastupovat Objednatele vůči Zhotoviteli a vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou. 

	Personál ředitele výstavby budou tvořit zejména zaměstnanci Objednatele nebo jiné fyzické či právnické osoby, které budou oprávněny vykonávat technický dozor objednatele, a úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele. Rozsah činností osob vykonávajících technický dozor objednatele a úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele je dále upraven zejména v Technických podmínkách.

	Není v pravomoci Ředitele výstavby měnit Smlouvu.

	Ředitel výstavby vykonává pravomoc náležející Řediteli výstavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě nebo jak z ní nutně vyplývá. Ředitel výstavby má, vedle jiných práv uvedených ve Smlouvě, právo zejména:
1)	kontrolovat dodržování podmínek Smlouvy a postupu prací; 
2)	požadovat po Zhotoviteli podklady pro přípravu výlukových rozkazů a plánů výluk;
3)	kontroly prací vykonaných ve výlukách a průběh výlukových prací, jakož i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací, sjízdnost cesty za určených podmínek a možnost ukončení výluky;
4)	při nedostatcích zjištěných při realizaci Díla Zhotovitele žádat zápisem ve Stavebním deníku jejich odstranění;
5)	přejímat od Zhotovitele doklady svědčící o provedeném plnění Zhotovitele v souladu se Smlouvou umožňující zahájit provoz (rychlost, zatížení apod.);
6)	kontroly a účasti na předepsaných zkouškách materiálů, konstrukcí a prací a jejich výsledku a požadovat kdykoliv předání dokladů prokazujících kvalitu plnění (atestů, protokolů apod.);
7)	kontroly a přejímky plnění Zhotovitele a plnění Zhotovitele, které nebude při přejímacím řízení přístupné pro zakrytí prací;  
8)	zápisem ve Stavebním deníku upozornit na nedostatky při dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických a hygienických předpisů a na případy nezajištění provádění opatření k ochraně majetku nebo třetích osob;
9)	v naléhavých případech, při ohrožení stavby živelnými událostmi při nedodržování bezpečnostních, požárních, ekologických a hygienických předpisů či podle pokynů technického dozoru investora nařídit zastavení provádění Díla či jeho části, provedení potřebných opatření či vykonání prací k minimalizaci škod či k zabránění vzniku škod; 
10)	přejímat a odmítnout plnění Zhotovitele;
11)	vznášet námitky a požadovat okamžité odvolání kterékoliv osoby z prací, která byla zaměstnána Zhotovitelem nebo jeho Podzhotovitelem a která podle jeho zjištění nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce  a osoby, která byla zaměstnána Zhotovitelem nebo jeho Podzhotovitelem, která zanedbává řádné plnění povinností, k nimž byla pověřena při plnění Smlouvy nebo osoby, která byla zaměstnána Zhotovitelem nebo jeho Podzhotovitelem, která ohrožuje bezpečnost a zdraví při práci či ohrožuje majetek,
12)	přístupu na pracoviště, do dílen a skladů zhotovitele a je oprávněn si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady, výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí, což je zhotovitel povinen umožnit;
13)	svolávat a organizovat kontrolní porady, výlukové štáby a místní šetření, sepisovat zápisy z těchto jednání a zasílat jejich kopii Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit na těchto jednáních účast svého zástupce oprávněného přijímat úkoly, vydávat rozhodnutí a plnit je.

Trvá-li Ředitel výstavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel žádat, aby Ředitel výstavby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě.

Pověření
ředitelem 
výstavby	3.2	Ředitel výstavby vykonává svoji funkci buď sám, nebo prostřednictvím svého personálu uvedeného ve Smlouvě. Dále může Ředitel výstavby čas od času převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenty a může tento převod nebo delegaci také odvolat. Ředitel výstavby však nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování). 
	
	Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok Ředitele výstavby. Kromě toho:
a)	absence neschválení práce, zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezují právo Ředitele výstavby odmítnout práci, Zařízení nebo Materiály;
b)	jestliže Zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat záležitost Řediteli výstavby, který rozhodnutí nebo pokyn potvrdí, zruší nebo pozmění.

Pokyny
ředitele 
výstavby	3.3	Ředitel výstavby může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo modifikované doklady dokumentace stavby, které jsou nutné pro realizaci Díla a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou. Zhotovitel dostává pokyny jen od Ředitele výstavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, bude platit kapitola 13 (Variace a úpravy).

	Zhotovitel musí plnit pokyny vydané Ředitelem výstavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže Ředitel výstavby nebo delegovaný asistent:
a)	vydá ústní pokyn;
b)	obdrží písemné potvrzení pokynu od Zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
c)	nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do čtyř pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení,

pak toto potvrzení představuje písemný pokyn Ředitele výstavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností).

Za písemně vydaný pokyn, jeho potvrzení nebo odmítnutí se považuje i jejich zápis do Stavebního deníku.

Výměna ředitele 
výstavby	3.4	Objednatel je oprávněn kdykoli vyměnit Ředitele výstavby. Ode dne oznámení nového Ředitele výstavby, je tato změna účinná vůči Zhotoviteli. 

Rozhodování	3.5	Kdykoli tyto Podmínky předpokládají, že bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 pro odsouhlasení nebo rozhodnutí o nějaké věci, bude to Ředitel výstavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní Ředitel výstavby rozhodnutí v souladu se Smlouvou, přičemž vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

	Ředitel výstavby Zhotoviteli oznámí každé straně odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud není revidováno podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení).

Kontrolní dny	3.6	Ředitel výstavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí zúčastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účast si Ředitel výstavby vyžádá. Ředitel výstavby zajistí zaznamenání záležitostí projednávaných na kontrolním dnu a zajistí poskytnutí kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.

Registr rizik	3.7	Ředitel výstavby a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má (může mít) vliv zejména na Cenu díla, kvalitu a termíny realizace. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Cenu díla, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto článku je společně najít optimální řešení za účelem realizace Díla v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je k tomu povinen vynaložit maximální úsilí.

4	Zhotovitel

Všeobecné 
povinnosti 
zhotovitele	4.1	Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou), provede a dokončí Dílo v souladu se Smlouvou a s pokyny Ředitele výstavby a odstraní veškeré vady Díla. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat s maximální odbornou péčí.

	Zhotovitel poskytne Zařízení a Dokumentaci zhotovitele, uvedené ve Smlouvě a veškerý Personál zhotovitele, Vybavení zhotovitele, spotřebovávané a jiné věci a služby, ať dočasné či trvalé povahy, vyžadované pro toto projektování, provedení Díla, dokončení a odstranění vad.

	Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na Staveništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě bude Zhotovitel (i) odpovídat za veškerou Dokumentaci zhotovitele, Pomocné práce a takový návrh každé položky Zařízení a Materiálů, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla daná položka v souladu se Smlouvou, a (ii) nebude však odpovídat za projekt navržených zhotovovacích prací převzatý od Objednatele a jejich technické podmínky, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a dalších Dokumentů zhotovitele, jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen.

	Zhotovitel předloží k odsouhlasení Řediteli výstavby podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Ředitelem výstavby požádán. Bez předchozího odsouhlasení Ředitelem výstavby nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod. Jakékoliv pracovní výkresy nebo potřebné detaily budou Zhotovitelem vypracované na vlastní náklady a podléhají schválení Ředitele výstavby.

	Jestliže Smlouva uvádí, že Zhotovitel bude projektovat některé zhotovovací práce a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, pak:

a)	Zhotovitel předloží Řediteli výstavby Dokumentaci zhotovitele k této části v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě;
b)	tato Dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickými podmínkami a dokumentací stavby, bude napsána v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a jazyk) a bude obsahovat dodatečné informace požadované Ředitelem výstavby pro doplnění k dokumentaci stavby kvůli koordinaci dokumentací projektu všech účastníků výstavby a Investora;
c)	Zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po dokončení Díla vyhovovat k tomu účelu, k němuž byla zamýšlena, jak je uvedeno ve Smlouvě; a
d)	nejpozději společně s žádostí o Protokol o převzetí podle článku 10.1 [Převzetí díla a částí díla] musí Zhotovitel:
(i) předložit Řediteli výstavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (podle okolností) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Investor a/nebo Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(i) zaškolit Investora a/nebo Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 [Převzetí díla a částí díla], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) výše předány a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše. Povinnost předat tyto dokumenty má Zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda projektoval část Stavby.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím a pravomocným stavebním povolením, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění potřebných stavebních a montážních prací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti při provádění Díla byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností příslušná oprávnění. Veškerý Personál zhotovitele na Staveništi, který se nachází či vykonává pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, musí disponovat průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“. Tato oprávnění musí Zhotovitel doložit před zahájením provádění Díla. Je-li určité oprávnění potřebné pouze pro provedení určité Sekce či se má některý člen Personálu zhotovitele podílet pouze na provádění určité části Díla nebo Sekce, postačí doložit tato oprávnění před zahájením provádění této části Díla nebo Sekce.

Zajištění splnění 
smlouvy	4.2.1	Bankovní záruka za provedení Díla

	Za Zajištění splnění smlouvy se považuje Bankovní záruka za provedení Díla, kterou Zhotovitel musí na své náklady získat ve výši 10 % Přijaté ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě o dílo a v souladu s článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka].

	Zhotovitel předá Bankovní záruku za provedení díla Objednateli do 14 dnů po uzavření Smlouvy o dílo a jednu kopii předá Řediteli výstavby. Znění bankovní záruky bude předem odsouhlaseno Objednatelem. 

	Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
	
	Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla podle článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla]. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

	Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za provedení Díla na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
	(a)	Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,
	(b) 	Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle článku 2.5 [Nároky objednatele], článku 20 [Nároky, spory a rozhodčí řízení], a to do 21 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
(c)	Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele nebo Ředitele výstavby požadující nápravu porušené smluvní povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti plnit,
(d) 	dojde k odstoupení Objednatelem podle článku 15.2 [Odstoupení objednatelem], kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za provedení Díla.

Objednatel vrátí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 28 dnů poté, co obdržel písemnou žádost Zhotovitele o vrácení Bankovní záruky za provedení díla. Žádost je Zhotovitel oprávněn Objednateli zaslat po tom, co obdržel Protokol o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci nebo poté, co předal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která skutečnost nastane později.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní Záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. Do doby doručení nové Bankovní záruky za provedení Díla, je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli platby až do výše 10 % Přijaté ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě o dílo.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

4.2.2	Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Bankovní záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši 5 % Přijaté ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě o dílo a v souladu s článkem 1.1.4.14 [Bankovní záruka]. 

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 14 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí předat Řediteli výstavby.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po celou Záruční dobu. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.

Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. 

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad Díla na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v následujících případech:

(a)	Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost bude kratší, než jak je sjednáno v tomto článku 4.2.2; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění vad Díla;
(b)	Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle článku 2.5 [Nároky objednatele], článku 20 [Nároky, spory a rozhodčí řízení], a to do 21 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
(c)	Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Protokolu o převzetí v době podle pokynů Ředitele výstavby nebo neodstraní vadu z vadného plnění dle článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do jednadvaceti (21) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo
(d)	nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo odstoupení skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel vrátí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do osmadvaceti (28) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní Záruky za odstranění vad Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

Zástupce 
zhotovitele	4.3	Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

	Pokud není Zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě, předá Zhotovitel, před Datem zahájení realizace díla, Řediteli výstavby ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá Zhotovitel jmenovat Zástupcem zhotovitele. Jestliže souhlas není dán nebo je později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako Zástupce zhotovitele, Zhotovitel obdobně předá jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.

	Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu Ředitele výstavby jmenování Zástupce zhotovitele, ani nejmenuje náhradu.

	Zástupce zhotovitele bude věnovat všechen čas řízení provádění Díla. Jestliže má být Zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během provádění Díla, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jmenování podléhá předchozímu souhlasu Ředitele výstavby. 

Pokud Ředitel výstavby do 14 dnů ode dne oznámení náhradní osoby nevznese připomínky, má se za to, že se jmenováním náhradní osoby souhlasil. 

	Zástupce zhotovitele bude jménem Zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3.3 (Pokyny ředitele výstavby). 

	Zástupce zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na některou kompetentní osobu a toto pověření může kdykoli odvolat. Jakékoliv pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud Ředitel výstavby neobdrží předcházející oznámení podepsané Zástupcem zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou uděleny nebo odvolávány.

	Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musejí plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Podzhotovitelé	4.4 Zhotovitel nesmí prostřednictvím Podzhotovitele realizovat celé Dílo ani jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Zhotovitel provede Dílo Vlastními prostředky.

4.4.1	K provádění části stavebních objektů a provozních souborů je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové Podzhotovitele, kteří jsou pro danou část Díla uvedeni ve Smlouvě, případně jsou Objednatelem schváleni. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele.

4.4.2	Neobsazeno.

4.4.3	Vlastními prostředky se podle těchto Podmínek rozumí Věci určené pro dílo, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Podzhotovitelé.

4.4.4	Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Podzhotovitelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:

(a)	Podzhotovitele uvedené ve Smlouvě, jejich podíl v procentech na provádění Díla nebo jinak vymezený předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze po písemném oznámení Řediteli výstavby a s jeho písemným souhlasem. Pokud Ředitel výstavby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení změnu nebo doplnění neodmítne, má se tato změna nebo doplnění za schválené;

(b)	Zhotovitel oznámí Řediteli výstavby nejméně pětatřicet (35) dnů předem předpokládané datum zahájení každé podzhotovitelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na Staveništi.

(c)	Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Podzhotovitel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Podzhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, Právními předpisy nebo Smlouvou.

4.4.5	Zhotovitel je za všech okolností povinen zamezit střetu zájmů a zamezit protichůdným zájmům Investora při projektování a následné realizaci téže stavby. Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce, ani žádný subjekt, který je s těmito osobami jakkoli majetkově spřízněn (např. je k těmto osobám ve vztahu ovládaných či ovládajících osob v rámci jednoho holdingu), který pro Zhotovitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby, v žádném časovém okamžiku pro Investora nebude vykonávat funkci Správce stavby, včetně jakýchkoli asistentů Správce stavby, ve vztahu ke Stavbě. 

Převod závazků
podzhotovitele                	4.5	Jestliže závazky Podzhotovitele časově přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby a Ředitel výstavby před tímto datem vydá Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těchto závazků na Objednatele či Investora, potom tak Zhotovitel učiní. Pokud není v převodu práv stanoveno jinak, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli a Investorovi žádné závazky za práci provedenou Podzhotovitelem poté, co převod práv nabude účinnosti.

Spolupráce	4.6	Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě, nebo podle pokynů Ředitele výstavby Zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:
a) Řediteli výstavby a jeho personálu, personálu Investora, Koordinátorovi BOZP   určenému Investorem,
b) všem dalším zhotovitelům najatým Objednatelem a dalším účastníkům výstavby,
c) personálu veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě na Staveništi nebo v jeho okolí.

Veškeré takové pokyny budou představovat Variaci, jestliže a do té míry, do jaké způsobí zhotoviteli nepředvídatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití Vybavení zhotovitele, Pomocné práce nebo umožnění přístupu, za něž odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku přístupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty Řediteli stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické speciﬁkaci.

Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy ČR Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu Stavby pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel nebo Ředitel výstavby Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Investor, Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 12 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Podzhotovitelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty podle předchozí věty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Investorovi a Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Investora, Objednatele či Podzhotovitelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Investorem, Objednatelem nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

Vytyčování	4.7	Zhotovitel vytyčí Dílo podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Ředitelem výstavby. Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště v rozsahu a za podmínek stanovených v Technické specifikaci. Zhotovitel je odpovědný za správné umístění všech částí Díla a napraví všechny chyby v umístění, výškách, rozměrech nebo trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu Díla zničeny či poškozeny.

Zhotovitel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady způsobené prováděním práce zapříčiněné chybou v těchto referenčních prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odhalit tuto chybu a vyhnout se zpoždění a/nebo Nákladům, oznámí to Zhotovitel Řediteli výstavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
(a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
(b) 	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) o věcech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míře.

Bezpečnostní postupy	4.8	Zhotovitel musí:
a)	dodržovat veškeré příslušné Právní předpisy,
b)	dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi,
c)	vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
d)	zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem) a
e)	zajišťovat veškeré Pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozované železniční dopravní cestě jsou:
a)	Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a staveb Investora;
b)	Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
c)	Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele;
d)	Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a Investora a naopak;
e)	V případě pracovního úrazu pracovníka Personálu zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy;
f)	Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při  plnění závazků ze  Smlouvy použito;
g)	Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
	
Zajištění kvality	4.9	Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Technické specifikaci, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Ředitel výstavby a Objednatel bude oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoli aspekt tohoto systému.

	Podrobnosti všech postupů a dokumenty o splnění požadavků budou předány Řediteli výstavby pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je Řediteli výstavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samotném dokumentu uveden zřejmý důkaz o předchozím schválení samotným Zhotovitelem.

	Splnění požadavků systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele žádné z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

Údaje o staveništi	4.10	Součástí Výkresů jsou informace a všechny významné údaje, které jsou k dispozici o hydrologických a podpovrchových podmínkách na Staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel dá Zhotoviteli k dispozici i všechny ostatní údaje o výše uvedených skutečnostech, které bude mít nově k dispozici Investora. Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.

	Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k Nákladům a času) se bude mít za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho Dílo. Ve stejné míře se bude mít za to, že Zhotovitel navštívil a prověřil Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před uzavřením Smlouvy uspokojen, pokud jde o všechny závažné záležitosti, včetně (avšak ne jenom):
a)	formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
b)	hydrologických a klimatických podmínek,
c)	rozsahu a povahy práce a Vybavení zhotovitele nutného pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad,
d)	Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v zemi a
e)	požadavků Zhotovitele na přístup, kanceláře, zařízení, personál, energii, dopravu, vodu a další služby. 

Dostatečnost přijaté
ceny díla  	4.11	Platí, že Zhotovitel:
a)	byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost Přijaté ceny díla, a
b)	založil Přijatou cenu díla na údajích, interpretacích, kontrolách, zkouškách a potřebných informacích, o nichž se mluví v článku 4.10 (Údaje o staveništi).

Přijatá cena díla obsahuje všechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
Jednotkové sazby a ceny uvedené ve Výkazu výměr zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Výkazu výměr, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy, které jsou nutné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad, i když nejsou ve Výkazu výměr případně konkrétně uvedeny (např. zařízení Staveniště, staveništní doprava, příprava a zajištění výluk, náklady na pronájem nemovitostí, přístup na stavbu apod.).

Nepředvídatelné
fyzické podmínky	4.12	V tomto článku "fyzické podmínky" znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, které Zhotovitel nalezne na Staveništi při realizaci Díla, včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením podmínek klimatických.

	Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvídatelné, oznámí to Řediteli výstavby, jak nejdříve je to proveditelné.

	V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být prověřeny Ředitelem výstavby, a uvedeny důvody, proč je Zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci Díla za použití všech řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní veškeré pokyny, které mu Ředitel výstavby dá. Jestliže pokyn zakládá Variaci, použije se článek 13 (Variace a úpravy).

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení a prověření a/nebo přezkoumání těchto fyzických podmínek bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry jsou tyto fyzické podmínky nepředvídatelné, a (ii) o záležitostech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto mírou.

Avšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může Ředitel výstavby rovněž prověřit, zda jsou jiné fyzické podmínky v podobných částech Díla příznivější, než mohlo být důvodně předpokládáno, když Zhotovitel uzavřel Smlouvu o dílo. Jestliže a do té míry, do jaké existovaly tyto příznivější podmínky, může Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby schválil nebo rozhodl o redukci Nákladů vzhledem k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpočty) do Ceny díla a do potvrzení plateb. Čistý efekt všech úprav podle odstavce (b) a všech těchto redukcí za všechny fyzické podmínky, které se nalézají v podobných částech Díla, nepovede k čistému snížení Ceny díla.

Ředitel výstavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předvídaných Zhotovitelem při uzavření Smlouvy o dílo, který může být předložen Zhotovitelem, ale nebude žádným takovým důkazem vázán.

Přístupová práva            	4.13	Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo Staveniště, která může potřebovat pro účely Díla.

Zamezení překážkám	4.14	Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

a)	veřejnost nebo
b)	přístup a užívání veškerých cest, silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob.

Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

Přístupové cesty	4.15	Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových cest na Staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a cest.

	Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak:
a)	bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována za užívání přístupových cest;
b)	zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
c)	objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových cest nebo jinak; za veškeré případné škody na silnicích, mostech nebo jiných přístupových cestách, které vzniknou v důsledku jejich užívání zhotovitelem, nese odpovědnost zhotovitel;
d)	objednatel neručí za vhodnost ani existenci určitých přístupových cest, a
e)	náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových cest pro užívání požadované zhotovitelem nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Investorem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z Právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy.

Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit za účasti Ředitele výstavby, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, popřípadě příslušných veřejných orgánů prohlídku přístupových cest dotčených prováděním Díla. Součástí prohlídky je pasportizace stávajícího stavu přístupových cest ve formě obrazového záznamu (foto, video) včetně sepsání zápisu. Zhotovitel je povinen předat jednu kopii tohoto záznamu Řediteli výstavby před zahájením prací. Stejnou prohlídku a kontrolu komunikací na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady po skončení stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách organizace výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle Právních předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupové cesty.

Pokud nebude možno určit, který ze zhotovitelů na Stavbě závady ve sjízdnosti přístupové cesty, její poškození či její znečištění způsobil nebo který je povinen k provedení potřebných úprav přístupové cesty, uhradí náklady na odstranění takových závad a znečištění a na potřebné úpravy přístupové cesty poměrně všichni zhotovitelé na Stavbě kteří užívali a/nebo užívají předmětnou přístupovou cestu. V případě sporu určí tento poměr mezi zhotoviteli na stavbě Ředitel výstavby.

Dodání vybavení 	4.16	Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:
a)	Zhotovitel oznámí Řediteli výstavby nejméně 28 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno nějaké Zařízení nebo významnější položka jiného Vybavení zhotovitele,
b)	Zhotovitel bude odpovídat za zabalení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého Vybavení zhotovitele a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo, a
c)	Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou Vybavení zhotovitele a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich přepravou.

Vybavení zhotovitele	4.17	Zhotovitel je odpovědný za veškeré Vybavení zhotovitele. Až bude dodáno na Staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem Vybavení zhotovitele je provedení Díla. Zhotovitel neodstraní ze Staveniště žádné významnější Vybavení zhotovitele bez souhlasu Ředitele výstavby. Jedinou výjimkou je, že se nebude souhlas Ředitele výstavby vyžadovat pro vozidla dopravující Vybavení zhotovitele nebo Personál zhotovitele mimo Staveniště. 

Ochrana 
životního prostředí	4.18	Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. V této souvislosti bude Zhotovitel dodržovat ustanovení uvedená v příloze Smlouvy o dílo nazvané „Povinnosti zhotovitele v oblasti zabezpečení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany“.
	
Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách, Výkresech a příslušnými Právními předpisy.

Zhotovitel nese odpovědnost za případné porušení Právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem.  

Elektřina, voda a plyn	4.19	Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat.

	Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely realizace Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a jejichž detaily jsou uvedeny v Technických podmínkách a Výkresech a na jejichž používání se s Ředitelem výstavby dohodnou. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Pokud napojení na přípojné body u jednotlivých správců sítí nezajistil Objednatel, zajistí u jednotlivých správců sítí napojení na tyto přípojné body uvedené v Technických podmínkách a Výkresech na svůj náklad Zhotovitel. V případě, že napojení u jednotlivých správců sítí zajišťuje Objednatel, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout potřebnou součinnost. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb nad rámec Technických podmínek, Výkresů a dohody s Ředitelem výstavby, např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. V případě, že napojení na přípojné body u jednotlivých správců sítí zajistil Objednatel a Zhotovitel se připojuje na jeho napojení, hradí Zhotovitel úhradu za spotřebu podle skutečného množství Objednateli na základě přeúčtování formou faktury. V případě, že napojení na přípojné body u jednotlivých správců sítí zajišťuje Zhotovitel, hradí Zhotovitel úhradu za spotřebu podle skutečného odběru přímo správcům jednotlivých sítí, na které je připojen.

Vybavení a materiál 
poskytovaný 
objednatelem 	4.20	Objednatel poskytne Vybavení objednatele (je-li jaké) pro použití Zhotovitelem při realizaci Díla v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Technických podmínkách a Výkresech. Není-li v Technických podmínkách stanoveno jinak:
a)	Objednatel bude odpovídat za Vybavení objednatele, s výjimkou případu, kdy
b)	Zhotovitel bude odpovídat za každou položku Vybavení objednatele, dokud s ní manipuluje, řídí ji nebo ji má v držení nebo ji ovládá Personál zhotovitele.

Přiměřená množství a splatné částky (při těchto uvedených cenách) za použití Vybavení objednatele Ředitel výstavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatele) a 3.5 (Rozhodování).  Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli.

Objednatel bezplatně poskytne "vlastní materiály" (jsou-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Technických podmínkách a Výkresech. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě.  Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí Řediteli výstavby nedostatek, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, Objednatel odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou „vlastní materiály“ do péče, správy a pod kontrolu Zhotovitele. 

Za "vlastní materiály" Objednatele se považuje i vyzískaný materiál, u něhož má dle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Díla. S vyzískaným materiálem se Zhotovitel zavazuje nakládat způsobem stanoveným v Technických podmínkách, Projektu stavby a v souladu s Právními předpisy. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (odpovědnost za péči) na "vlastních materiálech" Objednatele až do doby, kdy na Objednatele přejde odpovědnost za péči o příslušnou část Díla, do níž byly zapracovány, nebo do doby, kdy jej vrátí zpět Objednateli. 
"Vlastní materiály" Objednatele, které Objednatel předal Zhotoviteli k zapracování do Díla a které zapracovány nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět Objednateli.

Zprávy o postupu prací	4.21	Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, připraví Zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a ve čtyřech kopiích a rovněž v elektronické formě (v uzavřené a otevřené formě (*.pdf a *.doc)) je předá Řediteli výstavby. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně za kalendářní měsíce, vždy do posledního dne měsíce, jehož se týkají, v posledním měsíci v kalendářním roce do 10.12.

	Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení uvedeném v Protokolu o převzetí.

	Každá zpráva bude obsahovat:
a)	diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací (jsou-li jaké), Dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení; a včetně těchto dokumentů pro práci všech jmenovaných Podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenovaní podzhotovitelé)),
b)	fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,
c)	u výroby každé důležité položky Zařízení a Materiálů jméno výrobce, místo výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
i)	zahájení výroby,
ii)	kontrolách zhotovitele,
iii)	zkouškách, a
iv)	nakládce a dodání na Staveniště;
d)	podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele), 
e)	kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,
f)	seznam požadavků podle článku 2.5 (Požadavky objednatele) a požadavků, předložených podle odstavce 20.1 (Nároky zhotovitele), 
g)	bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a public relations, 
h)	srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se smlouvou,  a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění, a
i)	informaci o veškerých Nákladech podle článku 1.9 [Zpožděné výkresy a pokyny], článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště], článku 4.7 [Vytyčení], článku 4.24 [Archeologické a další nálezy na staveništi], článku 7.4 [Zkoušení], článku 8.9 [Důsledky přerušení], článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], článku19.4 [Důsledky vyšší moci], k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.

Zabezpečení staveniště	4.22	Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak:
				
a)	bude Zhotovitel odpovídat za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště a
b)	povolané osoby se budou omezovat na Personál zhotovitele, Personál objednatele, Personál investora, Personál koordinátora BOZP jmenovaného Investorem, a veškerý další personál ohlášený Zhotoviteli Objednatelem nebo Ředitelem výstavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů Objednatele a dalších účastníků výstavby na Staveništi a oprávněný personál veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dozoru a na oprávněné úřední osoby.

Činnost zhotovitele
na staveništi	4.23		Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na jakékoli další prostory, které může zhotovitel získat a ředitel výstavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby Vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na Staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky. Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích, se kterými nemá právo hospodařit Investor ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb. pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Investor (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je povinen zajistit Investor, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
	(i)	tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
	(ii)	získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
	Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

	Během provádění Díla se Zhotovitel postará o to, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a Pomocné práce, jichž už není třeba. 

Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo Ředitele výstavby bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.
Zhotovitel před vydáním Protokolu o převzetí předloží Objednateli jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady. Součástí této zprávy bude zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Obsah zprávy je upřesněn v Technické specifikaci.

Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho část nepřevzít v případě, že Zhotovitel řádně nedoloží likvidaci odpadu nebo předání výzisku oprávněnému zástupci Investora nebo Objednatele.

	K termínu vydání Protokolu o převzetí Zhotovitel vyčistí tu část Staveniště a díla, k nimž se Protokol o převzetí vztahuje, a odstraní z nich veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a Pomocné práce. Zhotovitel opustí tuto část Staveniště a díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu Záruční doby ponechat na Staveništi to Vybavení zhotovitele, které se vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své povinnosti podle Smlouvy.
	
	Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 14 dnů od vydání Protokolu o převzetí, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.

Vykopávky	4.24	Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne přiměřená opatření k tomu, aby se Personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení nebo poškození těchto nálezů.

	Objevení takového nálezu Zhotovitel okamžitě oznámí Řediteli výstavby, který vydá pokyn, jak se s ním má naložit.  Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo Náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel Řediteli výstavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých vzniklých Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Kontrolní prohlídky 
Stavby	4.25	Zhotovitel je povinen nejpozději 21 dnů předem nahlásit Řediteli výstavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Ředitelem výstavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.

Povinnost upozornit na 
nevhodnou povahu věci
nebo pokynu	4.26 	Obdrží-li Zhotovitel od Ředitele výstavby nebo Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je Zhotovitel povinen Ředitele výstavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli
smluvní pokutu 	4.27	Smluvní pokuty
	(a)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý případ, jestliže Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů nebo ustanovení o určení či změně Podzhotovitelů podle článku 4.4 [Podzhotovitelé];
	
	(b) 	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení jestliže Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle článku 4.28 [Postupné závazné milníky] uvedený ve Smlouvě; Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nezahájí provádění Díla do 7 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle článku 8.1 [Zahájení prací na díle], nebo Zhotovitel nezahájí provádění Díla do 7 dnů ode dne termínu uvedeného ve Smlouvě jako Datum zahájení prací na Díle;

(c)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele podle odstavců článku 6.9 [Personál zhotovitele];

(d)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z části Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 8.2 [Doba pro dokončení], a to za každý započatý den prodlení;

(e)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z části Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle článku 10.5 [Předčasné užívání stavby]; a to za každý započatý den prodlení;

(f)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedokončí práci nebo neodstraní vadu nebo poškození ve smyslu článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do data oznámeného Objednatelem podle článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];
(g)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost předložit Řediteli výstavby Harmonogram podle článku 8.3 [Harmonogram];

(h)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit Dílo po dobu přerušení prací podle článku 8.8 [Přerušení prací];

(i)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady podle Článku 18 [Pojištění];

(j)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý případ, jestliže Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil či zastavil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s článkem 1.7 [Postoupení];

(k)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ, jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s Právními předpisy, Smlouvou a Technickou specifikací podle článku 1.1.1.11 [Stavební deník] nebo 1.8 [Péče o dokumenty a jejich dodání]; Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 7 dnů ode dne zápisu Ředitele výstavby do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě;

(l)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ, jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Řediteli výstavby Zprávu o postupu prací podle článku 4.21 [Zpráva o postupu prací]; Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 7 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Řediteli výstavby;

(m)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000,- Kč za každý zjištěný případ, jestliže Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek Koordinátora BOZP při práci na Staveništi podle článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci];

(n)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinnosti, jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou nebo Právními předpisy;

(o)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každé porušení povinnosti, jestliže Personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci Díla se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této kontroly u takové osoby pozitivní;

(p)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel je v prodlení s převzetím, s vyklizením nebo s předáním Staveniště,

(q)	Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení jestliže Zhotovitel nedodrží termín stanovený mu ve Smlouvě pro splnění smluvní povinnosti a smluvní povinnost nesplní ani na výzvu Ředitele stavby v jím požadovaném termínu, prodlení se při nedodržení náhradního termínu uvažuje ode dne nesplnění termínu stanoveného Smlouvou;

(r) Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za provedení Díla za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla] a/nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla];

(s) Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou započatou hodinu prodlení, jestliže Zhotovitel poruší povinnost odstraňovat veškeré znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla dle Pod-článku 4.15;

(t) Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty jestliže dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozované dráhy: 
•	za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
•	za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
•	za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
•	za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. V případě prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí dlužník uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce (to neplatí pro souběh smluvních pokut a plateb za výluky).

Postupné závazné milníky 4.28	Jestliže jsou ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník ve Smlouvě. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených v článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku].

	O splnění každého postupného závazného milníku bude sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinky dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu.

Pokyny a příkazy při 
omezení provozu na 
pozemních komunikacích	4.29	Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Výluky 	4.30	Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla termíny a rozsah výluk uvedený ve Smlouvě, Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV).
	
	Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího odstavce tohoto článku. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou“. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Investorovi nejméně 120 dnů před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV.
	
	Dodatečnou výluku poskytuje Investor jako službu za úplatu počítanou za každou započatou hodinu Dodatečné výluky v těchto sazbách:
-	výluka trakčního vedení traťové koleje	 	3.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka traťové koleje			 	5.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka dvou a více traťových kolejí		10.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka staničních kolejí – dopravní	 	2.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka ostatních kolejí			 	1.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka zabezpečovacího zařízení		 3.000,- Kč/započatá hodina.

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel požádá méně, než 120 dnů před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti je „Překročenou výlukou“. Za Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou hodinu v následující výši:

-	výluka trakčního vedení traťové koleje		5.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka traťové koleje				10.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka dvou a více traťových kolejí		20.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka staničních kolejí - dopravní		5.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka ostatních kolejí				1.000,- Kč/započatá hodina,
-	výluka zabezpečovacího zařízení		5.000,- Kč/započatá hodina.

Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel je povinen uhradit úplatu za Překročenou výluku i tehdy, pokud Překročená výluka trvá méně než jednu hodinu.

Nad rámec platby za Dodatečnou výluku a za Překročenou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Investorovi, Objednateli, nebo které uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou nebo Překročenou výlukou.

Zhotovitel není povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto článku, pokud prokáže, že ke vzniku Dodatečné výluky či Překročené výluky došlo vinou Investora, Objednatele či Personálu objednatele nebo k Dodatečné výluce nebo Překročené výluce vedly:
(a)	pokyny Ředitele výstavby či Variace,
(b)	Vyšší moc.

Kontrola na alkohol a
návykové látky 	4.31	Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý Personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole na alkohol a návykové látky prováděné Objednatelem nebo Investorem.  Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím určených osob z řad Personálu objednatele. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba personálu Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna podle příslušného Právního předpisu.

Informovanost 	4.32	Zhotovitel je oprávněn na Staveništi a v dosahu 500 m od něj umístit informační či jakoukoliv reklamní tabuli jen s předchozím souhlasem Ředitele výstavby a za podmínek tohoto souhlasu. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve všech informačních materiálech o prováděném Díle bylo uvedeno, že Dílo Zhotovitel realizuje či realizoval pro generálního dodavatele stavby. 

5	Jmenovaní podzhotovitelé

Definice "jmenovaného 
podzhotovitele"	5.1	"jmenovaný podzhotovitel" ve Smlouvě označuje Podzhotovitele:
a)	který je jako jmenovaný Podzhotovitel uveden ve Smlouvě nebo
b)	o němž dá Ředitel výstavby pokyn Zhotoviteli podle kapitoly 13 (Variace a úpravy), aby ho zaměstnal jako Podzhotovitele.

Překážky jmenování	5.2	Zhotovitel nebude mít žádnou povinnost zaměstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti němuž vznese odůvodněnou námitku prostřednictvím oznámení Řediteli výstavby, jak nejrychleji je to proveditelné, s uvedením podpůrných argumentů. Bude se mít za to, že námitka je odůvodněná, pokud bude vyplývat (kromě jiného) z následujících záležitostí, ledaže by Objednatel souhlasil s tím, že odškodní Zhotovitele za následky této věci:
a)	jsou důvody k přesvědčení, že Podzhotovitel nemá dostatek zkušeností, zdrojů nebo dostatečnou finanční sílu;
b)	ve smlouvě o subdodávce není uvedeno, že jmenovaný Podzhotovitel odškodní Zhotovitele za následky nedbalosti nebo nesprávného použití Vybavení zhotovitele jmenovaným podzhotovitelem, jeho zmocněnci a zaměstnanci; nebo 
c)	smlouva o subdodávce neuvádí, že u práce, která je předmětem subdodávky (včetně projektování, je-li nějaké), jmenovaný Podzhotovitel:
(i)	se zaváže Zhotoviteli k převzetí takových povinností a závazků, aby to Zhotoviteli umožňovalo plnit jeho povinnosti a závazky podle Smlouvy, a
(ii)	odškodní Zhotovitele za všechny povinnosti a závazky podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní a za následky toho, že Podzhotovitel nekonal tyto povinnosti nebo neplnil závazky.

Platby jmenovaným
podzhotovitelům	5.3	Zhotovitel zaplatí jmenovanému Podzhotoviteli částky, o nichž je Ředitel výstavby oprávněn vydat potvrzení, že jsou v souladu se smlouvou s Podzhotovitelem. Tyto částky plus další poplatky budou zahrnuty v Ceně Díla podle odstavce (b) článku 13.5 (Provizorní položky), kromě toho, co je uvedeno v článku 5.4 (Prokázání plateb).

Prokázání plateb	5.4	Před vydáním potvrzení platby, které zahrnuje i částku splatnou jmenovanému Podzhotoviteli, může Ředitel výstavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl přiměřený důkaz o tom, že jmenovaný Podzhotovitel obdržel všechny částky splatné podle předchozích potvrzení plateb, mínus aplikovatelné odpočty za zádržné nebo jiné. Pokud Zhotovitel: 
a)	neposkytne Řediteli výstavby tento přiměřený důkaz, nebo
b)	
(i)	nepodá Řediteli výstavby písemně uspokojivé vysvětlení toho, že je odůvodněně oprávněn neposkytnout nebo odmítnout platbu těchto částek, a
(ii)	nepodá Řediteli výstavby přiměřený důkaz o tom, že jmenovanému Podzhotoviteli byl oznámen Zhotovitelův nárok,

potom Objednatel může (podle vlastního uvážení) zaplatit přímo jmenovanému Podzhotoviteli část nebo všechny tyto částky, o nichž bylo již dříve vydáno potvrzení platby (mínus aplikovatelné odpočty), že jsou splatné jmenovanému Podzhotoviteli a k nimž Zhotovitel nepředložil důkaz předepsaný ve výše uvedených odstavcích (a) a (b). Zhotovitel poté zpětně zaplatí Objednateli částku, která byla jmenovanému Podzhotoviteli vyplacena přímo Objednatelem. 

6	Personál a pracovní síly

Najímání personálu
a pracovních sil	6.1	Není-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, zařídí Zhotovitel najmutí personálu a pracovních sil v místě nebo jinak a jejich zaplacení, ubytování, stravování a dopravu.

	V případě zahraničního personálu a pracovních sil, musí Zhotovitel zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto pracovníků na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto pracovníků nebo jejich rodinných příslušníků v zemi zemře, ponese Zhotovitel odpovědnost za veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a za úhradu Nákladů s tím spojených.

Mzdové tarify a
pracovní podmínky	6.2	Neobsazeno.

Osoby v pracovním 
poměru u objednatele	6.3	Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, personál a pracovní síly u Personálu objednatele či Investora.

Pracovní právo	6.4	Zhotovitel se bude řídit veškerými Právními předpisy, které lze aplikovat na Personál zhotovitele, včetně Právních předpisů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace, a zajistí jim všechna jejich zákonná práva.

	Zhotovitel bude po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny Právní předpisy, včetně Právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba	6.5	Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Ředitel výstavby určí jinak.

Zařízení pro personál
a pracovní síly	6.6		Není-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, bude Zhotovitel poskytovat a udržovat veškerá nutné kanceláře a sociální zařízení pro Personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne kancelář a sociální zařízení pro Personál objednatele, pokud tak bude Personál objednatele dočasně potřebovat (např. pro zasedání kontrolních porad, výlukových štábů, místní šetření, sepisování zápisů, kontrolu a zapisování do stavebních deníků apod.).
.
	Zhotovitel nedovolí nikomu z Personálu zhotovitele, aby měl dočasné nebo trvalé bydlení v prostoru konstrukcí, které tvoří část zhotovovacích prací.

Ochrana zdraví a
bezpečnost	6.7	Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti Personálu zhotovitele. Zhotovitel bude zejména dodržovat ustanovení přílohy Smlouvy o dílo nazvané „Povinnosti zhotovitele v oblasti zabezpečení jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany“ a zavazuje se k součinnosti s Koordinátorem BOZP zajištěným Investorem. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích Personálu zhotovitele a objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

	Zhotovitel jmenuje na Staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci nehod.  Během celého provádění Díla bude Zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.  
	
	Zhotovitel zašle Řediteli výstavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo.  Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Ředitel výstavby odůvodněně požadovat.

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Právních předpisů, včetně: 
a)	plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b)	plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c)	zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
d)	zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e)	plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f)	plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

V případě, že bude byť jen určitá část Díla nebo Sekce prováděna více než jedním zhotovitelem, např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou určitou část Díla nebo Sekci k realizaci Podzhotoviteli a na Staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat Ředitele výstavby, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

Investor určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla i všechny své Podzhotovitele.

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(b) k povinnosti nejpozději 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Dozor zhotovitele	6.8	Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností Zhotovitele, zajistí Zhotovitel veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

	Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Právo a jazyk)) i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod prevence nehod) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla.

Personál zhotovitele	6.9	Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své řemeslo, profesi nebo povolání. Ředitel výstavby může požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoliv osoby zaměstnané na Staveništi nebo Díle, včetně Zástupce zhotovitele, pokud se jej to týká, která podle mínění Ředitele výstavby:
a)	se chová nepřístojně nebo je nedbalá,
b)	plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
c)	neplní některá ustanovení Smlouvy, 
d)	ohrožuje bezpečnost, včetně bezpečnosti dráhy a drážní dopravy, ohrožuje zdraví či porušuje předpisy o BOZP či ochraně životního prostředí,
e)	nesplňuje kvalifikační předpoklady stanovené Investorem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Stavby,
f)	nesplňuje odbornou či zdravotní způsobilost pro výkon svěřených prací, nebo
g)	působí škodu na majetku Objednatele či třetích osob.

Je-li to vhodné, Zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých fyzických osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti Řediteli výstavby, Koordinátorovi BOZP, dalším pověřeným pracovníkům Personálu objednatele a Investora a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými Investorem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Stavby (dále též oprávněné osoby Zhotovitele). Změna oprávněných osob Zhotovitele není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby Zhotovitele předloží pro tuto novou oprávněnou osobu Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Řediteli výstavby oznámit změnu nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím pátého pracovního dne po doručení oznámení Řediteli výstavby; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto odstavce. Oprávněné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dílo) jsou uvedeny v příloze č. 6 Smlouvy o dílo.

Zhotovitel se dále v souladu s příslušnými Právními předpisy zavazuje zajistit, že veškerý Personál zhotovitele, který bude vykonávat vedoucí práce, bude mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto osoby opravňovat k provádění činností na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti vydané na základě zmocnění podle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném Právním předpisem vydaným Investorem. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen doložit Řediteli výstavby před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně pak předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Právními předpisy zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy.

Záznamy o personálu zhotovitele
a vybavení zhotovitele	6.10	Zhotovitel předá Řediteli výstavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé kategorii Personálu zhotovitele a počty každého z typů Vybavení zhotovitele na Staveništi. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené Ředitelem výstavby, dokud Zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení uvedenému v Protokolu o převzetí nejsou dokončeny.

Neukázněné chování	6.11	Zhotovitel bude po celou dobu přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

7	Zařízení, materiály a ODBORNOST

Způsob realizace	7.1		Zhotovitel vyrobí nebo obstará Zařízení a Materiál a dále provede práce:
a)	způsobem uvedeným ve Smlouvě (je-li stanoven),
b)	odborně a pečlivě, v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a
c)	patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

Vzorky	7.2		Zhotovitel předá Řediteli výstavby následující vzorky Materiálů a relevantní informace ke schválení před tím, než budou Materiály použity při provádění Díla nebo zabudovány do Díla:
a)	standardní vzorky Materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele, a
b)	další (dodatečné) vzorky podle pokynů Ředitele výstavby, což bude řešeno jako Variace.
Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na Díle.

Kontrola 	7.3		Personál objednatele a Investora bude v kteroukoliv rozumnou dobu:
a)	mít plný přístup do všech částí Staveniště a na všechna místa, z nichž se získává přírodní Materiál, a
b)	během výroby, produkce a stavebních prací (na Staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn zkoušet, kontrolovat, měřit a testovat materiály a práci a kontrolovat postup výroby Zařízení a produkci a výrobu Materiálů.

Zhotovitel poskytne Personálu objednatele a Investora plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

Zhotovitel oznámí Řediteli výstavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zakryta, zabudována, nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Ředitel výstavby poté bez zbytečného odkladu buď provede prohlídku, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo oznámí Zhotoviteli, že nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to Zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a poté ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet Zhotovitele, jestliže a pokud je o to Ředitelem výstavby požádán. Prohlídky, kontroly, měření nebo zkoušky může společně se Ředitelem výstavby či namísto něho se stejnou platností provádět též Personál investora.
 
Kontroly a
zkoušení 	7.4		Tento článek bude platit pro všechny kontroly a zkoušky uvedené ve Smlouvě zejména v příslušných ustanoveních Technických podmínek, mimo Zkoušky po dokončení (jsou-li). V případech neupravených těmito Podmínkami se kontroly a zkoušky řídí příslušnými ustanoveními Technických podmínek. Kontroly a zkoušky může společně s Ředitelem výstavby či namísto něho se stejnou platností provádět též Personál investora.

	Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, Vybavení zhotovitele, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek.  Zhotovitel spolu s Ředitelem výstavby odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky toho kterého Zařízení, Materiálů nebo jiných součástí Díla.

	Ředitel výstavby může podle kapitoly 13 (Variace a úpravy) změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn Zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené Zařízení, Materiály nebo práce nejsou v souladu se smluvními dokumenty, ponese náklady na provedení takové Variace Zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy.

	Ředitel výstavby oznámí Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl účastnit se zkoušky. Jestliže se Ředitel výstavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od Ředitele výstavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti Ředitele výstavby.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo Náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny Ředitele výstavby, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá Objednatel, oznámí to Zhotovitel Řediteli výstavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
	
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
b)	uhrazení všech těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

	Zhotovitel dodá Řediteli výstavby bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, Ředitel výstavby potvrdí Zhotoviteli zprávy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát stejné platnosti. 

Odmítnutí	7.5	Jestliže v důsledku zkoušky, kontroly, měření nebo testování nebo i jinak Ředitel výstavby zjistí, že je některé Zařízení, Materiály nebo práce závadné nebo jinak neodpovídá Smlouvě, může Ředitel výstavby Zařízení, Materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí Zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené Ředitelem výstavby, a pokud není lhůta stanovena, tak bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě.

	Jestliže Ředitel výstavby požaduje, aby bylo toto Zařízení, Materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady Objednateli.

Opravné práce	7.6		Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může Ředitel výstavby dát Zhotoviteli pokyn k tomu, aby:
a)	odstranil ze Staveniště veškerá Zařízení nebo Materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou,
b)	odstranil a znovu provedl jakékoliv jiné práce, které nejsou v souladu se Smlouvou,
c)	provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Ředitele výstavby bezodkladně nutné pro bezpečnost Díla, až již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel splní pokyn v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel nesplní pokyn, bude Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele práce provést sám nebo zaměstnat a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít Zhotovitel nárok na platbu za práci, bude Zhotovitel povinen podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatit Objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění. 

Vlastnictví zařízení
a materiálů	7.7		Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá stát okamžikem, kdy se stanou součástí Stavby, nebo pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamžiku provedení platby za tyto Věci určené pro dílo, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve a Investor k nim ve stejném okamžiku nabývá odpovídající právo hospodařit ve smyslu Právních předpisů. 
Nebezpečí škody na Materiálech přechází vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s Článkem 10 [Převzetí objednatelem] a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na Materiálech Zhotovitel.
Pro vyloučení pochybností platí, že ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozích odstavcích neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s Právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

Veškerý výzisk ze stávajících konstrukcí je ve vlastnictví Investora a je určen k likvidaci podle projektu či Technických podmínek nebo k dalšímu zabudování nebo regeneraci. Zhotovitel je povinen si vždy u Ředitele výstavby ověřovat, zda výzisk ze stávajících konstrukcí je určen k likvidaci a zda s ním není počítáno při stavbě jako s užitým materiálem k dalšímu zabudování, a to i v rámci jiných SO a PS.

Poplatky	7.8		Není-li v Technických podmínkách stanoveno jinak, zaplatí Zhotovitel veškeré poplatky, půjčovné a další platby za:
a)	přírodní Materiály získané mimo Staveniště, a
b)	odstranění (odvoz) materiálu z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých), s výjimkou případu, kdy se prostory pro jejich uložení nacházejí na Staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě.

Dokumenty související 
s předáním Díla	7.9		Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

	Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba podle uvedeného právního předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celé Dílo. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 3 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 3 měsíců ode dne vydání posledního Protokolu o převzetí části Díla.
	
	Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení podle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 3 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 3 měsíců ode dne vydání posledního Protokolu o převzetí části Díla.

	Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a termínech uvedených v Technických podmínkách.
	
	Dokumenty předávané dle tohoto Pod-článku se nepovažují za dokumenty dle Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele].

8	ZaHÁJENí  prací,  Zpoždění  a  přerušení  prací

Zahájení díla	8.1		Není-li Datum zahájení prací uvedeno ve Smlouvě o dílo, bude Datum zahájení prací shodné s datem uzavření Smlouvy o dílo. 

	Zhotovitel začne s prováděním Díla, jakmile je to odůvodněně proveditelné po Datu zahájení prací a poté bude v pracích na Díle postupovat s odpovídající rychlostí a bez odkladu. Zahájení provádění Díla Zhotovitel bezodkladně oznámí Řediteli výstavby.
.
	Smluvní strany se dohodly na vzájemné součinnosti při realizaci Díla spočívající v připravenosti se přizpůsobit potřebám celé Stavby, zejména tam, kde technické řešení vyžaduje koordinaci zhotovitelů a podzhotovitelů jednotlivých částí stavby (tunely, mosty, kolejiště, nástupiště, podchody, přístřešky, informační systém pro cestující, kanalizace, osvětlení, ukolejnění apod.).

Doba pro dokončení	8.2	Zhotovitel dokončí celé Dílo, všechny jeho části (jsou-li jaké) a každou Sekci (je-li nějaká) v Době pro dokončení celého Díla, jednotlivých částí Díla a Sekce (podle okolností) stanovených ve Smlouvě o dílo a nejsou-li uvedeny ve Smlouvě o dílo, pak v Hlavním harmonogramu a nejsou-li stanoveny ani v Hlavním harmonogramu, pak v harmonogramu podle článku 8.3 (Harmonogram prací) a všechny jeho části (jsou-li jaké) během Doby pro dokončení díla, včetně:
a)	úspěšného provedení Přejímacích zkoušek, a
b)	dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě, tak jak se požaduje k tomu, aby bylo Dílo nebo jeho část pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí díla a částí díla). 

Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše a nepředá Objednateli dokumenty dle Pod-článku 7.9 [Dokumenty související s předáním Díla].

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (jsou-li specifikovány) Objednatelem podle článku 10.1 [Převzetí díla a částí díla] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Ředitel výstavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod- odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dalších ustanovení těchto Podmínek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a částí díla] v Době pro dokončení, nesplní Zhotovitel svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo, část Díla nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla, části Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla, části Díla nebo Sekce (podle okolností).

Harmonogram prací	8.3		Při provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat Hlavní harmonogram zpracovaný Objednatelem a předložený Zhotoviteli, který je pro Zhotovitele závazný, zejména pokud se týče plánu výluk, termínů zahájení a ukončení jednotlivých výluk, přechodových stavů, zkušebních provozů, provozních zkoušek, ukončení Sekcí, Díla či jeho částí, úspěšného provedení technicko-bezpečnostní zkoušky dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění.
	
Zhotovitel předá Řediteli výstavby v tištěné formě i digitálně (v programu MS Project verse 2000) v podrobnostech stanovených Ředitelem výstavby podrobný řádkový časový harmonogram, a to do 14 dnů po Datu zahájení prací. Každý harmonogram bude členěn podle jednotlivých SO a PS (pokud z Technické specifikace nevyplývá jiné členění Díla) a bude obsahovat podrobné údaje o časovém rozvržení prací na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vždy s vyznačením všech postupných závazných milníků. Zhotovitel musí dále předložit Řediteli výstavby nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací na SO a PS nebo Sekci aktualizaci podrobného harmonogramu, kdykoli je předchozí podrobný harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram musí dále obsahovat:
a)	Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Dobu pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Postupné
b)	data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání), 
c)	pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
d)	data zpracování a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby Řediteli stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby Ředitelem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace
e)	smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,
f)	posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce]
g)	všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
h)	data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
i)	všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,
j)	pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
k)	milník schválení Souhrnné zprávy o jakosti stavebních prací,
l)	průvodní zprávu, která obsahuje:
(i)	popis všech hlavních etap provádění Díla,
(ii)	obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
(iii)	údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
(iv)	v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
(v)	Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Harmonogram bude vycházet z Hlavního harmonogramu a bude v souladu s aktuálním plánem výluk schváleným Investorem. Při zpracování harmonogramu musí brát Zhotovitel v úvahu rozsah a časové návaznosti technologických postupů prací a možné povětrnostní podmínky v dané době a oblasti, které mohou podstatně ovlivnit postup prací.

Pokud Ředitel výstavby do 28 dnů poté, co podrobný harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli rozsah, v němž harmonogram neodpovídá Smlouvě, bude Zhotovitel postupovat v souladu s harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pokud Ředitel výstavby do 28 dnů oznámí k předloženému harmonogramu připomínky, upraví Zhotovitel harmonogram ve smyslu těchto připomínek a harmonogram předloží znovu Řediteli výstavby k odsouhlasení. 
Termíny a lhůty stanovené v harmonogramu nerozporovaném či odsouhlaseném Ředitelem výstavby jsou pro Zhotovitele závazné. Personál objednatele bude oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na podrobný harmonogram.

Zhotovitel okamžitě oznámí Řediteli výstavby pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit Cenu Díla nebo opozdit provedení Díla. Ředitel výstavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh podle článku 13.3 (Postup při změnách). 

Jestliže Ředitel výstavby kdykoli oznámí Zhotoviteli, že:
- podrobný harmonogram (v míře uvedené) neodpovídá Smlouvě nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, 
- se změnil Hlavní harmonogram (v míře uvedené),
- se změnily či byly nově stanoveny termíny, počtu či délky výluk poskytované Investorem (v míře uvedené), 
- byl Investorem stanoven objem finančních prostředků na příslušný kalendářní rok či došlo k jeho následné změně, nebo
- nařizuje změnu harmonogramu z jiného důvodu (v míře uvedené), 
předloží Zhotovitel při respektování pokynu vydaných Ředitelem výstavby do 7 dnů od obdržení oznámení aktualizovaný podrobný harmonogram Řediteli výstavby k odsouhlasení v souladu s tímto článkem. 

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku 8.3 je důvodem pro uplatnění smluvní pokuty a/nebo zadržení plateb.

Prodloužení doby pro
dokončení	8.4	Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) právo na prodloužení doby pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (Převzetí díla a částí díla) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:
a)	změna (pokud není úprava doby pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 (Postup při změnách)) nebo jiná významná odchylka v množství kterékoliv položky prací zahrnutých ve Smlouvě,
b)	z příčiny zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení doby podle  některého článku těchto Podmínek,
c)	mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
d)	nepředvídatelný nedostatek Věcí určených pro dílo způsobený zásahy veřejné moci, nebo
e)	jakékoliv zpoždění, překážka nebo omezení způsobené nebo přičitatelné Objednateli.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení Doby pro dokončení, oznámí to Řediteli výstavby v souladu s článkem 20.1 (Nároky zhotovitele).  Při určování každého prodloužení doby podle článku 20.1 zkontroluje Ředitel výstavby všechny předchozí rozhodnutí a může celkové prodloužení doby zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená
úřady	8.5	Jestliže platí následující podmínky:
a)	Zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálně ustavenými orgány veřejné správy,
b)	tyto úřady zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
c)	zpoždění nebo narušení bylo Nepředvídatelné,

potom se bude toto zpoždění nebo ztížené podmínky považovat za příčinu zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení).

Rychlost postupu	8.6	Jestliže kdykoli:
a)	je skutečný pokrok Zhotovitele příliš pomalý k tomu, aby mohl být Dílo dokončeno během Doby pro dokončení, nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu, a/nebo
b)	postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti platnému harmonogramu podle článku 8.3 (Harmonogram prací),

z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), pak může Ředitel výstavby vydat Zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (Harmonogram prací) předložil revidovaný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl Smlouvě.

Neoznámí-li Ředitel výstavby něco jiného, přijme Zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo počtu Personálu zhotovitele a/nebo Vybavení zhotovitele, na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli, spolu s veškerým smluvními pokutami, odškodněním za zpoždění a náhradami škod.

Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Řediteli stavby jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující uplatněné revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení během Doby pro dokončení. Ředitel stavby musí k tomuto harmonogramu vznášet případné připomínky co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 6 dnů od doručení aktualizovaného harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Ředitel stavby do 6 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy.

Odškodnění za
zpoždění	8.7	Jestliže Zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Doba pro dokončení), zaplatí za toto porušení Smlouvy Objednateli podle článku 2.5 (Nároky objednatele) odškodnění. Toto odškodnění za zpoždění činí 0,1 % z části Přijaté ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, a to za každý den prodlení.
	V rozsahu překračujícím toto odškodnění za zpoždění může Objednatel žádat po Zhotoviteli náhradu škody, kterou Zhotovitel porušením Smlouvy způsobil, včetně případů kdy dojde k ukončení podle odstavce 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele) před dokončením díla a případů stanovených v jiném článku Podmínek. Toto odškodnění nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy může mít. Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.

Přerušení práce	8.8	Ředitel výstavby může kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo jeho části. Během tohoto přerušení bude Zhotovitel chránit, uskladňovat a zabezpečovat tuto část Díla nebo Dílo před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením.

	Ředitel výstavby může rovněž oznámit příčinu přerušení.  Jestliže a do té míry, v jaké je příčina oznámena a je přičitatelná Zhotoviteli nebo jím způsobena, neplatí následující články 8.9 (Následky přerušení), 8.10 (Platba za zařízení a materiály v případě přerušení práce) a 8.11. (Prodloužení přerušení).

	V případě, že Ředitel výstavby vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo jeho části, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel, Investor nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených Právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

Následky přerušení	8.9	Jestliže se Zhotovitel zpozdí a/nebo mu vzniknou Náklady tím, že splnil pokyny Ředitele výstavby podle článku 8.8 (Přerušení práce) a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Řediteli výstavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby ani na zaplacení vzniklých Nákladů v případě nápravy chybné dokumentace Zhotovitele, práce nebo materiálů Zhotovitele nebo v případě, že Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (Přerušení práce).

Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo jeho části způsobeno Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli náklady a škodu, které mu v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikly. Objednatel nebo Ředitel výstavby to oznámí Zhotoviteli a dále se bude postupovat podle článku 2.5 (Nároky objednatele).

Platba za zařízení a
materiály v případě
přerušení práce	8.10	Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení hodnoty (k datu přerušení práce) za Zařízení a/nebo Materiály, které nebyly dodány na Staveniště, jestliže:

a)	práce na Zařízení a/nebo dodávka Zařízení a/nebo Materiálů byla přerušena na více než 35 dnů a
b)	Zhotovitel označil Zařízení a/nebo Materiály jako vlastnictví Objednatele nebo Investora v souladu s pokyny Ředitele výstavby.

Prodloužení přerušení	8.11	Jestliže přerušení práce podle článku 8.8 (Přerušení práce) trvá více než 91 dnů, může Zhotovitel požádat Ředitele výstavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže Ředitel výstavby nevydá povolení do 42 dnů poté, co o to byl požádán, může Zhotovitel, po oznámení Řediteli výstavby, zacházet s tímto přerušením jako s vynecháním dotčené části Díla podle kapitoly 13 (Variace a úpravy). Jestliže přerušení zasahuje celé Dílo, může Zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele).

Pokračování v práci	8.12	Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují Ředitel výstavby a Zhotovitel společně dílo a Zařízení a Materiály, jichž se týkalo přerušení prací. Zhotovitel napraví veškerá chátrání nebo vady či ztráty na Díle nebo v Zařízeních či Materiálech, k nimž došlo během přerušení prací.

Prodloužení doby
pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění 
postupného závazného
milníku	8.13	Zhotovitel je oprávněn podle článku 20.1 [Nároky zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny. Články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 [Nároky zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

	Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.

Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

9	Přejímací zkoušky

Povinnosti 
zhotovitele	9.1	Zhotovitel provede Přejímací zkoušky v souladu s touto kapitolou, článkem 7.4 (Kontroly a zkoušení) a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách, poté co poskytl dokumenty v souladu s písmenem d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele). Při provádění Přejímacích zkoušek se zhotovitel zavazuje respektovat termíny uvedené v Hlavním harmonogramu a v harmonogramu podle článku 8.3 (Harmonogram prací).

Zhotovitel oznámí Řediteli výstavby datum, po němž bude připraven provést každou z Přejímacích zkoušek, nejméně 28 dnů předem.  Není-li dohodnuto jinak, budou Přejímací zkoušky provedeny do 21 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Ředitel výstavby.

Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek přihlédne Ředitel výstavby k účinku jakéhokoliv užívání Díla Objednatelem či Investorem při provozu nebo na jiné vlastnosti Díla. Jakmile Sekce, Dílo nebo část Díla projde některými Přejímacími zkouškami, předá Zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto Přejímacích zkoušek Řediteli výstavby.

Odklad zkoušek	9.2	Jestliže jsou Přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy Objednatelem, bude platit článek 7.4 (Zkoušení) anebo článek 10.3 (Překážky pro provedení přejímacích zkoušek). 

Jestliže jsou Přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy Zhotovitelem, může Ředitel výstavby oznámením požádat Zhotovitele, aby Přejímací zkoušky provedl do 14 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede Přejímací zkoušky v den nebo ve dnech v této lhůtě, jak to Zhotovitel stanoví a oznámí Řediteli výstavby. 

Jestliže Zhotovitel neprovede Přejímací zkoušky do 14 dnů, může k Přejímacím zkouškám přistoupit Personál objednatele na riziko a náklady Zhotovitele. Pak se bude mít za to, že Přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele a výsledky Přejímacích zkoušek budou akceptovány jako přesné.

Opakování zkoušek	9.3	Jestliže Sekce, Dílo nebo část Díla neprojde Přejímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (Odmítnutí) a Ředitel výstavby nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se neúspěšné Zkoušky, a také Přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek a poměrů opakovaly.

Neúspěšné přejímací   
zkoušky  	9.4	Jestliže Sekce, Dílo nebo část Díla neprojde Přejímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude Ředitel výstavby oprávněn:
a)	nařídit další opakování Přejímacích zkoušek podle článku 9.3;
b)	jestliže neúspěch Přejímacích zkoušek zbavuje Objednatele v podstatě veškerého prospěchu ze Sekce, Díla nebo části Díla, odmítnout Sekci, Dílo nebo část Díla (podle okolností), a v tomto případě bude mít Objednatel stejné nápravné prostředky, jaké poskytuje odstavec (c) článku 11.4 (Neodstranění vad).
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (b), bude Zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností podle Smlouvy a Přijatá cena díla bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu. Pokud není odpovídající snížení uvedeno ve Smlouvě (nebo definována metoda jeho výpočtu), může Objednatel požadovat, aby snížení bylo (i) schváleno oběma stranami (tak, aby plně uhradilo pouze tento neúspěch) a zaplaceno před vydáním tohoto Protokolu o převzetí, nebo (ii) stanoveno a zaplaceno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a článku 3.5 (Rozhodování).

10   Převzetí objednatelem

Převzetí díla a 
částí díla             	10.1	S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přejímací zkoušky) bude Dílo převzato Objednatelem, (i) když bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Doba pro dokončení) a s výjimkou dovolenou v odstavci (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí.

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení Řediteli výstavby požádat o vydání Protokolu o převzetí ne dříve než 21 dnů před tím, než bude Dílo podle mínění Zhotovitele dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí pro každou Sekci.

Ředitel výstavby do 42 dnů poté, co obdržel žádost Zhotovitele:

a)	vydá Zhotoviteli Protokol o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo nebo Sekce dokončeno v souladu se Smlouvou. Ředitel výstavby je oprávněn převzít Dílo nebo Sekci i s ojedinělými menšími dosud nedokončenými pracemi a vadami, které podstatně samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní užívání Díla nebo Sekce k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena a tyto vady odstraněny). V případě převzetí Díla nebo Sekce s menšími dosud nedokončenými pracemi nebo vadami uvede Ředitel výstavby do Protokolu o převzetí výčet takovýchto nedokončených prací nebo vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto odstranit, nebo
b)	odmítne žádost, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí vydat. Zhotovitel poté tuto práci dokončí, než vydá další oznámení podle tohoto článku.
 
Převzetí části díla	10.2	Ředitel výstavby může, podle uvážení Objednatele, vydat Protokol o převzetí na kteroukoliv část Díla.

	Investor nebude užívat žádnou část Díla (kromě případu, že jde o dočasné opatření, které je buď stanoveno ve Smlouvě, nebo se na něm obě strany dohodnou), pokud a dokud Ředitel výstavby na tuto část nevydá Protokol o převzetí. Avšak jestliže Investor přece užívá některou část Díla před vydáním Protokolu o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku převzetí Objednatelem a/nebo užívání Části díla, s výjimkou případů, které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo s nimiž Zhotovitel vyjádřil souhlas, Zhotovitel (i) to oznámí Řediteli výstavby, a (ii) vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplacení veškerých těchto Nákladů, což bude zahrnuto do Ceny díla. Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat podle odstavce 3.5 (Rozhodování) a odsouhlasí nebo určí Náklady.

Překážky provedení 
přejímacích zkoušek	10.3 	Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 21 dnů (není-li v Technické specifikaci uvedena jiná doba) od data
	(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo
	(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,
	a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí
	
(i) dát Zhotovitel Řediteli stavby oznámení a
	(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Nároky zhotovitele] k:
	
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
	(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, které se zahrnou do Ceny díla.
	
Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Plochy vyžadující 
uvedení do původního
stavu                        	10.4     	Není-li v Protokolu o převzetí uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Protokol o převzetí potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

Předčasné užívání	10.5	Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle článku 1.1.3.11 [Doba pro uvedení do provozu]. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:
	(a) uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 42 dnů před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.11 [Doba pro uvedení do provozu];
	(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
	(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Investora.

11	   Odpovědnost za vady

Dokončení zbývajících 
prací a odstranění vad	11.1	Zhotovitel podpisem Smlouvy o dílo poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto dobu bude plně funkční a bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
	
	Zhotovitel dále odpovídá za všechny vady z vadného plnění, které má Dílo nebo jeho část od okamžiku vydání Protokolu o převzetí.

Dílo, Dokumentace zhotovitele, každá Sekce a každá část Díla musí být ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebení) k datu, kdy uplyne příslušná Záruční doba. Zhotovitel proto musí co nejdříve, jak je to možné:
a)	dokončit veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Protokolu o převzetí v přiměřené lhůtě podle pokynů Ředitele výstavby, přičemž za takovou práci se považuje i následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pokud povinnost provedení této činnosti vyplývá z Technické specifikace,
b)	provést veškeré opravné práce, rekonstrukce a odstranění vad a škod, které byly oznámeny Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) přede dnem nebo v den uplynutí příslušné Záruční doby,  
c)	předat Objednateli všechnu Dokumentaci zhotovitele včetně kompletní dokumentace skutečného provedení Díla a
d)	předat veškeré výše uvedené práce a dokumentaci protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).
Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to Zhotoviteli oznámeno Objednatelem nebo v jeho zastoupení.
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a převzetí Díla nebo v průběhu Záruční doby zjistí, že Dílo má vady, oznámit Zhotoviteli vady a uplatnit nároky z těchto vad, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistí či mohli zjistit a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách stanovených v souladu s těmito Podmínkami. 
Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, jakým způsobem zamýšlí vadu odstranit, je Objednatel oprávněn způsob odstranění vady Zhotoviteli určit spolu s termínem či lhůtou pro odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Ředitel výstavby bude do 14 dnů ode dne dokončení odstranění vady Díla postupovat v souladu s článkem 3.5 [Rozhodování], aby dohodl nebo určil, kdo odpovídá za tuto vadu. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 60 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla bez zbytečného odkladu a v odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu pro odstranění vady nestanoví, ani dodatečně, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě. 
Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou povinnost podle článku 4.26 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu].
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v níže uvedené délce:
(i) na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje v trvání 25 měsíců,
(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolaci proti vodě, izolací proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 121 měsíců,
(iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 61 měsíců, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. V případech, kdy je pro ostatní vady dle tohoto písm. c) uvedena Záruční doba jiná než 60 měsíců, se Záruční doba prodlužuje o 1 měsíc.
Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 25 měsíců ode dne vydání Protokolu o předání, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost v této delší době.
V případě, že Objednatel v Záruční době uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 25 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne vydání Protokolu o převzetí.

Záruční doba neběží také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vadu. Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli vadou dotčené Dílo po jejím odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Záruční doba neběží. Nemůže-li Objednatel nebo Investor pro vadu Díla užívat i jinou související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související část Díla.

V případě, že Zhotovitel nebude považovat požadavek Objednatele nebo jiné oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 6 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že Dílo má vady, písemně oznámit Objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí, jinak bude platit, že je požadavek Objednatele nebo jiné oprávněné osoby na odstranění vad oprávněný.
V případě, že je vada Díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se Zhotovitel dodat do 27 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z Ceny díla, je zcela v pravomoci Objednatele.
Náklady na odstranění
vad	11.2	Veškeré práce zmiňované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací a odstranění vad) budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:
a)	jakékoliv projektové dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,
b)	Zařízení, Materiálům nebo provedení, které nejsou v souladu se Smlouvou, nebo
c)	tomu, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst jiné příčině, bude to Zhotoviteli neprodleně oznámeno Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Postup při změnách). Zhotovitel se v takovém případě zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Prodloužení záruční
doby	11.3	Nemůže-li Investor pro vadu Díla užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související část Díla.

Neodstranění vad	11.4	Zhotovitel odstraní vadu či poškození v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě stanovené Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a pokud Objednatel (nebo v jeho zastoupení) dobu pro odstranění vady či poškození nestanoví, pak v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě.
	Jestliže Zhotovitel v této době vadu nebo poškození neodstraní, Objednatel může (podle vlastní volby):
a)	provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na náklady Zhotovitele, přičemž záruka Zhotovitele za jakost ani prodloužení Záruční doby dle příslušných ustanovení této kapitoly tím nejsou dotčeny; a Zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatí Objednateli náklady, které vznikly Objednateli při odstraňování vady nebo poškození;
b)	požadovat přiměřené snížení Ceny díla; nebo
c)	jestliže vada nebo poškození zbavuje Investora nebo Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo části Díla, odstoupit od Smlouvy jako celku, nebo ve vztahu ke kterýmkoliv částem Díla, které nemohou být užívány zamýšleným způsobem. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy nebo jiná, bude mít Objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celé Dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž Díla nebo jeho části, úklid Staveniště a navrácení Zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

Sjednání Zádržného podle těchto Podmínek se nedotýká práva Objednatele nezaplatit Zhotoviteli splatnou část Ceny díla ve výši, která by odpovídala jeho nároku na přiměřenou slevu z Ceny díla, jestliže by Zhotovitel neodstranil vady, které mu Objednatel oznámil.

V případě, že oznámená vada ohrožuje bezpečnost či plynulost železničního provozu, je nezbytné její neprodlené odstranění. V takovém případě jsou Objednatel či Investor oprávněni zajistit odstranění vady i jiným zhotovitelem nebo vlastní kapacitou, aniž by byli povinni poskytnout lhůtu pro odstranění vady Zhotoviteli a čekat na její uplynutí. Úhradu takto vynaložených nákladů na odstranění vady je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na základě jeho vyúčtování.

Odstranění vadné 
práce	11.5	Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti Zařízení, které jsou vadné nebo poškozené.  V tomto souhlasu je možno požadovat, aby Zhotovitel zvýšil hodnotu Zajištění splnění smlouvy o úplné náklady na výměnu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění. 

Další zkoušky	11.6	Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození ovlivnilo vlastnosti díla, může Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude oznámen do 42 dnů poté, co byla vada nebo poškození odstraněno. 

	Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad).

Právo na přístup	11.7	Neobsazeno.

Pátrání zhotovitele 
po příčině	11.8	Jestliže je o to Zhotovitel požádán Objednatelem, bude pod vedením Objednatele ve spolupráci s Objednatelem a Investorem pátrat po příčině vady. 

Protokol o provedení
díla	11.9  	Neobsazeno.
	
Nesplněné povinnosti	11.10	Neobsazeno.

Úklid staveniště	11.11	Do 7 dnů poté, kdy byl vydán Protokol o převzetí, Zhotovitel odstraní veškeré zbývající Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a Pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho předávanou část bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel se souhlasem Objednatele ponechat na Staveništi pouze ty stroje, Vybavení zhotovitele a Materiál, který potřebuje k odstranění vad, s nimiž Objednatel Dílo převzal a jež se Zhotovitel zavázal ve stanoveném termínu odstranit.

	Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 7 dnů poté, co byl vydán Protokol o převzetí, může Objednatel všechny zbývající položky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a uvedením Staveniště do původního stavu.

	Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady Objednatele, Zhotovitel uhradí tento rozdíl Objednateli.

Vada ovlivňující provoz
dráhy nebo drážní 
dopravy	11.12 	V případě, že se na Díle objeví vada, za kterou nese odpovědnost Zhotovitel a která ovlivňuje bezpečnost či plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit takovou vadu nejpozději do následujícího dne od okamžiku, kdy mu bude Objednatelem nebo Ředitelem výstavby oznámena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
	V případě, že Zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní a vadu neodstraní, použije se ustanovení článku 11.4 (Neodstranění vad) a Objednatel, Investor či jiná oprávněná osoba jsou oprávněni zajistit odstranění této vady na náklady Zhotovitele. Takto vzniklé náklady je Zhotoviteli povinen zaplatit na základě vyúčtování Objednatele. Takovýmto postupem Objednatele, Investora nebo jiné oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem ani prodloužení Záruční doby dle příslušných ustanovení této kapitoly.
Namísto postupu dle předchozího odstavce tohoto článku mohou Objednatel, Investor či jiná oprávněná osoba  v případě, že se na Díle objeví v průběhu Záruční doby vada, za kterou odpovídá Zhotovitel a která ohrožuje bezpečnost či plynulost provozování dráhy nebo drážní dopravy, zajistit odstranění vady i jiným zhotovitelem nebo vlastní kapacitou, aniž by byli povinni poskytnout lhůtu pro odstranění vady Zhotoviteli a čekat na její uplynutí. Úhradu takto vynaložených nákladů na odstranění takové vady je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli na základě jeho vyúčtování.

Oprávnění třetích 
osob	11.13	Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele.
	
	Objednatel je povinen Zhotoviteli oznámit skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit jiná oprávněná osoba.

	Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.

12	   Měření a oceňování

Měření díla	12.1	Dílo bude měřeno a oceňováno pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli Ředitel výstavby požádá o to, aby byla nějaká součást Díla změřena, bude to přiměřeným způsobem oznámeno Zhotoviteli, který:
a)	se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat Řediteli výstavby, a
b)	poskytne veškeré podrobnosti požadované Ředitelem výstavby.

Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle zástupce, bude měření provedené Ředitelem výstavby (nebo v jeho zastoupení) akceptováno jako přesné.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, kdykoli budou zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny Ředitelem výstavby. Zhotovitel se zúčastní prověření a odsouhlasí záznamy spolu s Ředitelem výstavby, když o to bude požádán, a podepíše je, bude-li s nimi souhlasit. Jestliže se Zhotovitel nezúčastní, budou záznamy přijaty jako přesné.

Jestliže Zhotovitel zkontroluje záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo je nepodepíše, potom Zhotovitel oznámí Řediteli výstavby důvody, které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení Ředitel výstavby zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení Řediteli výstavby do 7 dnů poté, co byl požádán, aby zkontroloval záznamy, budou záznamy akceptovány jako přesné.
 
Metoda měření          	12.2	Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak a nehledě na místní praxi:
a)	bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
b)	metoda měření bude v souladu s Výkazem výměr nebo jinými použitelnými dokumenty.

Oceňování	12.3	Není-li ve Smlouvě zejména ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr, uvedeno jinak, bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil Cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku.

	Příslušná sazba nebo cena za každou položku práce bude (v následujícím pořadí priority) (i) sazba nebo cena stanovená ve Smlouvě buď za tuto položku, nebo (není-li tam tato položka uvedena) (ii) určena Ředitelem výstavby stavby za podobnou práci na Stavbě, (iii) nebo je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS), platných ke dni uzavření Smlouvy a ponížená o 25 %. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta, (iv) nebo musí být určena Ředitelem výstavby podle Pod-článku 3.5 [Rozhodování] na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Řediteli výstavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Ředitele výstavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 2 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 2 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto článku mezi smluvními stranami za dohodnuté.

Vypuštění práce	12.4 	Ředitel výstavby může kdykoli vypustit jakékoli práce tvořící část Díla, a to zejména v případě, kdy tak učiní Investor, resp. Správce stavby. Vypuštění této práce tvořící část Díla bude mít (nebo má) za následek, že tento obnos netvoří část Ceny díla. 

13	   Variace a  úpravy

Právo na změnu	13.1	Variace může iniciovat Ředitel výstavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti Zhotoviteli, aby předložil návrh.

	Zhotovitel provede a bude vázán každou Variací, pokud okamžitě nepodá oznámení Řediteli výstavby, v němž uvede (spolu s podpůrnými argumenty), že nemůže ihned získat Vybavení zhotovitele nutné k Variaci. Při obdržení tohoto oznámení Ředitel výstavby pokyn zruší, potvrdí nebo změní. 
	Zhotovitel není oprávněn provést žádnou Variaci, pokud mu k tomu nevydá Ředitel výstavby pokyn nebo tuto změnu neschválí. Zhotovitel není dále oprávněn provést Variaci před tím, než bude tato Variace schválena Objednatelem v tzv. změnovém řízení. Taková Variace vyžaduje i změnu Smlouvy o dílo formou dodatku ke Smlouvě o dílo, nevydá-li Ředitel výstavby jiný pokyn. Zhotovitel není bez příslušného pokynu Ředitele výstavby oprávněn provést změnu před uzavřením tohoto dodatku.   

	Každá Variace může zahrnovat:
a)	změny v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých ve Smlouvě (tyto změny však nemusejí nutně znamenat Variaci ve smyslu této kapitoly),
b)	změny v kvalitě a jiných vlastnostech položky práce,
c)	změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech části Díla,
d)	vypuštění některé práce, Zařízení, Materiálu nebo služby,
e)	jakoukoliv dodatečnou práci, Zařízení, Materiály nebo služby nezbytné pro zhotovovací práce, včetně veškerých Přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů a dalších zkušebních a výzkumných prací.

Zhotovitel neprovede žádnou změnu, úpravu a/nebo modifikaci Díla, pokud a dokud Ředitel výstavby nevydá pokyn k Variaci nebo ji neschválí. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je podle Hlavní smlouvy o dílo Variace změnou závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí smluvní strany Hlavní smlouvy o dílo podepsat k dané Variaci změnový list. Do doby podpisu změnového listu smluvními stranami Hlavní smlouvy o dílo, nemohou být práce obsažené ve změnovém listu Zhotovitelem zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce obsahovat, Ředitel výstavby v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny během výstavby na výši Smluvní ceny (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení písemně a co nejdříve, jak je to možné od obdržení pokynu Ředitele výstavby ho předá Řediteli výstavby, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Ředitelem výstavby. Zhotovitel nemá nárok na žádnou dodatečnou platbu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

V případě, že Investor rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování].

V případě, že Investor rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle Právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit Objednateli nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Zhodnocení                	13.2	Zhotovitel může kdykoli předložit Řediteli výstavby písemný návrh, který (podle Zhotovitelova názoru), pokud bude schválen, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na realizaci a Investora na údržbu nebo provoz Stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené Stavby pro Investora nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele a Investora.

	Návrh bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat položky uvedené v článku 13.3 (Postup při změnách). 

	Jestliže návrh, který je schválen Ředitelem výstavby, zahrnuje změnu v návrhu části zhotovovacích prací, potom, nedohodnou-li se strany jinak:
a)	vyprojektování této části zajistí Zhotovitel, pokud Ředitel výstavby nevydá pokyn, aby tuto část vyprojektoval Zhotovitel,
b)	budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele). 

Postup při změnách	13.3	Jestliže Ředitel výstavby před vydáním pokynu k Variaci požádá Zhotovitele o předložení návrhu, Zhotovitel bez zbytečného odkladu žádost s uvedením důvodů odmítne nebo předloží Řediteli výstavby návrh, který bude obsahovat:
a)	popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a harmonogram jejich uskutečnění,
b)	návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy harmonogramu podle článku 8.3 (Harmonogram prací) a Doby pro dokončení a
c)	návrh Zhotovitele na ocenění Variace.
	
Po obdržení návrhu Zhotovitele jej Ředitel výstavby schválí, odmítne nebo k němu vyjádří své připomínky. Během čekání na odpověď nebude Zhotovitel odkládat žádné práce. Pokud Ředitel výstavby nabídku nebo návrh schválí a pokud jsou splněny i všechny ostatní podmínky pro provedení Variace, vydá Ředitel výstavby Zhotoviteli pokyn k jejímu provedení.

	Každý pokyn k provedení Variace se všemi požadavky na zaznamenávání Nákladů bude vydán Ředitelem výstavby Zhotoviteli, který potvrdí příjem.

	Každá Variace bude oceněna v souladu s kapitolou 12 (Měření a oceňování), nevydá-li Ředitel výstavby jiný pokyn nebo nerozhodne-li jinak v souladu s touto kapitolou.

Platba v použitelných
měnách	13.4 	Jestliže Smlouva předpokládá platbu ceny díla ve více než jedné měně, potom kdykoli je úprava dohodnuta nebo stanovena tak, jak je uvedeno výše, bude určena částka splatná v každé z použitelných měn. Pro tento účel bude připojena poznámka ke skutečnému nebo očekávanému poměru měn pro náklady na úpravu a k poměru různých měn určených pro platbu Ceny díla. 

Provizorní položky      	13.5	Neobsazeno.

Práce za denní sazbu	13.6	U prací menšího rozsahu nebo nahodilých prací může Ředitel výstavby vydat pokyn, aby byla Variace provedena na základě práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována v souladu s rozpisem prací za denní sazby, který je součástí Smlouvy a bude platit následující postup. Jestliže rozpis prací za denní sazby (seznam hodinových sazeb) není součástí Smlouvy, pak tento článek neplatí. 

	Dříve než Zhotovitel objedná Věci určené pro dílo, předá Řediteli výstavby předběžnou kalkulaci. Až bude žádat o zaplacení, předloží Zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky na veškeré Věci určené pro dílo.

	Kromě všech položek, pro něž rozpis prací za denní sazby uvádí, že platba není splatná, předá Zhotovitel Řediteli výstavby každý den přesný výčet, ve trojím vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:
a)	jména, profese a dobu práce Personálu zhotovitele,
b)	identifikaci, typ a čas použití Vybavení zhotovitele a Pomocných prací, a
c)	množství a typy použitých Zařízení a Materiálů.

Bude-li výčet správný, nebo až bude schválen, podepíše Ředitel výstavby jednu kopii každého výčtu a vrátí ji Zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží Řediteli výstavby výčet těchto zdrojů s uvedením cen, dříve než je zahrne do další žádosti podle článku 14.3 (Žádost o vydání potvrzení dílčí platby).

Úpravy v důsledku změn
legislativy	13.7	Přijatá cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení Nákladů vyplývající ze změn v Právních předpisech nebo ze soudních nebo oficiálních úředních výkladů těchto Právních předpisů, k nimž došlo po uzavření Smlouvy a která ovlivňují Zhotovitele při plnění povinností podle Smlouvy.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné Náklady v důsledku těchto změn v Právních předpisech po podpisu Smlouvy, Zhotovitel to oznámí Řediteli výstavby a vnikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

	Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo určil.

Upřesňování projektové 
Dokumentace pro 
provedení stavby	13.8	Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací.

14	   Cena díla a platební podmínky

Cena díla		14.1	Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:

a)	Cena díla bude stanovena dohodou nebo určena podle článku 12.3 (Oceňování) a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b)	Zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy a Cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým Nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy);
c)	veškerá množství, která jsou dána ve Výkazu prací nebo jiném souvisícím dokumentu, jsou množství odhadovaná (skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách Výkazu výměr, lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí Ředitele výstavby či jiného oprávněného zástupce Objednatele) a nemají být pokládána za skutečná a správná množství:
(i)	Díla, které má Zhotovitel realizovat, nebo
(ii)	pro účely kapitoly 12 (Měření a oceňování), 
d)	Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky tak, že již zahrnují náklady na pořízení všech Dokumentů zhotovitele a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných v Soupisu prací žádný nárok, a
e)	jakékoliv ve Výkazu výměr neoceněné práce, resp. položky Výkazu výměr oceněné nulovou hodnotou, nebudou Zhotoviteli uhrazeny. Má se za to, že ceny za tyto neoceněné položky jsou obsaženy v jiných jednotkových cenách Výkazu výměr.

Záloha	14.2	Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

Žádost o vydání 
potvrzení dílčí platby	14.3	Zhotovitel předá Řediteli výstavby ve čtyřech vyhotoveních a rovněž v elektronické formě (v uzavřené a otevřené formě *xml na kompaktním disku CD-R) Prohlášení do 25. dne příslušného měsíce ve formě schválené Ředitelem výstavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se Zhotovitel domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty.

	Prohlášení bude obsahovat následující položky a přílohy, tak jak to bude aplikovatelné, které budou vyjádřeny v měně Kč, v pořadí podle seznamu:
a)	odhadovaná smluvní hodnota provedeného Díla a Dokumentace zhotovitele vyhotovené do konce příslušného měsíce (včetně Variací, ale kromě položek popsaných v odstavcích (b) až (g) níže); 
b)	veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy);
c)	veškeré částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočtené tak, že se zádržné ve výši 10 % použije na celkovou sumu výše uvedených částek (limit zadržených částek není stanoven);
d)	veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení);
e)	odpočet částek potvrzených ve všech předchozích potvrzeních plateb;
f)	příloha - soupis zjišťovacích protokolů;
g)	příloha - zjišťovací protokol;
h)	příloha - soupis provedených prací a
i)	příloha - protokol o skutečné výměře provedených prací.

Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních dílů - Všeobecný objekt“ oceněny v Soupisu prací paušální cenou za celou položku a jestliže není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.

Harmonogram plateb	14.4	Jestliže Smlouva obsahuje harmonogram plateb určující splátky, v nichž bude zaplacena Přijatá cena díla, potom, nestanoví-li tento harmonogram jinak:
a)	platby uváděné v tomto harmonogramu plateb budou odhadované smluvní hodnoty pro účely odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o vydání potvrzení dílčí platby);
b)	článek 14.5 (Zařízení a materiály určené pro dílo) nebude platit; a
c)	jestliže tyto platby nejsou definovány ve vztahu ke skutečnému postupu dosaženému při provádění Díla a jestliže se zjistí, že skutečný postup je menší než ten, na němž byl založen tento harmonogram plateb, potom může Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil revidované platby, které zohlední míru, v níž je postup menší než postup, na němž byly platby založeny předtím.

	Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, předloží Zhotovitel Řediteli výstavby nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém kalendářním měsíci provádění Díla. První odhad bude předložen do 14 dnů po Datu zahájení prací. Harmonogram plateb bude navazovat na aktuální Hlavní harmonogram a podrobný harmonogram dle článku 8.3 (Harmonogram prací). Revidované odhady budou předkládány ve čtvrtletních intervalech a vždy, když se změní Hlavní harmonogram nebo podrobný harmonogram prací (článek 8.3 Harmonogram prací), nebo na žádost Ředitele výstavby až do vydání Protokolu o převzetí Díla.

Zařízení a materiály
určené pro dílo	14.5	 Dodávka Zařízení a Materiálů určených pro Dílo je součástí předmětu plnění a Ceny díla. Platby za jejich dodávku budou hrazeny v rámci úhrady Ceny díla a nebudou prováděny samostatně, ledaže Ředitel výstavby odsouhlasí nebo nařídí, že určité Zařízení nebo Materiály mohou být v rozsahu a za podmínek stanovených Ředitelem výstavby fakturovány samostatně (např. po naložení či po dodávce na Staveniště).

Vydání potvrzení 
dílčí platby	14.6	Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud Objednatel neobdrží a neschválí Zajištění splnění smlouvy. Potom Ředitel výstavby do 35 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů vydá Potvrzení dílčí platby, v němž se uvede částka, již Ředitel výstavby spravedlivě stanoví jako splatnou, spolu s podpůrnými podrobnostmi. 

	Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být ověřena z důvodu nedostatečných podkladových dokumentů, oznámí Ředitel výstavby tuto skutečnost spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Prohlášení. V takovém případě se
	(i)	k Prohlášení nepřihlíží; a
	(ii)	Zhotovitel je povinen předložit Řediteli výstavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Ředitel výstavby následně musí vydat Potvrzení dílčí platby, v němž je stanovena výše dílčí platby, kterou Objednatel na základě Prohlášení uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Prohlášení Ředitelem výstavby. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování Ředitelem výstavby. Plnění ve smyslu potvrzení dílčích plateb se považují za dílčí zdanitelná plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty.
	
	Z žádného jiného důvodu nebude Potvrzení dílčí platby odmítnuto kromě toho kdy:
a)	se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, cena této úpravy nebo náhrady může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo náhrada není dokončena, a/nebo
b)	Zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou a takto mu to bylo oznámeno, může Ředitel výstavby stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné dokud práce nebo povinnost není provedena.
	Zhotovitel
c)	je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla podle článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy],
d)	přes pokyn Ředitele výstavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci], nebo neplní jiné povinnosti dle Smlouvy,
e)	nepředloží na základě pokynu Ředitele výstavby ve stanoveném termínu aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],
f)	nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojištění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši 10 % z Potvrzení dílčí platby, a to opakovaně z kterékoli platby až do doby splnění dané povinnosti. V takovém případě Zhotovitel zašle Objednateli písemnou žádost o uvolnění spolu s podrobnosti. Objednatel zadrženou částku uvolní do 21 dnů po obdržení oprávněné písemné žádosti Zhotovitele.

Ředitel výstavby může v kterémkoliv Potvrzení platby provést změnu nebo modifikaci, která měla být správně provedena v některém předchozím Potvrzení platby. Nebude se mít za to, že Potvrzení platby znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost Ředitele výstavby.

Platba	14.7	Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku potvrzenou v každém potvrzení dílčí platby sníženou o 10 % zádržného do 90 dnů poté, co bude na adrese Objednatele pro doručování faktur (daňových dokladů), doručen příslušný daňový doklad. Částka je zaplacena odepsáním příslušné peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.
Platba splatné částky bude v souladu s článkem 14.15 (Měny platby) provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu - faktuře. Objednatel je oprávněn po Zhotovitelovi požadovat, aby mu Zhotovitel předložil písemné potvrzení banky o vlastnictví bankovního účtu, na který má být poukazována platby faktury.
	Daňové doklady - faktury Zhotovitel vystavuje dle vzoru a formátu předaných Ředitelem výstavby (existuje-li) a v souladu s instrukcemi k fakturaci předanými Ředitelem výstavby (existují-li). 
Každá faktura Zhotovitele bude obsahovat následující přílohy:
1.)	odpovídající Potvrzení dílčí platby,
2.)	soupis dosavadních zjišťovacích protokolů,
3.)	odpovídající zjišťovací protokol,
4.)	odpovídající soupis provedených prací a
5.)	odpovídající protokol o skutečné výměře provedených prací.
Všechny tyto přílohy musí být číslovány a datum na zjišťovacím protokolu a na protokolu o skutečné výměře musí být totožný. Z protokolů musí být jednoznačně zřejmé množství vykazované práce. Všechny měrné jednotky musí být zaokrouhleny na 3 desetinná místa a cena za měrnou jednotku musí být zaokrouhlena na 2 desetinná místa. V jednom objektu nesmí být dvě stejná čísla položek.
Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými Právními předpisy. Objednatel je oprávněn po Zhotovitelovi požadovat, aby mu Zhotovitel předložil podpisové vzory svých zástupců oprávněných podepisovat faktury. Před vystavením první faktury musí Zhotovitel předat Objednateli kopii dokumentu registrace plátce DPH.
	Každý daňový doklad musí být doručen na adresu Objednatele pro doručování faktur (daňových dokladů).
	Pokud daňový doklad výše uvedené náležitosti a přílohy splňovat nebude, je Objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel v tomto případě není v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit a Objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní Objednatelem uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu Zhotoviteli přestává Objednateli běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu.
	
	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí ani nezastaví žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	
	Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu § 1984 občanského zákoníku.

Opožděná platba	14.8	Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle Právních předpisů.

Platba zádržného a
záruka za 
odstranění vad   	14.9	Když byl Investorem (Správcem stavby) vydán Protokol o převzetí části Stavby, jehož je Dílo součástí, nebo pro celou Stavbu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ (podle toho, která skutečnost nastane dříve), bude Ředitelem výstavby, na písemnou žádost Zhotovitele, potvrzena Zhotoviteli k vyplacení první polovina z dosud zadržené částky. První polovina z dosud zadržené částky bude uhrazena do 77 dnů po obdržení písemné žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn Objednateli zaslat po vydání Protokolu o převzetí části Stavby, jehož je Dílo součástí, nebo pro celou Stavbu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ (podle toho, která skutečnost nastane dříve) Investorem (Správcem stavby).
	Do 35 dnů poté, co byl Investorem (Správcem stavby) vydán Protokol o převzetí části Stavby, jehož je Dílo součástí, nebo pro celou Stavbu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ (podle toho, která skutečnost nastane dříve), předloží Zhotovitel Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla dle článku 4.2.2. Podmínek. Do 77 dnů ode dne předložení Bankovní záruky za odstranění vad Díla Objednateli v sídle Objednatele, bude Ředitelem výstavby potvrzena Zhotoviteli k vyplacení zbývající část zádržného. 
	Žádná částka zbývající části zádržného nebude potvrzena ani vyplacena, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Pokud a dokud Zhotovitel Objednateli nepředá Bankovní záruku za odstranění vad Díla, bude se se zbývající částí zádržného zacházet jako se zárukou za odstranění vad.
	Na písemnou žádost Zhotovitele je Objednatel povinen mu sdělit datum, kdy byl Investorem (Správcem stavby) vydán Protokol o převzetí části Stavby, jehož je Dílo součástí, nebo pro celou Stavbu „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“.

Prohlášení o 
dokončení díla       	14.10	Do 14 dnů po obdržení Protokolu o převzetí části Díla předá Zhotovitel Objednateli ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě konečné vyúčtování s podpůrnými dokumenty podle článku 14.3 (Žádost o vydání potvrzení dílčí platby), které bude vyjadřovat:
a)	konečnou cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou k datu uvedenému v Protokolu o převzetí části Díla,
b)	veškeré další částky, které Zhotovitel považuje za splatné, a
c)	odhad veškerých dalších částek, o nichž se Zhotovitel domnívá, že se stanou jemu splatnými podle Smlouvy. Odhadované částky budou v tomto vyúčtování díla uvedeny odděleně.

	Ředitel výstavby poté vydá potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání potvrzení dílčí platby).

Žádost o vydání potvrzení 
konečné platby	14.11	Do 14 dnů po obdržení Protokolu o provedení Díla Zhotovitel předá Řediteli výstavby ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě návrh Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně vyjadřovat, ve formě schválené Ředitelem výstavby:
a)	cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou, a  
b)	veškeré další částky, které Zhotovitel považuje za jemu splatné podle Smlouvy nebo jinak.

	Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Ředitelem výstavby ověřena z důvodu nedostatečných podkladových dokumentů, musí Ředitel výstavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 35 dnů od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se
(i)	k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii)	Zhotovitel je povinen předložit bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podkladovými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Ředitel výstavby stavby následně vydá podle článku 14.13 [Žádost o potvrzení dílčí platby] Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

	Pokud se po diskusích mezi Ředitelem výstavby a Zhotovitelem a všech změnách v návrhu Závěrečného prohlášení, na nichž se dohodli, ukáže, že existuje nějaký rozpor, předloží Ředitel výstavby Potvrzení dílčí platby ke schváleným částem návrhu Závěrečného prohlášení Objednateli. Potom, jestliže je rozpor nakonec vyřešen podle kapitoly 20 [Nároky, spory a rozhodčí řízení], Zhotovitel připraví a předá Závěrečné prohlášení Objednateli.

Prohlášení 
o vyrovnání závazků	14.12	Při předání Závěrečného prohlášení Zhotovitel předá písemné prohlášení o vyrovnání závazků, v níž potvrdí, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné vyrovnání veškerých plateb splatných Zhotoviteli podle Smlouvy. V tomto prohlášení o vyrovnání závazků je možno uvést, že začne platit, až Zhotovitel obdrží Zajištění splnění smlouvy a zbylý zůstatek této celkové částky, v kterémžto případě prohlášení o vyrovnání závazků začne platit od tohoto data. 

Vydání potvrzení 
konečné platby	14.13	Do 42 dnů po obdržení Závěrečného prohlášení a písemného prohlášení o vyrovnání závazků v souladu s článkem 14.11 (Žádost o vydání potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Prohlášení o vyrovnání závazků), vydá Ředitel výstavby potvrzení konečné platby, v němž uvede:

a)	částku, která je splatná jako konečná, a
b)	po započtení Objednateli všech částek dříve zaplacených Objednatelem a všech částek, na něž má objednatel nárok, zůstatek (je-li) splatný Objednatelem Zhotoviteli nebo Zhotovitelem Objednateli, podle okolností.

	Jestliže Zhotovitel nepožádal o vydání Potvrzení konečné platby v souladu s článkem 14.11 (Žádost o vydání potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Prohlášení o vyrovnání závazků), je Ředitel výstavby oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže Zhotovitel nepodá žádost do 14 dnů, Ředitel výstavby vydá Potvrzení konečné platby na takovou částku, kterou spravedlivě stanoví jako splatnou. 
	Kopii Potvrzení konečné platby vydá Ředitel výstavby bezodkladně Zhotoviteli, aby v souladu s ním (případně podle okolností) připravil a předal Objednateli daňový doklad pro uskutečnění případné platby podle článku 14.7 (Platba).

Ukončení závazků 
objednatele	14.14	Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla s výjimkou případů (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování; Objednatel však není odpovědný za záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Protokolu o převzetí Díla.

Měny platby	14.15	Cena díla bude zaplacena v měně koruna česká.

15	Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Výzva k nápravě	15.1	Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Ředitel výstavby nebo Objednatel prostřednictvím oznámení vyzvat Zhotovitele, aby takové neplnění uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené lhůtě.

Odstoupení od smlouvy 
ze strany 
objednatele	15.2	Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených Právními předpisy a dále jestliže Zhotovitel:

a)	nevyhoví článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) nebo článku 14.9 (Platba zádržného a záruka za odstranění vad) nebo nesplní výzvu podle článku 15.1 (Výzva k nápravě),
b)	opustí Dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v konání svých povinností podle Smlouvy,
c)	bez rozumné omluvy:
(i)	nepokračuje v Díle v souladu s kapitolou 8 (Počátek prací, zpoždění a přerušení prací), nebo
(ii)	nesplní výzvu vydanou podle článku 7.5 (Odmítnutí) nebo článku 7.6 (Opravné práce) do 14 dnů po jejím obdržení,
d)	bez požadovaného souhlasu zadá celé Dílo nebo jeho část jako subdodávku nebo postoupí Smlouvu,
e)	smluvní vztah na zhotovení stavby mezi Objednatelem a Investorem či jeho část zanikl nebo předmět Díla Zhotovitele či jeho část přestal být předmětem stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)",
f)	je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo
g)	poskytne nebo nabídne poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou cennou věc jako stimulaci nebo odměnu:
(i)	za to, že udělá nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou, nebo
(ii)	za to, že projeví nebo se zdrží projevení přízně nebo nepřízně nějaké osobě v souvislosti se Smlouvou,
nebo pokud někdo z Personálu, zmocněnců nebo Podzhotovitelů Zhotovitele poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu stimulaci nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (g). Přitom legální platby a odměny Personálu zhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy.
h)	nedodržuje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci Investora nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek;
i)	nepostupuje v souladu s článkem 4.4 [Podzhotovitelé];
j)	nepostupuje v souladu s kapitolou 11 [Odpovědnost za vady] a neodstraní řádně a včas vadu Díla; a
k)	nepředloží do Data zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou Právními předpisy, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

	Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může Objednatel potom, co dá sedm dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e), (f) nebo (g) může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

	Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy neruší žádné jiné právo Objednatele podle Smlouvy nebo jiné.

	Zhotovitel poté opustí Staveniště a předá Řediteli výstavby veškeré požadované Věci určené pro dílo, veškerou Dokumentaci zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla.

	Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo sám a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškeré Věci určené pro dílo, Dokumentaci zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

	Objednatel poté vydá oznámení, že Vybavení zhotovitele a Pomocné práce budou vydány Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla provedena Zhotovitelem některá platba splatná Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány pro krytí této platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplacen Zhotoviteli. 

Ocenění k datu 
odstoupení	15.3	Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele) vstoupilo v účinnost, bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo stanovil hodnotu částí Díla již provedených v souladu se Smlouvou, Vybavení zhotovitele a Dokumentace zhotovitele a veškeré další částky splatné Zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou.

Platba po odstoupení	15.4	Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele) nabylo účinnost, může Objednatel:
a)	postupovat v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele),
b)	odmítnout další platby Zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny náklady na provedení prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, smluvní pokutu, odškodnění za zpoždění a náhradu škody za zpoždění při dokončení (došlo-li k němu) a všechny další náklady způsobené Objednateli, a/nebo
c)	získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty, které utrpěl Objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení Díla po započtení všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15.3 (Ocenění k datu odstoupení). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty a mimořádné výdaje vyplatí Objednatel zůstatek Zhotoviteli.

V rámci zůstatku má Zhotovitel právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů vzniklých mu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy.  Seznam prokazatelných Nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel podle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen Ředitelem výstavby.

Právo na úhradu Nákladů uplatní Zhotovitel u Objednatele do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Nárok objednatele
na odstoupení	15.5	Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv podle svého uvážení tak, že toto odstoupení oznámí Zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v platnost 14 dnů po pozdějším z dat, kdy buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy. 

	Po tomto odstoupení bude Zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele) a bude mu zaplaceno v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění).

16	Přerušení nebo odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

Oprávnění zhotovitele
přerušit práci	16.1	Jestliže Ředitel výstavby nevydá potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání potvrzení dílčí platby) nebo Objednatel neplní článek 14.7 (Platba), může Zhotovitel poté, co to nejméně 28 dnů předem oznámil Objednateli, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud Zhotovitel neobdrží potvrzení platby nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.

	Tento krok nijak neomezuje nárok Zhotovitele podle článku 14.8 (Opožděná platba) a na odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele). 
	Jestliže Zhotovitel následně obdrží toto potvrzení platby nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném článku a ve výše uvedeném oznámení), dříve než vydá oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je to prakticky možné.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá Zhotovitel Řediteli výstavby oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

	Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupení od 
Smlouvy ze strany
zhotovitele		16.2	Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:
a)	Ředitel výstavby nevydá příslušné potvrzení platby do 63 dnů poté, co obdržel Prohlášení a podpůrné dokumenty,
b)	Zhotovitel neobdrží splatnou částku podle potvrzení dílčí platby do 63 dnů od vypršení lhůty uvedené v článku 14.7 (Platba), do níž má být platba provedena (s výjimkou odpočtů podle článku 2.5 (Nároky objednatele)),
c)	Objednatel podstatným způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy,
d)	Objednatel neplní ustanovení článku 1.7 (Převod práv)
e)	se přerušení prací týká celého Dílo, tak jak je popsáno v článku 8.11  (Prodloužení přerušení).

	Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může Zhotovitel po tom, co dá 21 dnů předem oznámení Objednateli odstoupit od Smlouvy. 

	Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy neruší žádné jiné právo Zhotovitele ani Objednatele podle Smlouvy nebo jiné.

Ukončení prací
a odstranění vybavení
zhotovitele	16.3	Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.5 (Nárok objednatele na odstoupení), článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění) nabylo účinnosti, Zhotovitel okamžitě:
a)	přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Ředitel výstavby pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla,
b)	předá Dokumentaci zhotovitele, Zařízení, Materiály a další práce, za něž obdržel platbu, 
c)	odstraní ze Staveniště veškeré další Vybavení zhotovitele, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště, a
d)	vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal, včetně nezabudovaného vyzískaného materiálu.

Platba při odstoupení	16.4	Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nabylo účinnosti, Objednatel neprodleně:
a)	vrátí Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy,
b)	zaplatí Zhotoviteli v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění), a
c)	uhradí Zhotoviteli prokázanou skutečnou škodu, která Zhotoviteli nepředvídatelně vznikla v důsledku tohoto odstoupení.

17	Riziko a odpovědnost

Náhrady škod	17.1	Zhotovitel odškodní Objednatele, Personál objednatele a jejich zmocněnce, Investora a Personál investora a třetí osoby a zajistí, aby jim nevznikla újma, v případě jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně právních poplatků a výdajů) pokud: 
a)	souvisejí s tělesným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí, k nimž došlo v důsledku nebo z důvodu projektových prací Zhotovitele (jsou-li), provádění a dokončování Díla nebo opravy jakýchkoliv vad, pokud nevznikly opomenutím, úmyslně nebo porušením ustanovení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jejich zmocněnci, Investorem nebo Personálem investora či třetími osobami, a
b)	souvisejí se zničením nebo ztrátou jakéhokoliv majetku, společného či soukromého (jiného než Dílo) do té míry, kdy takové zničení nebo ztráta
(i)	vzniká z důvodu projektových prací Zhotovitele (jsou-li), provádění a dokončování Díla nebo opravy jakýchkoliv vad,
(ii)	je způsobeno zanedbáním, úmyslně nebo porušením Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jejich zmocněnci nebo kýmkoliv jimi přímo či nepřímo zaměstnaným,
(iii)	odpovídá částkám, které budou Objednateli nebo Investorovi ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností nebo finančním částkám, které na Objednateli uplatnila jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností, a to zejména ale nikoliv výlučně škodu, která vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla.

	Objednatel odškodní Zhotovitele, Personál zhotovitele nebo jejich zmocněnce za všechny nároky, škody, ztráty a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) pokud souvisejí s tělesným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí, vzniklých v důsledku opomenutí, úmyslně nebo porušením ustanovení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jejich zmocněnci.

Péče zhotovitele
 o dílo	17.2	Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Vybavení zhotovitele od Data zahájení prací až do data, kdy je vydán Protokol o převzetí Díla podle článku 10.1 (Převzetí díla nebo částí díla), kdy odpovědnost za péči o Dílo přejde na Objednatele. Jestliže je Protokol o převzetí díla vydán pro Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o část Díla nebo Sekci přechází na Objednatele.

	Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na Objednatele, bude Zhotovitel odpovídat za péči o veškeré práce, které zbývá vykonat ke dni uvedenému v Protokolu o převzetí díla, dokud Ředitel výstavby nestanoví, že zbývající práce byly dokončeny.

	Jestliže Dílo, Vybavení zhotovitele nebo Dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (Rizika objednatele), Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví, tak aby Dílo, Vybavení zhotovitele a Dokumentace zhotovitele odpovídaly Smlouvě.

	Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv činností Zhotovitele poté, co byl vydán Protokol o převzetí díla. Též bude odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví po vydání Protokolu o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích událostí, za něž byl Zhotovitel odpovědný.

Rizika 
objednatele	17.3	Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17.4, jsou:
a)	válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b)	rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, to vše v České republice,
c)	výtržnost, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinými osobami než je Personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d)	válečná munice, explosivní materiály, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou v zemi Stavby, pokud nebyla způsobena tím, že takovou munici, výbušniny, záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e)	tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f)	použití nebo zabrání části zhotovovacích prací Investorem, kromě případů popsaných ve Smlouvě,
g)	projekt některé části Díla vypracovaný personálem Objednatele, Investora nebo jinými osobami, za něž odpovídá Objednatel, 
h)	veškeré procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze rozumně očekávat, že proti nim zkušený zhotovitel podnikne preventivní opatření, a
i)	ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle článku 10.5 [Předčasné užívání].

Výše uvedené skutečnosti se za rizika objednatele považují pouze v případě, že nastanou v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění díla nebo s ním budou jinak souviset.

Důsledky rizik 
objednatele	17.4	Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17.3 vedou ke ztrátám nebo poškození Díla, Vybavení zhotovitele nebo Dokumentace zhotovitele, oznámí to Zhotovitel okamžitě Řediteli výstavby a napraví tuto ztrátu nebo poškození v rozsahu požadovaném Ředitelem výstavby.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo Náklady v důsledku nápravy této ztráty nebo poškození, předá Zhotovitel Řediteli výstavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
b)	uhrazení veškerých těchto Nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla. 

	Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Duševní a průmyslová
vlastnická práva	17.5.1	Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli a Investorovi.

	17.5.2	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a tímto poskytuje Objednateli a Investorovi bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele nebo Investora zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně jakoukoliv vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel nebo Investor začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel nebo Investor oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

	17.5.3	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout a poskytuje Objednateli a Investorovi bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

	17.5.4	Neobsazeno.

	17.5.6	Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady, včetně náhrady škody, která Objednateli nebo Investorovi vznikne plněním požadavku třetích osob za neoprávněné využívání práv podle článků 17.5.2, 17.5.3 a 17.5.4.

17.5.6	V tomto článku "porušení" znamená porušení (nebo údajné porušení) některého patentu, registrovaného projektu, copyrightu, ochranné známky, obchodního jména, obchodního tajemství nebo jiných práv na duševní vlastnictví souvisejících s dílem; a "nárok" znamená nárok (nebo postup při uplatňování nároku) při obvinění z porušení.

	Kdykoli Ředitel výstavby neoznámí nárok Zhotoviteli do 35 dnů či Zhotovitel Řediteli výstavby do 21 dnů po obdržení nároku, bude se mít za to, že se první strana vzdala veškerých práv na odškodnění podle tohoto článku.

	Objednatel odškodní Zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě veškerých nároků při obvinění z porušení, které je nebo bylo:
a)	nevyhnutelným důsledkem toho, že Zhotovitel plnil Smlouvu, nebo
b)	výsledkem toho, že Dílo bylo využito Objednatelem či Investorem:
(i)	pro jiný účel, než jaký byl uveden nebo než jaký mohl být přiměřeně odvozen ze Smlouvy, nebo
(ii)	ve spojení s nějakou věcí nedodanou Zhotovitelem, pokud nebylo takové využití sděleno Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy nebo není uvedeno ve Smlouvě.

	Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě jakýchkoli nároků ve smyslu této kapitoly.

	Jestliže má strana právo na odškodnění podle tohoto článku, povede odškodňující strana (na své náklady) jednání vedoucí k vyřešení nároku a všechny soudní spory nebo rozhodčí řízení, které z toho vyplynou. Druhá strana se bude, na požádání a náklady odškodňující strany, účastnit na napadení nároku. Tato druhá strana (a její personál) neučiní žádné prohlášení, které by mohlo poškodit odškodňující stranu, pokud odškodňující strana nezanedbala vedení nějakého jednání, soudního sporu nebo rozhodčího řízení, když k tomu byla druhou stranou vyzvána.

Omezení 
odpovědnosti	17.6	Žádná ze stran nebude odpovědná druhé straně za ušlý zisk, ztrátu nějaké jiné smlouvy o dílo nebo za jinou nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která druhé straně vznikne v souvislosti se Smlouvou. To se netýká článku 16.4 (Platba při odstoupení) a článku 17.1 (Náhrady škod). 

	Tento článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé nedbalosti spáchané provinilou stranou. 

18	Pojištění

Všeobecné požadavky
na pojištění	18.1	Zhotovitel i Objednatel mají právo uzavírat pojistné smlouvy (pro takto uzavřené pojistné smlouvy je pak příslušná smluvní strana dále pojišťující Stranou) dle ujednání článků níže.

	Jestliže se požaduje, aby pojistná smlouva odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit pro každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého ze společně pojištěných. Jestliže pojistná smlouva odškodňuje kromě Zhotovitele či Objednatele také dodatečné společně pojištěné (zejména Podzhotovitelé Zhotovitele), pak (i) tito dodateční společně pojištění nesmí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý styk s pojistitelem a (ii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistné smlouvě.

	Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Ředitele výstavby nebo Objednatele bez zbytečného prodlení, předložit Řediteli výstavby nebo Objednateli:
	
	(a)	důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v této kapitole, jsou v platnosti a
	(b)	kopie příslušných pojistných smluv.

	Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené dle článků níže pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

	Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat,  nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními této kapitoly a jeho článků, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu předložených pojistných smluv) dle této kapitoly a jejich článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné pojistné. Zhotovitel musí zaplatit částku v hodnotě tohoto pojistného Objednateli.

Pojištění díla a vybavení 
zhotovitele		18.2	Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, Zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit  jako  věc stejnou  nebo  novou, stejného  druhu  a účelu (dále jen Pojištění díla“) s pojistným plněním minimálně ve výši Přijaté ceny díla.

	Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:
-	pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks)
-	pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
-	pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
-	pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
-	pojištění okolního majetku
-	pojištění převzatého majetku od Objednatele
-	pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti
-	pojištění křížové odpovědnosti Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů
-	pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Investor, Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.
-	maximální spoluúčast ve výši 100 000,- Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
(a)	že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(b)	že  pojistné  plnění,  vztahující  se  k  budovanému  Dílu,  bude  ve  prospěch  Objednatele vinkulováno.	

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Pojištění proti zranění osob
a škodám
na majetku	18.3	Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne  Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v  souvislosti s realizací Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti.
	Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadami Dokumentace zhotovitele. 
	Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé podle Smlouvy.
	Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
	Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
	Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
	V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.

Pojištění 
zaměstnanců	18.4	Neobsazeno.

19	Vyšší moc

Definice vyšší 
moci 	19.1  V této kapitole "Vyšší moc" znamená výjimečnou událost nebo  okolnost:
(a)	kterou smluvní strana nemůže ovládat,
(b)	proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
(c)	které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a 
(d)	kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující výjimečné události a okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):
(i)	válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
(ii)	rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
(iii)	výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je Personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
(iv)	válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil nebo vyvolal Zhotovitel,
(v)	přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, tajfun nebo vulkanická činnost,
(vi)	zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy.

	Výše uvedené skutečnosti se za vyšší moc považují pouze v případě, že nastanou v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění díla nebo s ním budou jinak souviset.

Oznámení vyšší 
moci	19.2	Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy Vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří Vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dáno do 7 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod Vyšší moci.  
	
Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění.

	Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platby druhé straně podle Smlouvy kromě doby splatnosti povinné částky. 

Povinnost minimalizovat
zpoždění	19.3	Každá ze stran vždy vyvine veškeré potřebné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy vzniklé v důsledku Vyšší moci.

	Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna Vyšší mocí. 

Následky vyšší
moci	19.4	Jestliže Zhotoviteli brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy Vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci) a vznikne mu zpoždění a/nebo Náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit,  vzniknou Zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a)	prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
b)	úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podání oznámení podle článku 19.2 [Oznámení o vyšší moci].

	Po obdržení tohoto oznámení bude Ředitel výstavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Vyšší moc ovlivňující
podzhotovitele          	19.5 	Jestliže kterýkoli z Podzhotovitelů je oprávněn podle jakékoliv smlouvy, vztahující se k Dílu být uvolněn z důvodů vyšší moci dodatečných nebo širších než je specifikováno v této kapitole, tyto dodatečné nebo širší skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezbaví Zhotovitele jeho povinností nebo jej neopravňují ke zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupení,
platba a uvolnění	19.6	Jestliže brání Vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci), provádění v zásadě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou dobu 91 dnů, nebo po opakující se období které vcelku činí více než 154 dní ze stejného důvodu oznámené Vyšší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné dle uvážení Objednatele okamžitě, nebo 7 den po předání oznámení, a Zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele).

	Při takovém odstoupení může Ředitel výstavby stanovit hodnotu vykonané práce a vydat potvrzení platby, které bude obsahovat:
a)	částky splatné za veškeré uskutečněné práce, jejichž cena je uvedena ve Smlouvě;
b)	náklady na Zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly dodány Zhotoviteli a jejichž objednávku nelze zrušit, nebo jejichž dodávku je Zhotovitel povinen přijmout a není možno se této povinnosti zprostit: tato Zařízení a Materiály se stanou vlastnictvím (a rizikem) Objednatele, až za ně Objednatel zaplatí, a Zhotovitel je dá Objednateli k dispozici;
c)	veškeré další Náklady nebo závazky, které důvodně vznikly Zhotoviteli za předpokladu dokončení Díla;
d)	Náklady na odstranění pomocných prací a Vybavení zhotovitele ze Staveniště a navrácení těchto položek do provozovny Zhotovitele v zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší); a
e)	náklady na repatriaci zaměstnanců a dělníků Zhotovitele, kteří byli k datu odstoupení plně zaměstnáni ve spojení s Dílem.

Výsledná částka, která má být Zhotoviteli zaplacena podle tohoto článku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění] nesmí v souhrnu překročit Cenu díla.

Uvolnění z plnění
podle zákona	19.7	Nehledě na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vymykající se kontrole stran (včetně Vyšší moci, ale neomezující se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich smluvních povinností nebo je činí nezákonným, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva, opravňuje strany, aby byly uvolněny z dalšího plnění Smlouvy, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:
a)	budou strany zbaveny dalšího plnění, aniž by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy, a
b)	částka splatná Objednatelem Zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění), kdyby byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6.

20	  Nároky, spory a ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitele	20.1	Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení Doby pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy, oznámí to Zhotovitel Řediteli výstavby s popisem skutečností nebo okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dáno jak nejdříve je to možné, ale ne později než 21 dnů po tom, co se Zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti. 
	V oznámení podle předchozího odstavce musí Zhotovitel uvést jednotlivé druhy nároků, které oznamuje, a to vždy s uvedením ustanovení Smlouvy, podle něhož mu každý z oznamovaných nároků měl vzniknout.	
Dodržení postupu podle předchozích dvou odstavců tohoto článku 20.1 [Nároky zhotovitele] je podmínkou vzniku nároku na prodloužení Doby dokončení a jakéhokoliv nároku na dodatečnou platbu. 
	Zhotovitel také předloží ostatní oznámení vyžadovaná Smlouvou a podporující důvody pro nárok, vše vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti.
	Zhotovitel bude uchovávat veškeré průběžné záznamy, které by mohly být důležité pro zdůvodnění nároku, a to buď na Staveništi, nebo na jiném místě, přijatelném pro Ředitele výstavby. Aniž by se tím Objednatel zavazoval, může Ředitel výstavby poté, co obdržel oznámení podle tohoto článku, monitorovat vedení záznamů a/nebo vydat Zhotoviteli pokyn, aby vedl další průběžné záznamy. Zhotovitel umožní Řediteli výstavby, aby prověřil všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán předá Řediteli výstavby jejich kopie.

	Do 35 dnů poté co se Zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Ředitelem výstavby, předloží Zhotovitel Řediteli výstavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podpůrnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení doby a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže má událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, přetrvávající účinek:
a)	tento zcela podrobný nárok bude pokládán za předběžný;
b)	Zhotovitel bude zasílat další předběžné nároky v měsíčních intervalech; udá v nich nashromážděné zpoždění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být Ředitelem výstavby požadovány; a
c)	Zhotovitel zašle konečný nárok do 21 dnů po skončení důvodů, vyplývajících ze skutečností či okolností, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Ředitelem výstavby. 
	Nevyplývá-li nárok ve smyslu tohoto článku 20.1 [Nároky zhotovitele] z události nebo okolnosti, která má přetrvávající vliv, platí, že jakékoli nároky uplatněné v oznámení claimu jsou úplné a Zhotovitel nemá nárok na jakékoli následné rozšíření těchto nároků, které by znamenalo, že na základě nároku má být, ve srovnání s původním oznámením, prodloužena Doba pro dokončení o delší časový úsek nebo že má být poskytnuta jakákoli platba ve vyšším rozsahu nebo že má být poskytnuta dosud nepožadovaná platba.
Do 56 dnů po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podporujících předchozí nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena Ředitelem výstavby a schválena Zhotovitelem, zareaguje Ředitel výstavby souhlasem nebo nesouhlasem s podrobným komentářem. Může si také vyžádat nutné další podrobnosti, avšak musí dát své stanovisko k podstatě nároku v daném čase.
Jestliže Ředitel výstavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto článku, jakákoli ze smluvních stran může považovat tento nárok za odmítnutý Ředitelem výstavby a jakákoli ze smluvních stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení kapitoly 20.	
	Každé potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněny podle příslušných ustanovení Smlouvy. Pokud a dokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, má Zhotovitel nárok pouze na zaplacení té části nároku, kterou byl schopen doložit.
Ředitel výstavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení doby pro dokončení (před jejím vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká), na níž má Zhotovitel nárok podle Smlouvy. Při rozhodování o nároku Zhotovitele Ředitel výstavby přihlédne k tomu, zda Zhotovitel neporušil svoji povinnost postupovat při provádění díla s odbornou péčí a dále přihlédne ke stanovisku Správce stavby.
	Požadavky tohoto článku se přidají k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném článku, který se na nárok vztahuje. Pokud Zhotovitel nesplní tento nebo jiný článek v souvislosti s nárokem, při posouzení prodloužení doby pro dokončení a/nebo dodatečné platby se vezme v úvahu rozsah (pokud existuje), v němž takové nesplnění bránilo v řádném vyšetření nároku, pokud nárok není vyloučen podle tohoto článku.
Zhotovitel bere na vědomí, že Ředitel výstavby se při jednání a rozhodování (především podle článku 3.5 OP) vedle Smlouvy přihlédne i k Právním předpisům (zejména k Metodice pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020, Metodice pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018 a k Metodice pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1.vydání, leden 2018).

Smírné narovnání	20.2		Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu Smlouvy. Jestliže mezi stranami vznikne v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním díla jakýkoliv spor, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení ředitele výstavby, pokusí se nejprve daný spor vyřešit smírně. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu budou nejdříve jednat na základě výzvy jedné smluvní strany druhé, přičemž se zástupci vedení smluvních stran sejdou do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné smluvní strany druhé na dohodnutém místě.

Rozhodčí doložka	20.3		Neobsazeno.