DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17.8.2022
I.
Smluvní strany
l.
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
zastoupena:	ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:, provozně-technický náměstek
manažer investic
IC:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu: tel.:
008 44 896 CZ00844896. 

596 491 111
e-mail:	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „objednatel")
2. Obchodní firma
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
DRŽIK s.r.o.

286 57 454
CZ 286 57 454

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět dodatku
1.	„Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení44 Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016693
2.	Předmětem tohoto dodatku jsou více práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.8.2022, hlava V. bod 3. písmeno b, c. Podrobné rozpisy více práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín dohotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. Bod 5. a bod 11.
III.
Nová smluvní cena
1.	Smluvní cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.l bez DPH	16 928 639,00 Kč
2.	Více práce bez DPH (viz příloha)	990 983,92 Kč
3.	Méně práce bez DPH (viz příloha)	323 114,12 Kč
4.	Nová smluvní cena bez DPH
17 596 508,80 Kč

IV.
Nový termín plnění
1. Z důvodu provedení víceprací dle přílohy č.l. a přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky se prodlužuje termín dokončení díla o 94 dní viz. zápisy ve stavebním deníku.
V.
Závěrečná ujednání
1.	Změnit nebo doplnit tento dodatek č.3 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2.	Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3.	Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
9.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis více prací
V Havířově dne: 20.7.2023	V Ostravě dne: 20.7.2023
za objednatele
za zhotovitele
2