CETIN a.s.  
  
Souhrnný pohled XXXX
Rozhodnutí dosud neprovedeno.
stupeň - Startovací dokumentace	
  
INVESTIČNÍ AKCE  

Kategorie	  TN - Přenosová síť	
Podkategorie  	Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopù	
Číslo SAP	  	
Číslo interní	  66601/23/0011	
    Schvalování akce	    2-kolové schvalování	  
  Název	  	
VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO461  	

  
  
Budoucí uživatel	  GMo-ZLOS xxxxxx xxxxx		
Zpracovatel		Xxxxxx xxxxxxxx	
			
Předkladatel	role: Vedoucí	Xxxxxx xxxxxx	  
  	role: Manažer	Xxx xxxx	  
Schvaluje			
		Xxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx

Obsah:

1.	Identifikační údaje stavby
1.1.	Krycí list
1.1.1.	Základní identifikační údaje projektu
1.1.2.	Stručný popis technického řešení
1.1.3.	Požadavky
1.2.	Základní údaje o projektu
1.2.1	Identifikační údaje
1.2.2	Kapacitní údaje
1.2.3	Rekapitulace nákladů
1.2.4	Termíny

2.	Účel a zdůvodnění stavby
2.1.	Stručný popis technického řešení
2.2.	Poznámka
2.3.	Podmiňující, související a navazující stavby
2.4.	Vyjádření a záznamy
2.5.	Průběh schvalování

3.	Přílohy

1.	Identifikační údaje stavby
 
1.1. 	Krycí list 
1.1.1. 	Základní identifikační údaje projektu
  Název projektu:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prùm.pl.SO461	  
    SPP:				  
Investiční kategorie:	2	Podkategorie:	  1	
  Příprava od:	01.05.2023	do:	30.12.2023	  
Realizace od:	15.01.2024	od:	28.02.2026	    
    Nabídka k přejímce(RFA):	30.01.2026	  
    Zodpovědná osoba:	Xxxxx xxxxxx	
   
1.1.2. 	Stručný popis technického řešení
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Zahradní, Polní a Krnovská v Bruntále je nutno realizovat překládku SEK. Jedná se o vynucenou překládku.

Zpracováno CTN (malé) - bude následovat PD. 
ÚR - vyřídí zákazník.
VBŘ - vyřídí CETIN.
Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.
Vytýčení hranic pozemků - zákazník.

Termín CTN - do 30. 3. 2023, CTN konzultovat.	
Náklady na realizaci:	PD	VBŘ	INRC	INC	
	 0	 0	 0	 0	
Technické řešení schválil:		
Datum, podpis:		
 
1.1.3. 	Požadavky
Název polygonu:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO461	

K akci nejsou evidovány žádné požadavky	

1.2. 	Základní údaje o projektu 
1.2.1. 	Identifikační údaje:
Název:	VPIC Bruntál,Zahradní,zpří.prům.pl.SO461	
Kategorie:	2	
Podkategorie:	1.Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopů	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX	
Číslo intern  í:	66601/23/0011	
Prvek SPP:		
ABC:	C	  
HOST:	HOST - Bruntál(Dr. E. Beneše)-HOST646	
  ATÚ:	HOST - Bruntál(Dr. E. Beneše)-HOST646	
 
1.2.2. 	Kapacitní údaje: 
    	    	Průměrný náklad na:	
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů:	 0 km			              
100800_Délka HDPE trubek pro OK:	 0 km			              
101300_Délka trubiček:	 0 km			              
101000_Délka optických kabelů:	 0 km			              
Délka optických vláken:	 0 km			              
100900_Počet bytových domů:	 0 BD			              
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech:	 0 bj			              
100500_Počet rodinných domů:	 0 RD			              
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech:	 0 bj			              
OK MiDia 12vl,DC:	 0 km			              
OK 24vl. s Cu párem Sterlite:	 0 km			              
Kabel optický 24vl. dial Sterlite:	 0 km			              
OK 48vl. s Cu párem Sterlite:	 0 km			              
OK DuctSaver FX 96vl, 9,1mm:	 0 km			              
OK MiDia 96vl, Cu 10,5 mm:	 0 km			              
Kabel opt.LT MiDia GX,96vl.AWFlex 6,3mm CU:	 0 km			              
OK DuctSaver 144vl, DC:	 0 km			              
OK Sterlite 144vl,Cu:	 0 km			              
OK MiDia 2FX 144vl., DC 6,3mm :	 0 km			              
OK DuctSaver 288vl,DC :	 0 km			              
OK DuctSaver 576vl,DC :	 0 km			              
OK 12vl.AW 2xribb.:	 0 km			              
OK 24vl.AW 4xribb.:	 0 km			              
OK 48vl.AW 8xribb.:	 0 km			              
Mikrokabel FU 2f:	 0 km			              
Mikrokabel FU 6f:	 0 km			              
Mikrokabel FU 12f:	 0 km			              
Mikrokabel 48f 4mm BIRLA:	 0 km			              
Mikrokabel 144f HFCL:	 0 km			              
Mikrokabel MiDia 2GX 192f OD 6,0mm AWFle:	 0 km			              
Mikrokabel opticky samonosny OFS12vl.:	 0 km			              
Kabel RISER KTPLine 12xG657A2:	 0 km			              
Kabel RISER KTPLine 24xG657A2:	 0 km			              
Kabel RISER OFA 48xG657A2:	 0 km			              
OK LuT 72vl, 12xribb int:	 0 km			              
OK LuT 144vl, 12xribb int:	 0 km			              
OK vnitřní RISER 24vl :	 0 km			              
OK MiDia 24vl,Cu :	 0 km			              
OK MIDia 48vl,Cu:	 0 km			              
OK vnitřní EZ-Bend 1vl :	 0 km			              
Kabel opt.EZ-Bend,CORDAGE,3mm,bílý,1vlák:	 0 km			              
OK MiDia 24vl,DC:	 0 km			              
OK DuctSaver 144vl,Cu:	 0 km			              
OK DuctSaver FX 96vl, Cu 9,1mm:	 0 km			              
OK MiDia 96vl,DC:	 0 km			              

1.2.3. 	Rekapitulace nákladů: 
Příprava:	 0 tis.Kč	
Materiál – přímá dodávka:	 0 tis.Kč	
Materiál dodavatele:	 0 tis.Kč	
Montáž:	 0 tis.Kč	
Zemní práce:	 0 tis.Kč	
GOZ:	 0 tis.Kč	
Poplatky:	 0 tis.Kč	 
VBŘ:	 0 tis.Kč	
Ostatní práce:	 0 tis.Kč	
Ostatní:	 0 tis.Kč	 
OPEX:	 0 tis.Kč	
		
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	 0 tis.Kč	
Příprava:	 0 tis.Kč	
Celkové realizační náklady:	 0 tis.Kč	
Provozní náklady podle PD:	 0 tis.Kč	

1.2.4. 	Termíny: 
Platnost ÚR od:		
Platnost ÚR do:		
Plánované zahájení přípravy:	01.05.2023	
Plánované ukončení přípravy:	30.12.2023	
Plánované zahájení realizace:	15.01.2024	
Plánované ukončení realizace:	28.02.2026	
Plánovaný termín nabídky k přejímce(RFA):	30.01.2026	

2. 	Účel a zdůvodnění stavby
2.1. 	Stručný popis technického řešení
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Zahradní, Polní a Krnovská v Bruntále je nutno realizovat překládku SEK. Jedná se o vynucenou překládku.
Dojde k dotčení stáv. trasy HDPE40mm O/BB s MT 4x7/5,5+3x10/8 se stáv. OK 786 071 063 mezi SOR01D a SOR01E.
Stáv, rezerva OK na SOR01D – 30m, stáv. rezerva OK na SOR01E – 13m.

Z důvodu prodloužení trasy HDPE40mm trubek a MT a nedostatečné délky stáv. rezerv OK je nutné provést výfuk stáv. OK mezi SOR01D a SOR01E. V dostatečném předstihu bude projednána výluka z provozu PEW. 
V nové trase překládky SEK bude provedena vložka HDPE40mm O (s MT a OK) a HDPE40mm Č (rezervní). 
Následně, do přeložené, naspojkované trasy HDPE40mm trubky O/BB a MT bude zafouknut nový OK24f ribb. v délce cca 2100m. 

Na dotčeném stávajícím kabelu TCEPKPFLE 5XN0,4(stáv. kabelová spojka S16 - BRUN 262) bude provedena nová kabelová vložka TCEPKPFLE 5XN0,4.

V místě budování nového nového asf. sjezdu na nemovitosti parc.č. 3728/2 bude stáv. HDPE40mm O/BB a kabel TCEPKPFLE 5XN0,4 obnažen a dodatečně ochráněn uložením do půlené SYSPRO 160/110mm chráničky. V celé délce obnažení bude připoložena rezervní PE110mm chránička.

Stávající a nové komunikace budou kříženy řízeným protlakem 2x PE110mm(provozní + rezervní) s min. krytím 1,2m pod niveletou komunikace.

Navrhovanou trasou přeložky dojde k dotčení nemovitostí:
Parc.č.3728/2 k.ú.Bruntál-město – MSK – SSMSK, p.o. Ostrava
Parc.č.3724/19 k.ú.Bruntál-město – TS Bruntál, s.r.o.
Parc.č.3724/20 k.ú.Bruntál-město – TS Bruntál, s.r.o.

Může dojít i k příp. dotčení:
Parc.č.3701/64 k.ú.Bruntál-město – Státní pozemkový úřad Praha

Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Bude zpracována realizační dokumentace stavby přeložky a uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníky dočených nemovitostí.
Přeložku SEK je nutno koordinovat s připravovanou generální stavbou parkoviště.
Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů.
Stavbu je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“.

Zpracováno CTN (malé) - bude následovat realizační PD. 
UR - vyřídí zákazník.
VBŘ - vyřídí CETIN.
Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.
Vytýčení hranic pozemků - zákazník.

Termín CTN - do 30. 3. 2023, CTN konzultovat.	

2.2. 	Poznámka:
Zpracováno CTN (malé) - bude následovat PD, stavební povolení - vyřídí zákazník, VBŘ - vyřídí CETIN, výkopy - CETIN, vytýčení hranic pozemků - zákazník.
Z důvodu zpřístupnění průmyslových ploch na ul. Zahradní, Polní a Krnovská v Bruntále je nutno přeložit a ochránit zemní metalické a optické vedení tak, aby bylo umístěno a ochráněno dle dodané situace.
Investor: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČO: 00295892, DIČ: CZ00295892, zastoupená Bc. Martin Henč - starostou, tel.: 554 706 360, 724 178 700, e-mail: starosta@mubruntal.cz.
Kontaktní osoba: xxxxx xxxxxxxxx - investiční referent, tel.: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@mubruntal.cz.
Projektant: xxxx xxxxx xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, e-mail: x.xxxxxxxxx@shb.cz.

Smlouvu poslat na: x.xxxxxxxx@shb.cz a xxxxx.xxxxxxxxx@mubruntal.cz.

Zpracovatel CTN: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. – xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxx@smt.cz.

Předpokládaný termín realizace: 2024 - 2026.

Připomínky: xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.	
2.3. 	Podmiňující, související a navazující stavby:
Podmiňující akce – vložené:
Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav	

Navazující akce:
Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav	

2.4. 	Vyjádření a záznamy

2.5. 	Průběh schvalování

3. 	Přílohy 
Název přílohy	Stupeň	
Technická zpráva CTN	SD	
Rozpočet stavby PPD	SD	
Dokumentace CETIN	SD	
Informace o pozemcích	SD	
461_01_Technická_zpráva.pdf	SD	
461_2_Situace-S1.pdf	SD	
461_3_Situace_vytyceni-S1_.pdf	SD	
TZA_B_PZ_DUR.pdf	SD	
Vykresy_C1_C3_C4.pdf	SD	
cetin_SITUACE_461_462.pdf	SD	
Vyjádření o existenci SEK (727965-22).pdf	SD	
Situační výkres (727965-22).pdf	SD	
Žádost o překládku.msg	SD	
Doplňující informace.msg	SD