Spisový znak: 91.1
					Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

číslo smlouvy zhotovitele: 2308  	číslo smlouvy objednatele: OI-PRIPI/SOD/001597/2023/Koc	
název akce: MDO, p. o. Olomouc – výstavba nových dílen, edukační centrum	org: 26181  	

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

  1. Objednatel:	statutární město Olomouc 
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 00299308	DIČ:  CZ00299308	
Zástupci objednatele	
- ve věcech smluvních:  	
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora	
tel.: XXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXX	
- kontaktní osoba ve věcech technických:	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
tel.: XXXXXXX		e- mail: XXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
tel.: XXXXXXX		e- mail: XXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
tel: XXXXXXX                                          e-mail: XXXXXXXXXXXXX	
	
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,	
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800	

2. Zhotovitel:	ASET studio s.r.o.	
též „příkazník“	se sídlem: Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc	
IČ: 29459346	 DIČ: CZ29459346		
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 55102    	
	  	
Zástupci zhotovitele		
- ve věcech smluvních:	
Ing. arch. Stanislav Srnec	
tel.: XXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXX	
Ing. Jan Turek
tel.: XXXXXXX		
e-mail: XXXXXXXXXXXXX	
- ve věcech technických:	
Hlavní inženýr projektu: 	
XXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace: ČKAIT XXXXXXX)	
tel.: XXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXX	
Hlavní projektant:          	
XXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace: ČKAIT XXXXXXX)	
tel.: XXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXX	

Bankovní spojení: ČSOB	
č. účtu: 256032719/0300 	

II.
Preambule

1.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pomocí cenové soustavy ÚRS Praha (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad.
2.	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1.

III.
Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování dvoustupňové projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a následné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného společného povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a v autorském dozoru. Samostatně bude zpracována projektová dokumentace demolice stávajícího objektu vč. inženýrské činnosti vedoucí k vydání povolení odstranění stavby.
Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí v terénu již v rámci projektové dokumentace), nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých stavebních objektů na dotčených parcelách včetně jejich popisu.
Projektová dokumentace pod názvem „MDO, p. o. Olomouc – výstavba nových dílen, edukační centrum“ bude řešit výstavbu nového kulturního a kreativního centra Moravského divadla v Olomouci (na pozemku parc. č. 249/6 a parc. č. st. 1033 oba v katastrálním území Nové Sady u Olomouce), které bude sloužit jako dílny a sklady Moravského divadla Olomouc a také jako komunitní a edukační centrum. Edukační prostory bude primárně využívat pro vzdělávání a praktickou výuku Střední škola polygrafická, Olomouc. Budova bude využívána také pro zajištění celé řady programů, akcí a aktivit zaměřených na interakci, besedy, přednášky, tvůrčí workshopy atd. Objekt bude navržen do tří provozně nezávislých samostatných celků: výukové prostory, edukační prostory, dílenské a skladovací prostory. Projektová dokumentace bude vycházet z dokumentu „Požadavky na vybrané parametry a uživatelské řešení stavby objektu učeben, edukačního centra a dílen MDO na Nových Sadech u Olomouce“ zpracovaného Moravským divadlem Olomouc a částečně také ze studie proveditelnosti „Dílny MDO Střední novosadská, studie proveditelnosti“ zpracované společností PROJEKCE-OLOMOUC.

Objekt bude navržen jako dvoupodlažní splňující požadavky na energetické hospodářství budov, tedy budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Projektová dokumentace bude řešit vnitřní dispozice objektu (dle požadavků Moravského divadla Olomouc a Střední školy polygrafické, Olomouc), vnitřní rozvody NN, instalaci technologických zařízení dílen (tyčové jevištní tahy s motorickým pohonem, kladkostroj), zásobování teplem (vytápění/chlazení tepelným čerpadlem), větrání (řízené větrání s rekuperací), umístění fotovoltaiky na střeše objektu (prostup střechou v návaznosti na umístění rozvaděče v objektu, kapacity rozvaděče), návrh zelené střechy, osvětlení, měření a regulace, zásobování elektrickou energií, hospodaření se srážkovou vodou, požární ochranu, nouzové osvětlení, ochranu proti vloupání, telefonní rozvody, počítačovou síť, rozvody jednotného času. V budově bude navrženo bezbariérové WC a výtah, v učebnách a workshopových místnostech bude navržena podlahová smyčka pro neslyšící. Pro nevidomé bude nad vstupem do budovy navržen digitální hlasový majáček. 

S ohledem na technologické požadavky zařízení dílen, návrh zelené střechy a umístění fotovoltaiky na střeše bude zhotovitelem zpracováno statické posouzení objektu.

V blízkosti objektu budou navržena min. 3 parkovací místa. Pro odvoz a dovoz materiálů a uložení odpadu bude kolem objektu navržena manipulační plocha a příjezdová komunikace. V projektové dokumentaci bude navržena obslužná komunikace sloužící pro budoucí případnou dostupnost zadních částí pozemku školy. Tato komunikace však nebude předmětem realizačních prací. Projektová dokumentace komunikace bude zpracována v samostatné složce jako samostatný stavební objekt vč. samostatného soupisu prací.

Předmětem smlouvy je i přeložka stávající kanalizace se zpětnou klapkou.

V rámci zpracování projektové dokumentace bude zhotovitelem prověřena možnost etapizace výstavby objektu a s ohledem na tento fakt bude projektová dokumentace vypracována. 

Předmětem smlouvy je dále samostatné zpracování projektové dokumentace demolice původního objektu obsahujícího azbest, který se nachází v areálu školy (parc. č. st. 1033 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce) včetně samostatného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení odstranění stavby.

Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců. 
Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního hospodářství  města Olomouce dle městských standardů objektů HDV a MZI a s uplatněním principů, obsažených ve studii Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky.
2.	Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v souladu s podmínkami a zásadami uvedenými v „Politice jakosti pozemních komunikací“ vydané MsD (www.pjpk.cz), závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.
3.	Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

4.	Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:
 
a.	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)   

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a dále ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
     
Součástí PD budou průzkumy (např. radonový, inženýrsko-geologický, geotechnický, hydrogeologický, na přítomnost dehtu dle zákona č. 130/2019 Sb., apod.), inventarizace zeleně a studie (např. hluková studie) v rozsahu nutném pro zpracování této dokumentace. Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.

Zhotovitel odevzá dokumentaci členěnou s ohledem na etapizaci výstavby objektu. Jednotlivé etapy výstavby budou řešeny jako samostatný stavební objekt a odevzdány v samostatných složkách.

V případě, že stavba vyžaduje kácení dřevin a je požadována náhradní výsadba nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k náhradní výsadbě a následné péči.
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v elektronické podobě na webové stránce objednatele
        http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor

Požadovaný počet vyhotovení:	3 kusy	DUR+DSP vč. dokladové části (texty a výkresy) – v tištěné podobě,	
	2 kusy	DUR+DSP vč. dokladové části (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu	

Z toho 2 paré budou použita k žádosti o vydání společného povolení. Paré odevzdané objednateli bude obsahovat originály dokladové části.
      
Dokumentace DUR+DSP v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze),
1 kus nosiče dat ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze),
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a doby jeho platnosti.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v  čl. III. odst. 4 pod písm. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4 pod písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

Součástí DUR+DSP bude statický výpočet a propočet nákladů stavby.  

b.	Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání společného povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

–	projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí (přičemž zhotovitel je povinen řešit i ochranná pásma, která mohou být stavbou dotčena), získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání společného povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
–	projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků,
–	zajistí smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky (pokud to bude situace pro řádné provedení díla vyžadovat), případně vyhotoví podklady pro vyhotovení těchto smluv, a neprodleně předá objednateli,
-	vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení, 
-	zapracuje do DUR+DSP veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí,
–	zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání společného povolení v rozsahu stanoveném stavebním zákonem
–	     zajistí rozhodnutí o povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění,
–	bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 
       potřeby, nejméně 2x po dobu zpracování DUR+DSP, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,
–	doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení, 
–	doručí objednateli pravomocné společné povolení.

Výkon IČ končí předáním pravomocného společného povolení a DUR+DSP ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do 14 dnů od nabytí právní moci společného povolení. 

Společně  předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 4 pod písm. b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4 pod písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

c.	Projektová dokumentace bouracích prací vč. inženýrské činnosti vedoucí k vydání povolení odstranění stavby
Rozsah dokumentace je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti žádosti ohlášení odstranění stavby jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude zpracována jako jednostupňová dokumentace bouracích prací k vydání povolení odstranění stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Předmětem dokumentace je vypracování dokumentace bouracích prací k odstranění stávající stavby umístěné na pozemku parc. č. st. 1033 v k. ú. Nové Sady u Olomouce. Demolovaná stavba obsahuje azbest. Zhotovitel vypracuje podrobný postup provedení bouracích prací.

V rámci zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání povolení odstranění stavby je zhotovitel mj. povinen:
- projednat zpracovanou dokumentaci bouracích prací s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí (přičemž zhotovitel je povinen řešit i ochranná pásma, která mohou být stavbou dotčena), získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti ohlášení odstranění stavby,
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, předat objednateli ihned po jejich obdržení, 
- zapracuje do dokumentace veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí,
- zajistit rozhodnutí o povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění,
- zapracovat do dokumentace veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí,
- konzultaci projektové dokumentace s objednatelem a zajistit svolávání pracovních schůzek podle potřeby, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,
- doložit veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání povolení odstranění stavby,
- doložit vyjádření KÚOK – odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
 prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- doručit objednateli pravomocné povolení odstranění stavby.

V případě, že stavba vyžaduje kácení dřevin a je požadována náhradní výsadba nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k náhradní výsadbě a následné péči.
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v elektronické podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část dokumentace:

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) 
budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, řešení dopravy během výstavby, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu demolice, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na demolici objektu vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění bouracích prací. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat textovou a výkresovou část.  
 
- Plán BOZP 
zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy.
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická a konkrétní označení zboží a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků. 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky. 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
      
V rozpočtu uvažováno s bezpečnou likvidací nebezpečného odpadu - azbestu.

Dokumentace bouracích prací bude zpracována a předána ve formátu:  

Požadovaný počet vyhotovení:	4 kusy	(texty, výkresy) – v tištěné podobě včetně dokladové části, z toho 2 paré budou použita ve stavebním řízení odstranění stavby	
	2 kusy	(texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu. 	
	1 kus	oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky 
+ neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ  nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)	

Dokumentace bouracích prací v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze),
1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze),
Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4 pod písm. c) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4pod písm. c) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

d.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů, určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. 
Pokud je nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DUR+DSP. 

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů.
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DPS:

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) 
budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, řešení dopravy během výstavby, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat textovou a výkresovou část.  
 
- Plán BOZP 
zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

-	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy.
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická a konkrétní označení zboží a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků. 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky. 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
      
Na základě požadavku zákona č. 130/2019 Sb. v rámci průzkumů a provedeného odběru z asfaltového krytu ke zjištění přítomnosti dehtu bude v rozpočtu uvažováno s jeho likvidací dle platných předpisů.

Soupis prací bude členěn na stavební objekty a dále na uznatelné a neuznatelné náklady (stanovené dotační agenturou).

Rozpočet bude zhotovitelem zpracován a odevzdán s ohledem na možnou etapizaci výstavby. Každá etapa výstavby bude řešena samostatným rozpočtem. 

Samostatně bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k areálové komunikaci zajišťující přístup do zadních částí pozemku školy.

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:  
	
Požadovaný počet vyhotovení:	6 kusů	DPS (texty, výkresy) – v tištěné podobě včetně dokladové části	
	2 kusy	DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu. 	
	1 kus	oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ  nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)	

Dokumentace DPS v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:  
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze)
1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)
Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4 pod písm. d) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 4 pod písm. d) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

e.	Výkon činnosti autorského dozoru (AD)
1.	Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:
•	účast na předání staveniště zhotoviteli;
•	účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1x týdně) souvisejících s realizací stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu; 
•	vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování změnových listů;
•	zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a lhůty provedení dle smlouvy k předmětné stavbě;
•	poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;
•	kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku;
•	spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;
•	účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního souhlasu; 
•	účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;
•	vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační činnost,
•	vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována    
dle zhotovitelem zpracované PD nebo se změnami schválenými v průběhu realizace.
2.	Cena za výkon AD dle čl. III. písm. e) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 650,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní.
3.	Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací. 
4.	Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu 5 let od nabytí účinnosti této smlouvy.
5.	Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.
6.	Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech smluvních/technických. 
Společně s předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5 pod písm. e) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. e) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
IV.
Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby
         
Zhotovitel se zavazuje: 
•	ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby,
•	ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby,  
•	k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání 
objednatelem zhotoviteli,
•	k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS,
•	k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.)
•	ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby 
Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 650,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny/sazby za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let. 

V.
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a)	Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh,
b)	výkres č. S.1 SITUACE ze studie zpracované společností PROJEKCE-OLOMOUC, Ing. Jan Chvíla, Březnice 431, 760 01 Zlín pod vedením hlavního architekta Ing. arch. Ondřeje Nožky, Žerotínova 1742/54, 130 00 Praha 3 ČKA 04065 pod názvem „Dílny MDO Střední Novosadská“,
c)	výkres č. 1 - Půdorys 1. NP a výkres č. 2 - Půdorys 2. NP zpracováno Moravským divadlem Olomouc,
d)	studie proveditelnosti – DÍLNY MDO STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ zpracováno společností PROJEKCE-OLOMOUC, Ing. Tomáš Beran, Ing. Jan Chvíla,
e)	textová část zpracovaná Moravským divadlem Olomouc - Požadavky na vybrané parametry a uživatelské řešení stavby objektu učeben, edukačního centra a dílen MDO na Nových Sadech u Olomouce.

VI.
Termín plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace bouracích prací vč. dokladové části
se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů a organizací		do 15. 11. 2023
a podání ohlášení odstranění stavby

b) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr k části 1 a)						do 15. 12. 2023		

c) Projektová dokumentace DUR+DSP vč. dokladové části
se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů a organizací		 
a podání žádosti o vydání společného povolení				do 30. 6. 2024

d) Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr k části 1 c)				do 30. 8. 2024
				
Předání kompletního předmětu smlouvy				do 30. 8. 2024

2.	Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3.	Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o společné povolení nebo ohlášení odstranění stavby. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu, po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke smlouvě.

VII.
Cena a platební podmínky

1.	Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a)	Průzkumy a studie dle čl. III, odst. 4, písm. a), c)  
Cena za část a) bez DPH:	270 000,- Kč	
DPH za část a):	56 700,- Kč	
Cena za část a) s DPH:	326 700,- Kč	

b)	Projektová dokumentace bouracích prací včetně dokladové části a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Cena za část b) bez DPH:	80 000,- Kč	
DPH za část b):	16 800,- Kč	
Cena za část b) s DPH:	96 800,- Kč	

c)	Výkon inženýrské činnosti pro zajištění souhlasu odstranění stavby
Cena za část c) bez DPH:	20 000,- Kč	
DPH za část c):	4 200,- Kč	
Cena za část c) s DPH:	24 200,- Kč	

d)	Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) včetně dokladové části 
Cena za část d) bez DPH:	1 210 000,- Kč	
DPH za část d):	254 100,- Kč	
Cena za část d) s DPH:	1 464 100,- Kč	

e)	Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení
Cena za část e) bez DPH:	190 000,- Kč	
DPH za část e):	39 900,- Kč	
Cena za část e) s DPH:	229 900,- Kč	

f)	 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s 
 výkazem výměr
Cena za část f) bez DPH:	1 210 000,- Kč	
DPH za část f):	254 100,- Kč	
Cena za část f) s DPH:	1 464 100,- Kč	

Cena díla za části a) až f): (pro fakturaci dle platebních podmínek)
Cena bez DPH:	2 980 000,- Kč	
DPH:	625 800,- Kč	
Cena celkem s DPH:	3 605 800,- Kč	

  g)   Autorský dozor:
Cena za část g) bez DPH:	400 000,- Kč	
DPH za část g):	84 000,- Kč	
Cena za část g) s DPH:	484 000,- Kč	
        V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně.

Celková cena díla za části a) až g):     

Cena celkem bez DPH:	3 380 000,- Kč	
DPH:	709 800,- Kč	
Cena celkem s DPH:	4 089 800,- Kč	

2.	Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. 
3.	Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z. 
4.	Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
5.	Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech. 
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena a platební podmínky.
6.	Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se smlouvou. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
7.	Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak je neplatný a bude vrácen zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele
8.	Za doručení faktury se považuje opatření faktury podacím razítkem objednatele. 

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1.	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami, uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu smlouvy.
2.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
3.	Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní.
4.	Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.
5.	Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.
6.	Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne podepsání konečného předávacího protokolu.
7.	Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

IX.
Přehled dalších ujednání

1.	Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.
2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení.
3.	Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele. 
4.	Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.
5.	Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DUR+DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DUR+DSP a DPS  k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 15 dní před lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části předmětu smlouvy nebo celého předmětu smlouvy. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných právních předpisů. 
6.	Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu PD ze strany nezávislé organizace (např. TÜV) k připomínkám ke zvolenému technickému řešení a její úplnosti. 

X.
Majetkové sankce

1.	V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt sjednaných v čl. VI. odst. 1 této smlouvy je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam uvedenou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.
2.	V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3.	V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené objednatelem (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3),  je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady. 
4.	V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém listu) za každý případ.
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména, nikoliv však pouze:
a)	návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování PD.
b)	návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění (stavby),
c)	v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z částí projektu potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován být měl,
d)	v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů či ve vydaném stavebním povolení,
e)	nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a soupisem prací, zejména ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.
5.	V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou porušenou zásadu.
6.	Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení.
7.	Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 15 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. VII. odst. 1 za části a) – f).  
8.	Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

XI.
Licenční ujednání 

1.	Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek a částí tohoto předmětu smlouvy, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy) včetně rozpracování předmětu smlouvy do dalších stupňů projektové dokumentace (realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen předmět smlouvy využít. 
2.	Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy. 
3.	Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn., že PD nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani 
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele 
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy.
4.	Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5.	Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas.

XII.
Ukončení smlouvy
   
1.	Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby
         předvídanými občanským zákoníkem. 
2.	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:        
–	prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení delším jak 60 dní;
–	prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;
–	prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI této smlouvy delším jak 30 dní.
3.	Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                           

XIII.
Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1.	Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR)
2.	Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem. 
3.	Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v čl. III Předmět smlouvy.
4.	Zhotovitel je povinen:
a)	zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů;
b)	zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly k mlčenlivosti nebo
   aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem 
   osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými přijdou do kontaktu;
c)	přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;
d)	poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil. 
e)	bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy. 
5.	Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.
6.	Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1.	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  
2.	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné.
3.	Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4.	Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.
5.	Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 
6.	Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.  
7.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu,          na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
8.	Součástí této smlouvy jsou přílohy: 
č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pouze v elektronické podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-     investic/odbor)
9.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu ji akceptuje.   
10.	Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 12. 7. 2023 usnesením č. 2.                                    
11.	Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 
12.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.
13.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

     
V Olomouci dne:                    	V Olomouci dne:     	

 Objednatel	Zhotovitel	

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc	
Ing. Jan Turek
jednatel
ASET studio s.r.o.