Title: Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a násl
Author: Klimová Hana
Last saved by: Čtvrtečková Helena
Company: Advokátní kancelář

DODATEK č. 1 D216/2017/MG ke smlouvě č. 204/2017/MG
(ke smlouvě o dílo č. S560/2014/MG ze dne 16. 10. 2014)
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, a roku:

smluvní strany:
	
Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

Adam Máchal
Se sídlem Schwaigrova 644/2, 617 00, Brno
IČ: 76111628
DIČ: CZ8510244248
Zastoupena Adamem Máchalem
Nezapsaná v obchodním rejstříku 

Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení povinnosti dle předchozí věty dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 4. 2017 Smlouvu č. 204/2017/MG (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je:
a)	Výroba výstavních prvků a výstavní prezenční plochy dle přiložené Realizační dokumentace (příloha č. 1) a Realizační dokumentace2_sokly (Příloha č. 3) vč. dopravy do Moravské galerie v Brně

vše pro výstavu KMENY 90, která se uskuteční v termínu od 13. 5. 2017 do 1. 10. 2017 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, Husova 14.

II.
Smluvní strany se tímto dohodly vzhledem k důvodům, které nešly předem předpokládat, na rozšíření rozsahu díla, jež je předmětem Smlouvy o následující vícepráce:
-	Výroba a plechové popisky k tanku vč. přivaření k železným panelům: rozměry: 594 × 841 mm; tl. 4 mm; nátěr: černá antracitová
-	Dodání dřevěných hranolů 20 x 20 cm pod tank: 3 m3
-	Zaklopení SDK konstrukce a vyřezání tvarů ve stěně (viz Příloha dodatku č. 1)
-	Výroba SDK konstrukce pro dílo Revolution vč. nátěru bílou barvou – plocha: 6 m2
-	Oprava a nátěry soklů a SDK konstrukcí; barva antracitová, plocha 150 m2
-	Dodání skleněných poklopů: tl. 5mm, v. 20 cm, d. 160 cm, š. 100 cm – 5x

III.
Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla, jež je předmětem Smlouvy, o následující částku (dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 3. 5. 2017):

-	72 454 vč. DPH

IV.
Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 28. 4. 2017 zůstávají beze změny. 

V.
Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

VI.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne: 3. 5. 2017

Za objednatele: 

_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel

V Brně, dne: 3. 5. 2017

Za zhotovitele: 

_______________________________
Adam Máchal

Strana  (celkem )