2LZ1

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:	6	
Identifikace akce:	
Název akce	Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004705	
Číslo akce EDS/SMVS1):		
Objednatel:	Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552,765 02 Otrokovice	
Projektant:	MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno	
Předmět změnového listu	
Slaboproudé rozvody	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-Slaboproudé rozvody	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle původního zadání a rozpočtu bylo počítáno se starším typem kabeláže, menším počtem datových zásuvek, kamer a prvků informační technologie.	
Nové řešení:
Zvýšení rychlosti a propustnosti datové sítě bude dosaženo změnou typu kabeláže na vyšší kategorii C6 a doplněni aktivních prvků o redundantní komunikační moduly optické sítě. ie vybudována bezdrátová síť WIFI s oddělenými prvky pro zajištění bezpečnosti této sítě. Redundance/záložní spojení - napájení/bude dosažena zastupitelností jednotlivých aktivních prvků sítě a doplněním aktivních prvků redundantními zdroji. Dále bude provedeno vybavení dvou datových rozváděčů bateriovými zdroji UPS pro zamezení ztráty nebo poškození dat při výpadku hlavního napájení ze sítě NN.
Datové centrum /serverovna v pavilonu „S"/ bude stavebně rozšířeno tak aby bylo možno osadit dva 19" datové rozváděče pro ukončeni datových a telekomunikačních kabelů, umístěni aktivních prvků, záložních zdrojů a dalších prvků pro uložení a zpracování dat, budou zde i přípojné body zabezpečovacího přístupového /kartového/ systému a elektrického požárního bezpečnostního systému.
Pro zabezpečení dat a bezpečnost komunikace vyspecifikovalo oddělení IT nemocnice prvky kompatibilní se stávající informační technologii nemocnice, která je plně ve správě IT oddělení a neni možné strategii ochrany dat zveřejňovat. V podstatě se, ale jedná o systém zabezpečení přístupu k jednotlivým jednotkám sítě a ochrany dat a zamezení přístupu neoprávněným /neautorizovaným/uživatelům.
Všechny tyto změny si vyžádají zvětšení místnosti serverovny a stavební úpravy v stávajících místnostech ve kterých se bud doplňovat
strukturovaná kabeláž a nové datové zásuvky.			
Zdůvodnění změny:	_					
Od zpracování projektu do doby realizace proběhla modernizace datových sítí v nemocnici, došlo k rychlému vývoji IT technologie, strukturované kabeláže a kamerového systému.
Nově provedené změny zvýšením rychlosti a propustnosti přizpůsobí datové sítě pavilonu psychiatrie současným standardům počítačové sítě nemocnice. Nově navržené prvky jsou plně kompatibilní se stávající informační technologii nemocnice.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v KD
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 |Z2VZ):
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	1913 510,6Kč	382 937,23 Kč	2 206 447,83kč	
Odpočty z ceny díla:	-272 331,84Kč	• 57 189,6 kč	-329 521,44 kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	1641178,76 Kč	344 647,54Kč	1985 826,30kč	
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
RenéJakus
Datum:	r ,
Podpis: C^TC ItsQ

Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Datum:	Datum:
Krbítova 45
f-1G 09"~c»HN-^	
í'ax 541 211 409,7? .' RO i
Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc
<Ž>
PSI z I i TO o, ;' uu • jíVtOUÍCČK S POI.ÍlšUNíKOU HAVÍŘO
ICO 60703016 OIČ 026070" 0 5 příspěvková organizace
*1 ifhá 1A52 21 VoS 01 Havířův
Za technický dozor investora:
)np., Petr Kostá
Datum:
Podpis:
Razítko:
■8 Coratruotlon e.s.
11562 IČ: 05042020
fokovíco DIČ: CZ06Q42020
			^ V	;		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
— 	
EDS/SMVS se rozumi moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Obíekt	ZL.č.6 vícepráce slaboproud			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel	NsP Havířov, p.o.					
Dodavatel	PSG Construction a.s.				
Rozpočtoval	Bc.Marek Kuchař			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
TZB
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			1 450 549,38
190 629,38
0,00
1 641 178,76	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno
Datum :
Podpis	Jméno:
Datum :
Podpis:	Jméno'
Datum:	15.02.2021
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	1 641 178,76 CZK	
DPH	21	%	344 647,54 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 985 826,29 CZK	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 12

NsP HAVIftOV	~—	IRozpofiet:	OJX)
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
REKAPITULACE DÍLŮ
U-—-	Ménépráce slaboproud				Celkem
-272 331.84	
■—	Vicepráce slaboproud				1 722 881,22	
	Vicepráce omítky, malby				81 681,35	
	Vicepráce PVC. potěry				108 948,02	
						
	CELKEM OBJEKT				1 641 178,76	

Zpracováno programem BUlLDpowerS, ©RTS.a.s.
Strana 2 z 12

MénĚpráce slaboproud
p	popis poloiky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	
	Strukturovaná kabeláž - dodávka					
2	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH	m	-4500	7,04	-31 680,00	
e	zásuvka 2xkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet	ks	-62	110,00	-6 820,00	
7	zásuvka lxkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet	ks	-12	92,40	-1108,80	
8	kabel SYKFY 25x2x0.5	m	-450	32,56	-14 652,00	
17	switch: Smart managed, Routing/Switching: Layer 3 Lite,48x 100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty, L3 statické směrování s 32 trasami, Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard, Montáž do 19" racku, Doživotní záruka, Paměť a procesor MIPS @ 500 MHz 32 MB flash packet, buffer size: 4.1 Mb 128 MB SDRAM, Čekací doba 100 Mb Latency: < 5 ps
1000 Mb Latency: < 5 ps, Datový tok up to 77.4 Mpps (64-byte packets),
Kapacita směrování/přepínání 104 Gbps, Spotřeba energie 32 W	ks	-1	11176,00	-11176,00	
18	Smart-UPS 750VA LCD RM - Záložní zdroj 500W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá	ks	-1	7 392,00	-7 392,00	
22	patch panel 24 port CAT5e	ks	-4	668,80	-2 675,20	
23	patch kabel CATS UTP lm	ks	-50	22,00	-1100,00	
24	patch kabel CAT5 UTP 0.5m	ks	-50	16,72	-836,00	
27	Strukturovaná kabeláž - práce					
3]	kabel UTP - montáž	m	-4500	17,60	-79 200,00	
36	zásuvka 2xkeystone CAT5e montáž	ks	-62	105,60	-6 547,20	
37	zásuvka lxkeystone CAT5e pod omítku bílá komplet	ks	-12	79,20	-950,40	
38	kabel SYKFY - montáž na příchytky	m	-450	17,60	-7 920,00	
45	switch - montáž, zapojení	ks	-1	748,00	-748,00	
46	UPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu	ks	-1	396,00	-396,00	
51	patch panel - montáž, zapojení, popis	ks	-4	748,00	-2 992,00	
69	Kamerový systém - dodávka					
70	3.0 Megapixelová vnitřní Fisheye kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, citlivost: barevně: O.OlLux @ (F1.6,AGC ZAP), č/b: 0.001Lux@ (F1.6,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení:25fps(1920*1080,1280x720), tmavé sklo, objektiv: 1.6mm @F2.0, úhel záběru 180" (horizontálně), 106° (vertikálně), H.264/MJPEG, dual-stream, D- WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC128GB, Dosah IR min. 8m, Audio lx vstup/lx výstup, napájeni 12VDC/463mA PoE (802.3af)	ks	-6	12 793,44	-76 760,64	
71	2.0 Megapixelová, IP MiniDome kamera s IR, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG,3-osé nastavení, tmavé sklo, max.rozlišení: 1920xl080/25fps, objektiv: 2,8-12 mm <s> F1.2, úhel záběru; 113-33.8",
Citlivost: O.OlLux @(F1.2,AGCZap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, D- WDR, 3D-DNR, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 64GB, Napájení: DC12V±10%/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m,
Krytí: IP66	ks	-5	3 004,32	-15 021,60	
81	Kamerový systém - práce					
82	IP Kamerajnstalace	ks	-11	396,00	-4 356,00	
		
Rekapitulace		
Strukturovaná kabeláž	-176 193,60	
Kamerový systém	-96 138,24	
		
CELKEM	-272 331,84	
Ceny v Kč bez DPH		
strana 3 z 12

Vícepráce slaboproud
rT	pppis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	
	Strukturovaná kabeláž - dodávka					
	Instalační kabel UTP C6 LSOH	m	8460	10,08	85 276,80	
3	příchytka kabelová, povrchová	ks	2760	6,16	17 001,60	
4	trubka instalační ohebná 25mm	m	250	7,04	1 760,00	
	zásuvka 2xkeystone CAT6 pod omítku bílá komplet	ks	104	388,50	40 404,00	
	zásuvka lxkeystone CAT6 pod omítku bílá komplet	ks	18	346,50	6 237,00	
	kabel SYKFY 50x2x0,5	m	475	79,80	37 905,00	
	Switch 48 port - specifikace uživatele HPE 5130-486-4SFP	ks	4	123 919,00	495 676,00	
	Redund zdroj pro switch HPE RPS 800	ks	4	41 540,00	166 160,00	
	Smart APC UPS 1000VA LCD RM	ks	2	25 390,00	50 780,00	
	HPE X290 500V lm RSP kable	ks	4	1 039,50	4 158,00	
	HPE SFP transe SM,8iDi LC 1Gbit	ks	2	39 838,95	79 677,90	
	HPE SFP transe MM,Dupiexi LC 1Gbit	ks	2	13 930,20	27 860,40	
	DAC stack kabel SW 0,5m	ks	2	4 301,85	8 603,70	
	DAC stack kabel SW 3m	ks	2	6 458,55	12 917,10	
	LC-LC SM patch kabel 2m	ks	4	399,00	1 596,00	
	PoE switch Ubiquiti US-24-S00W	ks	2	15 255,00	30 510,00	
	WIFI Ubiquiti UAP-AC-SHD	ks	8	10 605,00	84 840,00	
	vyvažovači panel 1U	ks	26	325,50	8 463,00	
	patch panel 24 port UTP C6	ks	10	1 386,00	13 860,00	
	patch kabel CATS UTP 2m	ks	50	58,80	2 940,00	
23	patch kabel CAT5 UTP lm	ks	50	22,00	1100,00	
24	patch kabel CAT5 UTP 0.5m	ks	50	16,72	836,00	
	stojanový rozvaděč RACK 42U 600x600 proskt. rozeb. boky TRITON	ks	2	20 540,00	41 080,00	
	AXON nap. panel 230V PDU	ks	4	1107,75	4 431,00	
	Ventil, jednotka 4x ventil	ks	2	4 116,00	8 232,00	
	Sada koleček RACK	ks	2	1 501,50	3 003,00	
26	Drobný nosný, podružný a spotřební materiál	ks	1	10 780,00	10 780,00	
	Strukturovaná kabeláž - práce					
31	kabel UTP - montáž	m	8460	17,60	148 896,00	
32	příchytka kabelová - montáž	ks	2760	10,56	29 145,60	
33	drážka do zdi	m	250	21,12	5 280,00	
34	trubka instalační ohebná - montáž	m	250	31,68	7 920,00	
36	zásuvka 2xkeystone CAT6 montáž	ks	104	105,60	10 982,40	
37	zásuvka lxkeystone CAT6 pod omítku bílá komplet	ks	18	79,20	1425,60	
38	kabel SYKFY - montáž na příchytky	m	475	17,60	8 360,00	
45	switch - montáž, zapojení	ks	4	748,00	2 992,00	
46	UPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu	ks	2	396,00	792,00	
50	vyvažovači panel - montáž	ks	26	88,00	2 288,00	
51	patch panel - montáž, zapojení, popis	ks	10	748,00	7 480,00	
52	patch kabel - zapojení	ks	150	39,60	5 940,00	
	stojanový rozvaděč RACK 42U 600x600 proskl. rozeb. boky TRITON	ks	2	3 780,00	7 560,00	
	AXON nap. panel 230V PDU	ks	4	168,00	672,00	
	Ventil, jednotka 4x ventil	ks	2	168,00	336,00	
	Sada koleček RACK	ks	2	252,00	504,00	
	WIFI Ubiquiti UAP-AC-SHD	ks	8	441,00	3 528,00	
	Kamerový systém EKV - CCTV - dodávka					
	kamera DS-2CD2955FWD-IS/l,0Smm/hemisferlcka5Mp	ks	11	11 392,50	125 317,50	
	kamera DS-2CD2343GO-l/2,8mm/ IP ball 4Mp	ks	5	4 882,50	24 412,50	
	kamera DS-2CD2T46G2-2I /2,8mm/ IP bulet 4Mp	ks	2	5 407,50	10 815,00	
72	Kryt kabelů pro skrytou montáž, instalace pod kameru	ks	18	147,84	2 661,12	
	HDD, WD20PURZ	ks	1	2 089,50	2 089,50	
	NVR záznam pro 32 IP kamer DS-7732NI-K4	ks	1	15 634,50	15 634,SO	
80	Drobný nosný, podružný a spotřební materiál	kpl	1	2 950,00	2 950,00	
strana 4 z 12

	Kamerový systém EKV - CCTV - práce					
"82	IP Kamerajnstalace	ks	18	396,00	7 128,00	
—	HDD, WD20PURZ	ks	1	441,00	441,00	
•		Kamerový systém EKV - dodávka					
	HUB PRO - kontrolér	ks	1	13 807,50	13 807,50	
	Čtečka A7H	ks	1	3 937,50	3 937,50	
	UDS-1100 převodník RS/Base TX	ks	1	5 407,50	5 407,50	
	Kabeláž k čtečce 202/204 doplnění oboustranné	kpl	1	336,00	336,00	
	Drobný nosný, podružný a spotřební materiál	kpl	1	472,50	472,50	
	Kamerový systém EKV - práce					
	HUB PRO - kontrolér	ks	1	441,00	441,00	
	Čtečka A7H	ks	1	441,00	441,00	
	UDS-1100 převodník RS/Base TX	ks	1	441,00	441,00	
	Kabeláž k čtečce 202/204 doplněni oboustranné	kpl	1	441,00	441,00	
	Společné trasy SLP					
	Drátěný žlab 100x50 pro společné kabelové vedení	m	25	189,00	4 725,00	
238	Podpěra pod žlab vč. příslušenství	ks	50	39,60	1 980,00	
239	Příchytka kabelových svazků, kovová vč. šroubu a hmoždiny	ks	35	30,80	1 078,00	
240	Závitová tyč M8	m	15	30,80	462,00	
241	Podložky, matice, spojky, hmoždiny	kpl	1	500,00	500,00	
242	Drobný nosný, podružný a spotřební materiál	kpl	1	950,00	950,00	
	Společné trasy SLP - práce					
244	Instalace žlabů vč. podpěr a závitových tyči	m	25	105,60	2 640,00	
245	Instalace hromadné kabelové příchytky	ks	35	35,20	1 232,00	
246	Koordinační práce související s instalací tras	kpl	1	1 950,00	1 950,00	

Rekapitulace		
Strukturovaná kabela!	1490 190,10	
Kamerový systém	217174,12	
Společné trasy SLP	15 517,00	
		
CELKEM	1722 881,22	
Ceny v Kč bez DPH		
strana 5 z 12

Soupis prací
	JÓ025	NsP HAVÍŘOV					
W-	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
		
p
Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 880,00	
36	317121033RG3	Překlad nenosný do příčky porobeton, překlad 1100 x 249 x	kus	-2,00	940,00	-1 880,00	
		150 mm
2.NP : 2ks mistnosl č.203		-2,00			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				11 903,36	
40	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky
standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm místnost 6.203 :	m2	13,64	873,00	11 903,36	
		(1,35*2,6)+(1,625*2,6)-1,6
místnost č.202:		6,14			
		(2,5*3)		7,50			
Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				38 362,52	
83	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché
maltové směsi	m2	45,13	364,00	16 428,18	
		sekáni drážek obsaženo ve VCP slaboproudu pracovna primáře :
(2*6,15*2,8)+(2*4,65*2,8)+(-5*2,43-1,6) *0,15 stěny		7,01			
		(6,15*4,65-2,925*1,2)-3,51 *0,15 strop		3,24			
		místnost vrchní sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) *0,15 stěny		3,57			
		(3,15*2,5) *0,15 strop		1,18			
		pracovna art sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2.43-1,6) *0,15 stěny		3,57			
		(3,15*2,5) *0,15 strop		1,18			
		pracovna psychoperauta :
(2*3,15*2,8)+{2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) *0,15 stěny		3,57			
		(3,15*2,5) *0,15 strop		1,18			
		inspekční pokoj lékařky:
(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 *0,15 stěny inspekční pokoj lékaři:		7,18			
		(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2‘2,43)-1,6 *0,15 stěny		7,18			
		šatna personál.
(6,55*2*2,8)+(1,65*2*2,8)-(2,43)-1,6 *0,15 stěny		6,28			
86	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	90,26	243,00	21 934,33	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		
		pracovna primáře :
(2*6,15*2,8)+(2*4,65*2,8)+(-5*2,43-1,6) stěny		46,73			
		(6,15*4,65-2,925*1,2)-3,51 strop		21,58			
		místnost vrchní sestry:
(2*3,15*2,8)+(2'2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		pracovna art sestry :
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		pracovna psychoperaula :
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		inspekční pokoj lékařky:
(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 stěny inspekční pokoj lékaři:		47,86			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 6 z 12

	|	(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1t6 stěny		47,86			
/		šatna personál
(6,55*2*2,8)+( 1,65*2*2,8M2.43H ,6 stěny		41,89			
		30%		90,26			
(Díl	96	Bourání konstrukcí				962,50	
r 169	962031132ROO	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
Včetně omítky a možného obkladu.
2.NP :	m2	9,63	100,00	962,50	
		(1,35*2,5) místnost č.203
2.NP:		3,38			
		(2,5*2,5) místnost č.202		6,25			
Díl:	784	Malby				31 721,99	
473	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, plat! i pro nátěry pracovna primáře:	m2	300,88	25,65	7 717,64	
		(2*6,15*2,8)+(2*4,65*2,8)+(-5*2,43-1,6) stěny		46,73			
		(6,15*4,65-2,925*1,2>-3,51 strop		21,58			
		místnost vrchní sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		pracovna art sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,6)+(-2*2,43-1.6) slěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop pracovna psychoperauta :		7,88			
		(2*3,15*2,8)+<2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		inspekční pokoj lékařky:
(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2’2,43)-1,6 stěny inspekční pokoj lékaři:		47,86			
		(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 stěny		47,86			
		šatna personál :
(6,55*2*2,8)+(1,65*2*2,8)-(2,43)-1,6 stěny		41,89			
474	784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem pracovna primáře:	m2	328,15	11,40	3 740,94	
		(2*6,15*2,8)+(2*4,65*2,B)+(-5*2.43-1,6) stěny		46,73			
		(6,15*4,65-2,925*1,2)-3,51 strop		21,58			
		místnost vrchní sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		pracovna art sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+<-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		pracovna psychoperauta:
(2*3.15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny		23,78			
		(3,15*2,5) strop		7,88			
		inspekční pokoj lékařky :
(6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 stěny inspekční pokoj lékaři:		47,86			
		(6,55'2*2,8)+(3,15*2’2,8)-{2*2,43)-1,6 stěny		47,86			
		šatna personál:
(6,55*2*2,8)+(1,65*2*2,8)-(2,43)-1,6 stěny
SDK konstrukce místnost č.203		41,89			
		((1,35’2,6)+(1,625*2,6)-1,6))*2
SDK konstrukce místnost č.202		12,27			
		(2,5*3)*2		15,00			
475	784195322RO0	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	328,15	61,75	20 263,42	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 7 z 12

I
Díl:	D96	pracovna primáře :
(2*6,15*2,8)+(2*4,65*2,8)+(-5*2,43-1,6) stěny (6.15*4,65-2,925*1,2)-3,51 strop místnost vrchní sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny
(3,15*2,5) strop
pracovna art sestry:
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny (3,15*2,5) strop
pracovna psychoperauta :
(2*3,15*2,8)+(2*2,25*2,8)+(-2*2,43-1,6) stěny
(3,15*2,5) strop inspekční pokoj lékařky: (6,55*2*2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 stěny inspekční pokoj lékaři: (6,55*2"2,8)+(3,15*2*2,8)-(2*2,43)-1,6 stěny
šatna personál:
(6,55*2*2,6)+(1,65*2*2,8)-(2,43)-1,6 stěny
SDK konstrukce místnost č.203 :
((1,35*2,6)+(1,625*2,6)-1,6))*2
SDK konstrukce místnost č.202 :
(2,5*3)*2
Přesuny suti a vybouraných hmot		46,73
21,58
23,78
7,88
23,78
7,88
23,78
7,88
47,86
47,86
41,89
12,27
15,00		610,99	
513	S79990OO1ROO	Poplatek za skládku stavební suli	t	0,52	500,00	260,66	
		(300,88*0,0015)+0,02+0,05		0,52			
519	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,52	180,00	93,84	
520	979O11121RO0	Příplatek za každé další podlaží	t	0,52	140,00	72,98	
521	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52	145,00	75,59	
		Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.		
522	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,91	8,00	79,24	
523	979082111ROO	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,52	30,00	15,64	
		Včetně případného složeni na staveništni deponii					
524	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,61	5,00	13,03	
Cena celkem bez DPH za omítky a malby	81 681,35
Soupis prací
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 8 z 12

	]o325^	NsP HAVÍŘOV					
bC
SB	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
		
P.č.	"Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				21 711,04	
i 12	632415102RT2	Potěr samonivelačnl ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací	m2	105,91	170,00	18 004,28	
		3.NP :
pracovna primáře;
(6,15*4,65)-( 1,3*3,05) místnost vrchní sestry		24,63			
		(3,3*3,15M1,5*0,2) pracovna art sestry:		10,10			
		(3,2*3)		9,60			
		pracovna psychoperauta (3,3*3,15)-(1,5*0,2)
inspekční pokoj lékařky:		10,10			
		(6,6*3,1 >-(0,225*0,45)		20,36			
		inspekční pokoj lékaři:
(6,6*3,1 >-(0,225*0,45) šatna personál:		20,36			
		(6,6*1,65)-(0,35*0,35)		10,77			
114	632441491R00	Broušeni anhydritových potěrů	m2	105,91	35,00	3 706,76	
		3.NP :
pracovna primáře :
(6,15*4,65)-(1,3*3,05) místnost vrchní sestry:		24,63			
		(3.3-3.15)-(1,5*0,2) pracovna art sestry:		10,10			
		(3,2*3)		9,60			
		pracovna psychoperauta (3,3*3,15)-(1,5*0,2) inspekční pokoj lékařky:		10,10			
		(6,6*3,1)-(0,225*0,45) inspekční pokoj lékaři		20,36			
		(6,6*3,1 )-(0,225*0,45) šatna personál:		20,36			
		(6,6*1,65)-(0,35*0,35)		10,77			
Díl:	99	Staveništni přesun hmot				1 498,75	
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,93	252,70	1 498,75	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S,
Strana 9 z 12

435
776511810R00
Podlahy povlakové	
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC,
odstranění a uložení na hromady 3.NP :
pracovna primáře :
4,65+6,15+3,25+3,05+0,275+0,275+2,3+0,275 místnost vrchní sestry;
3,3+3,15+0,2+1,5+2,9+0,9 pracovna art sestry;
3,2+3+3,2+2,1 pracovna psychoperauta ; 3,3+3,15+0,2+1,5+2,9+0,9 inspekční pokoj lékařky: 6,6+3,1+6,6+1,375+0,225+0,225+0,45+0,375 inspekční pokoj lékaři: 6,6+3,1+6,6+1,375+0,225+0,225+0,45+0,375 šatna personál:
6,6+1,65+6,6+0,35+0,35+0,75
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
m
m2
109,83
40,50
20,23
11,95
11,50
11.95
18.95
18,95
16,30
105,91
40,50
3.NP :
pracovna primáře :
(6,15*4,65)-(1,3*3,05) místnost vrchní sestry
24,63
436
776521100RT1
(3,3*3,15)-(1,5*0,2) pracovna art sestry:
(3,2*3)
pracovna psychoperauta :
(3,3*3,15)-(1,5*0,2) inspekční pokoj lékařky:
(6,6*3,1)-(0,225*0,45) inspekční pokoj lékaři (6,6*3,1)-(0,225*0,45) šatna personál:
(6,6*1,65)-(0,35*0,35)
Lepeni povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci 3.NP :
m2
10,10
9,60
10,10
20,36
20,36
10,77
105,91
150,30
pracovna primáře :
(6,15*4,65)-(1,3*3,05) místnost vrchní sestry: (3,3*3,15)-(1,5*0,2) pracovna art sestry: (3,2*3)
pracovna psychoperauta : (3,3*3,15)-(1,5*0,2) inspekční pokoj lékařky: (6,6*3,1)-(0,225*0,45) inspekční pokoj lékaři : (6,6*3,1)-(0,225*0,45) šatna personál:
(6,6*1,65M0.35*0,35)
24,63
10,10
9,60
10,10
20,36
20,36
10,77
84 871,35
4 447,91
4 289,25
15 917,90
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S.
Strana 10 z 12

,(776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC	m	105,91	44,10	4 670,52	
	svaru					
	3.NP :
pracovna primáře :
(6,15*4,65)-( 1,3*3,05) místnost vrchní sestry		24,63			
	(3,3*3,15)-(1,5*0,2)		10,10			
	pracovna art sestry :
(3,2*3)		9,60			
	pracovna psychoperauta (3,3*3,15)-(1,5*0,2)		10,10			
	inspekční pokoj lékařky:
(6,6*3,1 >-(0,225*0,45) inspekční pokoj lékaři:		20,36			
	(6,6*3,1)-(0,225*0,45) šatna personál:		20,36			
	(6,6*1,65)-(0,35*0,35)		10,77			
28 443 010	Specif.- Podlahovina PVC standard tl.2,0 mm - dodávka, s polyuretanovou povrchovou úpravou
Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešeni stavby.	M2	111,20	346,50	38 531,80	
	3.NP:
pracovna primáře :
((6,15*4,65)-(1,3*3,05»*1,05 místnost vrchní sestry:		25,86			
	((3,3*3,15)-(1,5*0,2))*1,05		10.60			
	pracovna art sestry:
(3,2*3)*1,05		10,08			
	pracovna psychoperauta :
«3,3*3,15)-(1,5*0,2))*1,05 inspekční pokoj lékařky:		10,60			
	((6,6*3,1)-(0,225*0,45))*1,05		21,38			
	inspekční pokoj lékaři :
((6,6*3,1)-(0,225*0,45))*1,05 šatna personál:		21,38			
	((6,6*1,65)-(0.35*0,35))*1,05		11,31			
776220189	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončeni, akrylátem (obkl),vyplněni rohu pryž.kllnem Js 25mm
Ukončeni čepcovým těsněním.penetrace podkladu.	M	109,83	152,10	16 704,38	
	3.NP :
pracovna primáře :
4,65+6,15+3,25+3,05+0,275+0,275+2,3+0,275
místnost vrchní sestry:		20,23			
	3,3+3,15+0,2+1,5+2,9+0,9		11,95			
	pracovna art sestry:
3,2+3+3,2+2,1		11,50			
	pracovna psychoperauta :
3,3+3,15+0,2+1,5+2,9+0,9		11,95			
	inspekční pokoj lékařky: 6,6+3,1+6,6+1,375+0,225+0,225+0,45+0,375		18,95			
	inspekční pokoj lékaři:
6,6+3,1 +6,6+1,375+0,225+0,225+0,45+0,375
šatna personál:		18,95			
	6,6+1,65+6,6+0,35+0,35+0,75		16,30			
998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,37	844,61	309,59	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 11 z 12

r
wíL-
pí*	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			866,88	
	979990121ROO	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	0,35	1 800,00	631,22	
		0,003*105,91+0,0003*109,83		0,35			
519	979011111RO0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,35	180,00	63,12	
520	979011121RO0	Příplatek za každé další podlaží	t	0,35	140,00	49,10	
521	979081111RO0	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	0,35	145,00	50,85	
		Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.		
522	979081121 ROO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,66	8,00	53,30	
523	979082111 ROO	Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m
Včetně případného složeni na staveništni deponíi.	t	0,35	30,00	10,52	
524	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	'	1,75	5,00	8,77	
Cena celkem bez DPH za PVC a potěry
108 948,02
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S.
Strana 12 z 12

SOUPIS PRACÍ
Bezpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Sbiekt	Název objektu			
	Změnový list £.7 Doplněni svítidel			
Stavba	Název stavby			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Projektant						
				
Objednatel	NsP Havířov, p o.					
Dodavatel	PSG Construction a.s.				
Rozpočtoval	Bc.Marek Kuchař			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			18 903,13
0,00
0.00
18 903,13	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:
Datum
Podpis	Jméno
Datum :
Podpis:	Jméno
Datum:	15.02.2021
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	18 903,13 CZK	
DPH	21	%	3 969,66 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	22 872,79 CZK	
Popis
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s,
Strana 1 z 3

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
Identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMV51):
Objednatel:	
Zhotovitel:
Projektant:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.S6/0.0/0.0/16_048/0004705
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnické 1132/24, 736/Dl Havířov
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 76S 02 Otrokovice
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění svítidel
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrle-silnoproudé instalace
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadáni a rozpočtu bylo počítáno, že se v m.č.lll po provedení nových rozvodů VZT a snížení podhledu osadí původní svítidla zpět.
Nové řešení:
Po provedení sníženého pohledu pod novým rozvodem VZT bylo zjištěno, že stávající okna nejsou ve stejné rovině a namontování původních svítidel by způsobilo, že se zmenší světlá výška místnosti a nebude možné otevřít okna. Toto by bylo v rozporu s hygienickými předpisy.
Z tohoto důvodu se místo původních předsazených svítidel namontuj/ nová svítidla s menší tloušťkou.		
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadáni a rozpočtu bylo počítáno, že se v m.č.lll po provedení nových rozvodů VZT a snížení podhledu osadí původní svítidla zpět. Po provedení sníženého pohledu pod novým rozvodem VZT bylo zjištěno, že stávající okna nejsou ve stejné rovině a namontování původních svítidel by způsobilo, že se zmenší světlá výška místností a nebude možné otevřít okna. Proto se místo původních předsazených svítidel namontují nové užší. Tato změna nebyla možná zjistit před zahájením prací, neboť se jedná o skryté
konstrukce a konkrétní rozsah a materiálové skladby nebyly v době projektové přípravy zjistitelné a ověřitelné. 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není 	 /			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v KD č.ll ze dne 10.03.2021
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	18903,13Kč	3 969,66 Kč	22 872,79kč	
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 kč	0 kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	18 903,13 Kč	3 969,66Kč	22 872,79 kč	
Změnu odsouhlasil	
Za zhotovitele:
René Jakus	Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	#7	
Podpis:	S .
Chuí,	Podpis:	. __
.SP o.
Kroftova 45	g.	Podpis:	Podpis:		
L	Qe, Ífjíp • 6 1 b f'0 firtNO
HKk&M 211 409,777 B01 364 (JO 60703016 DIČ CZ607030 5	r$?£ftteí 8 POUKUNIBDO HAVÍŘOV příspěvková orgsntacc rtShirizá1152/24,736 lil Havířov	Razítko:	
■V;', on B.8.
.			 thTS -
tkl 02 Otrokovice
Datum:
!,>.	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
ĎÍČ: CZ06042020
1) ÉDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financováni.

SOUPIS PRACÍ
/Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
ÍSbiekt	Název objektu			
.	Změnový list £.7 Doplněni svítidel			
Stavba	Název stavby			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Projektant						
				
Objednatel	NsP Havířov, p.o.					
Dodavatel	PSG Construction a.s.				
Rozpočtoval	Bc.Marek Kuchař			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV					18 903,13	
PSV					0,00	
MON					0,00	
Vedlejší náklady						
Ostatní náklady						
Celkem					18 903,13	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:		Jméno		Jméno:		
Datum :		Datum		Datum .	15,02.2021	
Podpis :		Podpis:		Podpis.		
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	18 903,13 CZK	
DPH	21	%	3 969,66 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	22 872,79 CZK	
Popis
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 3

Hodnota A
Hodnota 8
' Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál Montáž - práce
Mezlsoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
16 196,00
583,06	161, §6
1 780,00
16 779,06	1 941,96
OOfuSQ	
	0^10	
—%oe	
	Cr/00	
16 779,06	2 048,76
———
0-1^,903,13
18 903,13	0 00
0.00
0,00
0,00.-os n--
-©rOO	•
	0,001——~ t
'	í
18 903/13
3 969,66
0,00
22 872,78
18 903,13 0,00

Pozice Název	Mj Počet Materiál	Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem	Výkaz výmár
Elektrotnstalace
Výměna svítidel za LED 1NP
	LED panel Sinclair PL 126060NVC	ks	3,00	2 820,00	8 460,00	100,00	300,00	8 760,00 D.l.6-1-8	svítidla nová položka, montáž dle SOD	
	LED panelBraso LED 28W
HODINOVÉ ZUCTOVAQ SAZBY	ks	6,00	1 256,00	7 536,00	100,00	600,00	8 136,00 D.l.6-1-8	svítidla nová položka, montáž dle SOD	
259	Stavební pTfpomoce - prostup vČ. úpravy 5DK
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	hod	2,00		0,00	220,00	440,00	440,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
131	Drobný Instalační materiál
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500	set	1,00	500,00	200,00		0,00	200,00 D. 1.6-12	cena dle SOD	
263	Revizní technik
Elektroinstalace - celkem	hod	2,00		0,00
16 196,00	220,00	440,00
1 780,00	440,00 D.l.6-1-8
17 976,00	cena dle SOD