■
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOI
CE.SKÍ REPUBLIKY
DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 7.10.2020 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,NOZ“) mezi smluvními stranami:
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
zastoupena:	 ředitel
kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
provozně-technický náměstek, email: 
vedoucí technicko - provozního oddělení,
email: 
00844896
CZ00844896
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel11)
a
2. Obchodní firma: PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: předsedou představenstva
IČ:05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535 Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel11)
II. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva11) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.6.2021 a v souladu s článkem XX. odst. 6 a čl. V. odst. 4 Smlouvy se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek), kterým se Smlouva mění způsobem uvedeným níže.
pévková organizace
Moravskoslezského kraje

1

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO
pro místní
ROZVOJ ČR
A
<*>
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ RQZVO)
ČESKÉ REPUBLIKY

Moravskoslezsky
kraj
III. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1.	Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, tj. na změně článku III. Smlouvy. Změna rozsahu předmětu díla je blíže specifikována ve změnových listech č. 14 - 31, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2.	Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu rozsahu díla, specifikovanou v předchozím odstavci tohoto Dodatku, dohodly na navýšení Ceny za dílo o částku 3 712 026,77 Kč bez DPH (slovy: třimilionysedmsetdvanácttisícdvacetšest korun českých a sedmdesátsedm haléřů).
S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení odstavce 1 článku V. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„ 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy se sjednává ve výši 45	531 081,44 Kč bez DPH (slovy:
čtyřicetpětmilionůpětsetřicetjednatisícosmdesátjedna korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)
Rekapitulace:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo:	37 899 000 kč bez DPH
45 857 790 včetně DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:
Cena víceprací dle Dodatku č.2:
Cena méněprací dle Dodatku č.2:
5	327 717,66 Kč bez DPH
6	446 538,37 včetně DPH - 1 407 662,99 Kč bez DPH -1 703 272,22 včetně DPH
3	828 876,77 bez DPH
4	632 940,89 včetně DPH - 116 850,00Kč bez DPH -141 388,50 včetně DPH
Smluvní cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 a č. 2:
45 531 081,44 Kč bez DPH 55 092 608,54 Kč včetně DPH
IV. Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení Dodatku.
2

Moravskoslezsky
kraj
Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVO|
České republiky
2.	Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.	Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a sjeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
L
3

Moravskoslezsky
kraj
Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
14
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Freomet zmenoveno listu	
Záměna kování dveří-obyčejné kliky za kliky proti oběšení
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání měly být dveře vybavené standartním kováním
Nové řešení:
Nově budou dveře do pokojů a sociálních zařízení vybavené speciálním kováním znemožňující oběšení.
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání měly být dveře vybavené standartním kováním. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodu musí být nově i dveře vybavené kováním znemožňující oběšení.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
335 990 Kč
70 557,9 Kč
406 547,9Kč
Odpočty z ceny díla:
-13 800 Kč
- 2 898 Kč
-16 698 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
322 190 Kč
67 659,9 Kč
389 849,90 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: jdg. Petr Kosta
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:
iZlEsiíCi
szssr— | Razítko:
PSG Construction am.
Napajedelská 1562	«S: 06042020
765 02 Otrokovice	DIČ: CZ05043020

Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:

toj rw+~
Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL.č.14 Kliky proti oběšení			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			322 190,00
322 190,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno:	Jméno •	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	322 190,00 CZK	
DPH	21	%	67 659,90 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	389 849,90 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 4

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	ZL.č.14 Kliky proti oběšení	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			322 190,00	
	CELKEM OBJEKT				322 190.00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 4

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské - klika proti oběšení varianta nerez				273 010,00	
324	PC 10400	U'i iKA PROT; OBěŠE^i V*R!/V'rr.-\ >iFRF“ PRO DVEŘE	KUS	5,00	6 235,00	31 175,00	
		VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, kování, mřížka					
		VZT 300/100 mm odečet původního kování		5,00	-300,00	-1 500,00	
325	PC 10500	■;UK4 FP.CTi 03ĚŠE i	:	- - PRO DVEŘE	KUS	14,00	6 235,00	87 290,00	
		VNI PL.HL. 70/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, gener.klíč odečet původního kování		14,00	-300,00	-4 200,00	
336	PC 11600	KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD, general.klíč	KUS	1,00	6 235,00	6 235,00	
		odečet původního kování		1,00	-300,00	-300,00	
337	PC 11700	KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE	KUS	1,00	6 235,00	6 235,00	
		VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18 ODLEHČ.DTD, gen.klič, mřížka VZT 300/100 mm odečet původního kování		1,00	-300,00	-300,00	
340	PC 12000	KLIKA PROTI OBÉ3E ii VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE	KUS	14,00	6 235,00	87 290,00	
		VNI PL.HL. 110/197 cm, T/21 ODLEHČ.DTD, aener.klíč.neDrůzvučnost 27 dB odečet původního kování		14,00	-300,00	-4 200,00	
341	PC 12100	KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE	KUS	6,00	6 235,00	37 410,00	
		VNI PL.HL. 110/197 cm, T/22 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 cm he7n rlvniskln odečet původního kování		6,00	-300,00	-1 800,00	
342	PC 12200	KLIKA PROT OBĚŠENÍ VARIANT* ÍEREZ PRO DVEŘE	KUS	3,00	6 235,00	18 705,00	
		VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23 ODLEHČ.DTD, gen.klič, mřížka VZT 300/100 mm odečet původního kování		3,00	-300,00	-900,00	
343	PC 12300	KLIKA PROTi OBĚŠENÍ VARIANTA l-REZ PRO DVEŘE	KUS	2,00	6 235,00	12 470,00	
		VNI PL.HL. 110/197 cm, T/24 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3					
		- C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB, odečet původního kování		2,00	-300,00	-600,00	
P.Č.
Díl:	Číslo položky
766	Název položky
Konstrukce truhlářské - rozeta	MJ	množství	cena/MJ	celkem
49 180,00	
324	PC 10400	KOVÁNI PRO DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	5,00	1 655,00	8 275,00	
325	PC 10500	KOVÁNI PRO DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, aener.klíč	KUS	14,00	1 655,00	23 170,00	
336	PC 11600	KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD, aeneral.klíč	KUS	1,00	1 655,00	1 655,00	
337	PC 11700	KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18 ODLEHČ.DTD. qen.klíč. mřížka VZT 300/100 mm	KUS	1,00	580,00	580,00	
340	PC 12000	KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/21 ODLEHČ.DTD, aener.klíč.neDrůzvučnost 27 dB,	KUS	14,00	620,00	8 680,00	
341	PC 12100	KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/22 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor
35/15 cm.bezD.dvoisklo	KUS	6,00	620,00	3 720,00	
342	PC 12200	KOVÁN, PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23 ODLEHČ.DTD, aen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm	KUS	3,00	620,00	1 860,00	
343	PC 12300	KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/24 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost ZZ-dB.	KUS	2,00	620,00	1 240,00	
Cena celkem bez DPH	322 190,00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 4

Nsp Havířov psychiatrie
Seznam místnosti a počet klik proti oběšení
3NP
2NP
M.č.	druh dveří	č.dveří	počet	počet wc		
324	obyčejné	T21P	1		klika-klika	
325	WC	T6L		1	klika-klika	
327	obyčejné	T21L	1		klika-klika	
323	WC	T6P		1	klika-klika	
330	obyčejné	T21p	1		klika-klika	
331	WC	T6L		1	klika-klika	
333	obyčejné	T21L	1		klika-klika	
	WC	T6P		1	klika-klika	
336	obyčejné	T21P	1		klika-klika	
	WC	T6L		1	klika-klika	
339	obyčejné	T21L	1		klika-klika	
341	WC	T6P		1	klika-klika	
342	obyčejné	T21P	1		klika-klika	
343	WC	T6L		1	klika-klika	
345	obyčejné	T21L	1		klika-klika	
347	WC	T6P		1	klika-klika	
348	obyčejné	T21P	1		klika-klika	
343	WC	T6L		1	klika-klika	
317	obyčejné	T21I	1		klika-klika	
313		T6P		1	klika-klika	
354	obyčejné	T24P	1		klika-klika	
355	WC	T6P		1	klika-klika	
356	obyčejné	T24P	1		klika-klika	
347	wc	T17P		1	klika-klika	
322	obyčejné	T18L	1		klika-klika	
M.č.	druh dveří	č.dveří	počet	počet wc	
220	obyčejné	T22P	1		
222	obyčejné	T22L	1		
225	obyčejné	T22P	1		
227	obyčejné	T22L	1		
230	obyčejné	T21P	1		
232	wc	T6P		1	
234	wc	T5L		1	
236	obyčejné	T21L	1		
237	wc	T6L		1	
233	wc	T5P		1	
240	obyčejné	T21L	1		
242	wc	T6L		1	
243	wc	T5P		1	
245	obyčejné	T21L	1		
246	wc	T5L		1	
247	wc	T5P		1	
217	obyčejné	T22I	1		
216	obyčejné	T22L	1		
214	obyčejné	T23L	1		
215	obyčejné	T23L	1		
207	obyčejné	T23L	1		
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
13
8
13	12
Celkem	WC	26
Obyčejné	20
46

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
15
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Záměna kování oken - obyčejné kování za kování proti oběšení
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání měly být okna vybavené standartním kováním
Nové řešení:
Nově budou okna včetně původních oken do pokojů a sociálních zařízení vybavené speciálním kováním znemožňující oběšení.
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání měly být okna vybavené standartním kováním. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodu musí být nově okna včetně těch stávajících, vybavené kováním znemožňující oběšení.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
208 980 Kč
43 885,80 Kč
252 865,80 Kč
Odpočty z ceny díla:
-Kč
-Kč
-Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
208 980Kč
43 885,80 Kč
252 865,80 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora:  Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis: fa' jj^
PSG Construction a.a,
Datum:
Podpis:
'-■Ctí
Datum:
Podpis:
Datum: Podpis:
k

Razítko:
Razítko:

79605Otrokovlca DIČ:czoB042uAýp|nost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	Zl.č.15 Kování oken proti oběšení			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			208 980,00
208 980,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno:	Jméno	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	208 980,00 CZK	
DPH	21	%	43 885,80 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	252 865,80 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 3

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	Zl.č.15 Kováni oken proti oběšení	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			208 980,00	
	CELKEM OBJEKT				208 980,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 2 z 3

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.
Díl:	Číslo položky
766	Název položky
Konstrukce truhlářské - kliky na okna	MJ	množství	cena / MJ [celkem
208 980,00	
300	PC 10400	BEZPEČNOSTNÍ KLIKY NA OKNA (proti oběšení, okenní
klika/knoflík s uzamykáním)	ks	129,00	1 620,00	208 980,00	
Cena celkem bez DPH
208 980,00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 3

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
16
Identifikace akce:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocníce s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění SLP o systém sestra v nouzi
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-slaboproudé rozvody
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání nebylo počítáno s vybavením oddělení systémem sestra v nouzi
Nove řešeni:
Nově bude oddělení psychiatrie vybavené systémem sestra v nouzi, který umožní v případě ohrožení personálu přivolat pomoc
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání nebylo oddělení vybavené systémem sestra v nouzi. Od doby provedení projektu se nově začal v nemocnicích uplatňovat systém sestra v nouzi, který umožní rychlé přivolání pomoci ohroženému personálu. Obzvláště na odděleních psychiatrické péče je tento systém důležitý a velmi potřebný, protože se tak zvýší úroveň BOZP zaměstnanců.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty kceně díla:
64 734 Kč
13 594 14 Kč
78 328,14 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
64 734Kč
13 594,14Kč
78 328,14 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:
1
nE2S7
£
Datum:
Podpis:
y.i
Datum:
Podpis:
H'irhA-
Razítko:
Razítko:
PSG Construetion a.s.
MapiltMikt1552 iČ:Q5Q4?rc
íc.: UbOJty.i,-		
DIČ:	úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval
765 02 Qtrokovtea
Datum:
1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
						
Objekt	Název objektu					
	ZL.5.16 Doplnění systému sestra v nouzi			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
1				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady					64 734,00	
Ostatní náklady Celkem					64 734,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :		
Podpis :		Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	64 734,00 CZK	
DPH	21	%	13 594,14 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKE	M	78 328,14 CZK	

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet.	0,00	
Objekt.	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Varianta 	
Stavební díl		!		Typ dílu			Celkem	
9	Sestra v nouzi				64 734,00	
9						
	CELKEM OBJEKT				64 734,00	

Rozpočet VCP sestra v nouzi
Název : NsP HAVÍŘOV
Systém "Sestra v nouzi" - Psychiatrie
Název	Mj	Počet	
Dodávky
ústředna s LAN, GSM a rádiový modul	ks	1	
Sběrnicový modul pro připojení bezdrát. komponentů	ks	5	
Plast box pro bezdrát. modul	ks	5	
FLEX PVC 3x1,5 bílá 3M	ks	2	
Bezdrátové aktivační tlačítko ve tvaru hodinek	ks	21	
Záložní akumulátor 12V/2,1Ah faston VdS	ks	2	
Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	8	
Datový kabel pro RS485 4x2x0,5 /rozvod 1NP,2NP,3NP/	m	145	
Kabelové trasy , přípoje k bezdrát modulům	ks	5	
Koordinace , zpracování do projektu skut provedení	ks	1	
Lišta vkládací v 1NP	m	22	
Prostupy zdí v 1NP	ks	4	
CENA CELKEM BEZ DPH 21%
Zpracováno pro :
PSG Construction a.s.
Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
11 990 Kč	11 990 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	13 190 Kč	
2 985 Kč	14 925 Kč	240 Kč	1 200 Kč	16 125 Kč	
225 Kč	1 125 Kč			1 125 Kč	
145 Kč	290 Kč			290 Kč	
990 Kč	20 790 Kč	10 Kč	210 Kč	21 000 Kč	
550 Kč	1 100 Kč			1 100 Kč	
		450 Kč	3 600 Kč	3 600 Kč	
16 Kč	2 320 Kč	10 Kč	1 450 Kč	3 770 Kč	
120 Kč	600 Kč	160 Kč	800 Kč	1 400 Kč	
			1 000 Kč	1 000 Kč	
25 Kč	550 Kč	32 Kč	704 Kč	1 254 Kč	
		220 Kč	880 Kč	880 Kč	
	53 690 Kč		11 044 Kč	64 734 Kč