EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINÍSTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
22
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocníce s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění stávajících oken bezpečnostní folií
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání nebylo počítáno s úpravou stávajících oken
Nove resem:
Nově budou všechny okna polepené bezpečnostní folii
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání nebylo počítáno s úpravou stávajících oken. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Součástí toho standardu je i požadavek na zabezpečení oken proti rozbití. Z tohoto důvodu musí být všechny okna zabezpečené proti rozbití.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
285 658,51Kč
59 988,29 Kč
345 646,79 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
285 658,51Kč
59 988,29 Kč 345 646,79 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus	Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	Za technický dozor investora:
Ing. Petr Kosta	
Datum:
P°dpiS:	Datum:
Podpis:
[šal	Datum:
Podpis:
r.	Datura^
Podpls:W)
srrr&' 1 __±,	
Razítko^-y^-7^7*
PSG Construction «3.
8,. I lr.1r.LfA iSCrq	rlK	Razítko:
rt49070	Razítko:	Razítko:.	C; ' i	
765 02 Otrokovice DIG: CZOSO-í^sjtfest změnového listu za účastníka programu zkontroloval;.		
Datum:	
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL.Č.22 Doplnění bezpečnostní folie na okna			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			285 658,51
285 658,51	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:	Jméno :	Jméno:	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	285 658,51 CZK	
DPH	21	%	59 988,29 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	345 646,79 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 5

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	ZL.C.22 Doplnění bezpečnostní folie na okna	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dilu			Celkem	
766	Konstrukce truhlářské	HSV			285 658,51	
	CELKEM OBJEKT				285 658,51	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a,s
Strana 2 z 5

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.
Dii:	Číslo položky	Název položky
Bezpečnostní fólie na stávající plastová okna a dveře	MJ	množství	cena/ MJ	celkem
285 658,51	
		Dodávka bezpečnostní fólie CLEAR 7 fólie - ochranná čirá	m2	274,00	541,97	148 500,00	
		175 mikronů (nutno počítat s prořezem cca 25%)					
		Dodávka bezpečnostní fólie CLEAR 7 fólie - ochranná bílá	m2	31,20	541,97	16 909,46	
		(nutno počítat s prořezem cca 30%)					
		Montáž bezpečnostní fólie	m2	305,20	328,47	100 249,04	
		Formátování materiálu	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	
		Přesun hmot	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 3 z 5

M.č.	počet klik	Ol	02	03	
301		1,35X1,8	1,35*2,7	1,35X1,8	
302		OKNO PLAST	DVEŘE	OKNO HLINÍK	
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315		2			
316		2			
317		3			
318					
319					
320		1			
321					
322					
323					
324		2	2		
325					
326					
327		2	2		
328					
329					
330		2	2		
331					
332					
333		2	2		
334					
335					
336		2	2		
337					
338					
339		2	2		
340					
341					
342		2	2		
343					
344					
345		2	2		
346					
347					
348		2	2		
349					

350					
351		1	1		
352					
353					
354		2			
355					
356		2			
357					
358					
359					
360					
361				4	
362					
363					
364					
365					
366				3	
367				3	
368				4	
369				2	
370					
371				2	
372				2	
373				1	
374	OKNO 90- 180			2	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
23
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Objednatel:
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o,, Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Bezpečnostní úpravy nábytku
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání byl navržen nábytek dle běžných standardů
Nove resem:
Nově bude nábytek přizpůsoben tak, aby nemohlo docházek sebepoškozování pacientů.
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání byl navržen nábytek dle běžných standardů. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodu bude přizpůsoben nábytek tak, aby nemohlo docházek sebepoškozování pacientů.
Budou tak přizpůsobené hrany a úchyty nábytku.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
116 318 Kč
24 426,78 Kč
140 744,78Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
116 318 Kč
24 426,78 Kč
140 744,78Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
ifgatum:
Podpis:
lfc 0504202H
Datum:
Podpis:
/T. i

Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Truhlářství Ladislav Džemla, Popská 3, 746 01 Opava
mobil:608 039 347 tel.fax:553 762 211
e-mail: dzemla.l@seznam.cz
ZL č.23 - Bezpečnostní úpravy nábytku
Položka		Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	
					
1	Zápustná úchytka - kuchyně				
	úchytky jsou zafrézované do dvířek				
	11 kuchyní (101 -111) x 10 úchytek (úchytka + frézování)	110	140 Kč	15 400 Kč	
2	Jídelní stoly	29	610 Kč	17 690 Kč	
	kulaté nohy a zakulacené nohy na stolových deskách				
	(rádiusy na stolech + olepování rádiusů)				
	prvky z rozpočtu D.4.5 : 22107, 22108, 22109, 22115, 22306, 22406 (celkem 29ks)				
3	Sklopný věšák - nosnost 8 kg	28	240 Kč	6 720 Kč	
	(D+M věšáku + frézování)				
	3 lůžkové pokoje (m.č.230,236,240,245,354,356) po 2ks/pokoj, tedy
celkem 12ks				
	2 lůžkové pokoje (m.č.317,324,327,330,333,336,339,342,345,348) po
1 ks/pokoj, tedy celkem 10ks				
	1 lůžkové pokoje (m.č.216,217,220,222,225,227) po 1ks/pokoj, tedy
celkem 6ks				
4	Sklopný stůl - zakulacené hrany vč. sklopného systému dle přání
nemocnice	9	950 Kč	8 550 Kč	
	prvek z rozpočtu D.4.5 : 22307 (celkem 9ks)				
5	Příplatek za nadstandardní barvu noh jídelních stolů - černý
komaxit	116	170 Kč	19 720 Kč	
	prvky z rozpočtu D.4.5 : 22107, 22108, 22109, 22115, 22306, 22406 (celkem 29ks)				
6	Zápustná úchytka - skříně				
	úchytky jsou zafrézované do skříně				
	20 skříní x 170 úchytek (úchytka + frézování)	170	140 Kč	23 800 Kč	
7	Skříň na léky	1	24 438 Kč	24 438 Kč	
	prvek z rozpočtu D.4.5 : 60168				
					
Cena celkem bez DPH	116 318 Kč