■
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský rond pro regionální rozvoj integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
30
identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Zhotovitel:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění krycích polosloupů k umyvadlům
Část díla dotčená změnovým listem
S0 01ZTI
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Die PD nebylo počítáno z polosloupy u umyvadel
Nové řešení:
Nově se zakryjí rozvody odpadů u umyvadel keramickými polosloupy.
Zdůvodnění změny:
Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto sta ndardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodů nemůže byt viditelné napojení umyvadel na vodu a kanalizaci. Zároveň se tak zabrání neodborné manipulaci či dokonce poškození těchto připojení pacienty v těžkém psychickém stavu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
45 900 Kč
6 885Kč
52 785 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
45 900 Kč
6 885Kč
52 785 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Datum:
Podpis:
jb-o
?SQ Construction a.s.
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Datum:
Podpis:
L<ct/ ■ V
zítko:
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: 	Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:
Datum: Podpis';//f
Razítko:
1662	""k05?!2.?2®	. Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: í
	SIĎ! C3Z05042020—		-—		r-
Oatum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet		JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
	ZL č.3d - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty
dveřních zarážek	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
	Psychiatrie Havířov	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
Z
R
N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
	PS V celkem	45 900	Oborová přirážka	0	
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem	45 900	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	45 900	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	45 900	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :
Datum :
Podpis :	Jméno :
Datum :
Podpis:	Jméno :
Datum :
Podpis:	
Základ pro DPH	15,0	%	45 900 Kč	
DPH	15,0	%	6 885 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	52 785 Kč	
Poznámka :
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1

Stavba :	Psychiatrie Havířov	Rozpočet:	2021/47	
Objekt:	ZL č.30 - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty dveřních zí	PSG-Havířov- VCP- D+M Polosloupy k i	
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
725	Zařizovací předměty
766	Konstrukce truhlářské - dveřní zarážky	O O	36 750
9 150	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	0	45 900	0	0	0	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN	Kč	% Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 900	0	
Oborová přirážka	0	0,0	45 900	0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 900	0	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 900	0	
Zařízení staveniště	0	0,0	45 900	0	
Provoz investora	0	0,0	45 900	0	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 900	0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 900	0	
CELKEM VRN	0	
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 2

Položkový rozpočet
Stavba :	Psychiatrie Havířov		
Objekt:	ZL č.30 - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty dveřnít		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	725	Zařizovací předměty	
1	72501	D+Montáž Polosloupu k umývadlům/kryty na sifony	soubor	35,00	1 050,00	36 750,00	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty	36 750,00	
P.č.
Dii:	Číslo položky
766	Název položky
Konstrukce truhlářské - dveřní zarážky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
9 150,00	
140	PC 10	D+M dveřních zarážek	ks	122,00	75,00	9 150,00	
		dveře dle PD : 104ks		104,00			
		2.NP : 15ks		15,00			
		Čekárna : 2ks		2,00			
		Dialýza : 1ks		1,00			
Cena celkem
45 900,00
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 3