H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:	1	
Identifikace akce:	
Název akce	Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004705	
Číslo akce EDS/SMVS1):		
Objednatel:	Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Projektant:	MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno	
Předmět změnového listu
Oprava dlažby na 20ks balkonech _ 	
Část díla dotčená změnovým listem	 		 	 		
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie - stavební část	’	
Popis změny, popis technického řešení 		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 	 	 	
Dle původního zaclání PD a rozpočtu nebylo počítané s opravou dlažeb na balkonech
Nové řešení:					
Dle původního zadání se neuvažovalo s opravami dlažeb na stávajících balkonech. Jedná se celkem o 20 ks balkonu. Nově se provede demontáž skladby podlahy balkonu včetně oplechování. Vyspraví se poškozené části ŽB desky, provede se izolace, spádový beton a nová dlažba včetně soklu a oplechování
Zdůvodnění změny:				 	
Během realizace stavby bylo zjištěné, že od doby zpracování projektu do doby realizace stavby, došlo na stávajících balkonech k velké degradaci dlažeb, které se původně neměly měnit. Projevil se vliv dlouhodobého zatékání dešťové vody pod dlažbu a vady původní hydroizolace. Sondami bylo zjištěno, že izolace pod dlažbou je značně poškozená a díky tomu dochází i k zatékání do fasádního pláště. Došlo tak k poškození jak tepelné izolace, tak povrchové úpravy fasády.
Dlažba vykazuje velké nerovnosti a je místy uvolněná. Nevyhovuje tak požadavkům bezpečného užívání stavby. Bez provedení opravy by docházelo k dalším poškozováním a ty můžou vážně narušit další konstrukce, jako jsou například železobetonové desky balkonů nebo nové skladby podlah místností, které na balkony navazují.
Z těchto důvodů bude nutné odstranit stávající dlažbu včetně soklu, provést sanaci porušených částí desky, novou hydroizolaci a položit novou dlažbu včetně klempířských prvků.
Tato změna byla vyvolaná časovým intervalem mezi zpracováním projektu a realizaci, neboť v době zadání projektu dlažba na balkonech nevykazovala poruchy.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není	
	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:					
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v KD č.2 ze dne 6.1.2021			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není	
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6	
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	980 124Kč	205 826,04Kč	1185 950,04 kč	
Odpočty z ceny díla:	Kč	kč •	kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	980 124 Kč	205 826,04Kč	1185 950,04k£	
Změnu odsouhlasil	
Za zhotovitele:
RenéJakus	Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	Za technický dozor investora:
Ing. Fptr KosK)	
Datum:
Podpis: oU	Datum:
Podpis:
Krofiove 45	Datum:
Podpis:
0.	Datum:
Podpis:	
Razítko:
PSG Gon&truot'on bjj. Napujedcleké 1652	\č: 0504
706 02 Otrokovice	C/uř	Razítko: 616 00 BRNO ©/fax 541 211 409, 777 80r 3
■)^ř-9n60703016 CZ80y0:j	^?azi\cE s poiiiaiNíKCii TiAVírrr.
^ příspěvková organ!/* o:
vý^Sr-h^ 11 9.*i m	Pí ?.7nViVi. -•	Razítko:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:
1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	Změnový list 6.1 Úpravy balkónů			
Stavba	Název stavby			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Projektant						
				
Objednatel	NsP Havířov, p.o.					
Dodavatel	PSG Construction a.s.				
Rozpočtoval	Bc. Marek Kuchař			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			502 740,00
477 683,76
0,00
980 124,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:		Jméno		Jméno:		
Datum		Datum:		Datum		
Podpis		Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	980 124,00 CZK	
DPH	21	%	205 826,04 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 185 950,04 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 4

[f===§tavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	
1	Obiekt:	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	HSV			19 996,76	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 137,87	
96	Bouráni konstrukci	HSV			2 151,49	
99	Staveništni přesun hmot	HSV			268,37	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HŠV			582,51	
711	Izolace proti vodě	PSV			2 744,64	
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 287,77	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 836,79	
	CELKEM za 1 balkón				49 006,20	
	CELKEM za 20 balkónů				98Ó -i 24,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 2 z 4

Stavba: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie Objekt; Úprava 20ks balkónů
ROZPOČET
Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum:
č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	Hmotnost
celkem	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6	výplní	19 996,76	0,800	
1	612409991RT2	Začišténi omítek kolem oken.dveří apod., s použitím maltové směsi	m	8,150	180,00	1 467,00	0,000	
2	632450100	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše- balkónový potěr	m2	7,200	915,00	6 588,00	0,756	
3	01san-01	Sanace betonové konstrukce - homi část 60% plochy	m2	4,320	1 941,53	8 387,41	0,000	
4	61001	Vloženi lišty PURENIT včetně úpravy pod prahem	bm	1,350	750,00	1 012,50	0,000	
5	610010001	Oprava čela balkonu včetně omítky a barevné úpravy balkónové desky	m2	0,625	1 250,00	781,25	0,000	
6	610010002	Úprava přechodu původní a nové omítky - čelo balkonu	bm	3,125	120,00	375,00	0 000	
7	61O991111R00	Zakrývání stávajících oken a parapetních desek	m2	6,075	6,44	39,12	0,000	
8	978036191.	Otlučeni (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % - očištění balkónové desky	m2	7,200	120,00	864,00	0,000	
9	622135002	Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do
10 mm	m2	1,630	296,00	482,48	0,044	
94	Lešení a stavební výtahy	2137,87	0,000	
10	941941032ROO	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	23,238	28,00	650,66	0,000	
11	941941192R0O	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	46,475	22,00	1 022,45	0,000	
12	941941832R00	Demontáž lešení leh.fads podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	23,238	20,00	464,76	0,000	
96	Bourání konstrukcí	 	 2 151,49	0,000
13	965044121R00	Bouraní podkladů bet., tl. 4 cm,	m2	7,200	212,64	. 1 531,01	0,000	
14	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,200	48,08	346,18	0,000	
15	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	8,150	32,00	260,80	0,000	
16	76441085OR00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	1,350	10,00	13,50	0,000	
	99	Staveništní přesun hmot				268,37	0,000	
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,062	252,70	268,37	0,000	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				582,51	0,000	
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,464	160,00	B3.52	0,000	
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,464	140,00	64,96	0,000	
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,464	145,00	67,28	0,000	
21	979081121ROO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,816	8,00	70,53	0,000	
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,464	30,00	13,92	0,000	
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,435,	500,00	217,50	0,000	
24	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	0,036	1 800,00	64,80	0,000	
	711	Izolace proti vodě				2 744,64	0,000	
25	711131811	Odstranění izolace proti zemni vlhkosti vodorovné	m2	7,200	21,20	152,64	0,000	
26	711212002R00	Hydroizolační' povlak - nátěr nebo stěrka	m2	7,200	360,00	2 592,00	0,000	
764
Konstrukce klempířské
1 287,77
0,002

E	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	Hmotnost
celkem	
		
27	764226406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené systémový prvek	m	1,350	951,00	1 283,85	0,002	
28	9987641O3R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,002	1 961,36	3,92	0,000	
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				19 836,79	0,260	
29	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	8,150	168,00	1 369,20	0,008	
30	597-15689	DLAŽBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka - mrazuvzd typ 2, popis viz skladby podlah	M2	1,712	330,00	564,96	0,038	
31	771479001ROO	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,150	10,00	81,50	0,000	
32	771575206R00	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 20x20 cm	m2	7,200	450,00	3 240,00	0,000	
33	597-15689	DLAŽBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka - mrazuvzd.typ 2, popis viz skladby podlah	M2	7,560	330,00	2 494,80	0,166	
34	771101210RCI0	Penetrace podkladu pod dlažby montáž + dodávka	m2	7,200	15,00	108,00	0,000	
35	771579795ROO	Spárováni vodotěsnou hmotou - plošně	m2	7,200	15,00,	108,00	0,000	
36	771591211.SCS	Rohož celoplošně lepená roznášecí a separační do podlah DITRA 25	m2	7,600	607,34	4 615,78	0,039	
37	771591263.SCS	Spoj izolace na sraz dvou rohoží DITRA	m	9,450	210,42	1 988,47	0,004	
38	771591264.SCS	Izolace těsnlcfmi pásy mezi podlahou a stěnou KERDI	m	9,550	199,08	1 901,21	0,003	
39	771591232. SCS	Izolace těsnícími pásy pružná pres dilatační spáry KERDI FLEX	m	9,550	347,17	3 315,47	0,003	
40	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m, výkaz výměr wgenerován programeme	t	0,260	190,00	49,40	0,000	
	OST	Ostatní				931 117,80	0,000	
41	001	Dopočet ceny do plného počtu, celkové množství je 20 ks balkonu	ks	19,000	49 006,20	931 117,80	0,000	
Celkem za 20 balkónů
980 124,00
1,062

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO
pro místní
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
Identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1): Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. Číslo projektu CZ.06.2.S6/0.0/0.0/16..048/000470S		 	
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov PŠG Construction a.s., Napajedelská 15S2, 765 02 Otrokovice
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Větší tloušťka a jiná skladba bouraných podlah Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část Popis tměny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání PD a rozpočtu bylo počítáno s bouráním podlah z betonové mazanlny v tloušťce 100 mm
Nové řešení:
Dle původního zadání bylo počítáno s bouráním podlah z betonové mazaniny v tloušťce 100 mm s jednou vrstvou PVC krytiny.
Stávající podlahy máji jinou skladbu a jsou v průměru o 20 mm silnější.
Dojde tak k větším výměrám bouracích prací a současně bude nutné dorovnat výškový rozdil v nových podlahách, kde bylo rovněž uvažované s tloušťkou 100 mm. Výškový rozdil bude dorovnán ve skladbě podlahy, a to z větší části polystyrenem a částečně anhydridovým potěrem.
Zdůvodnění změny:
Při bourácích pracích bylo zjištěno, že stávajíc! podlahy mají větší tloušťku, která je v průměru 120 mm. Tato skutečnost byla geodetický zaměřena oprávněným geodetem a je podložená měřičským plánem. Zároveň bylo zjištěno, že podlahy mají jinou skladbu oproti projektové dokumentaci a jsou na nich dvě vrstvy podlahové krytiny z PVC místo jedné.
Nové podlahy máji navrženou skladbu v tloušťce 100 mm a musí navazovat na stávající chodbu schodiště a stávající prahy výtahů, proto bude nutné tento rozdíl dorovnat. Pro sníženi nákladů a zamezení dalšího zatěžování konstrukcí stropu bude převážná část nerovnosti dorovnána podlahovým polystyrénem zbylá anhydridovým potěrem Tento změnový list zahrnuje dva samostatné rozpočty.
První řeší odpočet bouracích prací dle původního zadání a přípočet bouracích prací dle skutečnosti
Druhý řeší dorovnání výškového rozdílu skladby podlahy oproti projektu, který vznikl po vybouráni podlah, kdy se zjistilo, že jejich tloušťka je vyšší.
Tato změna nebyla možná zjistit před zahájením prací, neboť se jedná o skryté konstrukce a konkrétní rozsah a materiálové skladby nebyly v době projektové přípravy zjistitelné a ověřitelné.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v KD č.4 ze dne 21.1.2021
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla; Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6 Vliv na cenu:
Přfpočtyk ceně díla: Odpočty z ceny díla:
Celkový vliv na změnu ceny díla: Změnu odsouhlasil
Cena bez DPH
869 972,72Kč
-478 819,63 Kč
391153,09 Kč
DPH
182 694,27 Kč
-100 552,12 Kč
82 142,15 Kč
Cena s DPH
1 052 666,99 Kč
-579 371,75 Kč
473 295,24 Kč
Za zhotovitele:
RenéJakus	2a projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	-Za tethničky dozor investora:
Ing Petr Kosta	
Datum:	,
Podpis:	Datum:
Podpis:fjgi
g^igp	11 ,T-P-
‘	Krov.QVa 4b 		Datum:
Podpis:
)
4) -	Datum:
Podpis:
° M/*	/	
Razítko:	iris	m
'tiv. 02 Otrokovic© DIČ;
. _ ....	■fěsm:	616 00 BRNO
' O0S«aa2641 211 409, 777 ROl S ICO 60703018 Ol© C2SO/OU-.	Razítko:
'i OCNiraSroiffiUNIKOIJ HAVÍŘ i	příspěvkoví, organizace	Razítko:
V.	
Úplnost změnového listu za líčaštnfka^řográmu ikoňífdloval:
Datum:
EDS/SMVS se rozum! moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	ZL.č.2 Vícepráce podlahy			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel	NsP Havířov, p o.					
Dodavatel	PSG Construction a.s.				
Rozpočtoval	Bc.Marek Kuchař			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			391 153,09
0,00
0,00
391 153,09	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:		Jméno		Jméno		
Datum		Datum :		Datum	15.02.2021	
Podpis:		Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	391 153,09 CZK	
DPH	21	%	82 142,15 CZK	
Zaokrouhleni		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	473 295,24 CZK	
Popis
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 4

NsP HAVÍŘOV
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
Rozpočet:	0,00
SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební dli	Typ dílu			Celkem	
	Bourání a podlah 2. a 3. NP - odpočiy	HSV			-478 819,63	
	Bourání a podlah - přípočiy 2. a 3. NP	HSV			681 686,96	
	Vyrovnáni podlah	HSV			188 285,76	
	CELKEM OBJEKT				391 153,09	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 4

stavba: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie Objekt: Bourání a podlah 2. a 3. NP - odpočty
ROZPOČET
Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 21 1.2021
č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	Hmotnost
celkem	
96	Bourání konstrukcí	 			 -213 298,34	0,000
i 1 |965042t4tRQ0 jsourání mazanln betonových tl. 10 cm. had 4 m2	[m3 i -102,979|	2 071.2s|	-213 298^34]	0.0Qo|
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		 	 -265 521,29	0,000
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-226,554	180,00	-40 779,72	0,000	
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-226,554	140,00	-31 717,56	0,000	
4	979081111ROO	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-226,554	145,00	-32 850,33	0,000	
5	979081121RDO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-4 304.526	8,00	-34 436,21	0,000	
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-226,554	30,00	-6 796,62	0,000	
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti zs dalších 5 m	t	-1 132,770	5,00	-5 663,85	0,000	
8	9 7999000 JROO	Poplatek za skládku stavební suti	t	-226,554	500,00	-113 277,00	0,000	
Celkem
Objekt: Bourání a podlah - přfpočty 2. a 3. NP
-478 819,63	0,000
Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:
Místo:	Datum: 21.1.2021
c.	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	Hmotnost
celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV	Práce a dodávky HSV	589 121,13	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 898,60	0,000
Umírání mnrflnin Řkvárnhptnnnwr.h t! rin mn mm nl nřric í	1 Oni	1 Rán nnl	Dr an	n nnn
1	965041341	Bourání mazanjn škvárobetonových tJ do 100 mm pl přes 4 m2	m3	52,120	1 640,00	85 476,80	0,000	
2	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do
50 mm pl přes 4 m2	m2	1 042,400	113,00	117 791,20	0,000	
3	965045000	Příplatek za bourání rozdílné skladby podlah	m2	1 042,040	15,00	15 630,60	0,000	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				370 222,53	0,000	
4	979011111R00	Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	308,724	180,00	55 570,32	0,000	
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	308,724	140,00	43 221,36	0,000	
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	308.724	145,00	44 764,98	0,000	
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 865.756	8,00	46 926,05	0,000	
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	308,724	30,00	9 261.72	0,000	
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 543,620	5,00	7 718,10	0,000	
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	302,264	500,00	151 132.00	0,000	
11	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	6,460	1 800,00	11 628,00	0,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV				92 565,83	0,000	
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 264,96	0,000	
12	711131811	Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1 042,400	20.40	21 264,96	0,0001	
	776	Podlahy povlakové				37110,15	0,000	
13	776511810ROO	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	916.300	40,50	37 110,15	0,0001	
	762	Konstrukce tesařské				34 190,72	0,000	
| 14 [762526811	120 mm baz polštářů	 |m2	1 042,4001	32,60s	~	34190,721	0,000
Celkem
681 686,96
0,000

					i	
Popis	MJ	celkem	jednotková	Cena celkem	celkem	
Soupis prací
n$p HAVIR0V	
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
(jpT	Cisto položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	
Dii:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				142 627,60	
	632441119	Poplatek k anhydritovému samonivelačnimu potěru ze
podlahy:	m2	963,70	148.00	142 627,60	
		P 1 : 2.NP 440,1 m2		440,10			
		P 2,3,4 : 2NP 37m2		37,00			
		P 1 : 3.NP 401,5m2		401,50			
		P 2 : 3.NP 30.6m2		30,60			
		P 2,3 : 3.NP 54.5m2		54,50			
DII:	99	Staveništní přesun hmot				4 602,66	
260	999281111ROO	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,21	252.70	4 602,66	
		směs suchá pro samonivelační anhydritový potěr 25 MPa		18,21			
Dii:	713	Izolace tepelné				41 055,50	
283	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	781,71	22,50	17 588,52	
		P 1 : 2.NP 440,1 m2 (60% = 264.06m2)		264.06			
		P 2,3,4 : 2NP 37m2 (60% = 22,2m2)		22,20			
		P 1 : 3.NP 401,5m2		401,50			
		P 2 : 3.NP 30,6m2		30,60			
		P 2,3 : 3.NP 54,5m2		54,50			
		3NP u výtahů (místnost 302): 8,852m2		8,85			
291	28375778. AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.20 mm,	m2	811,50	25,90	21 017,85	
		P1-P4 : 772,86*1,05		811,50			
	28375777	Deska EPS 100 pro trvalé zatíženi v tlaku (max, 2000 kg/m2)	m2	9,29	147,00	1 366,31	
		3NP u výtahů (místnost 302): 8,852*1,05		9,29			
297	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,70	190,00	1 082,83	
		Polystyrén EPS 100S 1B-23kg/m3		0,02			
		Extrudovaný polystyrén 30-40kg/m3		5,68			
nová položka z KROSU
cena z SOD
cena z SOD
nová položka z KROSU
Celkem
188 285,76