_H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
14
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Freomet zmenoveno listu	
Záměna kování dveří-obyčejné kliky za kliky proti oběšení
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání měly být dveře vybavené standartním kováním
Nové řešení:
Nově budou dveře do pokojů a sociálních zařízení vybavené speciálním kováním znemožňující oběšení.
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání měly být dveře vybavené standartním kováním. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodu musí být nově i dveře vybavené kováním znemožňující oběšení.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
335 990 Kč
70 557,9 Kč
406 547,9Kč
Odpočty z ceny díla:
-13 800 Kč
- 2 898 Kč
-16 698 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
322 190 Kč
67 659,9 Kč
389 849,90 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: jdg. Petr Kosta
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:

Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:

toj rw+~
Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
^1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
Objekt | Název objektu | |
| ZL.č.14 Kliky proti oběšení | |
Stavba | Název stavby | |
| NsP HAVÍŘOV | |
Projektant | | | | |
Objednatel | | | | |
Dodavatel | | | | |
Rozpočtoval | Ing. Vladimír Soukal | |
Rozpis ceny
Název | Celkem

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

322 190,00
322 190,00

Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : | Jméno: | Jméno •

Datum :
Podpis :

Datum :
Podpis:

Datum :	26.05.2020
Podpis:

Základ pro DPH	15 | % | 0,00 CZK
DPH	15 | % | 0,00 CZK
Základ pro DPH	21 | % | 322 190,00 CZK
DPH	21 | % | 67 659,90 CZK
Zaokrouhlení | | 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM | 389 849,90 CZK
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 4

Stavba : | NsP HAVÍŘOV | Rozpočet:	0,00
Objekt: | ZL.č.14 Kliky proti oběšení | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl | Typ dílu | | | Celkem
766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 322 190,00
| CELKEM OBJEKT | | | | 322 190.00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 4

Soupis prací
S: | 0025 | NsP HAVÍŘOV
0: | 003 | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
R: | 01 | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | celkem
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské - klika proti oběšení varianta nerez | | | | 273 010,00
324 | PC 10400 | U'i iKA PRO^T; OBěŠE^i V*R!/V'^rr.-\ >iFRF“ PRO DVEŘE | KUS | 5,00 | 6 235,00 | 31 175,00
| | VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, kování, mřížka | | | |
| | VZT 300/100 mm odečet původního kování | | 5,00 | -300,00 | -1 500,00
325 | PC 10500 | ■;UK4 FP.CTi 03ĚŠE i	^:	- - PRO DVEŘE | KUS | 14,00 | 6 235,00 | 87 290,00
| | VNI PL.HL. 70/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, gener.klíč odečet původního kování | | 14,00 | -300,00 | -4 200,00
336 | PC 11600 | KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD, general.klíč | KUS | 1,00 | 6 235,00 | 6 235,00
| | odečet původního kování | | 1,00 | -300,00 | -300,00
337 | PC 11700 | KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE | KUS | 1,00 | 6 235,00 | 6 235,00
| | VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18 ODLEHČ.DTD, gen.klič, mřížka VZT 300/100 mm odečet původního kování | | 1,00 | -300,00 | -300,00
340 | PC 12000 | KLIKA PROTI OBÉ3E ii VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE | KUS | 14,00 | 6 235,00 | 87 290,00
| | VNI PL.HL. 110/197 cm, T/21 ODLEHČ.DTD, aener.klíč.neDrůzvučnost 27 dB odečet původního kování | | 14,00 | -300,00 | -4 200,00
341 | PC 12100 | KLIKA PROTI OBĚŠENÍ VARIANTA NEREZ PRO DVEŘE | KUS | 6,00 | 6 235,00 | 37 410,00
| | VNI PL.HL. 110/197 cm, T/22 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 cm he7n rlvniskln odečet původního kování | | 6,00 | -300,00 | -1 800,00
342 | PC 12200 | KLIKA PRO^T OBĚŠENÍ VARIANT* ÍEREZ PRO DVEŘE | KUS | 3,00 | 6 235,00 | 18 705,00
| | VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23 ODLEHČ.DTD, gen.klič, mřížka VZT 300/100 mm odečet původního kování | | 3,00 | -300,00 | -900,00
343 | PC 12300 | KLIKA PROTi OBĚŠENÍ VARIANTA l-REZ PRO DVEŘE | KUS | 2,00 | 6 235,00 | 12 470,00
| | VNI PL.HL. 110/197 cm, T/24 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 | | | |
| | - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB, odečet původního kování | | 2,00 | -300,00 | -600,00

P.Č.
Díl:

Číslo položky
766

Název položky
Konstrukce truhlářské - rozeta

MJ

množství

cena/MJ

celkem
49 180,00

324 | PC 10400 | KOVÁNI PRO DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, mřížka VZT 300/100 mm | KUS | 5,00 | 1 655,00 | 8 275,00
325 | PC 10500 | KOVÁNI PRO DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, aener.klíč | KUS | 14,00 | 1 655,00 | 23 170,00
336 | PC 11600 | KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD, aeneral.klíč | KUS | 1,00 | 1 655,00 | 1 655,00
337 | PC 11700 | KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18 ODLEHČ.DTD. qen.klíč. mřížka VZT 300/100 mm | KUS | 1,00 | 580,00 | 580,00
340 | PC 12000 | KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/21 ODLEHČ.DTD, aener.klíč.neDrůzvučnost 27 dB, | KUS | 14,00 | 620,00 | 8 680,00

341

PC 12100

KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/22 ODLEHČ.DTD, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor
35/15 cm.bezD.dvoisklo

KUS

6,00

620,00

3 720,00

342 | PC 12200 | KOVÁN, PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23 ODLEHČ.DTD, aen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm | KUS | 3,00 | 620,00 | 1 860,00
343 | PC 12300 | KOVANÍ PRO DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/24 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost ZZ-dB. | KUS | 2,00 | 620,00 | 1 240,00
Cena celkem bez DPH	322 190,00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 4

Nsp Havířov psychiatrie
Seznam místnosti a počet klik proti oběšení
3NP
2NP
M.č. | druh dveří | č.dveří | počet | počet wc |
324 | obyčejné | T21P | 1 | | klika-klika
325 | WC | T6L | | 1 | klika-klika
327 | obyčejné | T21L | 1 | | klika-klika
323 | WC | T6P | | 1 | klika-klika
330 | obyčejné | T21p | 1 | | klika-klika
331 | WC | T6L | | 1 | klika-klika
333 | obyčejné | T21L | 1 | | klika-klika
| WC | T6P | | 1 | klika-klika
336 | obyčejné | T21P | 1 | | klika-klika
| WC | T6L | | 1 | klika-klika
339 | obyčejné | T21L | 1 | | klika-klika
341 | WC | T6P | | 1 | klika-klika
342 | obyčejné | T21P | 1 | | klika-klika
343 | WC | T6L | | 1 | klika-klika
345 | obyčejné | T21L | 1 | | klika-klika
347 | WC | T6P | | 1 | klika-klika
348 | obyčejné | T21P | 1 | | klika-klika
343 | WC | T6L | | 1 | klika-klika
317 | obyčejné | T21I | 1 | | klika-klika
313 | | T6P | | 1 | klika-klika
354 | obyčejné | T24P | 1 | | klika-klika
355 | WC | T6P | | 1 | klika-klika
356 | obyčejné | T24P | 1 | | klika-klika
347 | wc | T17P | | 1 | klika-klika
322 | obyčejné | T18L | 1 | | klika-klika
M.č. | druh dveří | č.dveří | počet | počet wc
220 | obyčejné | T22P | 1 |
222 | obyčejné | T22L | 1 |
225 | obyčejné | T22P | 1 |
227 | obyčejné | T22L | 1 |
230 | obyčejné | T21P | 1 |
232 | wc | T6P | | 1
234 | wc | T5L | | 1
236 | obyčejné | T21L | 1 |
237 | wc | T6L | | 1
233 | wc | T5P | | 1
240 | obyčejné | T21L | 1 |
242 | wc | T6L | | 1
243 | wc | T5P | | 1
245 | obyčejné | T21L | 1 |
246 | wc | T5L | | 1
247 | wc | T5P | | 1
217 | obyčejné | T22I | 1 |
216 | obyčejné | T22L | 1 |
214 | obyčejné | T23L | 1 |
215 | obyčejné | T23L | 1 |
207 | obyčejné | T23L | 1 |
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
ka-klika
13
8
13	12
Celkem	WC	26
Obyčejné	20
46

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
15
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Záměna kování oken - obyčejné kování za kování proti oběšení
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání měly být okna vybavené standartním kováním
Nové řešení:
Nově budou okna včetně původních oken do pokojů a sociálních zařízení vybavené speciálním kováním znemožňující oběšení.
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání měly být okna vybavené standartním kováním. Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto standardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodu musí být nově okna včetně těch stávajících, vybavené kováním znemožňující oběšení.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
208 980 Kč
43 885,80 Kč
252 865,80 Kč
Odpočty z ceny díla:
-Kč
-Kč
-Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
208 980Kč
43 885,80 Kč
252 865,80 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora:  Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis: fa' jj^
PSG Construction a.a,
Datum:
Podpis:
'-■Ctí
Datum:
Podpis:
Datum: Podpis:
k

Razítko:
Razítko:

79605Otrokovlca DIČ:czoB042uAýp|_nost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
^1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
Objekt | Název objektu | |
| Zl.č.15 Kování oken proti oběšení | |
Stavba | Název stavby | |
| NsP HAVÍŘOV | |
Projektant | | | | |
Objednatel | | | | |
Dodavatel | | | | |
Rozpočtoval | Ing. Vladimír Soukal | |
Rozpis ceny
Název | Celkem

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

208 980,00
208 980,00

Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : | Jméno: | Jméno

Datum :
Podpis :

Datum :
Podpis:

Datum :	26.05.2020
Podpis:

Základ pro DPH	15 | % | 0,00 CZK
DPH	15 | % | 0,00 CZK
Základ pro DPH	21 | % | 208 980,00 CZK
DPH	21 | % | 43 885,80 CZK
Zaokrouhlení | | 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM | 252 865,80 CZK
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 3

Stavba : | NsP HAVÍŘOV | Rozpočet:	0,00
Objekt: | Zl.č.15 Kováni oken proti oběšení | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl | Typ dílu | | | Celkem
766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 208 980,00
| CELKEM OBJEKT | | | | 208 980,00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 2 z 3

Soupis prací
S: | 0025 | NsP HAVÍŘOV
0: | 003 | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
R: | 01 | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

P.č.
Díl:

Číslo položky
766

Název položky
Konstrukce truhlářské - kliky na okna

MJ

množství

cena / MJ [celkem
208 980,00

300

PC 10400

BEZPEČNOSTNÍ KLIKY NA OKNA (proti oběšení, okenní
klika/knoflík s uzamykáním)

ks

129,00

1 620,00

208 980,00

Cena celkem bez DPH
208 980,00
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 3

_H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
16
Identifikace akce:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocníce s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění SLP o systém sestra v nouzi
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-slaboproudé rozvody
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání nebylo počítáno s vybavením oddělení systémem sestra v nouzi
Nove řešeni:
Nově bude oddělení psychiatrie vybavené systémem sestra v nouzi, který umožní v případě ohrožení personálu přivolat pomoc
Zdůvodnění změny:
Dle původního zadání nebylo oddělení vybavené systémem sestra v nouzi. Od doby provedení projektu se nově začal v nemocnicích uplatňovat systém sestra v nouzi, který umožní rychlé přivolání pomoci ohroženému personálu. Obzvláště na odděleních psychiatrické péče je tento systém důležitý a velmi potřebný, protože se tak zvýší úroveň BOZP zaměstnanců.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty kceně díla:
64 734 Kč
13 594 14 Kč
78 328,14 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
64 734Kč
13 594,14Kč
78 328,14 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:
^1
nE2S7
£
Datum:
Podpis:
y.i
Datum:
Podpis:
H'irhA-
Razítko:
Razítko:
PSG Construetion a.s.
MapiltMikt1552 iČ:Q5Q4?rc
íc.: UbOJty.i,-		
DIČ:	úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval
765 02 Qtrokovtea
Datum:
^1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
Objekt | Název objektu | | | |
| ZL.5.16 Doplnění systému sestra v nouzi | |
Stavba | Název stavby | |
| NsP HAVÍŘOV | |
Projektant | | | | |
1 | | |
Objednatel | | | | |
Dodavatel | | | | |
Rozpočtoval | Ing. Vladimír Soukal | |
Rozpis ceny
Název | Celkem

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady

64 734,00

Ostatní náklady Celkem | | | | | 64 734,00
Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno | Jméno : | Jméno :
Datum : | | Datum : | | Datum : |
Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
Základ pro DPH | 15 | % | 0,00 CZK
DPH | 15 | % | 0,00 CZK
Základ pro DPH | 21 | % | 64 734,00 CZK
DPH | 21 | % | 13 594,14 CZK
Zaokrouhlení | | 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKE | M | 78 328,14 CZK

Stavba : | NsP HAVÍŘOV | Rozpočet.	0,00
Objekt. | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie | SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
REKAPITULACE DÍLŮ
Varianta 	
Stavební díl | ! | Typ dílu | | | Celkem
9 | Sestra v nouzi | | | | 64 734,00
9 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | | | | 64 734,00

Rozpočet VCP sestra v nouzi
Název : NsP HAVÍŘOV
Systém "Sestra v nouzi" - Psychiatrie
Název | Mj | Počet

Dodávky
ústředna s LAN, GSM a rádiový modul

ks

1

Sběrnicový modul pro připojení bezdrát. komponentů | ks | 5
Plast box pro bezdrát. modul | ks | 5
FLEX PVC 3x1,5 bílá 3M | ks | 2
Bezdrátové aktivační tlačítko ve tvaru hodinek | ks | 21
Záložní akumulátor 12V/2,1Ah faston VdS | ks | 2
Programování ústředny, uvedení do provozu | hod | 8
Datový kabel pro RS485 4x2x0,5 /rozvod 1NP,2NP,3NP/ | m | 145
Kabelové trasy , přípoje k bezdrát modulům | ks | 5
Koordinace , zpracování do projektu skut provedení | ks | 1
Lišta vkládací v 1NP | m | 22
Prostupy zdí v 1NP | ks | 4
CENA CELKEM BEZ DPH 21%
Zpracováno pro :
PSG Construction a.s.
Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
11 990 Kč | 11 990 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 13 190 Kč
2 985 Kč | 14 925 Kč | 240 Kč | 1 200 Kč | 16 125 Kč
225 Kč | 1 125 Kč | | | 1 125 Kč
145 Kč | 290 Kč | | | 290 Kč
990 Kč | 20 790 Kč | 10 Kč | 210 Kč | 21 000 Kč
550 Kč | 1 100 Kč | | | 1 100 Kč
| | 450 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč
16 Kč | 2 320 Kč | 10 Kč | 1 450 Kč | 3 770 Kč
120 Kč | 600 Kč | 160 Kč | 800 Kč | 1 400 Kč
| | | 1 000 Kč | 1 000 Kč
25 Kč | 550 Kč | 32 Kč | 704 Kč | 1 254 Kč
| | 220 Kč | 880 Kč | 880 Kč
| 53 690 Kč | | 11 044 Kč | 64 734 Kč