EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
24
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění ocelové konstrukce pro montáž hliníkových dveří
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie-stavební část
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle původního zadání byl navržen nábytek dle běžných standardů
Nové řešen::
Nově bude osezena konstrukce pro montáž hliníkových dveří
Zdůvodnění změny:
Po odkrytí konstrukcí v 2.NP bylo zjištěno, že pro osazení hlinkových dveří bude nutné vytvořit pomocnou ocelovou konstrukci.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
6 846,21 Kč
1441,48 Kč
8 305,69 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
6 846,21 Kč
1 441,48 Kč
8 305,69 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora:  Ing. Petr Kosta
Datum: Podpis: o
Datum:
Podpis:
{/

Datum:
Podpis:
v. i
Datum:
Podpis:

pijrhsť
Ra

Razítko:
Razítko
piC	\
a,S'<fe05043039 úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: i
7SS 02 Otrokovice D»Č: OZ06042020 Datum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL č.24 Doplnění ocelové konstrukce			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			6 864,21
6 864,21	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno	Jméno:	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	6 864,21 CZK	
DPH	21	%	1 441,48 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	8 305,69 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 2

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV					
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie					
	
|P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ | množství	cena / MJ	celkem	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 320,33	
375	PC 27300	POMOCNÁ OCEL.SVAROVANA KCE PRO
PROSKL.STĚNU dod + mont + osaz
Profil 100/100/3	2,7+2,6 m	kg	51,81	122,00	6 320,33	
		(2,7+2,6)*9,06		48,02			
		Plech 140/300/4 1 ks
1,32 kg/ kus
5% prořez		1,32			
		(48,04+1,32)7100*5		2,47			
Díl:	783	Nátěry				543,88	
465	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní pomocná ocelová svařovaná konstrukce nátěr 2x	m2	6,74	80,75	543,88	
		51,81*0,065*2		6,74			
|Cena celkem
6 864,211
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 2 z 2

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
25
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Objednatel:
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Hydrantové skříně
Část díla dotčená změnovým listem
Doplnění počtu žaluzií
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Původně se měly dodávat žaluzie pouze do nových oken 3.NP nástavby.
Nové řešení:
Nově se doplní žaluzie do stávajících oken
Zdůvodnění změny:
Od doby zpracování projektu do doby realizace došlo k nezvratnému poškození žaluzii ve většině stávajících oken. Z důvodu zajištění standartní lékařské péče pacientům a vyhovení podmínkám hygieny pracovního a léčebného prostředí je nutné zajistit kvalitní stínění a o žaluzie rozšířit další okna.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
50 995 Kč
10 708,95 Kč
61 703,95 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
50 995 Kč
10 708,95 Kč
61 703,95 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis: dLt-e, U\
Datum:
Podpis:

r
Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:

PSG Construction a.a.
sjedstsKá 1662 ič: 05042
Razítko:
170
Razítko:
78S Q2 Oxroicsvtci DIČ: C20DC42C2í>
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL.č.25 Doplnění žaluzií			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			50 995,00
50 995,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno:	Jméno	
Datum :
Podpis:	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	50 995,00 CZK	
DPH	21	%	10 708,95 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	61 703,95 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 3

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	ZL.č.25 Doplnění žaluzií	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební dil	Typ dílu			Celkem	
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			50 995,00	
	CELKEM OBJEKT				50 995,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 3

Soupis prací
s		0025	NsP HAVÍŘOV	
0		003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R		01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.
Díl:	Číslo položky
769	Název položky
Otvorové prvky z plastu	MJ	množství	cena / MJ	celkem
50 995,00	
407	PC 30400	Dodávka a montáž celostínicích žaluzií č.700	kus	65,00	776,92	50 500,00	
		okna 1,35x1,8m		65,00			
414	998766103ROO	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	4 950,00	495,00	
2.	NP (celkem 45ks žaluzií)
m.č. 213 2ks,212 2ks,211 2ks,210,207 2ks,206 2ks,250 2ks,251 4ks,253,252 2ks,255 2ks,256 2ks, 254
pracovna psychoperauta 2ks
pracovna ART sestry 2ks
pracovna vrchní sestry 2ks
předsíň
pracovna primáře 5ks pracovna psychologa 2ks inspekční pokoj lékařky 2ks šatna personál inspekční pokoj lékaři 2ks
3.	NP (celkem 20ks žaluzií)
m.č. 322,321,320,316 2ks,315 2ks.314.313,310 2ks,309,307,305 2ks,359 2ks,360,358 2ks
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 3

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
26
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p, o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedeiská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Hydrantové skříně	
Část díla dotčená změnovým listem
Doplnění úprav 2.NP
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Původně se v lékařském křídle 2.NP měly provádět úpravy m. č. 254,255, 257,259,260
Nove resem:
Nově se provede i ve zbývajících místnostech výměna podlahových krytin, dveřních křídel, zásuvek, svítidel. Doplní se otopná tělesa. Opraví se omítky, malby a nátěry stávajících zárubní
Zdůvodnění změny:
Od doby zpracování projektu došlo k zhoršení stavu povrchových úprav křídla v 2.NP (Lékařská část), ve které se původně měly dělat jen drobné úpravy zároveň táto část jíž koncepčně neodpovídá nově stavěnému oddělení psychiatrie. Z tohoto důvodu je potřeba provést takové úpravy, aby bylo i toto křídlo ve shodě s celým oddělením.
Zvýší se tak úroveň tohoto křídla a bude vytvářet jednotný komplex oddělení psychiatrie.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	346 034Kč	72 667,14 Kč	418 701,14 Kč	
Odpočty z ceny díla:	Kč	Kč	Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	346 034Kč	72 667,14 Kč	418 701,14 Kč	
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
RenéJakus	Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	Za technický dozor investora:
Ing. Petr Kosta	
Datum:
Podpis:
ncsfi		Datum:
Podpis:
[
m	\	Datum:
Podpis:	Datum:	
	Razítko:	Razítko:
ŽJ	.2.	
10: ostroze				
766 02 Otrokovic® Diů: CZ06G42020 úp|nost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:
1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL č.26 - Úprava 2.NP			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			346 034,00
346 034,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno ;	Jméno '	Jméno:	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	346 034,00 CZK	
DPH	21	%	72 667,14 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	418 701,14 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 10

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	ZL č.26 - Úprava 2.NP	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
	Stavební část				239 985,46	
	Demontáž otopných těles vč. úpravy a dodávky nových těles				13 914,73	
	Úprava a doplnění topení ve 2.NP (inspeční pokoj lékaři)				9 525,00	
	Silnoproud				82 608,81	
	CELKEM objekt				346 034,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 10

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	| celkem	
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				26 113,19	
51	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard imorea. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	47,57	513,00	24 400,85	
		včetně všech prostupu pro světla a prvky VZT.
inspekční pokoj lékaře
2,85*6,3 šatna personálu		17,96			
		1,7*6,3		10,71			
		inspekční pokoj lékařky
3*6,3		18,90			
53	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek do 15 mm inspekční pokoj lékaře	m2	47,57	36,00	1 712,34	
		2,85*6,3 šatna personálu		17,96			
		1,7*6,3		10,71			
		inspekční pokoj lékařky
3*6,3		18,90			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				13 843,65	
112	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací pracovna psychologa	m2	67,53	170,00	11 480,10	
		(3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))		58,71			
114	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů pracovna psychologa	m2	67,53	35,00	2 363,55	
		(3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))		58,71			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 853,90	
143	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m inspekční pokoj lékaře	m2	47,57	60,00	2 853,90	
		2,85*6,3		17,96			
		šatna personálu
1,7*6,3		10,71			
		inspekční pokoj lékařky
3*6,3		18,90			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 754,75	
146	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	115,10	50,00	5 754,75	
		pracovna psychologa (3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))		58,71			
		inspekční pokoj lékaře
2,85*6,3 šatna personálu		17,96			
		1,7*6,3		10,71			
		inspekční pokoj lékařky
3*6,3		18,90			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 707,80	
240	PC 12	Vybourání stáv podhledu - plech.kazety + topné, spirály z trubkv Js 30 mm + nosná kce	m2	47,57	120,00	5 707,80	
		včeíne tepslns izoíacs.					
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 10

		inspekční pokoj lékaře
2,85*6,3 šatna personálu		17,96			
		1,7*6,3		10,71			
		inspekční pokoj lékařky
3*6,3		18,90			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 249,03	
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,90	252,70	2 249,03	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				93 199,50	
	766691914	Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	15,00	27,30	409,50	
		15		15,00			
312	766661112ROO	Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m	kus	15,00	700,00	10 500,00	
		15		15,00			
323	PC 10300	DVEŘE VNI PL.HL 60/197 cm, ODLEHČ.DTD, bez aeneráíního klíče	KUS	5,00	4 950,00	24 750,00	
328	PC 10800	DVEŘE VNI PL.HL, 80/197 cm, ODLEHČ.DTD, bez aeneráíního klíče	KUS	10,00	5 750,00	57 500,00	
344	998766103ROO	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	200,00	40,00	
Díl:	776	Podlahy povlakové				56 173,30	
433	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady pracovna psychologa	m	67,53	40,50	2 734,97	
		(3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))		58,71			
435	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	67,53	40,50	2 734,97	
		pracovna psychologa (3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))*1,1		58,71			
436	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci pracovna psychologa	m2	67,53	150,30	10 149,76	
		(3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))*1,1		58,71			
438	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůrv PVC
bráno na 1 m2 - 1 bm svaru	m	67,53	44,10	2 978,07	
		pracovna psychologa (3,15*2,8)
chodba m.č.254		8,82			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))		58,71			
440	28443010	Specif - Podlahovina PVC standard tl.2,0 mm - dodávka, s polyuretanovou povrchovou úpravou
Přesný popis víz skladby podlah a barevné řešeni stavby.	M2	74,28	346,50	25 739,06	
		pracovna psychologa (3,15*2,8)*1,1
chodba m.č.254		9,70			
		((2,25*16,2)+(2,2*2)+(4,7*3,8))*1,1		64,58			
442	776220189	Vytažení lina na stěnu v. 100mm,úprava ukončeni, akrvlátem (obkl),vyplnění rohu prvž.klínem Js 25mm
Ukončeni čepcovým těsněním.penetrace podkladu.	M	67,83	152,10	10316,18	
		pracovna psychologa
3,15+3,15+2,8+2,8
chodba m.č.254		11,90			
		15+15+2,25+2,25+6,5+6,5+1,6+1,95+1,95+2,925		55,93			
445	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,80	844,61	1 520,30	
Díl:	783	Nátěry				14 553,00	
463	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním
zárubně :	m2	46,33	71,25	3 300,66	
		(0,8+1,97+1,97)*10*0,25		11,85			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 4 z 10

		(0,6+1,97+1,97)*5*0,25		5,68			
		radiátory 15ks		28,80			
	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem
zárubně :	m2	46,33	62,40	2 890,68	
		(0,8+1,97+1,97)*10*0,25		11,85			
		(0,6+1,97+1,97)*5*0,25		5,68			
		radiátory 15ks		28,80			
464	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	46,33	180,50	8 361,66	
		Nátěr vysoký standard • otěruvzdorný,vodovzdorný.					
		odol.desinfek;;,stálobarevný Nátěr v pastelových barvách.
zárubně :
(0,8+1,97+1,97)*10*0,25		11,85			
		(0,6+1,97+1,97)*5'0.25		5,68			
		radiátory 15ks		28,80			
Díl:	784	Malby				6 922,97	
473	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, platí i pro nátěrv pracovna psychologa	m2	70,071	25,65	1 797,31	
		((3,15+3,15+2,8+2,8)*3+(1,3+1,8+1,8)*2*0,2))-(0,8*1,97)- (1,3*1,8)*2+(3,15*2.6) předsíň u pracovny primářě		38,99			
		strop 1,45*2,15		3,12			
		stěny (1,45+1,45+2,15+2,15)*3-(0,6*1,97) sprcha u pracovny primáře		20,42			
		0,9*1,45		1,31			
		předsíň u pracovny primářě strop 2*1		2,00			
		stěny (2*1 )*3-(0,6*1,97)-2,4
úklid		2,42			
		strop 1*1,25		1,25			
		stěny (1*1,25)*3-(0,6*1,97)-2		0,57			
474	784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem pracovna psychologa	m2	70,07	11,40	798,80	
		((3,15+3,15+2,8+2,8)*3+(1,3+1,8+1,8)*2*0,2))-(0,8*1,97)- (1,3*1,8)*2+(3,15*2.6) předsíň u pracovny primářě		38,99			
		strop 1,45*2,15		3,12			
		stěny (1,45+1,45+2,15+2,15)*3-(0,6*1,97) sprcha u pracovny primáře		20,42			
		0,9*1,45		1,31			
		předsíň u pracovny primářě strop 2*1		2,00			
		stěny (2*1 )*3-(0,6*1,97)-2,4
úklid		2,42			
		strop 1*1,25		1,25			
		stěny (1*1,25)*3-(0,6*1,97)-2		0,57			
475	784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x
Omyvaielná.otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
( odolnost pro myti min.5000 cyklu )
pracovna psychologa	m2	70,07	61,75	4 326,85	
		((3,15+3,15+2,8+2,8)*3+(1,3+1,8+1,8)*2*0,2))-(0,8*1,97)- (1.3*1,8)*2+(3,15*2,6) předsíň u pracovny primářě		38,99			
		strop 1,45*2,15		3,12			
		stěny (1,45+1,45+2,15+2,15)*3-(0,6*1,97) sprcha u pracovny primáře		20,42			
		0,9*1,45		1,31			
		předsíň u pracovny primářě strop 2*1		2,00			
		stěny (2*1)*3-(0,6*1,97)-2,4		2,42			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 5 z 10

Díl:	D96	úklid
strop 1*1,25
stěny (1*1,25)*3-(0,6*1,97)-2
Přesuny suti a vybouraných hmot		1,25
0,57		12 614,38	
513	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,38	500,00	1 189,25	
		(50*47,57)/1000		2,38			
514	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy.PVC	t	0,13	1 800,00	230,95	
516	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0.38	500,00	187,50	
517	PC 49	Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu	t	0,13	1 800,00	230,95	
		(sklo .PVC.zářivkv.asfalt.oasv aood) a roztřídění do					
		jednotlivých kontejneru.					
518	PC 50	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo	t	0,13	1 800,00	230,95	
		PVC.zářivkv.asfalt.pasv apod)					
519	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP	t	15,69	180,00	2 824,58	
520	979011121ROO	Příplatek za každé další podlaží	t	15,69	140,00	2 196,89	
521	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,69	145,00	2 275,36	
		Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.		
522	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,11	8,00	2 384,88	
523	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,69	30,00	470,76	
		Včetně případného složeni na staveništní deponii.					
524	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	*	78,46	5,00	392,30	
Cena celkem
239 985,46
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 6 z 10

Položkový rozpočet
Stavba :	2021/37 Topení	Rozpočet: 2021/37	
Objekt:	2021/37 D.1.4.	VCP- D+M ÚT -Nefrologie + chodby 2 a 3 NP	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	97	Prorážení otvorů	
1	973031335ROO	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	290,00	580,00	
2	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	3,00	150,00	450,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů	1 030,00	
Díl:	732	Strojovny	
3	732	Vypuštění vody ze dvou stoupaček do kanalizace	soubor	2,00	135,00	270,00	
	Celkem za	732 Strojovny	270,00	
Díl:	733	Rozvod potrubí	
4	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	3,00	33,25	99,75	
5	733113114R00	navaření odboček + závit DN 15	kus	4,00	195,00	780,00	
6	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15x1 mm, polotvrdé	m	6,00	247,00	1 482,00	
7	733165012R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje +ořechod CU15/12	ks	6,00	195,00	1 170,00	
8	733191913R00	Zaslepení potrubí zavařením DN 15 po odřezání původních odboček	kus	2,00	135,00	270,00	
	Celkem za	733 Rozvod potrubí	3 801,75	
Díl:	734	Armatury	
9	734	D+M Termostatický ventil 1/2	ks	2,00	310,00	620,00	
10	7341	D+M Termostatická hlavice	ks	2,00	250,00	500,00	
11	73412	D+M uzaviratelné sroubení 1/2	ks	2,00	280,00	560,00	
	Celkem za	734 Armatury	1 680,00	
Díl:	735	Otopná tělesa	
12	735	demontáž litinových těles 10či..	soubor	2,00	250,00	500,00	
13	735156664R00	Otopná tělesa panelová desková Klasik 22 600/ 800	kus	1,00	2 850,00	2 850,00	
14	735156667R00	Otopná tělesa panelová desková Klasik 22 600/1200	kus	1,00	3 450,00	3 450,00	
15	735156668	napuštění stoupaček vč.odvětrání	kpl	2,00	75,00	150,00	
16	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,35	522,50	182,98	
	Celkem za	735 Otopná tělesa	7 132,98	
Cena celkem
13 914,73
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 7

Položkový rozpočet
Stavba :		Rozpočet:	
Objekt:	Úprava a doplnění topení 2.NP inspeční pokoj lékaři		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	733	Rozvod potrubí	
1	733	Vypouštění stoupaček	soubor	1,00	725,00	725,00	
2	7330	nařezání závitu v pozici DN 15	KPL	2,00	358,00	716,00	
3	73301	D+M přechod CU 15/1/2	KPL	4,00	157,00	628,00	
4	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15x1 mm, polotvrdé	m	3,00	247,00	741,00	
	Celkem za	733 Rozvod potrubí	2 810,00	
Díl:	734	Armatury	
5	734221413R00	Ventily regulační závitové přímé, G 1/2	kus	1,00	345,00	345,00	
6	734261213RT3	Sroubení V 4300 přímé, G 1/2 Heimeier	kus	1,00	285,00	285,00	
7	734291971R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické	kus	1,00	335,00	335,00	
	Celkem za	734 Armatury	965,00	
Díl:	735	Otopná tělesa	
8	73317	odřezání přípojek DN 25	KS	2,00	290,00	580,00	
9	733224222	Zhotovení + zavaření přípojek DN 25	KPL	2,00	285,00	570,00	
10	735156666R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	1,00	3 550,00	3 550,00	
11	73516	Napuštění stoupaček +odvzdušnění	soubor	1,00	1 050,00	1 050,00	
	Celkem za	735 Otopná tělesa	5 750,00	
Cena celkem
9 525,00
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 8

Název
Základní náklady	Hodnota A	Hodnota B	
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		52 796,00	
Montáž - práce		23 135,00	
Mezisoučet 1	0,00	75 931,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 555,86	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	80 486,86	
Dodav, dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2		321,95	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		80 808,81	
Vedlejší náklady	
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost - pomocné lešení		1 800,00	
Náklady celkem		82 608,81	
Základ a hodnota DPH 21%	17 347,85	3 643,05	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		86 251,86	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Matenál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	výkaz výmět		
	Elektroinstalace
RÁMEČEK
TANGO 3901A-B10 B
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ks	14,00	43,00	602,00	4,00	56,00	658,00 D. 1.6-1-8	nová položka, montáž dle SOD	
	Zásuvka dvojitá TANGO 5513A-C02357 B
VYPÍNAČ NA POVRCH	ks	27,00	272,00	7 344,00	60,00	1 620,00	8 964,00 D.l.6-1-8	nová položka, montáž dle SOD	
	TANGO tělo č.l 3559-a-01345	ks	14.00	167,00	2 338,00	290,00	4 060,00	6 398,00 D.l.6-1-8	nová položka, montáž dle SOD	
	Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-1651 B	ks	14.00	59,00	826,00	5,00	70,00	896,00 D.l.6-1-8	nová položka	
	TANGO tělo č.5 3559-a-05345	ks	14,00	200,00	2 800,00	290,00	4 060,00	6 860,00 D.l.6-1-8	nová položka, montáž dle SOD	
	TANGO 3901A-B10 B	ks	3,00	43,00	129,00	290,00	870,00	999,00 D.l.6-1-8	nové položka, montáž dle SOD	
	TANGO kryt ovladač dělený, 3558A-A6S2 B
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,sl,d0	ks	3,00	65,00	195,00	5,00	15,00	210,00 D.l.6-1-8	nová položka	
166	1-CXKH-R-J 3x2.5, pevně
SVÍTIDLO VESTAVNÍ	m	112,00	26,00	2 912,00	12,00	1 344,00	4 256,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového	ks	16,00			150,00	2 400,00	2 400,00 D.l.6-1-8	nová položka	
224	Cil 5K9 840 LED M625	ks	8,00	2 150,00	17 200,00	100,00	800,00	18 000,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
226	Dl 3 4K6 840 LED do podhledu
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	ks	8,00	2 150,00	17 200,00	100,00	800,00	18 000,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
255	Napojeni na stavajici zařízeni	hod	8,00			220,00	1 760,00	1 760,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
256	Zkušební provoz	hod	8,00			220,00	1 760,00	1 760,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
257	Zaučeni obsluhy	hod	8,00			220,00	1 760,00	1 760,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
122	Instalační materiál
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500	set	1,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00 D.l.6-10	poměrově z SOD	
263	Revizni technik	hod	8,00			220,00	1 760,00	1 760,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
	Elektroinstalace - celkem				52 796,00		23 135,00	75 931,00		
Svítidla a kabeíáže v místnostech úklid, předsíň, sprcha zůstávají původní