H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list číslo:
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
27
Identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Úpravy ovadání výtahů
Část díla dotčená změnovým listem
Doplnění úprav stávajících výtahu
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení die smluvní (tendrové) dokumentace:
Původně se nemělo měnit ovládání výtahu
Nové řešeni:
Nově se provedou úpravy ovládání v stávajících výtazích a doplní se nově čtečky.
Zdůvodnění změny:
Od doby zpracování projektu došlo k změně zabezpečení nemocničních oddělení a je nutné, aby na nově opravené oddělení psychiatrie neměly přístup neoprávněné osoby. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravy ovládání a doplnit výtahy o další čtečky karet tak, aby se na oddělení dostali jen personál, který má ktomu oprávnění.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
187 296 Kč
39 332,16 Kč
226 628,16 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
187 296 Kč
39 332,16 Kč
226 628,16 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus	Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera	Za objednatele:
Ing. Pavel Švarc	Za technický dozor investora:
. Ing. Petr Kosta	
Datum:
Podpis:	GL_í. ]_	Datum:
Podpis:
' (	Datum:
Podpis:
J- 4 • ■ ~'’1	'	Datum:
Podpis://^'
„ 'UvV
.0.1	
Raitol£jE5|£=ÍÍ	R^Sko:	Razítko:	|	Razlkk0' -■ - nc 1-1 '■ u 1	
PSG Construction		i		
$£kn70fi04í.02fýplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:;		
Datum:			7	
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Osobní a nákladní výtah pavilon S č. 7187/12 a 7912/15
Název	Mj	Počet	
Dodávky
HUP Pro - kontrolér pro čtečky	ks	3	
Čtečka A7H /2x výtah,2x 1 PP,2x1 NP/	ks	6	
Kabel 4x2x0,5 FTP	m	240	
Kabel 2x2x0,8	m	240	
Uložení kabeláže trubka instal / LV	m	480	
Drobný instalační materiál	kpl	1	
prostup do výtahové šachty	ks	6	
Koordinace s profesí výtahy	h	16	
Koordinace s profesí ITO NsP - sw část	h	8	
Odzkoušení,funkční zkoušky	h	8	
Práce Výtahy Ostrava - úprava dvou výtahů	
Materiál , záv. Kabeli2, mont mat...	ks	2	
Demont + montáž , doprava	ks	2	
CENA CELKEM BEZ DPH 21%
Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
12 800 Kč	38 400 Kč	800 Kč	2 400 Kč	40 800 Kč	
4 250 Kč	25 500 Kč	500 Kč	3 000 Kč	28 500 Kč	
11 Kč	2 520 Kč	25 Kč	6 000 Kč	8 520 Kč	
9 Kč	2 136 Kč	25 Kč	6 000 Kč	8 136 Kč	
24 Kč	11 520 Kč	36 Kč	17 280 Kč	28 800 Kč	
1 520 Kč	1 520 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	3 520 Kč	
		250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	
		360 Kč	5 760 Kč	5 760 Kč	
		360 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč	
		360 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč	
17 500 Kč	35 000 Kč		35 000 Kč	
	10 500 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč	
	116 596 Kč	70 700 Kč	187 296 Kč	

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
28
Identifikace akce:
Název akce
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Vytvoření šaten v l.PP
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 l.PP
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD nebylo počítáno z šatnováním personálu ve větším rozsahu
Nové řešení:
Nově se provedou stavební úpravy v 1PP tak, aby zde vznikl prostor pro převlíkání personálu. Šatny budou vybavené skřínkami pro uložení oděvu.
Zdůvodnění změny:
Od doby zpracování projektu došlo k nárůstů počtu personálu a změnily se podmínky z hlediska hygieny. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit šatny pro zaměstnance oddělení psychiatrie. K tomuto účelu budou sloužit dvě místnosti, včetně sociálního zázemí v l.PP
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
460 226,48 Kč
96 647,56 Kč
556 874,04Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
460 226,48 Kč
96 647,56 Kč
556 874,04Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:
Oe
Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:

on
Raz'l*SSZ^/
Razítko:
Razítko:
PSG Construction aa.
Napaiadelská 1662 ič:	i
785 02 Otrokovice DIČ: GZU&uÁAr.zu,
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval^-.
Datum;
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL č.28 Oprava šaten			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			460 226,48
460 226,48	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno	Jméno	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	460 226,48 CZK	
DPH	21	%	96 647,56 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	556 874,04 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 9

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet:	0,00	
Objekt:	ZL č.28 Oprava šaten	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
	Stavební část				414 764,10	
	Zdravotechnika				27 421,96	
	Silnoproud				18 040,42	
	CELKEM OBJEKT				460 226,48	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 2 z 9

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				705,82	
17	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s	kus	1,00	705,82	705,82	
		použitím suché maltové směsi
1.PP : 1*1		1,00			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				14 293,72	
	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochv do 30% šatna personálu	m2	36,38	194,00	7 057,72	
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná	m2	12,00	603,00	7 236,00	
		ručně
odhad 12m2		12,00			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 457,90	
112	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací šatna personálu	m2	36,38	170,00	6 184,60	
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
114	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů šatna personálu	m2	36,38	35,00	1 273,30	
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 182,80	
143	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m šatna personálu	m2	36,38	60,00	2 182,80	
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18.19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 819,00	
146	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m šatna personálu	m2	36,38	50,00	1 819,00	
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				379,05	
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,50	252,70	379,05	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				295 706,90	
	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	3,00	27,30	81,90	
		3		3,00			
312	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1 kř.do 0,8 m	kus	3,00	700,00	2 100,00	
		3		3,00			
323	PC 10300	DVEŘE VNI PL.HL 60/197 cm, ODLEHČ.DTD, bez	KUS	1,00	4 950,00	4 950,00	
328	PC 10800	aeneráiního klíče
DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, ODLEHČ.DTD, bez	KUS	2,00	5 750,00	11 500,00	
407	PC 30400	qenerálniho klíče
Dodávka a montáž šatní skříně 500/600/2050mm, provedení lamino dub tl.18mm, škříň rozdělená na 2 části	kus	44,00	6 240,00	274 560,00	
414	998766103R00	íčistá a nečistál
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,50	5 030,00	2 515,00	
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				5 060,00	
412	PC 30900	PLAST.ZÁVES DO SPRCHY D+M dle P/9, vel.cca	kus	2,00	1 170,00	2 340,00	
		150/200 cm.vč.kroužkú pro uchycení
Nerez konzole na srpchový závěs	kus	2,00	1 350,00	2 700,00	
414	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	200,00	20,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				32 038,60	
	772211811	Demontáž stávající dlažby a obkladů sociálky	m2	24,97	219,00	5 468,43	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 9

		(1,1+1+1,1 + 1,1+1+1,1)*2,1		13,44			
		WC					
		(0,7+1 + 1,9+1+0,5)*1,3		6,63			
		podlaha
(1*1,9)+(1*3)		4,90			
415	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby a obklady montáž +
dodávka
sociálky	m2	24,97	15,00	374,55	
		(1,1 + 1+1,1 + 1,1 + 1 + 1,1)*2,1		13,44			
		WC					
		(0,7+1 + 1,9+1+0,5)*1,3		6,63			
		podlaha
(1*1,9)+(1*3)		4,90			
420	771577842R00	Podlahový profil dilatační výšky 8 mm	m	16,00	195,00	3 120,00	
		(1,1+1+1,1+ 1,1+ 1 + 1,1+1+1+1 + 1+1 + 1+1 + 1+0,8+0,8)		16,00			
421	771577976R00	Ukončovací profil výšky 10 mm	m	11,50	110,00	1 265,00	
		(1,1+1 + 1,1 + 1,1 + 1+1,1 )+(0,7+1 + 1,9+1 +0,5)		11,50			
422	771579795R00	Spárování vodotěsnou hmotou - plošně sociálky	m2	24,97	15,00	374,55	
		(1,1+1 + 1,1 + 1,1 + 1 + 1,1)*2,1		13,44			
		WC					
		(0,7+1+1,9+1+0,5)*1,3		6,63			
		podlaha
(1*1,9)+(1*3)		4,90			
423	771313312RG1	Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože dod + mont, funkce drenáž - odvodnění, provzdušnění a separace tl.4,0	m2	4,90	547,20	2 681,28	
		mm					
		podlaha (1*1,9)+(1*3)		4,90			
418	771575202R00	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel,dlažba dle
stávající
sociálky	m2	24,97	399,00	9 963,03	
		(1,1+1+1,1 + 1,1 + 1 + 1,11*2,1		13,44			
		WC					
		(0,7+1 + 1,9+1+0,5)*1,3 podlaha		6,63			
		(1*1,9)+(1*3)		4,90			
428	597-15689	DLAŽBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka - mrazuvzd.tvo 2. popis viz skladby podlah sociálky	M2	26,12	330,00	8 620,76	
		((1,1+1 + 1,1+1,1+1 + 1,1)*2,11)*1.05		14,11			
		WC					
		((0,7+1+1,9+1+0,51*1,3)1*1,05
podlaha		6,96			
		((1*1,9)+(1*3))*1,05		5,05			
429	9987711O3RO0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m, výkaz výměr wqenerován programeme	t	0,90	190,00	171,00	
Díl:	776	Podlahy povlakové				31 427,56	
433	776401800RT1	Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromadv šatna personálu	m	38,60	40,50	1 563,30	
		5,5+3,3+1,1,+0,5+3,8		18,70			
		5,5+3,3+1,1 ,+0,5+3,8+0,6+0,6		19,90			
435	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	54,57	40,50	2 210,09	
		šatna personálu (2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)*2+(1,1*0,5)*2 dvojité PVC		36,38			
436	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci šatna personálu	m2	36,38	150,30	5 467,91	
		(2,8*6,31+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,31+1,1*0,5		18,19			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 4 z 9

438	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůrv PVC	m	36,38	44,10	1 604,36	
		šatna personálu (2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
		(2,8*6,3)+1,1*0,5		18,19			
440	284 43010	Specif.- Podlahovina PVC standard tl.2,0 mm - dodávka, s oolvuretanovou povrchovou úpravou
Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešet.? nav ;	M2	40,02	346,50	13 866,24	
		šatna personálu (2,8*6,3)*1,1+(1,1*0,5)*1,1		20,01			
		(2,8*6,3)*1,1+(1,1*0,5)*1,1		20,01			
442	776220189	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončeni, akrvlátem (obkl),vyplnění rohu orvž.klínem Js 25mm	M	38,60	152,10	5 871,06	
		Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
šatna personálu
5,5+3,3+1,1,+0,5+3,8		18,70			
		5,5+3,3+1,1 ,+0,5+3,8+0,6+0,6		19,90			
445	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,00	844,61	844,61	
Díl:	783	Nátěry				4 258,30	
463	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
zárubně :	m2	13,56	71,25	965,79	
		(0,8+1,97+1,97)*4*0,25		4,74			
		(0,6+1,97+1,97)*1*0,25		1,14			
		radiátory 4ks		7,68			
	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým
odmašťovačem
zárubně :	m2	13,56	62,40	845,83	
		(0,8+1,97+1,97)*4*0,25		4,74			
		(0,6+1,97+1,97)*1*0,25		1,14			
		radiátory 4ks		7,68			
464	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email
Náiěr - vysoký standard - otéruvzdorný,vodovzdorný, odol.desinrekci.stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách
zárubně :	m2	13,56	180,50	2 446,68	
		(0,8+1,97+1,97)*4*0,25		4,74			
		(0,6+1,97+1,97)*1 *0,25		1,14			
		radiátory 4ks		7,68			
Díl:	784	Malby				15 588,05	
473	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, platí	m2	157,77	25,65	4 046,90	
		i pro nátěrv šatna personálu
(3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2+0,6+0,6)*2,9		60,61			
		(3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2)*2,9		57,13			
		strop 6,6*6,3		41,58			
		průvlak 6,6*0,3
odečet dveří		1,98			
		(-0,8*1,97)*4		-6,30			
		(-0,6*1,97)*1
odečet obkladu		-1,18			
		-0,65*0,9*0,65		-0,38			
		-0,6*1*1,3 stěny v sociálkách		-0,78			
		(1,1+1+1,1+1,1+1+1,1)*0,8		5,12			
474	7841712O1RO0	Penetrace podkladu nátěrem	m2	157,77	11,40	1 798,62	
		šatna personálu
(3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2+0,6+0,6) *2,9		60,61			
		(3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2)*2,9		57,13			
		strop 6,6*6,3		41,58			
		průvlak 6,6*0,3
odečet dveří		1,98			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 5 z 9

475
DII:	784195322R00
D96	(-0,8*1,97)*4 (-0,6*1,97)*1
odečet obkladu
-0,65*0,9*0,65
-0,6*1*1,3 stěny v sociálkách (1,1+1+1,1+1,1 + 1 + 1,1)*0,8
Malba tekutá , barva, 2 x
Omyvateiná.otéruvzdorná a propustná pro vodní páry. í odolnost pro myt! min,5000 cyklů ;
šatna personálu
(3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2+0,6+0,6)*2,9 (3,3+1,1+0,5+6,3+3,3+5,2)*2,9 strop 6,6*6,3 průvlak 6,6*0,3
odečet dveří
(-0,8*1,97)*4 (-0,6*1,97)*1
odečet obkladu
-0,65*0,9*0,65
-0,6*1*1,3 stěny v sociálkách (1,1+1+1,1+1,1+1+1,1)*0,8
Přesuny suti a vybouraných hmot	m2	-6,30
-1,18
-0,38
-0,78
5,12
157,77
60,61
57,13
41,58
1,98
-6,30
-1,18
-0,38
-0,78
5,12	61,75	9 742,53
3 846,40	
513	979990001ROO	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03	500,00	14,99	
		(1*24,97+5)/1000		0,03			
514	979990121RO0	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	0,10	1 800,00	186,63	
517	PC 49	Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu	t	0,10	1 800,00	186,63	
		ísklo .PVC.zářivkv.asfalt.pasv apod) a roztříděni do					
		jednotlivých kontejneru.					
518	PC 50	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo	t	0,10	1 800,00	186,63	
		.PVC.zářivkv.asfalt.pasv apodt					
519	979011111RO0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,71	180,00	306,92	
520	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,71	140,00	238,71	
521	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,71	145,00	247,24	
		Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládk	j, bez poplatku za sklác	ku.		
522	979081121 ROO	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,11	8,00	2 384,88	
523	979082111 ROO	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,71	30,00	51,15	
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					
524	979082121RO0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	‘	8,53	5,00	42,63	
Cena celkem	414 764,10
ZL neobsahuje :
-	nátěry potrubí topení a VZT
-	dodávku a montáž dveří do sprch
-	vysekání drážek a jejich následné zednické zapravení
-	D+M generálního klíče ke dveřím
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 6 z 9

Položkový rozpočet
Stavba :	Psychiatrie Havířov - Nefrologie		
Objekt:	Zdravotechnika		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	725	Zařizovací předměty	
	725	Zastavení vody a znovu otevření	kpl	2,00	100,00	200,00	
205	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
DN 100	kus	2,00	400,00	800,00	
201	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,00	92,40	92,40	
202	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	83,60	167,20	
208	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	2,00	78,32	156,64	
209	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,00	57,20	114,40	
74	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odDad vodorovný	soubor	1,00	1 848,00	1 848,00	
75	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,00	1 056,00	1 056,00	
80	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krvtu na sifon 550 mm	soubor	2,00	897,60	1 795,20	
81	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá	soubor	2,00	836,00	1 672,00	
175	Kondenz 02	Zápachová uzávěrka plastová pro odvod kondenzátu s ořídavnou mechanickou uzávěrkou odtok DN40	kus	2,00	624,80	1 249,60	
94	551613150	uzávěrka zápachová umyvadl.podomítková DN40	kus	2,00	96,80	193,60	
93	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN
50	kus	4,00	74,80	299,20	
103	725841311	Baterie sprchové	soubor	2,00	1 654,40	3 308,80	
106	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	2,00	308,00	616,00	
108	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,00	1 337,60	2 675,20	
110	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,00	173,36	346,72	
165	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se záDachovou uzávěrkou Droti wschnutí	kus	2,00	985,60	1 971,20	
166	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,00	220,00	440,00	
173	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	100,00	19,36	1 936,00	
35	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,00	18,48	1 848,00	
	72217195	Zhotovení přípojek studené a teplé vody	soubor	2,00	845,00	1 690,00	
161	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	kus	15,00	154,00	2 310,00	
211	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech vvškv do 24 m	t	0,85	748,00	635,80	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty	27 421,96	
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 7

Název	Hodnota A Hodnota B
Základní náklady	
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		9 272,00	
Montáž - práce		6 270,00	
Mezisoučet 1	0,00	15 542,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		932,52	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	16 474,52	
Dodav, dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2		65,90	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		16 540,42	
Vedlejší náklady	
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost - pomocné lešení		1 500,00	
Náklady celkem		18 040,42	
Základ a hodnota DPH 21%	3 788,49	795,58	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		18 836,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	

Pozice	Název
Elektroinstalace
ZÁSUVKA PRO ZORA VOTNJCTVI	Mj	Počet	Maten ál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	výkaz výměi		
204	Jednonás. , b.alpska bílá
VYPÍNAČ NA POVRCH	ks	2,00	110,00	220,00	60,00	120,00	340,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
210	Vypínač 0-1, 1-pól, 20A, na povrch 1P65	ks	6,00	498,00	2 988,00	290,00	1 740,00	4 728,00 D.l.6-1-8	cena (Se SOD	
	Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-1651 B
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,sl,d0	ks	6,00	59,00	354,00	5,00	30,00	384,00 D.l.6-1-8	nové položka	
166	1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně
SVÍTIDLO VESTAVNĚ	m	20,00	26,00	520,00	12,00	240,00	760,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového	ks	6,00			150,00	900,00	900,00 D.l.6-1-8	nová položka	
	Stropní svítidlo LED/12-16W/230V 22,5cm
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	ks	6,00	790,00	4 740,00	100,00	600,00	5 340,00 D.l.6-1-8	nová položka, montáž dle SOD	
255	Napojeni na stávající zařízeni	hod	4,00			220,00	880,00	880,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
256	Zkušební provoz	hod	4,00			220,00	880,00	880,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
122	Instalační materiál
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500	set	1,00	450,00	450,00			450,00 D. 1.6-10	poměrově z SOD	
263	Revizní technik	hod	4,00			220,00	880,00	880,00 D.l.6-1-8	cena dle SOD	
	Elektroinstalace - celkem				9 272,00		6 270,00	15 542,00		

H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
29
Identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Objednatel:
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Změna ocelové konstrukce a
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 2NP a 3 NP. balkony
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD bylo počítáno z ocelovou konstrukci na uchycení sítí napojenou na stávající konstrukci zábradlí balkonů
Nové řešení:
Nově se nahradí poškozené částí zábradlí konstrukcí z nerezového materiálu, rovněž konstrukce pro uchycení sítí se provede z materiálu nerez.
Zdůvodnění změny:
Během realizace bylo zjištěno, že stávající ocelová konstrukce zábradlí je v zcela nevyhovujícím stavu a nelze na ni napojit konstrukci pro uchycení sítí.
Z důvodu zvýšení životnosti a ohledu na budoucí údržbu bude ocelová konstrukce nahrazena konstrukci v provedení nerez. Touto konstrukci budou nahrazené i poškozené prvky. Díky této záměně nebude potřeba uzavírat pokoje z důvodu údržby konstrukce a nebude tak narušen chod oddělení.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
901 248 Kč
189 262,08 Kč
1 090 510,08 Kč
Odpočty z ceny díla:
-93 390 Kč
-19 611,9 Kč
-113 001,9 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
807 858,00 Kč
169 650,18 Kč
977 508,18 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:
<■ T-.-C-C /S
Datum:
Podpis:
Datum:
Podpis:
Construction a.a.
Rak
Razítko:
Urr^
fJspajociaiaků 1552	Í&P5042020 jjp|nost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:!
7SS OS Otrokovice	DIČ: 0205042020	——	c—2	i-
Datum:
1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	ZL č.29 - Nerezová konstrukce zabezpečení			
Stavba	Název stavby			
	NsP HAVÍŘOV			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			807 858,00
807 858,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno	Jméno	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	807 858,00 CZK	
DPH	21	%	169 650,18 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	977 508,18 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 1 z 3

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet :	0,00	
Objekt:	ZL č.29 - Nerezová konstrukce zabezpečení balkónů	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Celkem	
9	Ostatní konstrukce - zabezpečení balkonů	HSV			807 858,00	
	CELKEM OBJEKT				807 858,00	
Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.
Strana 2 z 3

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.
Díl:	Číslo položky
9	Název položky
Ostatní konstrukce - zabezpečení balkonů	MJ	množství	cena / MJ	celkem
807 858,00	
139	PC 10	Nerezová nosná kce zabezp.balkonů, dod + mont + osaz	kg	1974,60	405,00	799 713,00	
		2.NP : 678,0		678,00			
		3.NP : 1020,0		1020,00			
		3.NP : 276,6 - doplnění od projektanta		276,60			
		Demontáž původní ocelové trubky (madla) u zábradlí	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00	
		D+M nerez madla průměr 40mm	kg	187,00	405,00	75 735,00	
		D+M nerez maticových nýtů M10	ks	380,00	50,00	19 000,00	
139	PC 10	Ocel.nosná kce zabezp.balkonú, dod + mont + osaz	kg	1698,00	-55.00	-93 390,00	
		2.NP : 678,0		678,00			
		3.NP : 1020,0		1020,00			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 3 z 3