_■
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský rond pro regionální rozvoj integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:
30
identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Zhotovitel:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Doplnění krycích polosloupů k umyvadlům
Část díla dotčená změnovým listem
S0 01ZTI
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Die PD nebylo počítáno z polosloupy u umyvadel
Nové řešení:
Nově se zakryjí rozvody odpadů u umyvadel keramickými polosloupy.
Zdůvodnění změny:
Od doby provedení projektu se zpřísnili požadavky MZ na stavební vybavení oddělení psychiatrické péče a dle těchto sta ndardů musí být všechny pobytové místnosti vybavené tak, aby nemohlo dojít k sebepoškození pacientů. Z tohoto důvodů nemůže byt viditelné napojení umyvadel na vodu a kanalizaci. Zároveň se tak zabrání neodborné manipulaci či dokonce poškození těchto připojení pacienty v těžkém psychickém stavu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
45 900 Kč
6 885Kč
52 785 Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
45 900 Kč
6 885Kč
52 785 Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
René Jakus
Datum:
Podpis:
jb-o
?SQ Construction a.s.
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Datum:
Podpis:
L<ct/ ■ V
zítko:
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: 	Ing. Petr Kosta
Datum:
Podpis:
Datum: Podpis';//f
Razítko:
^1662	""k^05?!^2.?^2®	. Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: í
	~~S~~I~~Ď~~! ~~C3Z05042020~~—		-—		r-
Oatum:
^1> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet | | JKSO |
Objekt | Název objektu | SKP |

ZL č.3d - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty
dveřních zarážek

Měrná jednotka

Stavba | Název stavby | Počet jednotek |
| Psychiatrie Havířov | Náklady na m.j. |
Projektant | | Typ rozpočtu |
Zpracovatel projektu | | |
Objednatel | | |
Dodavatel | | Zakázkové číslo |
Rozpočtoval | | Počet listů |
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady | Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem

0

Ztížené výrobní podmínky

0

| PS V celkem | 45 900 | Oborová přirážka | 0
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0
ZRN celkem | 45 900 | Zařízení staveniště | 0
| | Provoz investora | 0
HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0
ZRN+HZS | 45 900 | Ostatní náklady neuvedené | 0
ZRN+ost.náklady+HZS | 45 900 | Ostatní náklady celkem | 0
Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis:

Základ pro DPH	15,0 | % | 45 900 Kč
DPH	15,0 | % | 6 885 Kč
Základ pro DPH	0,0 | % | 0 Kč
DPH	0,0 | % | 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM | 52 785 Kč
Poznámka :
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1

Stavba : | Psychiatrie Havířov | Rozpočet:	2021/47
Objekt: | ZL č.30 - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty dveřních zí | PSG-Havířov- VCP- D+M Polosloupy k i
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS

725	Zařizovací předměty
766	Konstrukce truhlářské - dveřní zarážky

O O

36 750
9 150

0

0

0

CELKEM OBJEKT | 0 | 45 900 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN | Kč | % Základna | Kč
Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Provoz investora | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 45 900 | 0
CELKEM VRN | 0
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 2

Položkový rozpočet
Stavba : | Psychiatrie Havířov |
Objekt: | ZL č.30 - Polosloupky - kryty umyvadel, kryty dveřnít |
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
1 | 72501 | D+Montáž Polosloupu k umývadlům/kryty na sifony | soubor | 35,00 | 1 050,00 | 36 750,00
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty | 36 750,00

P.č.
Dii:

Číslo položky
766

Název položky
Konstrukce truhlářské - dveřní zarážky

MJ

množství

cena / MJ

celkem
9 150,00

140 | PC 10 | D+M dveřních zarážek | ks | 122,00 | 75,00 | 9 150,00
| | dveře dle PD : 104ks | | 104,00 | |
| | 2.NP : 15ks | | 15,00 | |
| | Čekárna : 2ks | | 2,00 | |
| | Dialýza : 1ks | | 1,00 | |
Cena celkem
45 900,00
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 3