H
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Změnový list číslo:	31
Identifikace akce:
Název akce
Číslo akce EDS/SMVS1):
Objednatel:
Zhotovitel:
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 048/0004705
Nemocnice s Poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Projektant:
MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
Předmět změnového listu
Úprava čekárny v ambulanci l.NP
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 l.NP
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD měla zůstat čekárna a ordinace v l.NP v původním stavu
Nové řešení:
Nově se provedou stavební úpravy v stávající čekárně tak, aby byl možný příjem pacientů v akutním psychickém stavu.
Zdůvodnění změny:
Od doby zpracování projektu, částečně i vlivem coronavirové epidemie, došlo k razantnímu nárůstů pacientů s těžkými duševními poruchami. Z důvodu zajištění bezpečnosti jak personálu, tak pacientů docházející k ambulantnímu léčení je nutné rozšířit a provést úpravy stávající čekárny tak, aby mohl bez problému probíhat příjem i pacientů v těžkém psychickém stavu. Stavebními úpravami se tak rozdělí prostor pro běžné pacienty a pacienty v těžkém akutním stavu. Tato úprava plně zajistí bezpečnost z hlediska provozu ambulance.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6
Vliv na cenu:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:
248 182 Kč
52 118,22Kč
300 300,22Kč
Odpočty z ceny díla:
Kč
Kč
Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:
248 182 Kč
52 118,22Kč
300 300,22Kč
Změnu odsouhlasil
Za zhotovitele:
QgjJ
Za projektanta:
Ing. Vladimír Kundera
Za objednatele: Ing. Pavel Švarc
Za technický dozor investora: Ing. Petr Rosta
P(^isč
PU )h
._ 3 Construction a.3,	' u
Napmjsdaíaká 1552	IČ: 060420:.
765 02 Otrokovice	DIČ: GZOSOT:
Datum:
Podpis:
O
2020

Datum:
Podpis:
]. i .
Datum,: V
Podpis:

Razítko:
Razítko:
Razítko:
' ..-t lí
yr
1
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: >
Datum:
1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

SOUPIS PRACÍ
Rozpočet	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
Objekt	Název objektu			
	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie			
Stavba	Název stavby			
	ZL.Č.31 Ambulantní příjem			
Projektant						
				
Objednatel						
Dodavatel						
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Soukal			
Rozpis ceny	
Název	Celkem	
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem			219 279,23 28 902,78
248 182,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno	
Datum :
Podpis :	Datum :
Podpis:	Datum :	26.05.2020
Podpis:	
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK	
DPH	15	%	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21	%	248 182,00 CZK	
DPH	21	%	52 118,22 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	300 300,22 CZK	
Popis :
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 1 z 14

Stavba :	NsP HAVÍŘOV	Rozpočet :	0,00	
Objekt:	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl	Typ dílu			Čelkém	
i	Stavební část	HSV			219 279,23	
2	ZTI	PSV			15 242,19	
3	Silnoproud	PSV			6 835,55	
4	Šiaboproud	PSV			1 767,04	
5	VZT	PSV			5 058,00	

						

						

	'celkem OBJEKT				248 182,00	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s
Strana 2 z 14

Soupis prací
S:	0025	NsP HAVÍŘOV	
0:	003	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
R:	01	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	|celkem	
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				36 714,99	
39	342261213RT2	Přfčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm. minerál tl. 7,5 cm
1.NP :	m2	18,20	828,00	15 072,91	
		6,25*3+1*3		21,75			
		odečet dveří T20P 0,9*1,97*2ks		-3,55			
40	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 56 dB	m2	8,89	1 197.00	10 640,73	
		1.NP :					
		1,675*2,5		4,19			
		2,8*2,5		7,00			
		odečet nadsvětlíku 0,35*1,5m		-0,53			
		odečet dveří 0,9*1,97m		-1,77			
41	59030618	profil výztužný UA 75 pro nadsvětlík
1.NP :	m	3,70	146,00	540,20	
		0,35+0,35+1,5+1,5		3,70			
13	342261213RT2	Úprava styku SDK příčky separační páskou a akrylátem (oboustranně)
3.NP :	m	40,65	111,00	4 512,15	
		6,25+6,25+3+3+3+3+1,675+1,675+2,5+2,5+2,5+2,5+2,8		40,65			
45	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení	kus	13,00	423,00	5 499,00	
		1.NP : 11 ks					
		6,25+6,25+3+3+3+3+1,675+1,675+2,5+2,5+2,5+2,5+2,8		13,00			
18	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,60	750,00	450,00	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 072,00	
78	611401311RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	512,00	3 072,00	
		1 NP : 1*6		6,00			
Díl:	64	Výplně otvorů				10 703,07	
123	641960000ROO	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	9,20	80,76	743,07	
		D+M vnl parotěsné zábrany (pásky) a paropropusíné voděodolné pásky z vně strany ostání.		
		(0,9+1,97+,197)*3		9,20			
125	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení příčkv UA profilem	kus	3,00	650,00	1 950,00	
		3		3,00			
130	553 30000	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM	KUS	1,00	1 010,00	1 010,00	
		typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravo	Uplatí pro všechny zárubně - viz	popis v	
		kcí. zámečnických
do SDK příčky tl. 150 mm :					
		90/197 : 1		1,00			
134	553 30400	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30 a Rw min 27 dB do SDK tl. 150 mm :	KUS	2,00	3 500,00	7 000,00	
		90/197 : 2		2,00			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 919,00	
143	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
1.NP :	m2	48,65	60,00	2 919,00	
		6,25*1		6,25			
		19,2+2,1+21,1		42,40			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 797,38	
146	952901111R00	Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m
1.NP :	m2	48,65	50,00	2 432,50	
		6,25*1		6,25			
		19,2+2,1+21,1		42,40			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 4 z 14

157	95979-1199RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	|m2	48,65	7,50	364,88
i -• ži •- ~	
		OH3
1.NP :
6,25*1		6,25			
		19,2+2,1+21,1		42,40			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 730,27	
170	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	19,73	185,00	3 649,50	
		Včetně omítky a možného obkladu.					
		1.NP :					
		(6,25*3)		18,75			
		(1,1*2,5)		2,75			
		odečet dveří 0,9*1,97		-1,77			
187	965081713ROO	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,51	48,08	168,76	
		1.NP :					
		2,6*1,35		3,51			
192	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
1 .NP :	kus	2,00	9,23	18,46	
		0,9*1,97 2ks		2,00			
197	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
1 .NP :	m2	1,77	219,41	389,01	
		0,9*1,97		1,77			
227	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	41,23	60,75	2 504,54	
		1 .NP :					
		(6,25*3)*2		37,50			
		(1,1*2,5)*2		5,50			
		odečet dveří 0,9*1,97		-1,77			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 490,93	
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,90	252,70	1 490,93	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				124 985,00	
313	766661122ROO	Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m	kus	1,00	700,00	700,00	
		1		1,00			
315	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm	kus	1,00	800,00	800,00	
		T/*20 : 1		1,00			
336	PC 11600	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/17 ODLEHČ.DTD	KUS	1,00	7 250,00	7 250,00	
339	PC 11900	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/20 POŽÁR.VÝPLŇ, El 30/DP3 - C.Sm .panik.kování
průzor 35/15 cm,bezp.dvojsklo	KUS	1,00	16 995,00	16 995,00	
		POLICOVÁ SKŘIN	KUS	3,00000	12 450,00	37 350,00	
		1200*1900*500
KUCHYŇKA S DVOJDŘEZEM	KUS	1,00000	21 200,00	21 200,00	
		1300 x 900 x 600 mm
PSACÍ STŮL - 1100 x 750 x 600 mm	KUS	1,00000	8 760,00	8 760,00	
		SKŘÍŇKA POLICOVÁ SE ZADNÍM ČELEM	KUS	1,00000	8 550,00	8 550,00	
		KUCHYŇKA S DVOJDŘEZEM	KUS	1,00000	23 200,00	23 200,00	
344	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,90	200,00	180,00	
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				3 940,00	
413	PC 31000	PLAST.NADSVĚTLÍK nad dveře T17P, rozměr
1,35x0,35m	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	
414	9987661O3R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	200,00	40,00	
Díl:	776	Podlahy povlakové				11 733,86	
433	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromadv
1 .NP :	m	12,50	40,50	506,25	
		6,25*2		12,50			
434	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC doplnění v 1 .NP :	m	9,05	45,00	407,25	
		6,25+2,8		9,05			
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 5 z 14

435	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,25	40,50	253,13	
		1.NP :					
		6,25*1,1		6,25			
437	776522110R00	Lepení podlah z pásů, mokrý provoz
1.NP :	m2	6,88	225,00	1 546,88	
		6,25*1,1		6,88			
438	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňúrv PVC	m	9,05	44,10	399,11	
		bráno na 1 m2 -1 bm svaru					
		doplnění v 1 ,NP :
6,25+2,8		9,05			
441	284 43055	Specif.- Podlahovina PVC protiskluzné tl.2,0 mm - dodávka, do mokrého provozu
Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby	M2	7,56	387,00	2 926,69	
		1 NP :					
		6,25*1,1*1,1		7,56			
442	776220189	Vytažení lina na stěnu v. 100mm,úprava ukončení, akrvlátem (obkl).vvplnění rohu orvž.klínem Js 25mm
Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.	M	9,05	152,10	1 376,51	
		1.NP :					
		6,25+2,8		9,05			
444	776575399	Štěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 1x, včetně výztužného prvku v koutu
1 .NP :	M2	6,88	585,00	4 021,88	
		6,25*1,1		6,88			
445	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,35	844,61	296,18	
DII:	781	Obklady keramické				3 630,64	
446	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a osténí
1 .NP :	m2	2,80	359,10	1 005,48	
		1,4*2		2,80			
447	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	2,80	13,50	37,80	
448	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
1 .NP :	m2	2,80	13,50	37,80	
		1,4*2		2,80			
449	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	6,80	52,20	354,96	
		1,4+1,4+2+2		6,80			
450	299 91115	UKONČUJÍCÍ LIŠTA - dodávka	M	7,48	80,10	599,15	
		(1,4+1,4+2+2)*1,1		7,48			
460	597 64552	OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm , přesný popis viz
TZ	M2	3,08	233,10	717,95	
		1,4*2*1,1		3,08			
461	781575399	Štěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze
1 .NP :	M2	2,80	297,00	831,60	
		1,4*2		2,80			
462	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,20	229,50	45,90	
Díl:	784	Malby				9 646,31	
474	784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem
1.NP ;	m2	131,87	11,40	1 503,32	
		6,25*3		18,75			
		mč.111 stěny
12,395*2,5*2 - odečet dveří 0,9*1,97m 3ks, 0,7*1,97m
4ks. -2,7*2,5m mč.111 strop		44,39			
		12,395*1,775		22,00			
		čekárna stěny
(4,8+4,8+2,8+2,8)*2,5 - odečet dveří 0,9*1,97m, -1,4*2
čekárna strop		33,29			
		2,8*4,8		13,44			
475	784195322R00	Malba tekutá . barva, 2 x
Omyvatelná.otěruvzdorná a propustná pro vodní páry	m2	131,87	61,75	8 142,99	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 6 z 14

Díl:	D96	1.NP :
6,25*3
mč.111 stěny
12,395*2,5*2 - odečet dveří 0,9*1,97m 3ks, 0,7*1,97m
4ks. -2,7*2,5m mč.111 strop
12,395*1,775 čekárna stěny
(4,8+4,8+2,8+2,8)*2,5 - odečet dveří 0,9*1,97m, -1,4*2
čekárna strop
2,8*4,8
Přesuny suti a vybouraných hmot		18,75
44,39
22,00
33,29
13,44		915,79	
513	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,75	500,00	375,55	
		19,73*0,15*2,2+0,1		0,75			
514	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC	t	0,01	1 800,00	25,86	
		7,56*1,9		0,01			
519	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP	t	0,77	180,00	137,78	
520	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,77	140,00	107,16	
521	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77	145,00	110,99	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez	poplatku za skládku.		
522	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,54	8,00	116,35	
523	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,77	30,00	22,96	
		Včetně případného sioženi na staveništní deponii.					
524	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	‘	3,83	5,00	19,14	
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Strana 7 z 14

Stavba :	#ODKAZ!		
Objekt:	#ODKAZ!		
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
97	Prorážení otvorů	1 115	0	0	0	0	
721	Vnitřní kanalizace	0	1 855	0	0	0	
722	Vnitřní vodovod	0	5 693	0	0	0	
725	Zařizovací předměty	0	6 579	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	1 115	14 127	0	0	0	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN	Kč	% Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 242	0	
Oborová přirážka	0	0,0	15 242	0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 242	0	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 242	0	
Zařízení staveniště	0	0,0	15 242	0	
Provoz investora	0	0,0	15 242	0	
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	15 242	0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 242	0	
CELKEM VRN	0	
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s
Strana 8

Položkový rozpočet
Stavba :	#ODKAZ!		
Objekt:	#ODKAZ!		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
Díl:	97	Prorážení otvorů	
1	973031334R00	Vysekáni kapes zeď cih, 0,5x0,2x0,5	kus	1,00	215,00	215,00	
2	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm odpad + voda	m	4,00	225,00	900,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů	1 115,00	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace	
3	7211009O2R0O	Oprava - zazatkování odpadního potrubí-víčkem dn 50	kus	2,00	380,00	760,00	
4	721171903U00	Vsazení odbočky DN 50/50	kus	1,00	360,00	360,00	
5	72117199	Potrubí HT D 50 dodávka + montáž	m	3,00	245,00	735,00	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace	1 855,00	
Díl:	722	Vnitřní vodovod	
6	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00	750,00	1 500,00	
7	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	4,00	250,00	1 000,00	
8	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	4,00	105,00	420,00	
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	145,00	580,00	
10	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	189,00	756,00	
11	72225	Demontáž umývadla + baterie+sifon	kpl	1,00	255,00	255,00	
12	72226	Kotevní prvky pro potrubí vodovodu	ks	15,00	48,40	726,00	
13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	6,00	30,80	184,80	
14	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	6,00	18,48	110,88	
15	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	0,30	535,04	160,51	
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod	5 693,19	
Díl:	725	Zařizovací předměty	
16	725212348R00	Umyvadlo z diturvitu 55CM vč.polosloupu	soubor	1,00	1 714,00	1 714,00	
17	725212349	montáž umývadla vč.polosloupu	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00	
18	72521234901	SIFON PLASTOVÝ D+M	soubor	1,00	460,00	460,00	
19	725821311U00	Baterie dřez stěna páka kul ú dl200	soubor	1,00	1 390,00	1 390,00	
20	725821331U00	Baterie dřez stoj klas otáč ú dl200	soubor	1,00	1 280,00	1 280,00	
21	725862123U00	Zápach uzávěr d řezová	kus	1,00	385,00	385,00	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty	6 579,00	
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 9

Název	Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka	2 352,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	84,67	23,52
Montáž - materiál	4 102,00
Montáž - práce	0,00
Mezisoučet 1	2 436,67	4125,52
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	246,12
Nátěry	0,00
Zemní práce	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	0,00
Mezisoučet 2	2 436,67	4 371,64
Dodav, dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2	27,23
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	0,00
Základní náklady celkem	6 835,55
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
Vedlejší náklady celkem	0,00
Kompletační činnost	0,00
Náklady celkem	6 835,55
Základ a hodnota DPH 21%	6 835,55	1 435,46
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH	8 271,01

Pozic
139
148
165
188
131
199
211
206
246
253
254
255
263
Název
Mj Počet Materiál	Materiál celkem	Montáž Montáž celkem Cena celkem	Výkaz výměr
a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.
JKSO
Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny
Elektroinstalace
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICI
8111 117xll7x58mm
HMOŽDINKA	ks	1,00	
HM 10
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,slfd0	ks	10,00	
1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně
UKONČENI VODIČŮ NA SVORKOVNICI	m	20,00	
Do 16 mm2
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	ks	1,00	
Drobný instalační materiál
RÁMEČEK	set	1,00	
Dvojnásobný, barva alpská bílá
VYPÍNAČ NA POVRCH	ks	2,00	
Vypínač 0-1, 4-pól, 25A, na povrch IP65
ZASUVKA PRO ZDRA VOTNICTVI	ks	2,00	
S ochranou před přepětím, b.alpská bílá
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm	ks	1,00	
Stená do 150mm
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	m	7,00	
Demontáž stávajícího zařízeni	hod	3,00	
Vyhledáni připojovacího mista	hod	2,00	
Napojeni na stavajici zařízeni
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500	hod	3,00	
Revizní technik
Elektroinstalace - celkem	hod	4,00	
112,00	112,00	92,00	92,00	0,00
0,00 odečteno
0,00 z dokumentu č.
204,00 D. 1.6-1-8	cena z SOD	
2,00	20,00	14,00	140,00	160,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
21,00	420,00	12,00	240,00	660,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	26,00	26,00	26,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
150,00	150,00		0,00	150,00 D.l.6-12	cena z SOD	
72,00	144,00	4,00	8,00	152,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
498,00	996,00	290,00	580,00	1 576,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
510,00	510,00	61,00	61,00	571,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	45,00	315,00	315,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	220,00	660,00	660,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	220,00	440,00	440,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	220,00	660,00	660,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	0,00	220,00	880,00	880,00 D.l.6-1-8	cena z SOD	
	2 352,00		4 102,00	6 454,00		

č.	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	
1	Strukturovaná kabeláž - dodávka					
2	Instalační kabel CAT5E UTP LSOH	m	7	7,04	49,28	
3	příchytka kabelová, povrchová	ks	10	6,16	61,60	
4	PVC lišta 40/20mm	m	7	50,00	350,00	
26	Drobný nosný, podružný a spotřební materiál	ks	1	50,00	50,00	
27	Strukturovaná kabeláž - práce					
31	kabel UTP - montáž	m	7	17,60	123,20	
32	příchytka kabelová - montáž	ks	10	10,56	105,60	
33	drážka do zdi	m	5	21,12	105,60	
34	PVC lišta 40/20mm - montáž	m	7	31,68	221,76	
53	Strukturovaná kabeláž - služby					
54	Demontáž a zpětná montáž monitoru na zdi	ks	1	500,00	500,00	
55	Kontrolní provoz, vedlejší výdaje	ks	1	200,00	200,00	
		
Rekapitulace		
Strukturovaná kabeláž	1 767,04	
		
CELKEM	1 767,04	
Ceny v Kč bez DPH		
strana 12 z 14

3
Stavba :	Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.	Soupis pracít:	
Objekt:	PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení	D.2 - Vzduchotechnika	
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2.	Požární větrání			5 058			
CELKEM OBJEKT			5 058			

4
Soupis prací
	Stavba: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.
Objekt: PS 01 - Vzduchotechnika a chlazení	Soupis prací:
D.2 - Vzduchotechnika	
		
P.č	Poz.	Název položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	
2. Požární větrání
2.37 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.l 1 NP, D2-1045, 3bm
99	do obvodu 1050/ 40% tvarovek
bm 3	374	1 122
100	2.38	Montážní, spojovací a těsnicí mat.	kg	1
1. NP, D2-103, 1 kg
101	2.39	Izolace protipožární požární odolnost	EI45 DP1 +	m2	6
povrchová úprava (plocha potrubí)
1. NP, D2-103, 6m2
Odbočka pro úpravu trasy potrubí	ks	2
132
484
450
132
2 904
900
Dodávka celkem
5 058

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Seznam poddodavatelů
VZ „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje	
PODDODAVATEL:		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo iméno a příjmení:	ELEKTRO-FA.
PAVELEK, s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobvtu:	Ostravská 327/54, 747 70 Opava - Komárov		
	IČO:	60322195	Silnoproud, slaboproud, EPS, McíR	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Tomáš Valach	20%	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 11443/KSOS Krajský soud v Ostravě		
	Tel./fax:	+420 553 794 316		
	E-mail:	infoVipavelek.cz		
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STAVO ARNE s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Studia 278/14, Zábřeh,
700 30 Ostrava		
	IČO:	26803810	Zdravotechniku, topení	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Radim Schoffer	13%	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 27353/KSOS Krajský soud v Ostravě		
	Tel ./fax:	+420 602 572 445		
	E-mail:	stavoameí/ seznam.cz		
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AUDY s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobvtu:	Živného la, 635 00 Bmo		
	IČO:	00544426	Zdravotnická technologie	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Bohdan Vojáček	9%	
	Spisová značka v	C 47/KSOS Krajský soud		
	obchodním rejstříku:	v Brně		
	Tel./fax:	+ 420 721 043 610		
	E-mail:	bohdan.vojacekivraudy.cz		

	Spisová značka v	C 2071/KSOS Krajský soud		
	obchodním reistříku:	v Ostravě		
	Tel./fax:	+420 596 237 746		
	E-mail:	info(a)fermion.cz		
Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.
V Otrokovicích dne 29.5.2020
A í\
I
_L
_

32

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Seznam poddodavatelů
VZ „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje	
PODDODAVATEL:		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELEKTRO-FA.
PAVELEK, s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ostravská 327/54, 747 70 Opava - Komárov		
	IČO:	60322195	Silnoproud, slaboproud, EPS, MaR	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Tomáš Valach	20%	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 11443/KSOS Krajský soud v Ostravě		
	Tel./fax:	+420 553 794 316		
	E-mail:	i nfo:'«; pavelek.cz		
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STAVO ARNE s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobvtu:	U Studia 278/14, Zábřeh,
700 30 Ostrava		
	IČO:	26803810	Zdra votechnika, topeni	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Radim Schoffer	13 %	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 27353/KSOS Krajský soud v Ostravě		
	Tel./fax:	+420 602 572 445		
	E-mail:	stavoameuseznam.cz		
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AUDY s.r.o.		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobvtu:	Živného la, 635 00 Brno		
	IČO:	00544426	Zdravotnická technologie	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Bohdan Vojáček	9%	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 47/KSOS Krajský soud v Bmě		
	Tel./fax:	+ 420 721 043 610		
	E-mail:	Bohdan.vojaček u audv.cz		

Spisová značka v	C 2071/KSOS Krajský soud		
obchodním reistříku:	v Ostravě		
Tel./fax:	+420 596 237 746		
E-mail:	inťoážfernnon. cz		
Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.
V Otrokovicích dne 29.5.2020