Objednatel	IČO:	00074276	DIČ:	CZ00074276	
			Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje	
	nám. Krále Jiřího z Poděbrad		
	350  02  Cheb		Dodavatel	IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105	
			ZIP o.p.s.	
	Bankovní spojení	KB Cheb			
	Číslo účtu	Anonymizováno			Tomanova 3-5	
				
			301  00  Plzeň	

Objednáváme:	ORJ 4031	
u Vás:	
Vás technické zajištění archeologického výzkumu na zaniklé synagoze v Mariánských Lázních".	
místo:	
2152, k. ú. Mariánských Lázní	
druh a rozsah požadovaných činnosti:,	
výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství	
3x archeologický dělník na 90 dní	
1x terénní technik na 90 dní	
1x dokumentátor na 90 dní	
předpokládaná výměra:	
bude se jednat o komplexní archeologický výzkum od začištění skrývkových prací, přes výkop archeologického	
souvrství v šachovnicové síti až po dokumentaci. Předpokládaná skrytá plocha cca 800 m?	
zahájení a předpokládaný termín dokončení:	
zahájení 11. 9. 2023	
dokončení 15. 12. 2023	
harmonogram:	
1 až 10. den: dokončení skrývkových prací, začištění plochy, vytyčení šachovnicové sítě, započetí exkavace	
11. až 80. den: exkavace kulturních souvrství v šachovnicové síti, třídění stratigrafických jednotek, třídění	
nálezů, jejich evidence, průběžná dokumentace, kresebná, fotografická, geodetická	
80. až 90. den: dokončování exkavace, dočištění plochy, dokončení dokumentace	
Cena: 734 421,60,- Kč včetně DPH	
	
Žadatel:          Anonymizováno	
	
Příkazce operace: Ing. Martina Kulová	
	
Správce rozpočtu: Anonymizováno	
	
	V  Chebu	
	Dne :	06.09.2023	
	Vyřizuje :	Anonymizováno	
	Telefon :	Anonymizováno	
	E-mail:	Anonymizováno	
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu