DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
uzavřené dle § 2586 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a
dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění
staveb, mezi smluvními stranami
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov zastoupenředitelem IČO: 00844896 DIČ: CZ 00844896
bankovní spojení: číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
provozně-technický náměstek 
manažer investic
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr. vložka 899
(dále jen „příkazce")
2. Miroslav Slezák
podnikající pod jménem: 
se sídlem: Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 47196408
DIČ: CZ7212254951
bankovní spojení: 
číslo Účtu: 
Zapsán v živnostenským rejstříku, vedené Magistrátem města Frýdku-Místku Č. j.: ŽÚ/4972/2017/Ora/4 (dále jen „příkazník")
Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na změně článku V. Odměna, z důvodu prodloužení termínu realizace stavby způsobený rozšířením rozsahu díla, které spočívalo v novém technickém řešení a realizaci zajištění stabilního podloží pro založení stavby u realizovaného díla takto:
V.
Odměna
ČI. V odst. 1. smlouvy nově zní:
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena celkem bez dle Dodatku č.l bez DPH Cena odměny doplněná bez DPH
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 % celkem
69 000,- Kč 18 000,- Kč
87 OOO,- Kč
18 270,- Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH
105 270,- Kč
Rekonstrukce infekčního oddělení pro oddělenou logistiku pacientů s VNN a C19"
,CA U

IV. Závěrečná ustanovení
1.	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních
3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V Havířově dne:
1 8. 09. 2023
lil L/ V
Rekonstrukce infekčního oddělení pro oddělenou logistiku pacientů s VNN a C19’
2