DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu: tel.: e-mail:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
ředitelem
provozně-technický náměstek
manažer investic
008 44 896
CZ00844896
596 491 111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. Zlínstav a.s.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

283 15 669 
CZ 283 15 669 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
(dále jen „zhotovitel")
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 1.
III.
Nová smluvní cena
Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	49.999.999,00 Kč	
Méněpráce bez DPH (viz příloha)	- 601.922,02 Kč	
Vícepráce bez DPH (viz příloha)	+ 2 828 880,64 Kč	
Nová smluvní cena bez DPH	52 226 957,62 Kč	

IV.
Nový termín plnění
1.	Z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v realizaci změnového listu ZL 03 Omítky, který byl řádně předložen Zhotovitelem a následně odsouhlasen Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o 32 kalendářních dní, tzn. na nový termín dokončení do 11 měsíců a dvou dnů ode dne předání staveniště.
V.
Závěrečná ujednání
1.	Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
4.	Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací
V Havířově dne /die elektronického podpisu/
1 a 09. 2023
2

'Co TM

01.08.2023
„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace"
§222, odst. (6), §222, odst. (5)	nepředvídatelné
Oddělitelný přesun pod jinou Smlouvu Zakázka
CELKEM SOD	49 999 999,00				§222, odst. (4) 15% neoddělitelné dodatečné dodatečné práce, 30%	§222, odst. (7) Záměna	malého rozsahu do 6 mil.
absolutní hodnota bez práce 30% rozdil, 50% rozdíl, 50% dodatečné materiálu - vždy menši.	Prostý odpočet	Kč. Samozřejmé pouze	
Změna | Popis	částka	VCP +	MNP-	ZASLÁNO	§222, odst. (2)	zdůvodňováni	dodatečné práce	p.íce	nebo rovno "0”	méněpraci	dodatečné práce	
a oi	Hydroizolace	205 626,43	256 847,09	-51 220,66	15.05.2023				205 626,43 Kč				
a 02	Mikropiloty	-50 429,76	5 994,05	-56 423,81	02.06.2023				50 429,76 Kč				
ZL 03	Omítky	1525 655,19	2 019 932,74	-494 277,55	02.06.2023				1 525 655,19 Kč				
ZL 04	Příplatek sanita	95 577,00	95 577,00		02.06.2023		95 577,00 Kč						
ZL 05	Oprava anglického dvorku	224 448,62	224 448,62		12.06.2023				224 448,62 Kč				
ZL 06	Provedeni f abionů z PVC	226 081,14	226 081,14		15.06.2023		226 081,14 Kč						
													
Celkem DODATEK č.l	1	2 226 958,62	2 828 880,69 j	-601922,02									
| Celkem DODATEK č.l a SocT
52 226 957,621	2828 880,641	-601 922,0Ť