Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23P05193
1.Smluvní strany
1.1. Zhotovitel:
Obchodní společnost:	PKS okna a. s.
Sídlo: 	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 	652 76 507	DIČ: 	CZ65276507
Telefon: 	566 697 301 (310)	Fax:	566 697 392 (393)
Servisní linka:	800 23 00 24	E-mail:	okna@pks.cz     
Bank. spojení:	Fio banka, a.s.	Č. ú.:	2701732596/2010
Zastupuje: 	Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva; Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel
Pro věci technické: 	Luděk Ondráček, 724 537 617; Jan Štěpánek, 602 192 613; Ing. Jakub Malimánek, 606 691 451
Pro věci obchodní:	Tomáš Buček, 724 015 319; Jan Zíta - regionální obchodní ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj  
Pro předání díla: 	Ing. Miroslav Veselý, 725 947 516; Martin Kabelka, 602 705421; Luděk Ondráček, 724 537 617; Ing. Zbyněk Pulec, 724 207 504
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:				(pro GDPR také jako „Subjekt údajů“)
Obchodní společnost/Jméno:	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
Sídlo/Bydliště:	Kokory 54, Kokory, 751 05
IČO/RČ/Dat. nar.:	61985929
Telefon, mobil:	721 204 881	E-mail:	reditel@dominikakokory.cz
Zastupuje:	Ing. Monika Orel, ředitelka
Pro potvrzení tech. dokument.:	Bc. Tomáš Zavadil, tel.: 771 289 384, tzavadil@dominikakokory.cz
Pro převzetí díla:	Bc. Tomáš Zavadil

2. Předmět dodatku
2.1.	Předmětem dodatku je snížení původní ceny plnění (SOD č. 23P05193 – cena plnění 173.805,00 Kč + DPH) z důvodu technických změn. Rozdíl dodatku činí -4.048,00 Kč + DPH – viz cenová nabídka č. P309837E, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku.
2.2.	Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá     od: 23.10.2023       do: 27.10.2023           
Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do:  17.10.2023
2.3.	Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:  
Cena díla bez DPH:                                 		169.757,00 Kč 	
Sazba DPH:	15 %       DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf                                                                      
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.    
3. Podpisy smluvních stran
Zhotovitel:		 Objednatel:
Žďár nad Sázavou dne: 9. 10. 2023		Kokory dne: 9. 10. 2023	

razítko, podpis		podpis	
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva		Ing. Monika Orel, ředitelka