Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5122000001 Číslo smlouvy zhotovitele: 21-012

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“) a
PROXIMA, a.s.
se sídlem na adrese: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616 IČ: 60916478
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Karel Chorvát, člen správní rady (dále též jen „zhotovitel“)
Preambule
Ve smlouvě o dílo je dle ustanovení 6.6. uvedeno, že s ohledem na překotný nárůst cen stavebních materiálů v návaznosti na změny trhu způsobené pandemií Covid-19 bude provedena indexace ceny díla. Tato indexace bude provedena na základě kladného nebo záporného přírůstku indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem. Indexace bude provedena v závěrečné faktuře po předání díla objednateli (částka indexace se nezapočítá do limitu dle bodu 7.7) průměrem indexů za období od prvního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání staveniště, do posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém dojde k předání dokončeného díla.
Z veřejně dostupných zdrojů zveřejněných Českým statistickým úřadem vyplývá, že indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb byly pro budovy nebytové nevýrobní odpovídající předmětu smlouvy v uvedeném období následující:

Období	4.Q.2021	1.Q.2022	2.Q.2022	3.Q.2022	4.Q.2022	1.Q.2023	2.Q2023	
Index	131,1	138,2	150,5	153,0	153,0	155,4	154,5	
Aritmetický průměr bazických indexů cen materiálových vstupů za období 1.Q. 2022 až 2.Q 2023 je dán (138,2 + 150,5 + 153,0 + 153,0 + 155,4 + 154,5) / 6 = 150,8
Výsledná hodnota bazického indexu cen materiálových vstupů je (150,8 / 131,1) = 1,15
Objednatel a zhotovitel se dohodli na snížení výsledné hodnoty bazického indexu cen materiálových vstupů za uvedené období na 1,1333.
Na základě tohoto ustanovení se tímto dodatkem upravuje cena díla indexací ceny dle indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem.

Článek 1. Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na základě ustanovení odst. 6.6. smlouvy na doplnění ustanovení odst. 6.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
cena bez DPH: 56 644 000,00 Kč (padesát šest milionů šest set čtyřicet čtyři tisíce korun a nula haléřů)
sazba DPH: 21%, DPH: 11 895 240,00 Kč (jedenáct milionů osm set devadesát pět tisíc dvě stě čtyřicet korun a nula haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 68 539 240,00 Kč (šedesát osm milionů pět set třicet devět tisíc dvě stě čtyřicet korun a nula haléřů) se navyšuje cena díla indexací ceny dle indexu cen materiálových vstupů uveřejňovaném Českým statistickým úřadem průměrem indexů za období od prvního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k předání staveniště, tedy 1. Q 2022, do posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k předání dokončeného díla, tedy 2.Q 2023, o 13,33 %.
Cena navýšení bez DPH činí 7 550 645,20 Kč (sedm miliónů pět set padesát pět tisíc šest set čtyřicet pět korun a dvacet haléřů)
Konečná cena díla, včetně započítání Dodatků č.1, č.2, č.3, č.4 činí:
cena bez DPH: 75 536 635,62 Kč (sedmdesát pět miliónů pět set třicet šest tisíc šest set třicet pět korun a šedesát dva haléřů)
sazba DPH: 21%, DPH: 15 862 693,48 Kč (patnáct milionů osm set šedesát dva tisíc šest set devadesát tři korun a čtyřicet osm haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 91 399 329,10 Kč (devadesát jeden milión tři sta devadesát devět tisíc tři sta dvacet devět korun a deset haléřů)
2.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze	V Praze

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Digitálně podepsal(a) Alena Kohoutková Datum: 10.05.2024
10:06:46

Ing. Karel Chorvát

Digitálně podepsal Ing. Karel Chorvát Datum: 2024.05.14
12:07:27 +02'00'

	
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.	Ing. Karel Chorvát
prorektorka pro výstavbu	člen správní rady
České vysoké učení technické v Praze	PROXIMA, a.s.