Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
se sídlem společnosti a adresou pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

Správce Společnosti:	Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČO:	45146802
DIČ:	CZ45146802
zastoupená: 	Ing. Jaromír Raclavský, ředitel společnosti a
	Ing. Milan Schagerer, výrobně technický ředitel,
	oba na základě plné moci
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx

Společník 2 Společnosti:	EUROGAS a.s.
se sídlem	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
IČO:	61859974
DIČ:	CZ61859974
zastoupený:	Ing. Petr Máša, předseda představenstva
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx

(„zhotovitel“)
na straně druhé

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna nutnost provedení některých prací neobsažených v projektové dokumentaci a výkazu výměr (odstranění zpevněné plochy za objektem, sanace základové spáry v 1.PP v návaznosti na provedené rázové zatěžovací zkoušky), případně je nutné s ohledem na skutečný stav odkrytých konstrukcí provést statické zajištění konstrukce.  

Objednatel se zhotovitelem proto projednali pro jednotlivé změny změnové listy č. ZL01 – ZL04 a tímto dodatkem upravují cenu díla. Provedení změn dohodnutých těmito změnovými listy nemá vliv na termín dokončení díla.	

V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p.2458, Kladno“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 024 63 245 (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL04.

2.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL01-ZL04. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 1 083 564,08 Kč bez DPH a částky v bodě 6.1. smlouvy se mění takto:

cena bez DPH: 70 838 540,10 (sedmdesát milionů osm set třicet osm tisíc pět set čtyřicet korun deset haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 14 876 093,42 Kč (čtrnáct milionů osm set sedmdesát šest tisíc devadesát tři koruny čtyřicet dva haléře)

Celková cena díla včetně DPH: 85 714 633,52 Kč 
(osmdesát pět milionů sedm set čtrnáct tisíc šest set třicet tři koruny padesát dva haléře)

3.	Dále se v ustanovení odst. 28.7. doplňuje nový bod d) tohoto znění:
d) Příloha 4 – změnové listy ZL01-ZL04 
4.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

5.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

6.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________		___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.		Ing. Jaromír Raclavský
prorektorka pro výstavbu				ředitel společnosti
České vysoké učení technické v Praze		Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
							na základě plné moci

							___________________________
					Ing. Milan Schagerer
							výrobně technický ředitel
							Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
							na základě plné moci