Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.39 /24 
Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
I. Smluvní strany. 
I. 
Zdeněk Hrbek 
česká 173, 440 01, Louny 
Tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx
12022136 
CZ6711170664 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Objednatel: se sídlem: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
PALATA- Domov pro zrakově postižené 
Na Hřebenkách 737 /5, 150 00 Praha 5 - Smíchov panem Ing. Jiřím Procházkou - ředitelem domova Palata Tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
70872783 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxx
Zástupci pro věci smluvní: 
Za objednavatele: xxxxxxxxxxx 
Za zhotovitele: 	xxxxxxxxxx 
Zástupci pro věci díla: 
Za objednavatelexxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx
Za zhotovitele: 	xxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx
II. Předmět dodatku 
1.	Předmětem je prodloužení realizace na díle - ,,Oprava fasády venkovního kiosku a garáží", •. 
PALAT A - Domov pro zrakově postižené" 
2. Při realizaci výše uvedené objednávky je nezbytné prodloužit dobu realizace veřejné zakázky. 
Vzhledem k náhlému onemocnění dodavatele stavby VZ - Oprava fasády venkovního kiosku a garáží, je nutné přistoupit k prodloužení realizace celého díla. Nemocenská absence má za následek delší časový úsek při plnění výše uvedené zakázky. 
Na cenu zakázky to žádný vliv mít nebude. Cena zakázky je konečná. 
3. Dílo se tak prodlužuje do 30. 10. 2024, původní datum dokončení bylo 30. 6. 2024. 
V Praze dne: 30.6.2024 
V Praze dne: 30.6.2024
Objednatel 
Zhotovitel 
,.