Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.24/24 
Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Objednatel: se sídlem: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
I. Smluvní strany. 
I. 
Bohumil Nejedlý 
Lísková 107, 251 68 Kamenice - Ládví 
Tel. xxxxxxx, e-mail: xxxxxx
 495 02 859 
CZ6804170659 
xxxxxxxxxx
PALATA- Domov pro zrakově postižené 
Na Hřebenkách 737 /5, 150 00 Praha 5 - Smíchov xxxxxx xxxxxxxx Palata Tel. xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx
70872783 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxx
Zástupci pro věci smluvní: 
Za objednavatele: xxxxxxxxxx
Za zhotovitele: 	xxxxxxxx
Zástupci pro věci díla: 
Za objednavatele: xxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx
Za zhotovitele: 	xxxxxxxxxx telxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
II. Předmět dodatku 
1.	Předmětem je prodloužení realizace na díle - ,,Výměna koberců v klubovně, vrátnici a zasedací místnosti", PALATA- Domov pro zrakově postižené" 
2.	Při realizaci výše uvedené VZ je nezbytné prodloužit dobu realizace veřejné zakázky. 
Vzhledem k pozdnímu dodání koberců výrobcem je dodavatel díla VZ - Výměna koberců v klubovně, vrátnici a zasedací místnosti, přistoupit k prodloužení realizace celého díla. Na cenu zakázky to žádný vliv mít nebude. Cena zakázky je konečná. 
3. Dílo se tak prodlužuje do 30. 10. 2024, původní datum dokončení bylo 30.6.2024. 
V Praze dne: 30.6.2024 
V Praze dne 30.6.2024 
Objednatel 
Zhotovitel