DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2024 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a související činnosti investiční akce Výzkumné centrum Motol“ 
(dále v textu jen Dodatek č. 1)

uzavřený mezi smluvními stranami:
Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 
		jejímž jménem jedná: 	prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu 
		IČO: 68407700		DIČ: CZ68407700
		(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	STUDIO AM s. r. o.
		Na Bojišti 24
		120 00 Praha 2
		ve věcech smluvních a technických 
je oprávněn jednat: 	Ing. arch. Jiří Košťál, jednatel	
		IČO: 62416596		DIČ: CZ62416596	
		(dále jen „zhotovitel“)

zhotovitel a objednatel společně dále také jako „smluvní strany“ 
	
PREAMBULE
1)	Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 5. 2024 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a související činnosti investiční akce Výzkumné centrum Motol“ (dále v textu jen „SoD“).
2)	V průběhu plnění SoD objednatel doplňoval nové projektové podklady (bludné proudy, zkušební vrt) a požadavky na základě podnětů budoucího uživatele – ČVUT v Praze-Kloknerův ústav; Vzhledem ke skutečnosti, že na základě výše uvedeného byly změněny podmínky plnění závazku z SoD a to zejména tak, že je zapotřebí prodloužení doby plnění SoD, sjednávají smluvní strany Dodatek č. 1. 
3)	Smluvní strany prohlašují, že nedochází k navýšení ceny díla dle SoD.
4)	Objednatel prohlašuje, že Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. že zejm. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch zhotovitele, jeho uzavření nepředstavuje takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů plnění SoD nebo by byl ovlivněn výběr dodavatele v zadávacím řízení, které vedlo k výběru smluvní strany SoD, a konečně ani nerozšiřuje významně předmět plnění SoD.

I.	ZMĚNY SoD

1)	Smluvní strany se dohodly, že:
a)	Text čl. IV. odst. 1.1. SoD se zcela nahrazuje následujících textem:
Výstup díla dle čl. III. 2.1. smlouvy (projektová dokumentace – draft k připomínkám) do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
b)	Text čl. IV. odst. 1.2. SoD se zcela nahrazuje následujícím textem:
Výstup dle čl. III. 2.2. (bílá kniha) do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
c)	Text čl. IV. odst. 1.6. SoD se zcela nahrazuje následujícím textem:
Výstup dle čl. III. 2.6. (odborný propočet) do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
d)	Text čl. V. odst. 2 se zcela nahrazuje následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly, že cena díla (výstupů) dle čl. III. 2.2., čl. III. 2.4., čl. III. 2.6. bude hrazena jako jednorázová dle ceny uvedené v cenovém rozpadu. Cena za dílo dle čl. III. 2.1. bude hrazena ve 2 splátkách: 70 % z ceny díla po odevzdání draftu DSP k připomínkám; 30 % z ceny díla po zapracování připomínek.
2)	Smluvní strany se dále dohodly, že všechny odkazy na čl. II. v čl. IV. SoD se nahrazují v čl. IV. SoD odkazy na čl. III. SoD.
3)	Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změny.
II.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1)	Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a opatřen elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty) smluvních stran.
2)	Smluvní strany Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že se zakládá na pravdivých údajích a vůle být jím vázán vychází z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne…………………………………

	….…………………………                                                            	……………………………………….
               za objednatele ČVUT                                                                za zhotovitele Studio AM s. r. o.