L
Smlouva o dílo
(stavebně-řemeslnické práce)

1.	Objednatel
Astronomický ústav AV ČR v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
Zastoupený:
XXXXXXXXXXXXX
IČO: 679 85 815
DIČ: CZ67985815

2.	Zhotovitel
Izolace Praha Matouš s.r.o.
Chudenická 1059/30 Praha 10 
Zastoupený: XXXXXXXXXXX
IČO:01928317 
DIČ: CZ01928317

uzavřeli tuto smlouvu o dílo

I.	Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: opravu střešního pláště na budově Výrobní mechanické dílny v areálu Astronomického ústavu v Ondřejově v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy (cenová nabídka), která je její nedílnou součástí; dále jen „Dílo".

Zhotovitel bude při provádění smluvních prací používat materiál a vybavení v souladu s danou nabídkou. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.	Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu článku I. Byla stanovena dle rozpočtu ve výši 1 298 700,- Kč bez DPH.
Ve faktuře bude vykázáno DPH (přenesená daňová povinnost) v zákonné výši 21 %.

Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze. Splatnost faktur se stanovuje 10 dní. Faktura bude zaslána na adresu: faktury@asu.cas.cz

III. Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 2.9.2024 - 30.11. 2024

Smluvní strany souhlasí s tím, že termín zhotovení se může prodloužit kvůli následujícím událostem:
-	špatnému počasí,
-	výjimečným a nečekaným událostem technického charakteru.

IV. Předání a převzetí díla

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1 % za každých den prodlení, max. však 10 % z ceny díla.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu pěti let od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními    stranami   sepsán   záznam.   Náklady    na   odstranění    vad    nese Zhotovitel.

VI.	Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost smlouvy je datem zveřejnění v registru smluv dle Zák. 340/2015 Sb.

V Ondřejově dne: 2.9.2024

Objednatel	Zhotovitel