SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 482/2016/OSM na dílo:

„Projekt elektroinstalace objektu ZŠ č.p.777 Politických vězňů, Slaný“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1  OBJEDNATEL :

Obchodní jméno :	Město Slaný
Adresa :	Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČ :	002 34 877

DIČ :	CZ00234877

Bankovní spojení :	
Číslo účtu/směrný kód :          

Zástupce města :	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zástupci pro věci technické:	František Schwarz, pracovník odboru správy majetku

dále jen „objednatel“

1.2  ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno :	Elektromontáže Stavby s.r.o.
Adresa :	Smečenská 1009, 274 0 Slaný

IČ :	25700936

DIČ :	CZ25700936
Bankovní spojení :	

Číslo účtu/směrný kód :          

Statutární orgán :	Ing.Lubomír Hošínský

Telefon :	
E-mail:	

dále jen „zhotovitel“

2.	Předmět díla 

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodání projektové dokumentace osvětlení, silnoproudé a strukturované kabeláže, včetně všech potřebných stavebních a malířských prací pro stavební povolení a realizaci stavby a zajištění souhlasu hygienické stanice. Převedení výkresové dokumentace do DWG. Projektová dokumentace bude předána v rozsahu 6x papírová podoba (z toho 1x bude potvrzeno hygienickou stanicí), 1x elektronická podoba, 1x rozpočet v papírové podobě, 1x výkaz výměr a rozpočet elektronicky, 1x originál vyjádření dotčených institucí, 1x vyjádření v PDF. 

2.2	Zhotovitel je povinen provést veškeré ostatní práce související s předmětem díla, které jsou zřejmé nebo které bylo možné zjistit při prohlídce stavby před podáním nabídky. 

3.	Lhůty plnění 

3.1	Zhotovitel zahájí práce na projektu dnem podepsání smlouvy, tj. 05. 08. 2016. 

3.2	Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 30. 10. 2016. 

3.3	V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné termín zahájení dodržet, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran. 

4.	Cena díla 

4.1	Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí: 

1

4.1.1	cena bez DPH	99 767,00 Kč		
				
4.1.2  DPH v zákonné výši	20 951,10 Kč		
			
4.1.3	cena včetně DPH	120 780,10 Kč		

4.2	Rozpočet ze dne 18. 07. 2016 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 1.

5.	Změna ceny díla 

5.1	Dojde-li v souvislosti se změnou této smlouvy ke zvýšení ceny díla, bude tato cena vyfakturována zhotovitelem odděleně, nad rámec ceny díla. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, nebudou zhotovitelem fakturovány. Zvýšení ceny díla je přípustné do 20% ceny díla podle rozpočtu a to i v případech provádění prací nad rámec předmětu díla. Změna ceny díla bude řešena dle odst. 10.1 této smlouvy. 

6.	Platební podmínky 

6.1	Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude cena uvedená ve smlouvě o dílo 

6.2	Fakturu je objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

7.	Smluvní pokuty 

7.1	Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty řádného provedení díla z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7.2	V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním ústavem. 

7.3	Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady předmětu díla v souladu s ustanovením odst. 8.3 z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.	Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruční doba) 

8.1	V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen tuto vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na e-mail

8.2	Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení vady objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.	Předání a převzetí předmětu díla 

9.1	Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor, které souvisí s dílem. 

9.2	Zhotovitel je povinen písemně (dopis, e-mail) vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis. 

2

9.3	Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré doklady uvedené v předmětu díla.

10.	Ostatní ujednání 

10.1	Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 7 dnů od obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 

10.2	Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod. 

10.3	Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je projektant ………………………. a bude vybaven mobilním telefonem číslo ………………………. 

10.4	Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo. 

10.5	Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze místa plnění a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo. 

10.6	Veškeré věci určené k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

10.7	Zhotovitel nesmí zadat dílo ani její část jinému zhotoviteli nebo subdodavateli, než kterého uvedl v nabídce na tuto veřejnou zakázku, bez souhlasu objednatele. 

11.	Závěrečná ustanovení 

11.1	Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu soud příslušný místu navrhovatele. 

11.2	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

11.3	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

11.4	Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

11.5	Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města dne 27. 07. 2016 pod číslem usnesení 07/71/2016/RM. 

Příloha:

č. 1 Rozpočet (4A4)

Ve Slaném dne 05. 08. 2016

Za zhotovitele:	Za objednatele:

…….……………………………………	…….…………………………………………

Ing.Lubomír Hošínský	Mgr. Martin Hrabánek

starosta města Slaný

3

schváleno: RM č. 71/2016/RM dne 27. 07. 2016, usnesení č. 07/71/2016/RM zpracoval: František Schwarz, referent úseku investic a oprav

4