Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2024 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
zastoupená: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
Peněžní ústav: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné
a

EPZ, spol. s r.o.
se sídlem: 		Husova 424, 261 01 Příbram VI
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98741
IČ:			27132960
zastoupená:		Pavlem Zelenkou, jednatelem společnosti
Peněžní ústav: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je třeba s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících stavebních konstrukcí provést dílčí úpravy navrženého technického řešení. Ke změně dochází především ve stavebních pracích (zvětšení tlouštěk podlahových stěrek z důvodu nerovinatého podkladu, změna rozsahu elektroinstalací, změna rozsahu betonáže kabelových žlabů, změna rozsahu omítání stropu).
Objednatel se zhotovitelem projednali jednotlivé změny a na každou tuto změnu vyhotovili a odsouhlasili změnový list, jedná se o změnové listy č. ZL01 až ZL03. Změnovými listy a tímto dodatkem se upravuje cena díla a prodlužuje se termín dokončení díla o 35 kalendářních dní a to do 17.11. 2024.
V souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť 
•	se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku,
•	potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Nezbytnost provedení prací je popsána v jednotlivých změnových listech a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže včetně výrazného zvýšení nákladů (nutnost přerušení stavebních prací a výběr nového dodavatele by byl zcela jistě výrazně finančně náročnější).
Celkový nárůst hodnoty dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb ).
 Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

2.1. Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby dle veřejné zakázky spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v projektové dokumentaci vypracované ing. Arch. Tamarou Pokornou, zaměstnancem zadavatele (referát rozvoje a výstavby FD ČVUT  (dále jen "DPS"). Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL03.

2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2 smlouvy, které se nahrazuje novým zněním takto:

3.2. Dílo bude provedeno nejpozději do 17.11. 2024.

3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány změnovými listy č. ZL01 až ZL03. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo k zvýšení ceny díla o 122 356,50 Kč bez DPH a ustanovení odst. v bodě 6.1. smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

6.1 Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:
cena bez DPH: 1 218 279,24 Kč 
(slovy: jeden milion dvě stě osmnáct tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých a dvacet čtyři haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 255 838,64 Kč 
(dvě stě padesát pět tisíc osm set třicet osm korun českých a šedesát čtyři haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 1 474 117,88 Kč 
(jeden milion čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc sto sedmnáct korun českých a osmdesát osm haléřů)

4.	Dále se ustanovení odst. 28.10 smlouvy upravuje takto:
28.10.	Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Jedná se o tyto přílohy:
a)	Příloha A – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
b)	Příloha B – Seznam poddodavatelů
c)	Příloha C – Časový a finanční harmonogram realizace upravený na základě dodatku č.1 
d)	Příloha D – Změnové listy ZL01-ZL03

5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Pavel Zelenka
prorektorka pro výstavbu				jednatel společnosti
České vysoké učení technické v Praze		EPZ, spol. s r.o.