Smlouva o dílo 
Rekonstrukce sociálních zařízení a podlah Prostřední části DM Gymnázia Český Krum1ov 
dle $ 631 a následující zákona 89/2012 Sb. Občanského zákona ve znění pozdějších předpisů. 
A) SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL: 	Gymnázium Český Krumlov 
ADRESA: 	Český Krumlov, Chvalšinská 112 
	IČO: 	00583839 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních: 
ZHOTOVITEL: 
ADRESA: 
IČO: 
DIČ: 
Tel: 
Osoby ve ve 
Hodboď sro. 
Český Krumlov, Pod Hrází 472 26071835 
CZ26071835 
380 711 196 
oprávněné jednat 
věcech smluvních: Ivo Heřmánek, jednatel věcech technických: Milan Hodboď, jednatel 
B) PŘEDMĚT SMLOUVY 
Rekonstrukce sociálních zařízení a podlah prostřední části Domova mládeže Gymnázia Český Krumlov v rozsahu předané dokumentace pro zadání veřejné zakázky. 
C) CENA ZA DÍLO 
Cena za dílo je vyčíslena v příloze a činí Bez DPH 520 455,94 Kč 
(pětsetdvacettisíc čtyřistapadesátpět korun 94 haléřů) Včetně DPH 629 751,69Kč 
(šestsetdvacetdevěttisíc sedmsetpadesátjedna koruna 69 haléřů) 
D) TERMÍNY PROVÁDĚNÍ Zahájení: 17.7.2017 Dokončení: 11.8.2017 
E) PŘÍLOHY 
1) Rozpočet 2)Všeobecné podmínky 
V České~ Krumlově dne 
V Českém Krumlově dne 18.&.2017 

			Položkový rozpočet 			
Zakázka: 			Gymnázium - oprava ubytovacích buněk 		
Misto 					Gymnizlum český Krumlov 		
Objednatel: 						IC: 		
						DIC: 		
					- 			
Zhotovitel: 	Hod bod' sro 				IC: 26018035 	
	Pod Hrizi 472 				DIC: 		
381 01 Český Krumlov 						
ROZDis ceny 							Celkem 	
HSV 							195554,46 	
PSV 							299691,48 	
MON 							25210,00 	
Vedlejšl náklady 							0,00 	
Ostatnl náklady 							0,00 	
Celkem 							520455,94 	
Rekaoltulace dani 								
Základ pro sníženou DPH 		15 	% 		0,00 CZK 	
Snlžená DPH 				15 	% 		0,00 CZK 	
Základ pro základnl DPH 		21 	% 		520 455,94 CZK 	
Základnl DPH 				21 	% 		109295,75 CZK 	
Zaokrouhleni 							0,00 CZK 	
Cena celkem s DPH 					629 751,69 CZK 	
v 	Českém Krumlově 			dne 	19.04.2017 		
		M O D 8 O Ď "'.0. 				
		Pod Hrázi 472 					
		381 01 Cesk~ Krumlov 				
	oCo: 260 71 635, DI : os2'~ 			
		tel.: 602 490 872 					
		Za zhotovitele '\ 		Za objednatele 		
	. 						
			I 					

Rekapitulace dílů 
črslo 	Název 	Typ dnu 			Celkem 	
3 	Svislé a kompletnl konstrukce 	HSV 			19212,36 	
61 	Upravy povrchů vnitřni 	HSV 			91676,29 	
63 	Podlahy a podlahové konstrukce 	HSV 			31109,85 	
64 	Výplně otvoru 	HSV 			2940,00 	
96 	Bouráni konstrukci 	HSV 			29735,96 	
99 	Staveništni přesun hmot 	HSV 			20880,00 	
725 	Zai'izovaci předměty 	PSV 			60100,00 	
766 	Konstrukce truhlářské 	PSV 			11180,00 	
771 	Podlahy z dlaždic a obklady 	PSV 			12405,75 	
776 	Podlahy povlakové 	PSV 			79344,85 	
781 	Obklady keramické 	PSV 			65100,80 	
782 	Konstrukce z přlrodního kamene 	PSV 			27000,00 	
783 	Nátěry 	PSV 			4032,00 	
784 	Malby 	PSV 			40528,08 	
M21 	Elektromontáže 	MON 			25210,00 	
Cena celkem 				520455,94 	

s: 
Položkový rozpočet GymnáZium - oprava ubytovacfch buněk 
GymnáZium Český Krumlov 
o: 
P.Č. 	Čfslo položky 	Název položky 	MJ 	množsM 	cena I MJ 	Celkem 	
Díl: 	3 	Svislé a kompletnf konstrukce' 				19212,36 	
	1 310100011RAB 	Zazdlvka otvoru ve zdivu, bez úpravy povrchu, tlouAfky 45 	m2 	2,64000 	2630,00 	6943,20 	
		cm 					
		jídelna:(1,2*2,6-0,9*2,0)*2 		2,64000 			
	2 311270010RAO 	Zdivo z tvárnic porobetonových, tloušťka 30 cm 	m3 	0,92400 	3790,00 	3501,96 	
		recepce: 1 ,1*2,8'0,3 		0,92400 			
	3317940911RAO 	Osazeni válcovaných profilů dodatečně 	t 	0,06000 	38200,00 	2292,00 	
		jídelna:1,S*4*0,01 		0,06000 			
	4 340100011 RAB 	Zazdlvka otvoru v pi'lčkách plochy do 1 m2, pi'lčka 	m2 	6,00000 	753,00 	4518,00 	
		tloušťky 15 cm 					
		jídelna: 1 ,S*2,0*2 		6,00000 			
	5 342270014RAO 	prlčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 15 cm 	m2 	2,80000 	699,00 	1957,20 	
		recepce: 1 ,5*2,8-1 ,0*1,4 		2,80000 			
Dll: 	61 	Upravv povrchů vnitrnf 				91676,29 	
	6 612100032RAA 	Oprava omitek stěn vnitmlch vápenocem. štukových, 	m2 	629,34000 	61,00 	38389,74 	
		oprava ze 30 % 					
		Buňka S: 					
		chodba: (4,3+3,0)*2*3,2 		46,72000 			
		koupelna:(3,6S+1 ,9)'2*1,1 		12,21000 			
		wc:(0,95+1 ,9)*2*1,7 		9,69000 			
		komora:(1 ,0+1 ,9)*2*3.2 		18,S6000 			
		kuchyňka:(2,0+1,9)*2*3,2 		24,96000 			
		pokoj:(3, 7+6,45 )*2*3,2 		64,96000 			
		po~oj: (4,3+5,2)*2*3,2 		60,BooOO 			
		pokoj: (4,4+6,4) *2*3,2 		6912000 			
		Bur1ka 8: 					
		chodba: (S.55+4.85) '2"3.2 		66.56000 			
		koupelna:(2,05+2,9S)*2*1,1 		11,00000 			
		wc.(1 ,4+0,9+1 ,4+0,9)*2*1,7 		15,64000 			
		kuchyňka: (2,4+2,45)*2*3,2 		31,04000 			
		pokoj:(3,7S+5,8)*2*3,2 		61,12000 			
		pokoj: (4,2+3,4)*2*3,2 		48.64000 			
		pokoj:(3,7S+5,8)*2*3,2 		61.1.2000 			
		komora:(1,8+2,45)*2*3,2 		2720000 			
	7611100011RAA 	Oprava omltek stropů vniti'nich vápenocem.štukových, 	mi 	190,18500 	96,00 	18257,76 	
		oprava z 10 %, malba 					
		Buňka 5: 					
		chodba:4,3"1,1+2,3*2,2 		9,79000 			
		koupelna:3,65*1,9 		6,93S00 			
		wc:0,9S*1,9 		1,80S00 			
		komora:1 ,0*1,9 		1,90000 			
		kuchyňka:2.0*1,9 		3.80000 			
		pokoj:3,7*6,45 		23,86500 			
		pokoj:4,3*5,2 		22.36000 			
		pokoj:4,4*6,4 		28.16000 			
	- 	Buňka 8: 					
		chodba:S,SS*1 ,85+4,2*1,1 		14,88150 			
		koupelna:2.05*2,95 		6,04750 			
		'tIc:(1 ,4+1 ,45)*0,9 		2,56500 			
		kuchyňka:2,4*2,4S 		5,88000 			

			pokoj"3,7S'S,8 			21,7S000 			
			pokoj:4,Z*3,4 			14,28000 			
			pokoj:3.7S*S,8 			21,75000 			
			komora: 1 ,8'2,4S 			4,41000 			
	8 612420010RAO 		Omltka stěn vnitrnl vápenocementová hrubá zatfená 	m2 	102,19000 	259,00 	26467,21 	
			Buňka S' 						
			Koupelna:(3, 7+1 ,9+0,9*2+2,OS)'2*2, 1 		39,69000 			
			wc:(O,95+1 ,9)*2*1,5 			8,55000 			
			kucllyně:(0,6+1,9+0,6)*0,8 		2,48000 			
			Buňka 8, 						
			koupelna:(2,OS+2,9S+0,9+2,OS)*2*2,1 		33,39000 			
			\'.Ic:(1 ,4+0,9+1 ,4+0,9)*2*1.5 		13,80000 			
			ku,chyně:(O,6+0,8)*1 ,8+(1 ,6+0,6)*0,8 		4,28000 			
	9612420014RAO 		Omltka stěn vnitml vápenocementová hladká 	m2 	11,76000 	313,00 	3680,88 	
			vrátnice 'O ,92.4/0,3*2+ 2,8 *2 		11,76000 			
10 	612420016RAO 		Omltka stěn vnitml vápenocementová ětuková 	m2 	13,05000 	374,00 	4880,70 	
			J idelna:(1 ,2*2.6-0,9*2,0)*2+(2,0+0,9+2 ,0)*0,4S'2 		7,OSOOO 			
			po dveřích: 1 ,S*2,0*2 			6,00000 			
Dll: 	63 		Podlahy a podlahové konstrukce 				31 109,85 	
11 	632450020RAO 		Vyrovnávacl potěr 	tl. 20mm 	m2 	172,83250 	180,00 	31109,85 	
			Buňka S: 						
			chodba:4,3*1, 1 +2,3*2,2 			9,79000 			
			komora:1 ,0*1,9 			1,90000 			
			kuchyňka:2,0*1,9 			3,80000 			
			pokoj:3,7*6,45 			23,86500 			
			pokoj:4,3*5,2 			22,36000 			
			pokoj:4,4 *6.4 			28,16000 			
			Buňka 8: 						
			chodba:S,55*1 ,85+4,2*1,1 		14,88750 			
			kuchyňka:2,4*2,4S 			S,88000 			
			pokoj:4,2*3,4 			14,28000 			
			pokoj:3,75*S,8 			21.75000 			
			pokoj:3,75*5,8 			21.7S000 			
			komora: 1 ,8*2,4S 			4,41000 			
Dll: 	64 		VVDlně otvoru 					2940,00 	
12 	642942111 RU5 		OsazenI zárubnI dvemlch ocelových, pl. do 2,5 m2, 	kus 	2,00000 	1470,00 	2940,00 	
			včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm 					
			jídelna:2 			2,00000 			
Dll: 	96 		Bouránr konstrukcr 					2973596 	
13 	962200011 RAB 		Bouráni příček z cihel pálených, tlou§fka 15 cm 	m2 	5,60000 	135,00 	756,00 	
			recepce:2,0*2,8 			5,60000 			
14 	965100032RAA 		BouránI dlažeb keramických, bez podkladnfch vrstev, 	m2 	17,35250 	150,00 	2602,88 	
			tlotlšt'ka do 10 mm 						
			Buňka 5: 						
			koupelna:3,6S*1,9 			6,93500 			
			wc:0.95*1,9 			1,80S00 			
			Buňka 8' 						
			koupelna:2,OS*2,95 			6,047S0 			
			wc:1 ,4*0,9+1 ,4S*0,9 			2.56500 			
15 	968072456ROO 		Vybouráni kovových dveřnřch zárubní pl. nad 2 m2 	m2 	7,20000 	450,00 	3240.00 	
			Buňka 8:0,6*2,0 			1,20000 			
			jldelna: 1,5*2,0*2 			6,00000 			
16 	.968062746ROO 		Vybouráni drevěných stěn plochy do 4 m2 	m2 	3,36000 	60,00 	201,60 	
			recepce: 1 ,2*2,8 			3,35000 			
17 	968083002ROO 	- 	VybouránI plastových oken do 2 m2 		5,48000 	60,00 	328,80 	
				m2 				
			jfdelna:1,2*1.7*2 			4,08000 			
			recepce:1 ,0*1,4 			1,40000 			
18 	968096001 ROD 		BouránI parapetů plastových š. do 20 cm 	m 	6,80000 	65,00 	442,00 	
			jídelna: 1,2*4 			4,80000 			

		recepce: 1,0*2 		2,00000 			
19 	971100021RAB 	VybourénJ otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm 	m2 	2,04000 	3950,00 	8058,00 	
		jídelna: 1,2*0,85*2 		2,04000 			
20 	978500010RAO 	Odsekání vniti'nlch obkladů 	m2 	85,49500 	165,00 	14106,68 	
		Buňka 5: 					
		koupelna:(3, 7+1,9+0,9*2+2,05)*2*2,1 		39,59000 			
		wc:(0.95+1 ,9)*2*'1 ,5 		8.55000 			
		kuchyně:(O,6+" ,9+0,6)*0,8 		2,48000 			
		Buňka 8: 					
		koupelna:(Z,05+Z,95+0,9+2,05)*2,1 		16,69500 			
		wc:(1 ,4+0,9+1 ,4+0,9)*2*1,5 		13,80000 			
		kuchyně:(O,6+0,8)*1 ,8+(1 ,6+0.6)"0,8 		4,28000 			
Dll: 	99 	Staveništnr přesun hmot 				20880,00 	
21 	979100011 RAD 	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá 	t 	14,40000 	1450,00 	20880,00 	
		doprava z 4.NP výtahem, poplatek za suť 					
Ofl: 	725 	Zai'izovacl pfedmětv 				60100,00 	
22 	725100006RAO 	Klozet kombi 	kus 	2,00000 	5320,00 	10640,00 	
		Buňka S:1 		1,00000 			
		Buňka 8:1 		1,00000 			
23 	725111912ROO 	Oprava nádrži, zpětná montáž nádrže 	kus 	1,00000 	300,00 	300,00 	
		veřejné WC:1 		1,00000 			
24 	725100001RAO 	Umyvadlo, baterie, zépachová uzávěrka 	kus 	6,00000 	3060,00 	18360,00 	
		Buňka 5:3 		3,00000 			
		Buňka 8:3 		3,00000 			
25 	725100004RA1 	sprchová vanička,sifon, sprchová baterie 	kus 	4,00000 	7300,00 	29200,00 	
		Buňka 5:2 		2,00000 			
		Buňka 8:2 		2,00000 			
26 	725290030RAO 	Demontáž zařízovaclch pfedmětů 	kpl 	2,00000 	800,00 	1600,00 	
Ofl: 	766 	Konstrukce truhlářské 				11180,00 	
27 	766629301ROO 	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 	kus 	1,00000 	500,00 	500,00 	
		recepce:1 		1,00000 			
28 	766660014RAO 	Montáž dverl jednokrldlovjch šlfky 	kus 	16,00000 	350,00 	5600,00 	
		Buňka S:7 		7,00000 			
		Buňka 8:7 		7,00000 			
		jídelna:Z 		2,00000 			
29 	61165403R 	Dveře vniti'nl lamino CPL plné 1 kro 90x197, plná DTD 	kus 	2,00000 	2540,00 	5080,00 	
		jidelna:2 		Z.OOOOO 			
Dll: 	n1 	Podlahv Z dlaždic a obkladv 				12405.75 	
30 	771570014RAI 	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, 	m2 	17,35250 	300,00 	5205,75 	
		dlažba ve specifikaci 					
		Buňka 5: 					
		koupelna:3,6S*1,9 		6,93500 			
		Wc:O,9S*1,9 		1,80S00 			
		Buňka 8: 					
		koupelna:2,05*Z,95 		6.04750 			
		wc:1 ,4*0,9+1 ,4S*0,9 		Z,56500 			
31 	59770102R 	Dlaždice 30x30 cm 	m2 	20,00000 	360,00 	7200,00 	
Ofl: 	n6 	Podlahy povlakové 				79344.85 	
32 	776511810ROO 	Odstraněni PVC a koberců lepených bez podlotky 	m2 	173,58250 	60,00 	10414,95 	
		Buňka S: 					
		chodba:4,3*1,1 +2.3*2,2 		9,79000 			
		komora: 1,0*1,9 		1,90000 			
		kuchyňka:Z,O*1,9 		3,80000 			
		pokoj:3,7*6,45 		23,86500 			
	k 	pokoj:4,3*S,2 					
				22,36000 			
		pokoj:4,4*6,4 		28,16000 			
		Buňka 8: 					
		chodba'S,S5*1 ,85+4,Z"1, 1 		14,88750 			
		kuchyňka:2,4*2,45 		5,88000 			

		pokoi:3,75*5,8 		21,75000 			
		pokoj:4,2;'3,4 		14,28000 			
		pokoj:3,75*5,8 		21,75000 			
		komora: 1,8*2,45 		4,41000 			
		recepce:1 ,0*1 ,512 		0,75000 			
33 	n6520010RAI 	Podlaha povlaková z PVC pásů, sokllk, pouze položení, 	m2 	173,58250 	120,00 	20829,90 	
		podlahovina ve specifikaci 					
		Buňka 5: 					
		chodba:4,3*1,1 +2,3*2,2 		9,79000 			
		kcrnora.t ,0*1 ,9 		1,!lOOOO 			
		kuchyiíka'2,O*1,9 		3,80000 			
		pokoj:3,7*6,45 		23,86500 			
		pokoj:4,3*5,2 		22.36000 			
		pokoj:4,4*6,4 		28,16000 			
		Buňka 8: 					
		chodba:5,55*1 ,8S+4,2*1, 1 		14,88750 			
		kuchyňka:2,4*2.45 		S,88000 			
		pokoj:3,7S*5,8 		21,75000 			
		pokoj:4,2*3,4 		14,28000 			
		pokoj:3,7S*S,8 		21,7S000 			
		komora: 1 ,8*2,4S 		4,41000 			
		recepce:1 ,0'1 ,512 		0,75000 			
34 	28412285R 	Podlahovina PVC Novoflorextra 1500x2,0 mm 	m2 	185,00000 	260,00 	48100,00 	
Dll: 	781 	Obkladv keramické 				6510080 	
35 	78147001 ORAl 	Obklad vnítřní keramický 20 x 20 cm, do malty, obklad ve 	m2 	102,19000 	320,00 	32700,80 	
		specifikaci 					
		Buňka S: 					
		koupelna:(3, 7+1,9+0,9*2+2.05)*2*2,1 		39,69000 			
		wc:(0,95+1,9)*2*1.5 		8,55000 			
		kuchyně:(0.6+1,9+0,6)*0,8 		2,48000 			
		Buňka 8: 					
		koupelna:(2, 05+2, 95+0,9+2,05)'2*2,1 		33,39000 			
		wc:(1 ,4+0,9+1 ,4+0,9)'2*1,5 		13,80000 			
		kuchyně:(0,6+0,8)*1 ,8+(1 ,6+0,6)'0,8 		4,28000 			
36 	597813600R 	Obkládačka 20x20 	m2 	108,00000 	300,00 	32400,00 	
Dll: 	782 	Konstrukce z eřírodníno kamene 				27000,00 	
37 	782111120ROO 	Obklad stěn kamenem měkkým do 2,5 cm, remlnky 	m2 	6,00000 	4500,00 	27000,00 	
		jídelna: 1,5*2,0*2 		6,00000 			
Dll: 	783 	Nátěrv 				4032,00 	
38 	783624200ROO 	Nátěr synt. truhl. Výrobků 2x + 1 x email + 1 x tmel 	m2 	22,40000 	180,00 	4032,00 	
		Nátěr dveří: 					
		Buňka 5:0,8*2,0*7 		11,20000 			
		Buňka 8:0,8*2,0*7 		11,20000 			
Dll: 	784 	Malbv 				40528,08 	
39 	784450077RAO 	Malba disperznf, penetrace 1x, malba v barvě 2x 	m2 	844,33500 	48,00 	40528,08 	
		11,76+13,05+629,34+190,185 		844,33500 			
Dll: 	M21 	Elektromontáže' 				25210,00 	
40 	210110001RT2 	Splnač nástěnný jednop61.- řaz, 1, obyč.prostředí, včetně 	kus 	12,00000 	380,00 	4560,00 	
		dodávky sptnače 3553-01929 					
41 	210110003ROO 	Splnač nástěnný senoVý· raz. 5, obyč.prosti'edl 	kus 	6,00000 	450,00 	2700,00 	
42 	210111011RT2 	Zásuvka domovn! zapuAtěná - provedeni 2P+PE, včetně 	kus 	10,00000 	400,00 	4000,00 	
		dodávky zásuvky 5517-2389 					
43 	210111014~T6 	Zásuvka domovnr zapuštěná - provedeni 2x (2P+PE), 	kus 	15,00000 	540,00 	8100,00 	
		včetně dodávky zásuvky a rámečku 					
44 	210800106RT1 	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omltkou, 	m 	30,00000 	95,00 	2850,00 	
	- 	včetně dodávky kabelu 					
45 	R1 -.011 	Výpomocné zednické práce 	KPL 	1,00000 	3000,00 	3000,00 	
26 
520455,94

Všeobecné podmínky ke smlouvě o dílo 
dle $ 631 a následující zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
1) SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
2) PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo dle podaného ohlášení údržbových prací a podle pozdějších vzájemných dohod v souladu se stavebním zákonem a platnými technickými normami. Kvalita díla je určena platnými stavebními normami EN, ČSN a technologickými předpisy výrobců materiálů. 
2.2. Kvalita použitých materiálů je dána specifikací zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2.3. Zhotovitel díla může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - subdodavatele. Při provádění díla svým subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3) ČAS PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla na základě předaného staveniště. 
3.2 Lhůty výstavby jsou uvedené v titulním listu smlouvy o dílo a jejich případné porušení ze strany dodavatele podléhá sankcím dle oddílu 9) těchto všeobecných podmínek. 

4) CENA DÍLA 
4.1. Cena za dílo je v rozpočtu uvedena bez daně z přidané hodnoty, přičemž tato daň bude doúčtována v jednotlivých fakturách dle platných předpisů. 
4.2. Cena za dílo je stanovena na základě dohodnutého rozsahu a výkazu výměr, který byl zhotovitelem oceněn a je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo. Jednotlivé ceny, uvedené v nabídce jsou pevně platné po celou dobu výstavby. 
4.3. Uvedená cena je celková a konečná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla. 
4.4. Vícepráce mohou vzniknout pouze dalším požadavkem investora nad rámec rozsahu prací zadaných ve výběrovém řízení. 
4.5. V ceně dílo jsou i obsaženy náklady na zařízení staveniště stavby a i náklady na pořízení dokladů potřebných pro kolaudaci stavby, vyjma geodetického zaměření stavby, které slouží objednateli pro změnu zápisu do katastru nemovitostí. 
5) PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Zhotovitel nepožaduje zálohu na předzásobení materiálem. 
5.2. Způsob platby je po dokončení a po podepsání protokolu o předání díla objednateli. Splatnost faktury je 14 dní po jejím doručení objednateli. 
5.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě: - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
- obsahuje chybné cenové údaje 
- nebyly provedeny práce, opravňující k fakturaci 
Toto vrácení musí být provedeno neprodleně po obdržení chybné faktury. 
5.4. Materiály a výrobky zabudované či jen dodané na stavbu jsou až do úplného zaplacení ceny díla majetkem zhotovitele. 

6) NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY 
6.1. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou: 
vlastní nabídka zhotovitele. 
Zadávací dokumentace výběrového řízení. Zápis o předání staveniště. 
7) SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
7.1. Za spolupůsobení objednatele jako podstatné náležitosti této smlouvy se považují: 
- Předání ohlášení stavby k termínu zahájení stavby. 
- Protokolární předání staveniště při splnění dohod v něm 
uvedených. 
- Včasné upřesnění interiérových prvků. 
7.2. Objednatel určí svého zástupce, který bude ve styku se zhotovitelem a je oprávněn řešit běžné technické a provozní záležitosti. 
7.3 Objednatel je povinen na vyzvání převzít dokončené dílo a uhradit jej podle těchto všeobecných podmínek. 
8) SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE 
8.1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí, který je oprávněn vyřizovat se zástupcem objednatele všechny běžné náležitosti, týkající se provádění a předávání prací a dodávek včetně změn a víceprací. 
8.2 Zhotovitel spolupracuje s technickým dozorem objednatele a vysílá svého kompetentního zástupce na pravidelné kontrolní dny stavby. Zápisy z kontrolních dnů se pořizují zásadně do stavebního deníku. Pokud bude učiněn zápis z kontrolního dne dodatečně, bude zaslán e-mailem a má stejnou právní váhu, jako zápis ve stavebním deníku. 
9) SMLUVNÍ POKUTY 
Dohodou smluvních stran se sjednávají následující sankce a pokuty: 

9.1. Zhotovitel při nesplnění dohodnutého termínu dokončení stavby zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 
9.2. V případě, kdy platební doklad zhotovitele není proplacen do 30- ti dnů po lhůtě splatnosti, má zhotovitel právo od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupením od smlouvy z tohoto důvodu nezaniká nárok na úhradu dlužných plateb. Ustanovení tohoto odstavce platí pouze v případě, že nedojde k vrácení faktury dle bodu 5.4.  těchto podmínek, a v případě plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a těchto podmínek pro něj. 
10) ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ LHŮTA 
10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jím provedené práce v délce trvání 36 měsíců. Za materiál přebírá záruku do výše záruk poskytovaných výrobcem tohoto materiálu. 
10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. U dodávek dalších dodavatelů, u kterých je běžnou součástí dodávky záruční list, platí záruční doba, v tomto listě uvedená. 
10.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit se na reklamační řízení na stavbu nejpozději následující pracovní den. Po posouzení náročnosti úprav pak nastoupí na opravy v dohodnutém termínu. V případě náročnějších prací se zavazuje neprodleně zajistit provizorní zabezpečení objektu. 
10.4. Za případné škody vzniklé na objektu činností zhotovitele na majetku objednatele, na samém zhotovovaném díle a na majetku třetích osob, ručí zhotovitel a je povinen je odstranit dle vzájemných dohod s objednatelem. 
11) PŘEDÁNÍ DÍLA 
11.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
11.2. Zhotovitel předloží u přejímacího řízení všechny doklady stanovené ve stavebním povolení (vyjma závěrečného geodetického zaměření). Náklady na pořízení těchto dokladů je 

obsaženo v ceně za dílo a hradí je zhotovitel. Objednatel má právo požadovat jakékoli další doklady, náklady za jejich pořízení však hradí nad rámec ceny za dílo. 

11.3. Za dokončené dílo se považuje i dílo, které vykazuje takové vady či nedodělky, které nebrání ani kolaudaci ani následného užívání. U díla, které uživatel po dokončení prací užívá je považované jako převzaté. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, uvede své důvody do zápisu o předání. 
11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis případných vad a nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění. Za vadu resp. nedodělek se považují práce chybně provedené resp. vůbec neprovedené oproti projektu, technickým normám a vzájemných dohod. 
12) OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran. 
12.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. 

12.3. Ostatní neřešené záležitosti se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

12.4. Zhotovitel souhlasí s využitím jeho osobních údajů objednatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro účely informování veřejnosti a jeho činnosti. Za tímto účelem je zadavateli konstatován souhlas zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít. 
v 	dne 
V Českém Krumlově dne 18.6.2017 

HOD B O Ď •. r.o. 
Pocl Hrázi 472 
381 01 óesf<ý Krumlov 
!tO: 260 71 835, DIČ: 082·28071835