Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Společnost „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
se sídlem společnosti a adresou pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

Správce Společnosti:	Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČO:	45146802
DIČ:	CZ45146802
zastoupená: 	xxxxxxxx
	xxxxxxxx
	oba na základě plné moci
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Společník 2 Společnosti:	EUROGAS a.s.
se sídlem	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
IČO:	61859974
DIČ:	CZ61859974
zastoupený:	xxxxxxx
Peněžní ústav:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx

(„zhotovitel“)
na straně druhé

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je třeba s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících stavebních konstrukcí provést dílčí úpravy navrženého technického řešení v projektové dokumentaci. Ke změně dochází především v rozsahu stavebních prací z nichž některé mají i dopad do termínu dokončení díla. Prodloužení termínu výstavby bylo způsobeno zejména nutností realizovat řadu statických úprav (zvětšení únosnosti podloží, zesilování stěn, překladů, průvlaků, prvků krovu), komplikovanou realizací rozvodů vzduchotechniky v podkroví a napojení TZB rozvodů na stávající areálové rozvody inženýrských sítí.  

Objednatel se zhotovitelem projednali jednotlivé změny a na každou tuto změnu vyhotovili a odsouhlasili změnový list - jedná se o změnové listy č. ZL05 až ZL37, kterými se upravuje cena díla. Změnový list č. ZL36 prodlužuje termín dokončení díla o 3 měsíce a to do 30.04. 2025.

V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.  

Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

Článek 1.	Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1. smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:

2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p.2458, Kladno“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 024 63 245 (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL37.

2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2 smlouvy, které se nahrazuje novým zněním takto:

3.2. Dílo bude provedeno nejpozději do 30.04. 2025 (17 měsíců od předání staveniště).

3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL05-ZL37. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 
2 402 556,63 Kč bez DPH a ustanovení odst. 6.1 se nahrazuje novým zněním takto:

6.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:
cena bez DPH: 73 241 096,73 Kč (sedmdesát tři milionů dvě stě čtyřicet jeden tisíc devadesát šest korun a sedmdesát tři haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 15 380 630,31 Kč (patnáct milionů tři sta osmdesát tisíc šest set třicet korun a třicet jedna haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 88 621 727,04 Kč (osmdesát osm milionů šest set dvacet jeden tisíc sedm set dvacet sedm korun a čtyři haléře)

4.	V ustanovení odst. 28.7. se nahrazuje bod c) takto:
c) Příloha 3 – Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění) upravený na základě dodatku č.2

5.	V ustanovení odst. 28.7. se doplňuje nový bod e) tohoto znění:
e) Příloha 5 – změnové listy ZL05-ZL37 
6.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

7.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

8.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze						V Praze

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________		___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.		Ing. Jaromír Raclavský
prorektorka pro výstavbu				ředitel společnosti
České vysoké učení technické v Praze		Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“
							na základě plné moci

							___________________________