Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění TDS

Rozsah a obsah činností Příkazníka pro výkon technického dozoru stavebníka akce: „Věznice Oráčov - vrty a úpravna vody - výkon TDS“ 
Příkazník při výkonu TDS provádí pro Příkazce zejména tyto činnosti: 

1)	Seznamuje se s veškerými podklady poskytnutými mu pro plnění jeho povinností Příkazcem, zejména se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem služby, nabídkou poskytovatele služby, podklady pro její zpracování, předává své případné připomínky k nim Příkazci.
2)	Svolává a řídí kontrolní porady s projektantem ve fázi zpracování projektové dokumentace všech stupňů, průběžně posuzuje návrhy této projektové dokumentace a předkládá svá doporučení Příkazci. Zpracovává a distribuuje zápisy z těchto kontrolních porad. Termíny jejich konání budou stanoveny po dohodě se zúčastněnými stranami. 
3)	Kontroluje a odsouhlasuje projektovou dokumentaci všech stupňů zpracovanou projektantem, včetně cenového propočtu a Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v neoceněné i oceněné verzi, kontroluje jejich soulad se všemi výchozími podklady, zejména s/se
a)	smlouvou Příkazce s projektantem,
b)	příslušnými obecně platnými předpisy,
c)	Českými státními normami (ČSN, EN, EN ISO), přičemž pro účely této smlouvy se má za to, že závaznými jsou všechny ČSN, EN, EN ISO, a to i v případě, že jsou částečně či zcela deklarovány jako pouze doporučené, pokud se Příkazník s Příkazcem nedohodnou v konkrétním případě jinak,
d)	technickými/technologickými předpisy výrobců a dodavatelů konkrétních, poskytovatelem služby navržených materiálů, výrobků, systémů apod.,
e)	dobrou stavební praxí.
4)	Spolupracuje s Příkazcem/poskytovatelem služby při zajištění příslušných povolení, zejména společného povolení, souhlasu s provedením stavby na základě jejího ohlášení, a při zajištění souvisejících závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a jiných souhlasů dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob. Účastní se všech místních šetření spojených se stavebním řízením a ohlášením stavby.
5)	Zajišťuje oznámení o zahájení stavebních prací dotčeným orgánům.
6)	Organizuje předání staveniště dodavateli stavby včetně vyhotovení zápisu o předání staveniště, kontroluje fyzické vytýčení stávajících inženýrských sítí dodavatelem stavby. Kontroluje provedení a montáž označení stavby.
7)	Provádí průběžnou kontrolu postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby, kontrolu dodržování podmínek stanovených v PD, společném povolení, závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob. Kontroluje soulad prováděného díla s platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů použitých materiálů, výrobků, systémů a dobrou stavební praxí. 
8)	Provádí kontrolu dodržování časového a finančního harmonogramu stavebních prací. Upozorňuje Příkazce, dodavatele stavby a ostatní zúčastněné strany na případné nedodržení termínů a posuzuje a odsouhlasuje návrhy těchto subjektů k vyrovnání vzniklých skluzů.
9)	Spolupracuje s pracovníky autorského dozoru projektanta a dodavatelem stavby při navrhování případných změn PD a projednává se zúčastněnými stranami případné dodatky smlouvy. Informuje o této činnosti Příkazce.
10)	Účastní se úředních jednání, a zastupuje Příkazce během těchto jednání nebo řízení v rozsahu svého pověření Příkazcem.
11)	Zajišťuje komunikaci a vzájemnou součinnost mezi dodavatelem stavby, Příkazcem, autorským dozorem projektanta.
12)	Zajišťuje a řídí kontrolní prohlídky stavby (kontrolní dny stavby, dále jen "KD") včetně zajištění podpisů přítomných osob, pořizuje a distribuuje zápisy z KD ostatním zúčastněným stranám, provádí do stavebního deníku zápisy za Příkazce, v souladu s příslušnými předpisy a smlouvami provádí kontrolu řádného vedení stavebního deníku dodavatelem stavby a průběžně ukládá jednu kopii stavebního deníku pro potřeby Příkazce. KD se budou povinně konat minimálně 1 x týdně a dále    budou stanoveny po dohodě se zúčastněnými stranami. Každý zápis z KD musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a)	Číslo příslušného zápisu,
b)	Název stavby,
c)	Seznam přítomných osob,
d)	Popis postupu prací provedených od předcházejícího KD, kontrola souladu postupu prací s časovým a finančním harmonogramem a dokumentací pro provedení stavby a identifikace případných odchylek a změn
e)	Výhled předpokládaných prací na dalších 7 dní
f)	Kontrola úkolů z minulých zápisů včetně vyjádření, zda je nebo není příslušný úkol splněn, v případě že úkol není splněn, uvedení důvodů, proč není splněn a uvedení náhradního termínu pro jeho splnění,
g)	Popis skutečností, co bylo na příslušném kontrolním dni projednáno, včetně skutečností, zjištěných při obchůzce stavby,
h)	Soupis nově vzniklých úkolů včetně termínu odstranění případných nedostatků, závad,
i)	Případné vyjádření k nově zjištěným skutečnostem zúčastněných stran včetně vyjádření TDS,
j)	Místo, datum, a hodina příští kontrolní prohlídky.
k)	Přílohy (např. prezenční listina, apod.). U zápisu pod poř. číslem 1 bude přílohou seznam všech osob, zainteresovaných na provádění stavby včetně e-mailových adres, telefonů a název organizace, kterou zastupují. V případě změn, bude tento seznam aktualizován.
l)	Zápis z KD odešle e-mailem, nejpozději do dvou kalendářních dnů všem zúčastněným.

13)	Zajišťuje součinnost se zpracovatelem dokumentace skutečného provedení, provádí kontrolu a evidenci případných změn dokončených částí stavby.
14)	Průběžně provádí přejímání již dokončených částí stavebních prací a provozních souborů, zejména těch, které budou dalšími pracemi zakryty.
15)	Provádí průběžnou fotodokumentaci realizace stavby.
16)	Eviduje závady vzniklé v průběhu realizace stavby a kontroluje jejich odstraňování včetně dohodnutých termínů a jejich zápisů do stavebního deníku.
17)	Provádí kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů (zjišťovacích protokolů) pro financování a faktur, včetně jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Provádí průběžnou evidenci a kontrolu čerpání nákladů stavby a kontrolu souladu fakturace se smlouvou a skutečným provedením stavby. Posuzuje a schvaluje oprávněnost případných více- a méněprací, jejich nároků dle Smlouvy, jejich objemu a požadované ceny. Kontroluje a odsouhlasuje věcnou a cenovou správnost změnových listů zpracovávaných a předkládaných dodavatelem stavby a zajišťuje jejich písemné schválení podpisy příslušných osob (dodavatel stavby, autorský dozor projektanta, TDS, Příkazce). Každý změnový list musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a)	Číslo příslušné změny stavby, včetně uvedení, zdali se jedná o vícepráci či méněpráci (např. VP – vícepráce, MP – méněpráce)
b)	Název stavby,
c)	Název stavebního objektu/provozního souboru, kterého se změna dotýká,
d)	Název objednatele/stavebníka stavby,
e)	Číslo smlouvy, na základě, které se stavba realizuje,
f)	Název dodavatele stavby,
g)	Identifikace zpracovatele PD/autorského dozoru projektanta,
h)	Identifikace TDS,
i)	Technický popis a zdůvodnění změny,
j)	Vyjádření souhlasu s předkládanou změnou oprávněných osob za objednatele, TDS, autorského dozoru a dodavatele stavby,
k)	Identifikace všech příloh náležejících k příslušnému změnovému listu (např. změnový rozpočet pro posouzení finančních nákladů,
l)	Vyjádření časového vlivu na plnění harmonogramu stavby (má/nemá vliv na časové plnění),
m)	Vyjádření finančního vlivu (jedná se o navýšení celkové ceny nebo odpočet z celkové ceny v Kč bez DPH),
n)	Podpisy oprávněných osob.

18)	Upozorňuje Příkazce na uplatnění případných smluvních sankcí vůči poskytovateli služby, připravuje podklady pro uplatnění takových smluvních sankcí.
19)	V průběhu realizace stavby provádí kontrolu těch částí dodávek a prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.
20)	V průběhu realizace stavby provádí kontrolu dodavatele stavby a jeho dodržování: 
a.	smlouvy Příkazce s poskytovatelem služby,
b.	podmínek stanovených pro poskytnutí dotace Příkazci,
c.	příslušných obecně platnými předpisů,
d.	Českých státních norem (ČSN, EN, EN ISO), přičemž pro účely této Smlouvy se má za to, že závaznými jsou všechny ČSN, EN, EN ISO, a to i v případě, že jsou částečně či zcela deklarovány jako pouze doporučené, pokud se Příkazník s Příkazcem nedohodnou v konkrétním případě jinak,
e.	technických/technologických předpisů výrobců a dodavatelů konkrétních, poskytovatelem služby navržených materiálů, výrobků, systémů apod., včetně uložení materiálů a výrobků na stavbě,
f.	dobrou stavební praxí včetně např. technologických přestávek.
21)	Vydává závazná stanoviska jménem Příkazníka, k technickým otázkám týkajících se stavby.
22)	Posuzuje a schvaluje návrhy poskytovatele služby na rozsah a průběh kontrol, revizí, prohlídek (obecně "kontrol") a zkoušek dokončených částí díla a celého díla, zejména individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek, případně tyto návrhy zpracovává sám. Účastní se všech takových kontrol a zkoušek a upozorňuje na veškeré vady, které se při kontrolách a zkouškách projeví.
23)	Provádí kontrolu výsledků provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a dodaných zařízení, včetně dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací a dodávek (certifikátů, atestů, protokolů, revizí apod.), případně se zúčastní na těchto zkouškách.
24)	Pravidelně informuje Příkazce o podstatných záležitostech týkajících se průběhu realizace stavby.
25)	Organizuje a zajišťuje přejímací řízení stavby nebo jejích částí včetně návrhu vhodného termínu a místa, včetně své účasti na tomto přejímacím řízení. Připravuje podklady a vyhotovuje příslušné předávací protokoly včetně soupisů vad a nedodělků. Každý předávací protokol musí obsahovat alespoň tyto údaje:
a)	Název stavby (předmětu plnění),
b)	Identifikace stavebníka a dodavatele stavby,
c)	Místo stavby,
d)	Číslo Smlouvy o dílo, na základě které se stavba provádí,
e)	Dobu plnění dle Smlouvy o dílo,
f)	Skutečné datum zahájení a ukončení předání díla, 
g)	Popis předmětu plnění,
h)	Soupis provedených činností po stavebních objektech/provozních souborech - rozsah předmětu díla, 
i)	Seznam veškerých předávaných dokladů, např. protokolů o revizích a zkouškách, protokolů o zaškolení uživatele, návodů k obsluze a údržbě, technické dokumentace apod.,
j)	Seznam příloh dokumentace skutečného provedení,
k)	Seznam případných předávaných ovládacích prostředků, klíčů apod.
l)	Seznam všech (sub)dodavatelů jednotlivých částí díla s uvedením kontaktů (min. adresa, jméno zástupce, telefon, e-mailová adresa),
m)	Seznam vad anebo nedodělků bránících užívání včetně termínů jejich odstranění,
n)	Seznam vad a nedodělků nebránících užívání včetně termínů jejich odstranění,
o)	Datum a místo sepsání příslušného předávajícího protokolu,
p)	V případě nepřejímky předmětu plnění důvod této nepřejímky.
q)	Podpisy předávajícího a přejímajícího.
26)	Kontroluje úplnost a správnost dokladů, které doloží dodavatel stavby k předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho částí, včetně dokumentace skutečného provedení.
27)	Provádí kontrolu a odsouhlasení soupisů provedených prací a závěrečného vyúčtování předloženého dodavatelem stavby včetně případných více a méně prací.
28)	Provádí kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení v dohodnutých termínech, vyplývajících z protokolů o předání a převzetí díla.
29)	Provádí kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem stavby.
30)	Kontroluje a odsouhlasuje podklady potřebné pro kolaudační řízení a účastní se Závěrečné kontrolní prohlídky.
31)	Předá veškeré podklady zapůjčené Příkazcem a všechny doklady a dokumentaci, kterou sám případně získal v průběhu plnění dle této Smlouvy, včetně např. fotodokumentace stavby, originálů zápisů z kontrolních porad s projektantem a originálů zápisů z KD stavby, včetně originálů prezenčních listin, apod.
32)	Vede evidenci skutečně provedených prací a činností TDS včetně časových a finančních údajů. Vyhotovuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení svých činností k předání stavby a závěrečnému vyhodnocení stavby.