Změnový list č. 1 
v 
ZS Satalice 
- úprava ostění oken tmelením - boční fasáda - 
- propočet nákladů - 
I č. I č. pol. I 	popis 	I m.j. I výměra I J. Cena I Celkem I 
6 Úpravy povrchů 

		- typ 1 : 1810x2050 mm ... celkem 26 ks 				0,00 	
		- typ 5 : 	900x1500 mm ... celkem 6 ks 					
9 Ostatní konstrukce a práce 

		- krček 		0,000 		0,00 	
6 949000001 	Ochrana stávajících konstrukcí + úklid 	kpl 	1,000 	5000,00 	5000,00 	
7 999000001 	Přesun hmot 	% 	3,000 	1 098,00 	3294,00 	
XVRN 
     8 X	 VRN 	   %          	2,0001 1 103,001 	2206,001 
	(úprava ostění oken - boční fasáda -tmelení celkem bez DPH : 	I 49271,00 Kč 
poznámky:
: platí pouze pro okna v fasádě s omítkou, spáry oken v obkladových páskách budou pouze přetmeleny 
- typ 1 : 1810x2050 mm ... celkem 26 ks 
2) okna ve fasádě s obkladovými pásky 
Strana 1 z 2 

- typ 1 : 1770x2100 mm 000 celkem 11 ks 
- zpracováno v CÚ RTS II./2016 

Strana 2 z 2