DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění
(dále jen „smlouva“)

Název stavby: 	ČVUT FBMI – Rekonstrukce objektu č.p. 2458, Kladno
Číslo smlouvy objednatele:	1724000078
Číslo smlouvy zhotovitele: 	149900/24

1.	SMLUVNÍ STRANY

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Sídlo:	Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Zastoupená:	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan
IČO: 	68407700
DIČ:  	CZ68407700
Bankovní spojení: 	xxx
č. ú.: 	xxx
(dále v textu jen „objednatel“)

a

Společnost „ESB/EUROGAS – ČVUT FBMI – Reko objektu“ 
se sídlem společnosti a adresou pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 

Správce Společnosti:	Energie – stavební a báňská a.s. 
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399 
Sídlo:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
IČO: 	45146802 
DIČ:	CZ45146802 
zastoupená: 	Ing. Oldřich Vytiska, předseda představenstva 
Peněžní ústav: 	xxx
Číslo účtu:	xxx

Společník 2 Společnosti:	EUROGAS a.s. 
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593 
Sídlo:	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
IČO:	61859974 
DIČ:	CZ61859974 
Peněžní ústav:	xxx 
Číslo účtu:	xxx

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:
- technických:	xxx, výkonný ředitel – EUROGAS, a.s.
	mob.: xxx, e-mail: xxx 
- realizačních:		xxx, stavbyvedoucí
	mob.: xxx, e-mail: xxx
(dále v textu jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna nutnost provedení / neprovedení některých prací obsažených / neobsažených v projektové dokumentaci a výkazu výměr, spočívající v neprovedení mechanicky ovládaných vnitřních okenních rolet, závěsných desek pod umyvadla a v provedení maleb stropů v RAL 7033, OK pro požární VZT, dlaždice před vstupem, kanalizačního poklopu v asfaltu, revizních dvířek v SDK, štěrkové ploše u popelnic, obrubníku + doplnění asfaltu.  
Objednatel se zhotovitelem proto projednali pro jednotlivé změny změnové listy č. ZL1 – ZL9, kterými se upravuje cena díla a rovněž termín dokončení díla.	
Na základě těchto skutečností se proto smluvní strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo takto:

I.

1)	Smluvní strany berou na vědomí změnu v zastoupení na straně zhotovitele, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

2)	V článku 2.  PŘEDMĚT DÍLA –
bod 4 – na konec textu bodu se připojuje další úprava takto:
    „	Součástí předmětu plnění jsou také práce a dodávky, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl (tzv. vícepráce), spočívající v neprovedení mechanicky ovládaných vnitřních okenních rolet, závěsných desek pod umyvadla a v provedení maleb stropů v RAL 7033, OK pro požární VZT, dlaždice před vstupem, kanalizačního poklopu v asfaltu, revizních dvířek v SDK, štěrkové ploše u popelnic, obrubníku + doplnění asfaltu, a jejichž rozsah je dokumentován v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu k Dodatku č. 1 ke smlouvě.   “

3)	V článku 3.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ –
bod 1 – třetí řádek bodu se mění takto:
     „	Zhotovitel dokončí a předá celé dokončené dílo objednateli nejpozději do 	 31.05.2025 “

4)	V článku  4.  CENA -
	bod 1 – text bodu se upravuje takto:
 „ 1.	Celková cena za zhotovení díla, obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných na řádné splnění zakázky, je sjednána pro rozsah díla uvedený v článku 2. jako cena nejvýše přípustná, pokrývá veškeré náklady a odměny zhotovitele nutné na úplné a řádné splnění díla a činí (bez DPH):
625 563,02 Kč
slovy: (šest set dvacet pět tisíc pět set šedesát tři korun a dva haléře české)
Rekapitulace ceny bez DPH:
Cena za dílo dle základní smlouvy ………………………………………………......	  547 282,00 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1………………………………………………...............	  78 281,02 Kč
Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1 celkem (bez DPH) ……………………	 625 563,02 Kč	“

II.

1)	Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2)	Pokud tento dodatek není uzavřen elektronicky, je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno..
3)	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Příloha:  Změnové listy ZL č. 1 až ZL č. 9
	V Kladně dne: 6. 5. 2025	V Praze dne: 5. 5. 2025
	
	Za objednatele: 	Za zhotovitele:

	.........................................................	.........................................................
	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA	Ing. Oldřich  Vytiska	
	děkan	předseda představenstva
	Fakulta biomedicínského inženýrství	Energie – stavební a báňská a.s.
		Správce Společnosti „ESB/EUROGAS
		– ČVUT FBMI – Reko objektu“