DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„ČVUT SÚZ – Rekonstrukce bloku 12 Areálu Strahov“
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Objednatel:	České vysoké učení technické v Praze	
sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6	
Osoba oprávněná jednat za objednatele	prof. Ing. Alena Kohoutková, Ph.D., prorektorka pro výstavbu	
IČO:	68407700	
DIČ:	CZ68407700	
ID datové schránky:	p83j9ee	
dále jen „objednatel,“ na straně jedné
a
Zhotovitel:	Rekomont, a.s.	
sídlo:	Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín	
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Vladko Domažlický, předseda představenstva a.s.	
IČO:	00499838	
DIČ:	CZ00499838	
zápis v OR:	Vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 74	
ID datové schránky:	axjfzsk	
telefon:	xxxxxx	
e-mail:	rekomont@rekomont.cz 	
bankovní spojení a číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxx 	
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé, 
společně dále v textu „smluvní strany“

1.	Smluvní strany:
a)	s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokládatelné okolnosti spočívající zejména ve zjištění vadného stavu konstrukcí stavby po jejich odkrytí a
b)	požadavků objednatele na dílčí změny díla oproti jeho vymezení ve smlouvě
se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě spočívající v provedení dodatečných stavebních prací. Smluvní strany prohlašují, že jim je známo, že provedení dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.	Smluvní strany se konkrétně dohodly z hlediska věcného rozsahu na rozsahu změn vymezených změnovými listy č. 1 až 3, 4a, 4b a 5; Změnové listy, které jsou připojeny jako příloha dodatku č. 1. tvoří jeho nedílnou součást.

3.	Dále se smluvní strany dohodly, že dosavadní znění článku 3.1. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

3.1.Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:
Cena bez DPH:		42 165 751,43 Kč		 
(slovy: čtyřicetdvamilionůjednostošedesátpěttisícsedmsetpadesátjedna koruna česká a čtyřicettři haléře)
DPH (21 %): 		  8 854 807,80 Kč		 
(slovy: osmmilionůosmsetpadesátčtyřitisícosmsetsedm korun českých a osmdesát haléřů)
Cena díla (včetně DPH):	51 020 559,23 Kč		 
(slovy: padesátjednamilionůdvacettisícpětsetpadesátdevět korun českých a dvacettři haléře)
4.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5.	Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

6.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

7.	Svým zaručeným elektronickým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně jejích příloh, nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle        

Přílohy dodatku č. 1:
•	příloha č. 1 rekapitulace změnových listů
•	příloha č. 2 změnový list č. 1
•	příloha č. 3 změnový list č. 2
•	příloha č. 4 změnový list č. 3
•	příloha č. 5 změnový list č. 4a
•	příloha č. 6 změnový list č. 4b
•	příloha č. 7 změnový list č. 5	

Za objednatele		    Za zhotovitele	

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.				   Vladko Domažlický
     prorektorka za výstavbu					předseda představenstva