DODATEK Č.1 KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 26. 9. 2024
číslo smlouvy kupujícího: 1724000096

na dodávku interiérového vybavení uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
se sídlem:	nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
IČ	68407700
DIČ	CZ68407700
Bankovní spojení:	xxx
Zastoupený:	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA (dále jen kupující)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo
Sídlo:	Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ:	00030520
zastoupený:	Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	xxx
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431
(dále jen prodávající)

Čl. I. PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2024 kupní smlouvu na dodávku interiérového vybavení rekonstruovaného objektu starých a již nevyužívaných kasáren, který je adaptován na novou budovu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na adrese ul. Sportovců 2458, 272 01 Kladno, podle projektu zpracované Atelier s.r.o., IČ 26418223 v 5/2022.
V souladu  s  článkem  II.,  odst.  (4)  Smlouvy  dne  17.  3.  2025  vyzval  kupující prodávajícího k dodávce a montáži mobiliáře ve lhůtě do 8 týdnů.
Kupující žádá o prodloužení termínu dodávky, montáže nábytku a jeho předání do 13.
6. 2025. Důvodem pro prodloužení termínu dodávky, montáže nábytku a jeho předání jsou dokončovací stavební práce a běžící kolaudační řízení objektu na adrese ul. Sportovců 2458, 272 01 Kladno.

Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., odst. (3) výše uvedené kupní smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v článku II., odst. (4) Smlouvy takto:

Dodávka a montáž nábytku bude provedena nejpozději do 13. 6. 2025.

Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 26. 9. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne:	V Kladně dne:
Za prodávajícího:	Za kupujícího:

Ing. Jiří

Digitálně podepsal Ing. Jiří Řídký

Lubom

Digitálně podepsal Lubomír Šmíd

Digitálně podepsal(a) Jozef Rosina

Řídký

Datum:
2025.05.16
06:04:15 +02'00'

Datum:

ír Šmíd

2025.05.16
06:04:35 +02'00'

Datum: 16.05.2025
14:39:58

………………………..………………	…………………………………
Ing.Jiří Řídký	Lubomír Šmíd
předseda	místopředseda
představenstva	představenstva